Утверждены

	Постановлением Госстроя СССР

	от 28 июня 1985 г. N 103

	СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА
	ПОЛОЖЕНИЕ О ГЛАВНОМ ИНЖЕНЕРЕ (ГЛАВНОМ
	АРХИТЕКТОРЕ) ПРОЕКТА
	СНиП 1.06.04-85

	Срок введения в действие

	15 июля 1985 года

	Разработаны ЦНИИпроектом Госстроя СССР (канд. экон. наук М.С. Подольский;
	А.В. Литвинов, С.А. Барченков).

	Внесены и подготовлены к утверждению Главоргпроектом (В.Г. Коршунов, А.Д.
	Мирошников, В.М. Луценко), Главстройпроектом Госстроя СССР (С.Е. Потехин) и
	Госгражданстроем (В.В. Милашевский).

	С введением в действие СНиП 1.06.04-85 утрачивает силу "Положение о главном
	инженере (главном архитекторе) проекта", утвержденное постановлением Госстроя
	СССР от 31 декабря 1969 г. N 150.

	При пользовании нормативным документом следует учитывать утвержденные
	изменения строительных норм и правил и государственных стандартов, публикуемые в
	журнале "Бюллетень строительной техники" и информационном указателе
	"Государственные стандарты".

	1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

	1.1. Настоящее Положение определяет обязанности, права и ответственность
	главного инженера (главного архитектора) проекта строительства новых, расширения,
	реконструкции и технического перевооружения действующих предприятий, зданий и
	сооружений отраслей народного хозяйства и отраслей промышленности, планировки и
	застройки городов, поселков городского типа и сельских населенных пунктов (в

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	дальнейшем - строительство объектов).

	1.2. Министерства и ведомства вправе, руководствуясь действующем
	законодательством, возлагать дополнительные к настоящему Положению обязанности
	на главного инженера (главного архитектора) проекта с учетом особенностей
	проектирования и строительства объектов различных отраслей народного хозяйства и
	отраслей промышленности.

	1.3. Главный инженер (главный архитектор) проекта назначается для организации
	разработки проектно-сметной документации и технического руководства проектно-
	изыскательскими работами на протяжении всего периода проектирования,
	строительства, ввода в действие объекта и освоения проектных мощностей.

	При проектировании объектов промышленности, транспорта, энергетики, связи,
	сельскохозяйственного и водохозяйственного строительства назначается главный
	инженер проекта, а объектов гражданского строительства, планировки и застройки
	городов, поселков городского типа и сельских населенных пунктов - главный
	архитектор проекта.

	При проектировании крупных и сложных объектов или объектов, имеющих
	большое значение для архитектурного облика города, предприятий и сооружений,
	допускается назначение главного инженера проекта и главного архитектора проекта.
	При этом ведущая роль возлагается на одного из них.

	Главный инженер (главный архитектор) проекта назначается из числа наиболее
	квалифицированных специалистов по крупным и сложным объектам министерствами
	и ведомствами, по другим объектам - руководителями проектных организаций.

	Генеральная проектная организация назначает главного инженера (главного
	архитектора) проекта по всему комплексу предприятия, здания и сооружения,
	планировки и застройки городов, поселков городского типа и сельских населенных
	пунктов, субподрядная проектная организация - по комплексу работ, выполняемых
	этой организацией.

	Руководителями организаций - генеральным проектировщикам разрешается
	вводить в штаты в случае необходимости при проектировании важнейших объектов
	должность заместителя главного инженера проекта.

	1.4. Главный инженер (главный архитектор) проекта в своей деятельности
	руководствуется: действующим законодательством; схемами развития и размещения
	отраслей народного хозяйства и отраслей промышленности; схемами развития и
	размещения производительных сил по экономическим районам и союзным
	республикам; схемами и проектами районной планировки; проектами планировки и
	застройки городов, поселков городского типа и сельских населенных пунктов; схемами
	генеральных планов промышленных узлов; стандартами; документами по основным
	направлениям в проектировании объектов соответствующих отраслей; каталогами
	типовой проектной документации; строительными нормами и правилами; связанными
	с проектированием, инженерными изысканиями и строительством нормативными

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	документами органов государственного надзора и общесоюзными нормативными
	документами отдельных министерств и ведомств СССР и общественных организаций
	и другими указаниями министерств, ведомств и советов министров союзных
	республик.

	2. ГЛАВНЫЕ ЗАДАЧИ И ОБЯЗАННОСТИ ГЛАВНОГО ИНЖЕНЕРА (ГЛАВНОГО
	АРХИТЕКТОРА) ПРОЕКТА

	2.1. Главными задачами главного инженера (главного архитектора) проекта
	являются обеспечение высокого технико-экономического уровня проектируемых
	объектов и качества проектно-сметной документации в соответствии с "Положением
	об оценке качества проектно-сметной документации для строительства", повышение
	производительности труда и сокращение расхода материальных ресурсов при их
	строительстве и эксплуатации, снижении доли строительно-монтажных работ и
	стоимости объектов, улучшение качества градостроительных и архитектурно-
	планировочных решений.

	2.2. В соответствии с главными задачами на главного инженера (главного
	архитектора) проекта возлагаются обязанности:

	2.2.1. Участие в работе комиссии по выбору площадки (трассы) для строительства,
	в подготовке задания на проектирование и в организации инженерных обследований
	для разработки проектно-сметной документации на реконструкцию и техническое
	перевооружение действующих предприятий, зданий и сооружений.

	2.2.2. Участие в составлении комплексных планов-графиков выполнения научно-
	исследовательских, конструкторских и проектных работ для объектов, на которых будут
	применяться новые технологические процессы и оборудование с длительным циклом
	разработки, конструирования и изготовления.

	2.2.3. Подготовка данных для заключения договора с заказчиком на выполнение
	проектно-изыскательских работ, в том числе о стоимости проектирования и изысканий
	и распределении ее между организациями и подразделениями - участниками
	разработки проекта, и составление графика разработки проектно-сметной
	документации.

	2.2.4. Обеспечение формирования состава разработчиков проекта, разделение
	между ними заданий по разделам и частям проекта и объемов работ с
	соответствующим фондом заработной платы.

	2.2.5. Контроль технического и экономического уровня принимаемых проектных
	решений и сроков разработки проектно-сметной документации.

	2.2.6. Подготовка заданий субподрядным проектным и изыскательским
	организациям на выполнение поручаемых им работ и обеспечение этих организаций

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	необходимыми исходными данными для проектирования; своевременное решение всех
	вопросов, возникающих у субподрядных организаций в процессе разработки проектно-
	сметной документации.

	2.2.7. Выбор типовых и повторно используемых экономичных индивидуальных
	проектов, унифицированных объемно-планировочных, конструктивных и
	технологических решений, узлов, конструкций и изделий с целью широкого
	применения их при проектировании, не допуская необоснованной разработки
	индивидуальных проектов и проектных решений.

	2.2.8. Координация проектно-изыскательских работ по всему комплексу проекта,
	обеспечение выдачи заказчику комплектной документации в сроки, предусмотренные
	графиком к договору на выполнение этих работ, и систематический контроль за
	правильным расходованием средств на проектно- изыскательские работы.

	2.2.9. Своевременное решение вопросов, связанных с проектированием и
	возникающих в процессе строительства, ввода в действие объекта и освоения
	проектных мощностей.

	2.2.10. Обеспечение разработки необходимых вариантов для выявления наиболее
	целесообразных и экономичных проектных решений.

	2.2.11. Обеспечение соответствия проектов заданию на проектирование и
	рабочей документации - утвержденному проекту.

	2.2.12. Организация работы по проверке на патентную чистоту впервые
	примененных или разработанных в проекте технологических процессов, оборудования,
	приборов, конструкций, материалов и изделий.

	2.2.13. Сокращение объемов проектно-сметной и другой технической
	документации.

	2.2.14. Согласование документации, выполненной с обоснованными
	отступлениями от действующих норм, правил и инструкций, в части этих отступлений
	с органами государственного надзора и заинтересованными организациями,
	утвердившими их.

	2.2.15. Подтверждение в материалах проекта соответствующей записью, что
	проектно-сметная документация на строительство предприятий, зданий и сооружений
	разработана в соответствии с нормами, правилами, инструкциями и государственными
	стандартами.

	2.2.16. Участие в рассмотрении и согласовании генеральной подрядной
	строительной организацией проектно-сметной документации согласно порядку,
	установленному Госстроем СССР.

	2.2.17. Защита проекта в вышестоящих организациях и органах экспертизы.

	2.2.18. Осуществление авторского надзора за строительством.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	2.2.19. Подготовка предложений руководству проектной организации и заказчику
	проектно-сметной документации о внесении в рабочую документацию изменений,
	связанных с введением в действие новых нормативных документов, с учетом
	фактического состояния строительства.

	3. ПРАВА ГЛАВНОГО ИНЖЕНЕРА (ГЛАВНОГО АРХИТЕКТОРА) ПРОЕКТА

	3.1. Главный инженер (главный архитектор) проекта имеет право:

	3.1.1. Представлять проектную организацию в учреждениях, организациях и на
	предприятиях по вопросам разработки, согласования и рассмотрения проектно-
	сметной документации, осуществления строительства по утвержденному проекту и
	вести переписку по этим вопросам в установленном проектной организацией порядке.

	3.1.2. Принимать решения по техническим вопросам в процессе проектирования,
	строительства, ввода в действие объекта и освоения проектных мощностей.

	3.1.3. Приостанавливать производство отдельных видов строительно- монтажных
	работ при осуществлении их с отступлениями от проекта, при нарушении технических
	условий и правил производства этих работ, а также неудовлетворительном их качестве.

	3.1.4. Устанавливать по согласованию с подрядными строительно-монтажными
	организациями сокращенный объем рабочей документации.

	3.1.5. Проверять состояние разработки проекта, правильность расходования
	средств на проектно-изыскательские работы, соблюдение установленных сроков
	проектирования и качество проектных решений в процессе разработки проектно-
	сметной документации.

	3.1.6. Вносить руководству проектной организации предложения о разработке
	новых и корректировке действующих нормативных документов по проектированию,
	строительству и эксплуатации объектов.

	3.1.7. Принимать решения об использовании резерва годового объема работ по
	конкретным проектам.

	3.1.8. Представлять руководству проектной организации предложения о
	поощрении работников, отличившихся при разработке проекта, принимать участие в
	распределении премий между организациями и подразделениями-исполнителями, а
	также вносить предложения о наложении взысканий на виновных в несвоевременной
	и некачественной разработке проектно-сметной документации.

	4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ГЛАВНОГО ИНЖЕНЕРА (ГЛАВНОГО АРХИТЕКТОРА)
	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	ПРОЕКТА

	4.1. Главный инженер (главный архитектор) проекта несет установленную
	законом ответственность за технико-экономический уровень и архитектурные решения
	строящихся объектов, за качество, своевременную разработку и комплектность
	проектно-сметной документации, правильное определение сметной стоимости и
	очередности строительства, за достижение предприятиями проектных показателей в
	установленные сроки, а также за выполнение всех обязанностей, возложенных на него
	настоящим Положением.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.