МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ
	ФЕДЕРАЦИИ
	ПИСЬМО от 25 января 1996 г. N 12-29
	ОБ ОПЛАТЕ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕ СВАЙНЫХ РАБОТ

	При расчетах с подрядчиком, исходя из проектных данных (т.е. без учета отказа и
	обрубки свай), заказчик вправе потребовать от подрядчика передать ему обрубленные
	части свай, т.к. он оплачивает полностью за всю длину свай, предусмотренную
	проектным решением.

	При расчетах с заказчиком за фактически произведенные объемы работ, т.е. без
	учета обрубленной части свай, подрядчик должен сам использовать оставшиеся
	обрубки свай на каких-то других работах или реализовать их на сторону с тем, чтобы не
	иметь убытков в своей деятельности.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.