Document comments: Gnostice eDocEngine V2.5.1 (www.gnostice.com)

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО ДЕЛАМ СТРОИТЕЛЬСТВА
	ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 30 декабря 1985 г. N 273
	ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МЕТОДИЧЕСКИХ УКАЗАНИЙ О ПОРЯДКЕ
	ВЫДЕЛЕНИЯ В СОСТАВЕ СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ НА
	СТРОИТЕЛЬСТВО ПРЕДПРИЯТИЙ, ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ
	НОРМАТИВНОЙ ТРУДОЕМКОСТИ И ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ РАБОЧИХ,
	ЗАНЯТЫХ НА СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТАХ

	Во исполнение Постановления Совета Министров СССР от 28 января 1985 г. N 96 "О
	дальнейшем совершенствовании проектно-сметного дела и повышения роли экспертизы и
	авторского надзора в 	строительстве"	 Государственный комитет СССР по делам строительства
	постановляет:

	1. Утвердить и ввести в действие с 1 января 1986 г. разработанные с участием НИИЭС и
	ВНИПИтруда в 	строительстве	 Госстроя СССР, а также заинтересованных министерств и ведомств
	СССР и представленные отделом сметных норм и ценообразования в строительстве совместно с
	отделом организации и нормирования труда и отделом организации и технологии строительного
	производства Госстроя СССР прилагаемые Методические указания о порядке выделения в составе
	сметной документации на строительство предприятий, 	зданий	 и сооружений нормативной
	трудоемкости и заработной платы рабочих, занятых на строительно-монтажных работах.

	2. Установить, что утвержденная до 1 января 1986 г. сметная документация уточнению в связи с
	утверждением Методических указаний, предусмотренных пунктом 1 настоящего Постановления, не
	подлежит.

	Председатель Госстроя СССР

	С.БАШИЛОВ

	Утверждены

	Постановлением Госстроя СССР

	от 30 декабря 1985 г. N 273

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ О ПОРЯДКЕ ВЫДЕЛЕНИЯ В СОСТАВЕ СМЕТНОЙ
	ДОКУМЕНТАЦИИ НА СТРОИТЕЛЬСТВО ПРЕДПРИЯТИЙ, ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ
	НОРМАТИВНОЙ ТРУДОЕМКОСТИ И ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ РАБОЧИХ, ЗАНЯТЫХ НА
	СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТАХ

	Настоящие Методические указания разработаны во исполнение и в соответствии с
	Постановлениями Совета Министров СССР от 28 января 1985 г. N 96 "О дальнейшем
	совершенствовании проектно-сметного дела и повышении роли экспертизы и авторского надзора в
	строительстве" и Совета Министров СССР и ВЦСПС от 24 января 1985 г. N 87 "О
	совершенствовании организации системы оплаты и стимулирования труда в строительстве".

	Методические указания содержат положения, которыми следует руководствоваться при
	составлении сметной документации на строительство предприятий, 	зданий	 и сооружений для
	выделения в ней:

	показателя нормативной трудоемкости строительно-монтажных работ (затрат труда рабочих,
	занятых на строительных и монтажных работах) <*>;

	------------------------------------

	<*> Нормативная трудоемкость строительно-монтажных работ (затраты труда рабочих, занятых
	на строительных и монтажных работах) в дальнейшем именуется "нормативная трудоемкость" или
	"затраты труда рабочих".

	сметной заработной платы рабочих, занятых на строительных и монтажных работах <*>.

	------------------------------------

	<*> Сметная заработная плата рабочих, занятых на строительных и монтажных работах, в
	дальнейшем именуется "сметная заработная плата".

	1. Общие положения

	1.1. Нормативная трудоемкость и сметная заработная плата выделяются в локальных и
	объектных сметных расчетах и сметах, составляемых при разработке проектов, рабочих проектов и
	рабочей документации.

	1.2. Нормативная трудоемкость, выделяемая в локальных и объектных сметах и сметных
	расчетах, отражает количество труда рабочих (в чел.-ч), которое по сметным нормам должно
	затрачиваться на выполнение соответствующих строительных и монтажных работ, и определяется по
	формуле:

	                 Т = Т   + Т   + Т   + Т   + Т ,               (1)

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	                      пр    нр    вр    зу    п

	    где:

	    Т - нормативная трудоемкость, выделяемая в объектной смете или

	сметном расчете;

	    Т   -  нормативная  трудоемкость  работ,  предусматриваемых  в

	     пр

	прямых затратах;

	    Т   -  нормативная  трудоемкость  работ,  учтенных  накладными

	     нр

	расходами;

	    Т   - нормативная трудоемкость работ по  возведению  титульных

	     вр

	временных зданий и 	сооружений;

	    Т   - нормативная трудоемкость, учтенная в зимних удорожаниях;

	     зу

	    Т  - нормативная трудоемкость, учтенная в  других  начислениях

	     п

	на строительные и монтажные работы, включаемых в объектную смету.

	    Нормативная  трудоемкость  работ,  предусматриваемых  в прямых

	затратах  локальных  смет  или  сметных  расчетов, определяется по

	формуле:

	                          Т   = Т  + Т ,                       (2)

	                           пр    р    м

	    где:

	    Т  - затраты  труда   рабочих,   непосредственно   выполняющих

	     р

	строительные и монтажные работы, т.е. не  занятых  управлением   и

	обслуживанием машин;

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	    Т  - затраты  труда   рабочих,   занятых   на   управлении   и

	     м

	обслуживании машин.

	Общая формула (2) трансформируется в развернутые формулы, приведенные далее и зависящие
	от методов счета затрат труда рабочих.

	Нормативная трудоемкость в прямых затратах выделяется:

	1) прямым счетом, исходя из затрат труда, приведенных в сметных нормативах в чел.-ч, - в
	составе локальных смет;

	2) расчетно, исходя из размера заработной платы, - в сметных расчетах.

	1.3. Сметная заработная плата (в рублях) выделяется в локальных и объектных сметах и сметных
	расчетах по формуле:

	             З = З    + З  + З   + З   + З   + З ,             (3)

	                  осн    м    нр    вр    зу    п

	    где:

	    З - сметная заработная плата;

	    З    -  основная    заработная    плата    рабочих,    занятых

	     осн

	непосредственно на строительных и монтажных работах;

	    З  - заработная   плата  рабочих,  занятых  на  управлении   и

	     м

	обслуживании машин;

	    З   - заработная плата рабочих, учтенная в  сметных  накладных

	     нр

	расходах;

	    З   - заработная   плата   рабочих,   учтенная   в   стоимости

	     вр

	возведения титульных временных зданий и 	сооружений;

	    З   - заработная плата  рабочих,  учтенная  в  составе  зимних

	     зу

	удержаний;

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	    З  - заработная  плата  рабочих,  учтенная  в  составе  других

	     п

	начислений на строительные и монтажные работы объектной сметы.

	2. Выделение нормативной трудоемкости в локальных сметах путем прямого счета исходя из
	затрат труда, приведенных в сметных нормативах

	2.1. При прямом счете нормативная трудоемкость определяется по формулам:

	                          Т = Т   + Т  ;                       (4)

	                               пр    нр

	                      Т   = SUM V x (t  + t ),                 (5)

	                       пр             р    м

	    где:

	    Т - нормативная трудоемкость, определяемая в локальной смете;

	    Т   - нормативная  трудоемкость  работ,  предусматриваемых   в

	     пр

	прямых затратах;

	    Т   - нормативная  трудоемкость  работ,  учтенных   накладными

	     нр

	расходами;

	    t  - затраты труда рабочих, не  занятых  обслуживанием  машин,

	     р

	принимаемые по сметным нормативам (ЕРЕР, ЕРКС, РМО, УСН, УР, УПСС,

	ПРЗС и др.), из графы "Затраты труда рабочих" (чел.-ч);

	    V - объемы   работ   по   соответствующему   виду   работ   (в

	установленных единицах);

	    t  - затраты   труда   рабочих,   обслуживающих   машины    по

	     м

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	соответствующему виду работ, определяемые в чел.-ч по формуле:

	                         t  = к x з ,                          (6)

	                          м        м

	    где:

	    з  -  заработная   плата   рабочих,   обслуживающих    машины,

	     м

	принимаемая  по  сметному  нормативу,  из  графы   "в   том  числе

	заработная плата рабочих, обслуживающих машины";

	    к - коэффициент перехода от заработной платы рабочих, учтенной

	в затратах  на  эксплуатацию  строительных  машин  (в  рублях),  к

	затратам труда этих рабочих (в чел.-ч).

	    Принимается в размерах:

	    для  всех  строительно-монтажных  работ (кроме земляных работ,

	выполняемых с применением строительных машин) - 1,29;

	    для  земляных  работ,  выполняемых  с применением строительных

	машин, - 1,44.

	    2.2. Определение  затрат  труда  рабочих  производится  прямым

	счетом построчно в локальных сметах. В отдельных графах  локальных

	смет приводятся затраты труда на  единицу  измерения  и  общие  по

	данной  строке  сметы   как   результат   перемножения   единичной

	трудоемкости на количество единиц измерения.  При  этом  единичная

	трудоемкость в локальной смете приводится раздельно: по не занятым

	обслуживанием  машин  рабочим  (t ),   принимаемая   по   сметному

	                                 р

	нормативу  (из  графы  "Затраты  труда  рабочих");   по   рабочим,

	обслуживающим машины (t ), определяемая по формуле (6)  на  основе

	                       м

	данных  из  графы  "в  том   числе   заработная   плата   рабочих,

	обслуживающих машины", принимаемых из того же сметного норматива.

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	    В тех случаях, когда в составе сметного норматива (например, в

	ранее выпущенном укрупненном сметном нормативе) отсутствуют данные

	в графе "Затраты труда рабочих", эти данные (t )  определяются  по

	                                              р

	формуле:

	                         t  = к x з   ,                        (7)

	                          р        осн

	    где:

	    t  - затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин;

	     р

	    з    - основная  заработная  плата  рабочих,  принимаемая   из

	     осн

	сметного норматива;

	    к - коэффициент перехода от основной заработной платы  рабочих

	(в рублях)  к  затратам  труда  рабочих  (в чел.-ч),   принимаемый

	согласно Приложению 1 к настоящим Указаниям.

	2.3. Определенные по каждой строке локальной сметы затраты труда рабочих суммируются в
	той же итоговой строке сметы, где приводится итог прямых затрат, а также по промежуточным
	итогам к разделам сметы.

	В процессе применения локальной сметы, т.е. при возможном разделении объемов между
	различными исполнителями работ (генподрядчиком и субподрядчиками) для определения
	нормативной трудоемкости, приходящейся на каждого исполнителя, соответствующие строки сметы
	суммируются.

	2.4. При определении нормативной трудоемкости прямым счетом в локальной смете должны
	применяться в необходимых случаях различные коэффициенты, приведенные в технических частях
	соответствующих сборников сметных нормативов, а также в Указаниях по применению ЕРЕР-84,
	ЕРКС-84 и Указаниях по применению расценок на монтаж оборудования (УРМО-84). При этом не
	должны приниматься районные коэффициенты к заработной плате работников строительных
	организаций и коэффициенты, учитывающие надбавки к заработной плате, устанавливаемые
	директивными органами по отдельным регионам (см. УЕРЕР-84, п. п. 2.11, 2.12, приложение 8;
	УРМО-84, п. 2.6), косвенные расходы (см. УРМО-84, п. 2.7) и другие тому подобные коэффициенты
	и поправки.

	2.5. К работам, учтенным в составе накладных расходов и выполняемых рабочими, относятся
	возведение временных (нетитульных) зданий и сооружений, благоустройство и содержание
	строительных площадок, подготовка объектов к сдаче и другие. Нормативная трудоемкость работ,

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	выполняемых за счет накладных расходов, определяется по формуле:

	                      Т   = 0,092 x М  ,                       (8)

	                       нр            нр

	    где:

	    М   - масса  накладных   расходов,   принимаемая   из   строки

	     нр

	"Накладные расходы" локальной сметы (руб.);

	    0,092 - коэффициент перехода от массы  накладных  расходов  (в

	рублях) к затратам труда (в чел.-ч), определяемый по формуле:

	                       Д

	                        нр   0,051

	                   К = --- = ----- = 0,092,                    (9)

	                       С     0,59

	                        р

	    где:

	    Д   - доля  основной  заработной  платы  рабочих,  занятых  на

	     нр

	строительно-монтажных работах, учтенная в накладных  расходах  (по

	отчетным данным составляет 5,4%);

	    С  - средняя (в  целом  по  отрасли  "Строительство")  часовая

	     р

	тарифная ставка рабочих среднего разряда, занятых на  строительных

	и монтажных работах, выполняемых за счет  накладных  расходов  (по

	отчетным данным составляет 0,59 руб./ч).

	2.6. Нормативная трудоемкость работ, учтенных накладными расходами, включается в
	локальную смету отдельной строкой (вслед за суммой накладных расходов и суммой НУЧП в составе
	накладных расходов) и показывается в отдельной графе "Затраты труда рабочих".

	В составе плановых накоплений нормативная трудоемкость не выделяется.

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	2.7. Примеры расчета нормативной трудоемкости в локальных сметах по данному методу счета
	приведены в приложении 2 <*> к настоящим Указаниям.

	------------------------------------

	<*> Приложения 2 и 3 не приводятся.

	3. Выделение затрат труда рабочих в локальных сметных расчетах путем исчисления от
	размера заработной платы

	3.1. Нормативная трудоемкость по данному методу определяется по формулам:

	                          Т = Т   + Т  ;                       (4)

	                               пр    нр

	                          Т   = Т  + Т ,                       (2)

	                           пр    р    м

	    где:

	    Т - нормативная трудоемкость, выделяемая в  локальном  сметном

	расчете;

	    Т   -  нормативная  трудоемкость  работ,  предусматриваемых  в

	     пр

	прямых затратах;

	    Т   -  нормативная  трудоемкость  работ,  учтенных  накладными

	     нр

	расходами, определяемая по формуле (8);

	    Т  - затраты труда рабочих, не  занятых  обслуживанием  машин,

	     м

	определяемые по формуле:

	                        Т  = к x З   ,                        (10)

	                         м        осн

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	    где:

	    З    - основная  заработная  плата рабочих,   принимаемая   из

	     осн

	локального сметного расчета;

	    к - коэффициент перехода от основной заработной платы (в руб.)

	к затратам труда (в чел.-ч), принимаемый согласно Приложению  1  к

	настоящим Указаниям;

	    Т  - затраты труда рабочих, обслуживающих машины, определяемые

	     м

	по формуле:

	            Т  = Т   + Т   = 1,44 x З   + 1,29 x З  ,         (11)

	             м    м1    м2           м1           м2

	    где:

	    Т   - затраты  труда   рабочих,   обслуживающих   машины   при

	     м1

	выполнении земляных работ;

	    Т   - затраты  труда   рабочих,   обслуживающих   машины   при

	     м2

	выполнении всех других работ;

	    З   - заработная  плата  рабочих,  обслуживающих  машины   при

	     м1

	выполнении земляных работ;

	    З   - заработная  плата  рабочих,  обслуживающих  машины   при

	     м2

	выполнении всех других работ;

	1,44 и 1,29 - коэффициенты перехода от заработной платы рабочих, обслуживающих машины (в
	руб.), к затратам труда механизаторов соответственно на земляных и всех других работах (в чел.-ч).

	3.2. Определение затрат труда рабочих производится по формулам (2), (10) и (11) с включением
	итогов в отдельную группу локальных сметных расчетов.

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	Нормативная трудоемкость приводится за итогом прямых затрат, сразу в целом по всему
	сметному расчету и показывается отдельной строкой.

	Нормативная трудоемкость работ, выполняемых за счет накладных расходов, определяется по
	формуле (8) и включается в локальный сметный расчет в порядке, указанном в пунктах 2.5 и 2.6
	настоящих Указаний.

	3.3. Пример расчета нормативной трудоемкости в локальных сметных расчетах приведен в
	приложении 3 к настоящим Указаниям.

	4. Выделение нормативной трудоемкости в объектных сметах и в объектных сметных
	расчетах

	4.1. В объектных сметах отдельно определяется нормативная трудоемкость в составе работ по
	возведению титульных временных зданий и сооружений, зимних удорожаний и других видов прочих
	работ и затрат, включаемых в эти сметы.

	4.2. Затраты труда по строительно-монтажным работам, выполняемым при возведении
	временных зданий и сооружений, в том случае, когда стоимость этих работ включается в объектные
	сметы в установленном проценте, определяются по формуле:

	                      Т   = 0,304 x М  ,                      (12)

	                       вр            вр

	    где:

	    М   - сумма,  принимаемая  из  строки  "Временные   здания   и

	     вр

	сооружения" объектной сметы (тыс. руб.);

	    0,304 - коэффициент перехода от суммы по временным  зданиям  и

	сооружениям  (в  руб.)  к  затратам  труда  рабочих   (в  чел.-ч),

	определяемый по формуле:

	                     Д

	                      вр   0,19

	                 к = --- = ----- = 0,304,                     (13)

	                     С     0,625

	                      р

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	    где:

	    Д   - доля затрат на возведение временных зданий и сооружений,

	     вр

	приходящаяся на заработную плату  рабочих,  в  структуре  норм  на

	временные здания и сооружения (по отчетным данным составляет 19%);

	    С  - средняя (в целом по возведению всех  временных  зданий  и

	     р

	сооружений) часовая тарифная ставка рабочих среднего  разряда  (по

	отчетным данным составляет 0,625 руб./ч).

	    4.3. Затраты труда рабочих, приходящиеся на зимние удорожания,

	определяются по формуле:

	                           Т   = к x М  ,                     (14)

	                            зу        зу

	    где:

	    М   - сумма удорожания строительно-монтажных  работ  в  зимнее

	     зу

	время (тыс. руб.);

	    к - коэффициент   перехода   от   сметной   стоимости   зимних

	удорожаний  (в  руб.)  к  нормативной  трудоемкости   (в  чел.-ч),

	принимаемый из таблицы (графа 4) согласно Приложению 4 к настоящим

	Указаниям.

	4.4. Затраты труда рабочих, относящиеся к остальным видам прочих работ и затрат, включаемых
	в объектные сметы как строительно-монтажные работы, определяются в том же проценте, в каком
	подсчитывается их сметная стоимость, т.е. от итогов нормативной трудоемкости по всем локальным
	сметам и по временным зданиям и сооружениям.

	4.5. Нормативная трудоемкость в объектной смете выделяется также из состава резерва средств
	на непредвиденные работы и затраты, находящегося в распоряжении подрядчика, путем применения
	норматива к предшествующему итогу, приведенному в графе "Нормативная трудоемкость".

	4.6. Нормативная трудоемкость в составе объектной сметы показывается в отдельной графе (в
	тыс. чел.-ч).

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	4.7. Нормативная трудоемкость в составе объектных сметных расчетов ведется в том же
	порядке, что и для объектных смет. Однако в объектных сметных расчетах не показываются
	соответствующие начисления к стоимости строительных и монтажных работ, которые даются к этой
	стоимости в составе объектных смет.

	4.8. Примеры расчета нормативной трудоемкости в объектных сметах и в объектных сметных
	расчетах приведены соответственно в приложениях 2 и 3 к настоящим Указаниям.

	5. Определение сметной заработной платы в локальных и объектных сметах и сметных
	расчетах

	5.1. Для определения сметной заработной платы исходной является формула (3).

	    Основная заработная плата рабочих, занятых непосредственно  на

	строительных  и  монтажных  работах  (З   ),  в  локальных  сметах

	                                       осн

	определяется   построчно   традиционным   методом,   т.е.    путем

	перемножения величины этой заработной платы, принятой из  сметного

	норматива,  на   количество   единиц   измерения   с   последующим

	суммированием всех строк сметы на основе формулы:

	                      З    = V x з   ,                        (15)

	                       осн        осн

	    где:

	    V - объемы   работ   по   соответствующему   виду   работ   (в

	установленных единицах);

	    з    - основная  заработная  плата  рабочих,  принимаемая   из

	     осн

	сметного норматива (руб.).

	    Основная   заработная   плата   рабочих   в  локальных  сметах

	показывается в отдельной графе.

	    Заработная  плата  рабочих,  обслуживающих   машины   (З ),  в

	                                                            м

	локальных  сметах  определяется  также  построчно  с   последующим

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	суммированием всех строк сметы на основе формулы:

	                          З  = V x з ,                        (16)

	                           м        м

	    где:

	    V - объемы   работ   по   соответствующему   виду   работ   (в

	установленных единицах);

	    з  - принимаемая  из  сметного  норматива   заработная   плата

	     м

	рабочих, обслуживающих машины (руб.).

	Заработная плата рабочих, обслуживающих машины, в указанных сметных документах
	показывается также в отдельной графе под наименованием "в т.ч. заработной платы".

	При определении сметной заработной платы должны применяться в необходимых случаях
	различные коэффициенты, приведенные в технических частях соответствующих сборников сметных
	нормативов, а также в Указаниях по применению ЕРЕР-84, ЕРКС-84 и Указаниях по применению
	расценок на монтаж оборудования (УРМО-84), в том числе районные коэффициенты к заработной
	плате работников строительно-монтажных организаций и коэффициенты, учитывающие надбавки к
	заработной плате, устанавливаемые директивными органами по отдельным регионам (см. УЕРЕР-84,
	п. 2.11, п. 2.12, приложение 8; УРМО-84, п. 2.6), и другие тому подобные коэффициенты и поправки.

	    5.2. Заработная плата  рабочих,  выполняющих  работы  за  счет

	сметных накладных расходов (З  ), в локальных сметах  определяется

	                             нр

	по формуле:

	                          З   = 0,18 x М  ,                   (17)

	                           нр           нр

	    где:

	    0,18 - доля заработной платы рабочих, занятых на  строительных

	и монтажных работах, учтенных в сметных накладных расходах (в  том

	числе основной заработной платы, составляющей по  отчетным  данным

	5,4%, и дополнительной заработной платы, составляющей 12,6%);

	    М   - масса  накладных   расходов,   принимаемая   из   строки

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	     нр

	"Накладные расходы" локальной сметы (в рублях).

	    Итоговая сметная заработная плата в  составе  локальной  сметы

	складывается  из  основной  заработной  платы   рабочих,   занятых

	непосредственно  на  строительных  и  монтажных  работах   (З   ),

	                                                             осн

	заработной платы рабочих, обслуживающих машины (З ), и  заработной

	                                                 м

	платы  рабочих,  выполняющих  работы  за  счет  сметных  накладных

	расходов (З  ).

	           нр

	Сметная заработная плата в составе локального сметного расчета выделяется в том же порядке,
	что и для локальной сметы.

	5.3. В объектных сметах выделяется сметная заработная плата из стоимости временных зданий и
	сооружений, зимних удорожаний, а также других видов прочих работ и затрат, включаемых в эти
	сметы.

	    Сметная  заработная  плата  рабочих,  выполняющих  работы   по

	возведению временных зданий и сооружений  (З  ),  определяется  по

	                                            вр

	формуле:

	                      З   = 0,19 x М  ,                       (18)

	                       вр           вр

	    где:

	    0,19 - доля заработной  платы  рабочих  в  структуре  норм  на

	временные здания и сооружения (по отчетным данным составляет 19%);

	    М   -  сумма,  принимаемая  из  строки  "Временные  здания   и

	     вр

	сооружения" объектной сметы, в тыс. рублей.

	    Сметная заработная плата рабочих в составе  зимних  удорожаний

	(З  ) определяется по формуле:

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	  зу

	                       З   = к x М  ,                         (19)

	                        зу        зу

	    где:

	    М   - сумма на удорожание строительно-монтажных работ в зимнее

	     зу

	время (тыс. руб.);

	    к - коэффициент   перехода   от   сметной   стоимости   зимних

	удорожаний к сметной  заработной  плате  рабочих  в  составе  этих

	удорожаний, принимаемый из таблицы (графа 5) согласно Приложению 4

	к настоящим Указаниям.

	Сметная заработная плата, относящаяся к остальным видам прочих работ и затрат, включаемых
	в объектные сметы как строительно-монтажные работы, определяется в том же проценте, в каком
	подсчитывается их сметная стоимость, т.е. от итогов сметной заработной платы по всем локальным
	сметам и по строке "Временные здания и сооружения".

	Сметная заработная плата выделяется также из состава резерва средств на непредвиденные
	работы и затраты, находящегося в распоряжении подрядчика, путем применения норматива резерва к
	предшествующему итогу, приведенному в графе "Сметная заработная плата".

	5.4. В объектных сметах сметная заработная плата в одноименной графе показывается в тыс.
	рублей.

	5.5. Сметная заработная плата в составе объектных сметных расчетов выделяется в том же
	порядке, что и для объектных смет.

	5.6. Примеры определения сметной заработной платы в локальных и объектных сметах
	приведены в приложении 2, а в локальных и объектных сметных расчетах - в приложении 3 к
	настоящим Указаниям.

	Приложение 1

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	к Методическим указаниям

	КОЭФФИЦИЕНТЫ ПЕРЕХОДА ОТ ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ РАБОЧИХ К
	ЗАТРАТАМ ТРУДА

	----T---------------------T------------------T-------------------¬

	¦	 N 	¦	Конструкции и работы 	¦	N и наименование  	¦	Коэффициент перехо-	¦

	¦	п/п	¦	 по сборникам ЕРЕР и 	¦	сборников, их раз-	¦	да от основной за- 	¦

	¦	   	¦	сборникам расценок на	¦	делов и отделов   	¦	работной платы ра- 	¦

	¦	   	¦	 монтаж оборудования 	¦	                  	¦	бочих к затратам   	¦

	¦	   	¦	                     	¦	                  	¦	труда, чел.-ч      	¦

	+---+---------------------+------------------+-------------------+

	¦	 1 	¦	          2          	¦	         3        	¦	         4         	¦

	+---+---------------------+------------------+-------------------+

	¦	   	¦	 Строительные работы 	¦	                  	¦	                   	¦

	¦	   	¦	                     	¦	                  	¦	                   	¦

	¦	1. 	¦	Горнопроходческие    	¦	сборник 35        	¦	        0,7        	¦

	¦	   	¦	работы               	¦	                  	¦	                   	¦

	¦	   	¦	                     	¦	                  	¦	                   	¦

	¦	2. 	¦	Тоннели и метрополи- 	¦	сборник 29 (раздел	¦	        1,1        	¦

	¦	   	¦	тены.                	¦	"Закрытый способ")	¦	                   	¦

	¦	   	¦	Подземные работы     	¦	                  	¦	                   	¦

	¦	   	¦	                     	¦	                  	¦	                   	¦

	¦	3. 	¦	Горновскрышные работы	¦	сборник 2         	¦	        1,3        	¦

	¦	   	¦	                     	¦	                  	¦	                   	¦

	¦	4. 	¦	Водопровод - наружные	¦	сборник 22        	¦	        1,4        	¦

	¦	   	¦	сети                 	¦	                  	¦	                   	¦

	¦	   	¦	                     	¦	                  	¦	                   	¦

	¦	5. 	¦	Буровзрывные работы. 	¦	сборники 3, 5, 19 	¦	                   	¦

	¦	   	¦	Свайные работы. Зак- 	¦	и 39              	¦	                   	¦

	¦	   	¦	репление грунтов.    	¦	                  	¦	                   	¦

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	¦	   	¦	Опускные колодцы.    	¦	                  	¦	                   	¦

	¦	   	¦	Газоснабжение - внут-	¦	                  	¦	                   	¦

	¦	   	¦	ренние устройства.   	¦	                  	¦	                   	¦

	¦	   	¦	Металлические конст- 	¦	                  	¦	                   	¦

	¦	   	¦	рукции гидротехничес-	¦	                  	¦	                   	¦

	¦	   	¦	ких сооружений       	¦	                  	¦	                   	¦

	¦	   	¦	                     	¦	                  	¦	                   	¦

	¦	   	¦	 Монтаж оборудования 	¦	                  	¦	                   	¦

	¦	   	¦	                     	¦	                  	¦	                   	¦

	¦	6. 	¦	В подземных условиях,	¦	сборники 3        	¦	        0,8        	¦

	¦	   	¦	в шахтах и рудниках  	¦	(отдел 6),        	¦	                   	¦

	¦	   	¦	                     	¦	7 (группа 298),   	¦	                   	¦

	¦	   	¦	                     	¦	8 (отдел 4),      	¦	                   	¦

	¦	   	¦	                     	¦	10 (отделы 10 и   	¦	                   	¦

	¦	   	¦	                     	¦	11),              	¦	                   	¦

	¦	   	¦	                     	¦	12 (отдел 4),     	¦	                   	¦

	¦	   	¦	                     	¦	19 (отдел 7),     	¦	                   	¦

	¦	   	¦	                     	¦	20 (отдел 2)      	¦	                   	¦

	¦	   	¦	                     	¦	                  	¦	                   	¦

	¦	7. 	¦	В подземных условиях,	¦	сборники 8 (отдел 	¦	        0,98       	¦

	¦	   	¦	в метрополитенах и   	¦	2, раздел 4), 20  	¦	                   	¦

	¦	   	¦	тоннелях             	¦	(отдел 2, раздел  	¦	                   	¦

	¦	   	¦	                     	¦	2), 21            	¦	                   	¦

	L---+---------------------+------------------+--------------------

	Примечание. По остальным конструкциям и работам, не приведенным в таблице,
	коэффициенты перехода принимаются равными:

	1,7 - для строительных конструкций и работ;

	1,6 - для монтажных работ.

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	Приложение 4

	к Методическим указаниям

	КОЭФФИЦИЕНТЫ ПЕРЕХОДА ОТ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ ЗИМНИХ УДОРОЖАНИЙ К
	ТРУДОЕМКОСТИ И ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ, ЗАНЯТЫХ НА СТРОИТЕЛЬНО-
	МОНТАЖНЫХ РАБОТАХ

	----T------------------------T-----------T-----------------------¬

	¦	 N 	¦	 Наименование отраслей  	¦	Температур-	¦	 Коэффициенты перехода 	¦

	¦	п/п	¦	 промышленности и видов 	¦	ные зоны   	¦	 от сметной стоимости  	¦

	¦	   	¦	     строительства      	¦	           	¦	  зимних удорожаний к  	¦

	¦	   	¦	                        	¦	           	+--------T--------------+

	¦	   	¦	                        	¦	           	¦	трудоем-	¦	сметной зара- 	¦

	¦	   	¦	                        	¦	           	¦	кости   	¦	ботной плате  	¦

	¦	   	¦	                        	¦	           	¦	        	¦	рабочих в сос-	¦

	¦	   	¦	                        	¦	           	¦	        	¦	таве этих удо-	¦

	¦	   	¦	                        	¦	           	¦	        	¦	рожаний       	¦

	+---+------------------------+-----------+--------+--------------+

	¦	 1 	¦	           2            	¦	     3     	¦	   4    	¦	      5       	¦

	+---+------------------------+-----------+--------+--------------+

	¦	1. 	¦	Предприятия угольной    	¦	I - VI     	¦	  0,68  	¦	     0,40     	¦

	¦	   	¦	промышленности          	¦	I - II     	¦	  0,76  	¦	     0,45     	¦

	¦	   	¦	                        	¦	           	¦	        	¦	              	¦

	¦	2. 	¦	Предприятия черной и    	¦	I - VI     	¦	  0,68  	¦	     0,40     	¦

	¦	   	¦	цветной металлургии     	¦	VII - VIII 	¦	  0,85  	¦	     0,50     	¦

	¦	   	¦	                        	¦	           	¦	        	¦	              	¦

	¦	3. 	¦	Предприятия химической, 	¦	I - VIII   	¦	  0,85  	¦	     0,50     	¦

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	¦	   	¦	станкостроительной и    	¦	           	¦	        	¦	              	¦

	¦	   	¦	инструментальной, авто- 	¦	           	¦	        	¦	              	¦

	¦	   	¦	мобильной, целлюлозно-  	¦	           	¦	        	¦	              	¦

	¦	   	¦	бумажной и деревообраба-	¦	           	¦	        	¦	              	¦

	¦	   	¦	тывающей, пищевой, мо-  	¦	           	¦	        	¦	              	¦

	¦	   	¦	лочной промышленности,  	¦	           	¦	        	¦	              	¦

	¦	   	¦	сахарные и консервные   	¦	           	¦	        	¦	              	¦

	¦	   	¦	заводы, заводы легкого и	¦	           	¦	        	¦	              	¦

	¦	   	¦	прочего машиностроения, 	¦	           	¦	        	¦	              	¦

	¦	   	¦	склады и хранилища      	¦	           	¦	        	¦	              	¦

	¦	   	¦	                        	¦	           	¦	        	¦	              	¦

	¦	4. 	¦	Предприятия тракторного 	¦	I - VI     	¦	  0,76  	¦	     0,45     	¦

	¦	   	¦	и сельскохозяйственного 	¦	VII - VIII 	¦	  0,85  	¦	     0,50     	¦

	¦	   	¦	машиностроения, мясной  	¦	           	¦	        	¦	              	¦

	¦	   	¦	промышленности, первич- 	¦	           	¦	        	¦	              	¦

	¦	   	¦	ной обработки сельскохо-	¦	           	¦	        	¦	              	¦

	¦	   	¦	зяйственной продукции,  	¦	           	¦	        	¦	              	¦

	¦	   	¦	медицинской промышлен-  	¦	           	¦	        	¦	              	¦

	¦	   	¦	ности                   	¦	           	¦	        	¦	              	¦

	¦	   	¦	                        	¦	           	¦	        	¦	              	¦

	¦	5. 	¦	Предприятия промышлен-  	¦	I - VIII   	¦	  0,76  	¦	     0,45     	¦

	¦	   	¦	ности строительных мате-	¦	           	¦	        	¦	              	¦

	¦	   	¦	риалов: заводы и полиго-	¦	           	¦	        	¦	              	¦

	¦	   	¦	ны сборных железобетон- 	¦	           	¦	        	¦	              	¦

	¦	   	¦	ных и бетонных конструк-	¦	           	¦	        	¦	              	¦

	¦	   	¦	ций и изделий, цементные	¦	           	¦	        	¦	              	¦

	¦	   	¦	заводы, предприятия ас- 	¦	           	¦	        	¦	              	¦

	¦	   	¦	бестоцементной, санитар-	¦	           	¦	        	¦	              	¦

	¦	   	¦	но-технической и сте-   	¦	           	¦	        	¦	              	¦

	¦	   	¦	кольной промышленности  	¦	           	¦	        	¦	              	¦

	¦	   	¦	                        	¦	           	¦	        	¦	              	¦

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	¦	6. 	¦	Предприятия легкой про- 	¦	I - VIII   	¦	  0,68  	¦	     0,40     	¦

	¦	   	¦	мышленности, насосные   	¦	           	¦	        	¦	              	¦

	¦	   	¦	станции водопроводные   	¦	           	¦	        	¦	              	¦

	¦	   	¦	                        	¦	           	¦	        	¦	              	¦

	¦	7. 	¦	Предприятия рыбного хо- 	¦	I - VIII   	¦	  1,02  	¦	     0,60     	¦

	¦	   	¦	зяйства, дорожные покры-	¦	           	¦	        	¦	              	¦

	¦	   	¦	тия (гравийные или щебе-	¦	           	¦	        	¦	              	¦

	¦	   	¦	ночные)                 	¦	           	¦	        	¦	              	¦

	¦	   	¦	                        	¦	           	¦	        	¦	              	¦

	¦	8. 	¦	Элеваторы из сборного и 	¦	I - II     	¦	  1,19  	¦	     0,70     	¦

	¦	   	¦	монолитного железобетона	¦	III - VIII 	¦	  1,02  	¦	     0,65     	¦

	¦	   	¦	                        	¦	           	¦	        	¦	              	¦

	¦	9. 	¦	Энергетическое строи-   	¦	           	¦	        	¦	              	¦

	¦	   	¦	тельство:               	¦	           	¦	        	¦	              	¦

	¦	   	¦	воздушные линии электро-	¦	I - II     	¦	  1,27  	¦	     0,75     	¦

	¦	   	¦	передачи 35 кВт и выше  	¦	III - VIII 	¦	  1,19  	¦	     0,70     	¦

	¦	   	¦	                        	¦	           	¦	        	¦	              	¦

	¦	10.	¦	Строительство дорог:    	¦	           	¦	        	¦	              	¦

	¦	   	¦	земляное полотно из     	¦	I - VI     	¦	  0,68  	¦	     0,40     	¦

	¦	   	¦	обыкновенных и дренирую-	¦	VII - VIII 	¦	   -    	¦	      -       	¦

	¦	   	¦	щих грунтов             	¦	           	¦	        	¦	              	¦

	¦	   	¦	земляное полотно из     	¦	I - VI     	¦	  1,44  	¦	     0,85     	¦

	¦	   	¦	скальных грунтов        	¦	VII - VIII 	¦	   -    	¦	      -       	¦

	¦	   	¦	крепление земляного по- 	¦	I - VIII   	¦	  0,85  	¦	     0,50     	¦

	¦	   	¦	лотна и регуляционных   	¦	VII - VIII 	¦	   -    	¦	      -       	¦

	¦	   	¦	сооружений              	¦	           	¦	        	¦	              	¦

	¦	   	¦	прочие искусственные    	¦	I - VI     	¦	  0,76  	¦	     0,45     	¦

	¦	   	¦	сооружения, сооружения  	¦	VII - VIII 	¦	   -    	¦	      -       	¦

	¦	   	¦	водоснабжения и канали- 	¦	           	¦	        	¦	              	¦

	¦	   	¦	зации                   	¦	           	¦	        	¦	              	¦

	¦	   	¦	верхнее строение пути   	¦	I - VI     	¦	  1,02  	¦	     0,60     	¦

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	¦	   	¦	                        	¦	VII - VIII 	¦	   -    	¦	      -       	¦

	¦	   	¦	                        	¦	           	¦	        	¦	              	¦

	¦	11.	¦	Строительство зданий и  	¦	I - VI     	¦	  1,02  	¦	     0,60     	¦

	¦	   	¦	сооружений связи        	¦	VII - VIII 	¦	  1,19  	¦	     0,70     	¦

	¦	   	¦	                        	¦	           	¦	        	¦	              	¦

	¦	12.	¦	Сельскохозяйственное    	¦	I - VIII   	¦	  0,93  	¦	     0,55     	¦

	¦	   	¦	строительство и строи-  	¦	           	¦	        	¦	              	¦

	¦	   	¦	тельство жилых и общест-	¦	           	¦	        	¦	              	¦

	¦	   	¦	венных зданий           	¦	           	¦	        	¦	              	¦

	¦	   	¦	                        	¦	           	¦	        	¦	              	¦

	¦	13.	¦	Горнопроходческие рабо- 	¦	           	¦	        	¦	              	¦

	¦	   	¦	ты:                     	¦	           	¦	        	¦	              	¦

	¦	   	¦	шахтные стволы          	¦	I - VIII   	¦	  0,25  	¦	     0,15     	¦

	¦	   	¦	горизонтальные и наклон-	¦	I - VIII   	¦	  0,17  	¦	     0,10     	¦

	¦	   	¦	ные выработки (без по-  	¦	           	¦	        	¦	              	¦

	¦	   	¦	догрева воздуха)        	¦	           	¦	        	¦	              	¦

	¦	   	¦	                        	¦	           	¦	        	¦	              	¦

	¦	14.	¦	Строительство наружных  	¦	           	¦	        	¦	              	¦

	¦	   	¦	трубопроводов:          	¦	           	¦	        	¦	              	¦

	¦	   	¦	водоснабжение и газопро-	¦	I - VI     	¦	  0,76  	¦	     0,45     	¦

	¦	   	¦	воды в мягких грунтах   	¦	VII - VIII 	¦	  1,02  	¦	     0,60     	¦

	¦	   	¦	канализация в мягких    	¦	I - VI     	¦	  0,68  	¦	     0,40     	¦

	¦	   	¦	грунтах                 	¦	VII - VIII 	¦	  1,02  	¦	     0,60     	¦

	¦	   	¦	                        	¦	           	¦	        	¦	              	¦

	¦	15.	¦	Прочие виды строительст-	¦	           	¦	        	¦	              	¦

	¦	   	¦	ва:                     	¦	           	¦	        	¦	              	¦

	¦	   	¦	коллекторы для подземных	¦	I - VI     	¦	  0,76  	¦	     0,45     	¦

	¦	   	¦	сооружений              	¦	VII - VIII 	¦	  0,93  	¦	     0,55     	¦

	L---+------------------------+-----------+--------+---------------

	Примечание. По отраслям и видам строительства, не приведенным в таблице, коэффициент
	перехода к трудоемкости принимается равным 0,8, а коэффициент перехода к сметной заработной

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	плате рабочих в составе зимних удорожаний - 0,5.

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.