Утверждены

	Приказом Министерства

	коммунального хозяйства РСФСР

	от 30 декабря 1968 г. N 457

	УКАЗАНИЯ ПО ПЛАНИРОВАНИЮ ТЕКУЩЕГО РЕМОНТА ЖИЛЫХ
	ЗДАНИЙ И ОРГАНИЗАЦИИ ТРУДА РАБОЧИХ УПРАВЛЕНИЙ ДОМАМИ
	(ЖИЛИЩНО-ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ КОНТОР)

	Указания разработаны лабораторией экономики Ленинградского научно-исследовательского
	института Академии коммунального хозяйства РСФСР и представляют собою второе переработанное
	и дополненное и 	здание	 "Указаний по планированию текущего ремонта жилых зданий и
	организации труда рабочих управлений 	домами	 (жилищно-эксплуатационных контор)", выпущенных
	в 1965 году.

	I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

	1. Указания по планированию текущего ремонта жилых 	зданий	 и организации труда рабочих
	управлений 	домами	 (жилищно-эксплуатационных контор) имеют своей целью дать методику
	определения объема текущего ремонта жилых зданий, расчета потребности в рабочей силе и
	материалах, а также рекомендации по рациональной организации труда рабочих, занятых на работах
	по текущему ремонту жилищного фонда.

	2. В основу настоящих Указаний положены:

	- Постановления Совета Министров СССР от 26 августа 1967 г. N 807, Совета Министров
	РСФСР от 30 октября 1967 г. N 818 и Приказ Министра коммунального хозяйства РСФСР от 14
	ноября 1967 г. N 383 "О мерах по улучшению эксплуатации жилищного фонда и объектов
	коммунального хозяйства";

	- Постановление Совета Министров РСФСР от 18 октября 1962 г. N 1390 "О повышении
	ответственности за сохранность и содержание в исправном состоянии жилищного фонда";

	- перечень профессий рабочих, занятых на эксплуатации и текущем ремонте жилых домов,
	зданий, 	сооружений	 и оборудования, для отнесения к группам по размерам окладов. Приложение к
	Постановлению Государственного комитета Совета Министров СССР по вопросам труда и
	заработной платы и Президиума ВЦСПС от 4 сентября 1964 г. N 393/П-18;

	- Положение о премировании работников жилищно-эксплуатационных организаций,
	утвержденное Постановлением Государственного комитета Совета Министров СССР по вопросам
	труда и заработной платы и секретариата ВЦСПС от 7 марта 1969 г. N 85/6;

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	- Приказ Министра коммунального хозяйства РСФСР N 414 от 3 декабря 1967 г. "Об
	установлении тарифных ставок и окладов рабочих и служащих жилищно-коммунального хозяйства в
	связи с увеличением минимального размера заработной платы до 60 рублей в месяц и повышением
	тарифных ставок и окладов отдельным категориям работников";

	- инструктивное письмо Министерства финансов СССР от 28 сентября 1964 г. N 283 "Об
	упорядочении планирования, учета и списания материалов при текущем ремонте государственного
	жилищного фонда";

	- Правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденные Приказом МКХ
	РСФСР от 31 декабря 1968 г. N 455;

	- Положение о проведении планово-предупредительного ремонта жилых и общественных
	зданий, утвержденное Госстроем СССР от 8 сентября 1964 г.;

	- Инструкции и формы по составлению хозяйственно-финансового плана управления домами
	(жилищно-эксплуатационной конторы), утвержденные Приказом по Министерству коммунального
	хозяйства РСФСР от 21 февраля 1969 г. N 65;

	- Нормы затрат труда на техническое обслуживание и текущий ремонт жилищного фонда для
	управления домами (ЖЭК), утвержденные Приказом МКХ РСФСР от 7 августа 1963 г. N 226, и
	циркулярное письмо МКХ РСФСР и ЦК профсоюза от 28 мая 1968 г. N 01-03-97 "О частичных
	изменениях норм затрат труда на техническое обслуживание и текущий ремонт жилищного фонда для
	управлений домами (ЖЭК)".

	3. Текущий ремонт заключается в систематически проводимых работах по предохранению
	частей зданий и оборудования от преждевременного износа и по устранению мелких повреждений и
	неисправностей, возникающих в процессе эксплуатации.

	Текущий ремонт жилых зданий включает:

	а) производство работ по текущему ремонту, объем, место и время выполнения которых можно
	предусмотреть заблаговременно, исходя из технического состояния зданий, сооружений и домового
	оборудования (профилактический ремонт);

	б) устранение аварий и выполнение неучтенных планом работ, выявленных в процессе
	эксплуатации или в ходе выполнения профилактического текущего ремонта, отсрочка которых не
	может быть допущена без ущерба для сохранности и нормальной эксплуатации зданий
	(непредвиденные работы);

	в) периодические осмотры частей зданий, 	сооружений	 внешнего благоустройства, квартир и
	оборудования, устранение мелких повреждений.

	4. Перечень работ, относящихся к текущему ремонту, приведен в Правилах и нормах
	технической эксплуатации жилищного фонда (см. Приложение 27).

	II. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОТРЕБНОСТИ В ТЕКУЩЕМ РЕМОНТЕ

	5. Объемы работ по профилактическому текущему ремонту на планируемый год выявляются в
	предшествующем году на основании весеннего осмотра зданий, производимого в порядке и в сроки,
	установленные Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда.

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	6. Все неисправности конструкций, сооружений и домового оборудования, выявленные при
	осмотре, записываются в ведомость результатов осмотра (Приложение 1).

	Ведомость результатов осмотра составляется на каждое строение в отдельности.

	Работы, относящиеся к текущему ремонту, включенные в ведомость результатов осмотра,
	заносятся в описи работ (см. п. п. 22 и 23 настоящих Указаний).

	На работы, подлежащие выполнению квартиросъемщиками согласно договору найма жилого
	помещения, выдается задание на ремонт (Приложение 2).

	7. Мелкие работы, выявленные в ходе осмотров, записываются в "Журнал заявок жильцов на
	ремонт" (Приложение 3). В журнале учитываются заявки жильцов (письменные и устные) на ремонт
	и устранение мелких неисправностей.

	Журнал ведется в управлении домами (ЖЭК), а при наличии технических участков -
	непосредственно на участках, и должен быть доступен для записей в течение всего рабочего дня.

	В нерабочее время письменные заявки могут опускаться в специальный почтовый ящик,
	вывешенный у входа в управление домами (ЖЭК) или технический участок.

	8. Заявки жильцов, не имеющие срочного характера, после их проверки на месте должны быть
	включены в опись работ и выполняться в процессе производства текущего ремонта в данном доме.
	Об этом делается отметка в гр. 6 журнала заявок и должно быть сообщено подателю заявки.

	9. Рабочие управлений домами (ЖЭК) обязаны производить регулярный по графику обход и
	осмотр закрепленных за ними квартир, частей здания и оборудования.

	10. Графики обходов составляются техником и утверждаются главным (старшим) инженером
	управления домами (ЖЭК).

	11. Время, необходимое для осмотров, определено "Нормами затрат труда на проведение
	осмотров" (Приложение 4).

	12. Для учета периодических осмотров и выполнения в ходе осмотров мелких работ рабочим
	ежемесячно выдаются "Карты обхода квартир и осмотра конструкций и оборудования" (Приложение
	5) с указанием общего количества нормо-часов, полагающихся на обходы и осмотры за данный месяц.
	Карты обхода должны быть пронумерованы и по окончании месяца сдаваться технику.

	Ответственность за выполнение рабочими обходов и осмотров по графику несет техник
	управления домами (ЖЭК).

	В отведенное на осмотры время рабочий устраняет мелкие неисправности, выполнение
	которых отмечается в гр. 4 карты обхода. Перечень работ, выполняемых рабочим во время осмотра,
	приведен в Приложении 5а.

	13. Все другие работы, которые рабочий не может выполнить в отведенное для осмотра время,
	выполняются в период проведения в доме профилактического текущего ремонта, а работы
	неотложного характера - в сроки, предусмотренные "Правилами и нормами технической
	эксплуатации жилищного фонда".

	14. При обнаружении неисправностей, устранение которых лежит на обязанности
	специализированных организаций ("Горгаз", "Лифтремонт", "Теплосеть" и т.п.), управление домами
	(ЖЭК) обязано немедленно сообщить соответствующей организации для принятия мер по

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	устранению неисправностей.

	15. В нерабочее время работы неотложного характера производятся централизованными
	аварийными службами, а при их отсутствии - дежурными рабочими управления домами,
	назначаемыми на дежурство по графику.

	III. ПЛАН РАБОТ ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ

	16. В план текущего ремонта включаются работы по профилактическому ремонту,
	непредвиденные работы, а также периодические осмотры объектов, проводимые рабочими
	управления домами (ЖЭК).

	17. Профилактический текущий ремонт зданий планируется, исходя из периодичности
	постановки домов на ремонт, в соответствии с Положением о проведении планово-
	предупредительного ремонта жилых и общественных зданий.

	В домах, не поставленных в планируемом году на профилактический ремонт, должен
	производиться только непредвиденный ремонт и регулярный осмотр рабочими закрепленных за
	ними конструктивных элементов, оборудования и приборов.

	18. В малоценных (ветхих) домах и домах, подлежащих сносу, ежегодно производится
	необходимый текущий ремонт, обеспечивающий нормальные условия проживания до наступления
	срока капитального ремонта или сноса таких домов.

	19. Объем работ по текущему ремонту в денежном выражении определяется в пределах 0,75 -
	1% от восстановительной стоимости зданий в соответствии с Постановлением Совета Министров
	СССР от 26 августа 1967 г. N 807.

	20. Объем работ в натуральных показателях планируется:

	а) по профилактическому ремонту - в квадратных метрах жилой площади домов, поставленных
	на профилактический ремонт в планируемом году;

	б) по ремонту малоценных (ветхих) домов и домов, подлежащих сносу, - в физических объемах
	работ согласно описям работ (Приложение 8).

	21. План текущего ремонта содержит:

	а) описи работ по каждому дому;

	б) расчет необходимой численности рабочих;

	в) расчет потребности и стоимости материалов;

	г) график работ по профилактическому ремонту;

	д) сводный план работ.

	Описи работ и расчет численности рабочих

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	22. На каждое строение, включаемое в план профилактического текущего ремонта, составляется
	опись работ (Приложение 6), в которую записываются результаты весенних осмотров зданий и
	заявок жильцов, предусмотренных для включения в план профилактического ремонта. Описи работ
	уточняются по данным осенних осмотров и периодических осмотров, осуществляемых техниками и
	рабочими в процессе эксплуатации.

	23. Если в процессе профилактического ремонта по данному дому выявляются дополнительные
	работы, на них составляется дополнительная опись, в которой так же, как и в основной описи,
	определяются дополнительные затраты труда в человеко-часах и делается выборка основных
	материалов.

	24. Для текущего ремонта малоценных (ветхих) зданий составляются:

	а) опись работ по каждому дому по упрощенной форме (Приложение 7);

	б) сводная опись по техническому участку (Приложение 8).

	25. В описях работ по профилактическому ремонту и в сводной описи работ по малоценным
	(ветхим) домам и домам, подлежащим сносу, техники заполняют первую, вторую, третью и
	четвертую графы, после чего передают их главному (старшему) инженеру управления домами (ЖЭК).

	26. В соответствии с характером и объемами работ главный (старший) инженер определяет
	работы, которые вследствие их технической сложности или отсутствия в домохозяйстве технических
	приспособлений не могут быть выполнены собственными силами.

	Работы, подлежащие выполнению подрядными организациями, включаются в план с
	разрешения гор(рай)жилуправления при наличии в данном городе (населенном пункте) ремонтно-
	строительной организации, имеющей возможность выполнять такие работы.

	27. После согласования объемов работ, выполняемых подрядной организацией, главный
	(старший) инженер рассчитывает в описях работ (Приложения 6 и 8) необходимое количество
	человеко-часов и потребность в материалах по работам, выполняемым собственными силами.

	28. Для определения необходимого количества человеко-часов на проведение периодических
	осмотров составляется расчет в соответствии с "Нормами затрат труда на проведение периодических
	осмотров".

	Пример составления расчета приведен в Приложении 9.

	29. Общая численность рабочих определяется в сводном расчете (Приложение 10).

	Порядок составления расчета

	а) Количество нормо-часов на обходы и осмотры (гр. 3) записывается на основании
	Приложения 9.

	б) Количество нормо-часов на профилактический ремонт и ремонт малоценных и ветхих домов
	(гр. гр. 4 и 5) - по данным описей работ (Приложения 6 и 8).

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	в) Количество нормо-часов на непредвиденный ремонт (гр. 8) определяется в процентах к
	сумме нормо-часов на осмотры, профилактический ремонт и ремонт малоценных и ветхих домов.

	Размер процента устанавливается управлением домами (ЖЭК) дифференцированно по
	профессиям.

	Средний процент непредвиденных работ в целом по управлению домами (ЖЭК) определяется
	путем деления итога по гр. 8 на итог по гр. 9.

	Средний процент непредвиденных работ не должен превышать 25% от общего баланса
	рабочего времени рабочих по текущему ремонту управления домами (ЖЭК).

	г) На основании рассчитанного количества нормо-часов устанавливается необходимая
	численность рабочих по каждой профессии и в целом по управлению домами (гр. 10) путем деления
	общего количества нормо-часов на годовой баланс рабочего времени одного рабочего - 1945 часов
	(примерный расчет баланса рабочего времени приведен в Приложении 11).

	д) Нормативная численность рабочих по текущему ремонту (гр. 11) определяется "Нормами
	затрат труда на техническое обслуживание и текущий ремонт жилищного фонда", утвержденными
	Приказом МКХ РСФСР от 7 августа 1963 г. N 226.

	е) Если необходимое количество рабочих превышает количество рабочих, полагающихся по
	нормам обслуживания, гор(рай)жилуправлениям предоставляется право увеличивать управлениям
	домами (ЖЭК) в зависимости от состояния жилищного фонда штатные нормативы до 20%.

	Количество рабочих, принятое в плане, записывается в гр. 11.

	30. Фонд заработной платы рабочих рассчитывается в хозфинплане (таблица 4 - 2) в
	соответствии с месячными окладами рабочих, введенными в действие Приказом по Министерству
	коммунального хозяйства РСФСР от 3 декабря 1967 г. N 414.

	Расчет потребности и стоимости материалов

	31. Расчет потребности в материалах и домовом оборудовании и их стоимости производится в
	расчетной таблице (Приложение 12).

	Порядок расчета:

	- наименование и количество материалов переносятся из описей работ;

	- цена за единицу (гр. 5) принимается по местным ценникам.

	Стоимость материалов, необходимых для выполнения непредвиденных работ, показывается
	отдельной строкой только по гр. 6 и планируется в процентах к общей стоимости материалов,
	расходуемых на выполнение профилактического ремонта и ремонта малоценных и ветхих домов.

	Величина этого процента принимается равной среднему проценту человеко-часов на
	непредвиденные работы к общему количеству человеко-часов (итог гр. 8 / на итог гр. 9 таблицы
	Приложения 10).

	32. Расчет потребности в материалах и домовом оборудовании является основанием для

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	составления заявки на основные материалы и оборудование. При этом должна быть учтена
	возможность использования материалов и оборудования, полученных от разборки конструкций.

	33. Оприходование и списание материалов для текущего ремонта должны осуществляться в
	порядке, установленном "Основными положениями по учету материалов на предприятиях"
	(инструктивное письмо Министерства финансов СССР от 22 марта 1956 г. N 114).

	34. Разрешение на отпуск материалов со склада должно даваться после предварительной
	проверки соответствия запрашиваемых материалов фактической потребности, исходя из норм
	расхода материалов с учетом наличия материалов у рабочих, выполняющих работы по текущему
	ремонту.

	35. Материалы для текущего ремонта могут выдаваться только на основании требования, один
	экземпляр которого выдается лицу, получившему материалы в подотчет.

	36. Списание израсходованных материалов производится по закрытым нарядам-заданиям после
	проверки их главным (старшим) инженером.

	Графики работ

	37. На группу домов, подлежащих профилактическому текущему ремонту, составляется
	пообъектный график работ с указанием адресов домов, их жилой площади и сроков начала и
	окончания работ (Приложение 13).

	В график включаются дома, в которых работы выполняются как силами управления домами
	(ЖЭК), так и силами подрядной организации.

	38. На технических участках в соответствии с описями работ составляются квартальные графики
	выполнения работ (Приложение 14).

	В квартальном графике указываются объекты ремонта, наименование работ, их количество, в
	каком месяце должна быть выполнена работа. После выполнения работ в графике делается отметка о
	выполнении.

	В квартальных графиках должны быть учтены и другие не предусмотренные планом работы,
	выявленные в процессе эксплуатации, выполняемые за счет непредвиденных работ.

	Сводный план работ по текущему ремонту жилых зданий (Приложение 15)

	39. Сводный план работ составляется в следующем порядке:

	- Стоимость работ по текущему ремонту (п. 1) принимается по хозфинплану.

	В стоимость работ, выполняемых подрядным способом, включаются затраты на услуги
	ремонтно-строительных организаций, машинопрокатных баз, аварийной службы, организаций по
	ремонту лифтов, телевизионных ателье и др.

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	- Объем работ по профилактическому текущему ремонту в квадратных метрах жилой площади
	(п. 2) планируется в соответствии с пообъектным графиком (Приложение 13).

	- Затраты труда в нормированном времени на все виды ремонта и на обходы и осмотры (п. 3)
	переносятся из "Расчета необходимой численности рабочих по текущему ремонту" (Приложение 10).

	- В конце сводного плана записывается ремонт квартир за счет средств населения согласно
	выданным квартиросъемщикам заданиям на ремонт.

	40. Одновременно с годовым планом составляется план I квартала. Планы на последующие
	кварталы составляются до начала очередного квартала.

	41. Проект сводного годового плана работ по текущему ремонту рассматривается домовым
	комитетом и представляется на утверждение в гор(рай)жилуправление одновременно с
	хозяйственно-финансовым планом, как его составная часть.

	42. Квартальные планы текущего ремонта рассматриваются домовым комитетом, после чего
	утверждаются управляющим домами (начальником ЖЭК).

	Расходы на текущий ремонт

	43. Смета расходов на текущий ремонт является разделом расходной части хозяйственно-
	финансового плана управления домами (ЖЭК) и рассчитывается в форме 4 хозфинплана.

	Показатели, разработанные согласно настоящим Указаниям, должны приниматься в
	обоснование сметы затрат по текущему ремонту хозяйственно-финансового плана в следующем
	порядке:

	а) численность рабочих по текущему ремонту принимается по расчету (Приложение 10);

	б) заработная плата рассчитывается в соответствии с месячными окладами согласно перечню
	профессий, отнесенных к соответствующим группам по размерам окладов;

	в) премии - в соответствии с Положением о премировании работников хозрасчетных жилищно-
	эксплуатационных организаций, утвержденным Постановлением Государственного комитета Совета
	Министров СССР по вопросам труда и зарплаты и секретариата ВЦСПС от 7 марта 1969 г.;

	г) материалы - по расчету потребности и стоимости материалов и домового оборудования
	(Приложение 12);

	д) прочие расходы (начисления на зарплату, охрана труда и техника безопасности, спецодежда и
	др.) - по действующим нормам.

	44. Стоимость работ, выполняемых подрядным способом, устанавливается на основании
	договоров.

	Сроки выполнения работ, осуществляемых подрядным способом, устанавливаются при
	подписании подрядного договора.

	45. Расходы по работам и услугам, выполняемым организациями, осуществляющими
	техническое обслуживание и надзор за лифтами, строительными механизмами, централизованной

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	аварийной службой и т.п., планируются на основании соответствующих договоров.

	IV. ОРГАНИЗАЦИЯ ТРУДА РАБОЧИХ ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ

	46. Текущий ремонт осуществляют постоянные штатные рабочие управления домами (ЖЭК), с
	оплатой труда по повременно-премиальной системе.

	47. В обязанности рабочих по текущему ремонту входит:

	а) систематический обход и осмотр квартир, частей зданий и оборудования, закрепленных на
	постоянное обслуживание за каждым рабочим, и инструктаж жильцов о пользовании домовым
	оборудованием;

	б) выполнение работ текущего ремонта.

	48. Рабочие по текущему ремонту в оперативном отношении подчиняются технику или
	главному (старшему) инженеру, в зависимости от принятой в управлении домами (ЖЭК)
	организации работ.

	49. Работы по текущему ремонту выполняются отдельными рабочими или бригадами.

	50. Для производства профилактического текущего ремонта в зависимости от характера и
	объема работ целесообразно создавать бригады или комплексные бригады из рабочих всех
	специальностей, требующихся для данного объекта.

	51. На работы, выполняемые бригадой, выдается наряд-задание (Приложение 16), в котором
	указывается начало и окончание всех работ в соответствии с составом бригады и количеством
	человеко-часов, рассчитанных в описи работ.

	52. Если в процессе профилактического текущего ремонта выявляются дополнительные работы,
	на них составляется опись работ, в которой так же, как и в основной описи, делается выборка
	рабсилы и материалов.

	53. Законченные работы по дому принимаются комиссией в составе главного (старшего)
	инженера управления домами (ЖЭК), техника и представителя домового комитета. На принятый
	объект составляется акт (Приложение 17).

	При приемке работ следует обращать внимание на то, чтобы в ходе профилактического ремонта
	дома были выполнены все без исключения работы, относящиеся к текущему ремонту.

	54. Если к концу отчетного квартала полностью закончены все работы только в отдельных
	секциях, то комиссия может принять по акту готовые секции и в отчет включается жилая площадь
	этих секций.

	55. Для учета работы бригады и расхода материалов за истекший месяц на незаконченных
	объектах профилактического текущего ремонта составляется промежуточный акт, в котором
	указывается объем фактически выполненных работ в данном месяце, количество затраченных
	человеко-часов и материалов.

	56. Для выполнения работ в малоценных (ветхих) домах и непредвиденных работ в домах, не
	поставленных в планируемом году на профилактический текущий ремонт, выдается наряд-задание по

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	форме (Приложение 18).

	Такие же наряды-задания даются на устранение неисправностей, обнаруженных рабочим при
	обходе закрепленных объектов, если характер работы не позволяет рабочему устранить
	неисправности во время обхода.

	57. Наряд-задание выдается на срок, определяемый сложностью и объемом ремонтных работ.
	По выполнении работ наряд-задание возвращается технику.

	58. Приемка работ, указанных в п. 56 настоящих Указаний (в том числе и от ремдружинников),
	производится техником. В приемке работ, выполненных в квартирах, участвуют квартиросъемщики
	(ответственные лица по квартире).

	59. Общий контроль за качеством и сроками выполнения ремонтных работ и расходованием
	материалов осуществляет главный (старший) инженер управления домами (ЖЭК).

	V. УЧЕТ ВЫПОЛНЕНИЯ ПЛАНА ТЕКУЩЕГО РЕМОНТА

	Учет выполнения нормированных заданий

	60. Для учета нормированных заданий рабочим управления домами (ЖЭК) старший инженер
	(инженер) или техник на основании закрытых нарядов-заданий и карт обхода и осмотра составляет
	по истечении каждого месяца:

	- ведомость учета выполнения рабочими нормированных заданий по текущему ремонту
	(Приложение 19);

	- ведомость учета выполнения рабочими графиков обхода и осмотра жилых домов (Приложение
	20).

	61. На основании вышеуказанных ведомостей техник или инженер подготавливает материалы
	для премирования рабочих согласно Положению о премировании работников хозрасчетных
	жилищно-эксплуатационных организаций, утвержденному Постановлением Государственного
	комитета Совета Министров СССР по вопросам труда и заработной платы и секретариата ВЦСПС от
	7 марта 1969 года.

	К этим материалам относятся:

	а) справка о выполнении показателей премирования рабочими-повременщиками управления
	домами (ЖЭК) (Приложение 21);

	б) акт о выполнении условий Положения о премировании для выплаты премии рабочим в
	полном размере (Приложение 22);

	в) акт на лишение премии отдельных рабочих полностью или частично (Приложение 23).

	62. Справка о выполнении показателей премирования с соответствующими актами
	рассматривается местной профсоюзной организацией, после чего управляющий домами (начальник

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	ЖЭК) издает приказ о начислении премий.

	Учет выполненных работ

	63. Первичными документами для учета выполненных работ являются:

	а) по профилактическому текущему ремонту - акты приемки домов или секций;

	б) по текущему ремонту малоценных (ветхих) домов и прочим работам - наряды-задания;

	в) по периодическим осмотрам - карты обхода и осмотра.

	64. Работы, выполненные ремдружинами, выделяются отдельно по данным нарядов-заданий.
	Учет работ ремдружинников ведется в натуральных показателях (виды и объемы работ и затраты
	рабочего времени) и в денежном выражении.

	65. Стоимость работ, выполненных ремдружиной, складывается из стоимости израсходованных
	материалов и условной зарплаты.

	Условная зарплата определяется путем умножения часовой ставки рабочего соответствующей
	профессии и группы по оплате труда на количество отработанных человеко-часов ремдружинами.

	66. По окончании квартала управления домами (ЖЭК) составляют справку о выполнении плана
	текущего ремонта (Приложение 25), являющуюся приложением к бухгалтерскому отчету.

	Порядок составления справки:

	- затраты на текущий ремонт, выполненный собственными силами и подрядными
	организациями, принимаются по данным бухгалтерской отчетности;

	- количество отремонтированной жилой площади принимается по актам приемки домов или
	секций (Приложение 17);

	- затраты труда в нормированном времени на работах, выполненных собственными силами,
	принимаются:

	а) на профилактический ремонт - по актам приемки домов или секций (Приложение 17), а в
	домах, где работы полностью не закончены, - по промежуточным актам;

	б) на текущий ремонт малоценных (ветхих) домов и прочие работы по закрытым нарядам-
	заданиям (Приложение 18);

	в) затраты труда на обходы и осмотры - по картам обхода квартир и осмотра конструкций
	(Приложение 5).

	Работы, выполненные на общественных началах ремонтными дружинами, учитываются в
	трудозатратах и в денежном выражении (см. п. п. 64 и 65 настоящих "Указаний") и указываются в
	справке как сверхплановый источник увеличения объемов ремонтных работ.

	Данные о ремонте квартир за счет средств населения принимаются по "Журналу учета
	выполнения ремонта жилых комнат и мест общего пользования" (Приложение 24).

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	67. Городские (районные) жилищные управления на основании бухгалтерской отчетности и
	справки о выполнении работ по текущему ремонту (Приложение 25) проверяют один раз в квартал
	выполнение управлениями домами (ЖЭК) плана текущего ремонта жилищного фонда в денежном и
	натуральных показателях.

	68. При оценке деятельности управления домами (ЖЭК) в части осуществления текущего
	ремонта следует учитывать кроме выполнения плановых показателей:

	а) качество выполненных работ;

	б) соблюдение рабочими графиков обходов и осмотров;

	в) содержание конструктивных элементов и домового оборудования в исправном состоянии;

	г) рациональное и экономное расходование средств, предназначенных для текущего ремонта, и
	использование внутренних резервов для увеличения объемов ремонтных работ.

	Приложение 1

	                                                            УТВЕРЖДАЮ

	                                                       Управляющий
	домами

	                                                         (начальник
	ЖЭК)

	                                                      _____________
	19__ г.

	Управление домами (ЖЭК) N _______

	__________________________ района

	гор. ____________________________

	                     РЕЗУЛЬТАТЫ ОСМОТРА ДОМА N ______

	(строение _______________________) по улице
	_______________________________

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	N	Место обнаружения дефекта	Краткое описание	Решение о принятии мер
	п/п	(отдельные части здания,	дефекта и причины	(капитальный или текущий
	конструктивные элементы,	его возникновения	ремонт, выполняемый  
	системы инженерного  	(с указанием  	жилищно-эксплуатационной
	оборудования с указанием	примерного объема	организацией, или   
	N квартиры, наименование	работ)     	текущий ремонт,    
	вспомогательных    	выполняемый нанимателями
	помещений)       	квартир за их счет)  
	1	2           	3        	4           

	    Члены комиссии                           (подписи)

	Приложение 2

	Управление домами (ЖЭК) N _______

	__________________________ района

	гор. ____________________________

	                                  ЗАДАНИЕ

	            квартиросъемщику (ответственному лицу по квартире)

	квартиры N ___________ дома N _______________ по ул.
	______________________

	гр-ну ____________________ на выполнение ремонта занимаемого им
	помещения.

	    На основании осмотра квартиры от "__" _________________________
	19__ г.

	Вам надлежит в течение ____________ квартала 19__ года произвести
	следующий

	внутриквартирный ремонт:

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	___________________________________________________________________________

	___________________________________________________________________________

	___________________________________________________________________________

	    О    выполнении   ремонта   сообщите    в   управление   домами  
	(ЖЭК)

	технику
	___________________________________________________________________

	    Задание выдал техник ________________________

	    Член домового комитета ______________________

	    Задание принял квартиросъемщик (или  ответственное  лицо  по 
	квартире)

	__________ (подпись), дата ______________ 19__ год.

	    Задание на ремонт выполнено ______________ мес. 19__ год.

	                    Техник ___________________

	Оборотная сторона Приложения 2

	Выписка из Правил

	пользования жилым помещением,

	утвержденных Постановлением

	Совета Министров РСФСР

	от 18 октября 1962 г. N 1390

	...13. Наниматели жилых помещений обязаны производить за свой счет текущий ремонт
	занимаемых ими жилых помещений и мест общего пользования в квартирах.

	К текущему ремонту жилых помещений и мест общего пользования относятся следующие
	работы: побелка потолков, окраска стен или оклейка обоями, окраска полов и дверей, оконных
	переплетов с внутренней стороны, окраска подоконников, вставка стекол, замена оконных и дверных
	приборов, ремонт электропроводки от ввода в квартиру.

	15. Повреждения квартиры и домового оборудования, происшедшие по вине жильцов,
	исправляются ими или управлением домами за счет виновных.

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	* * *

	При ремонте мест общего пользования расходы распределяются между всеми съемщиками
	квартиры по количеству жильцов, включая детей и временных жильцов.

	Необходимую техническую консультацию по вопросам ремонта помещений Вы можете
	получить в управлении домами (ЖЭК).

	* * *

	По Вашему заказу ремонт квартиры может быть выполнен участком по ремонту квартир для
	населения, который расположен по ______________________________ ул., дом N _________ телефон
	N _______________.

	Приложение 3

	Управление домами (ЖЭК) N ___________

	______________________________ района

	гор. ________________________________

	                      ЖУРНАЛ ЗАЯВОК ЖИЛЬЦОВ НА РЕМОНТ

	Технический участок __________________________________________

	Начат ________________________________________________ 19__ г.

	Окончен ______________________________________________ 19__ г.

	                                                     Наименование
	профессии

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	N	Адрес и	Дата	Краткое 	В какое	Кому и к какому 	Дата   
	п/п	фамилия	заявки	содержание	время 	сроку поручено  	выполнения
	заявителя	заявки 	можно 	выполнение работ 	заявки и 
	застать	или подлежит   	отметка 
	жильцов в	включению в план 	техника об
	квартире	профилактического	исполнении
	текущего ремонта 
	1	2   	3  	4    	5   	6        	7    

	Приложение 4

	НОРМЫ ЗАТРАТ ТРУДА НА ПРОВЕДЕНИЕ ПЕРИОДИЧЕСКИХ ОСМОТРОВ ДЛЯ РАБОЧИХ
	УПРАВЛЕНИЯ ДОМАМИ (ЖЭК)

	----T---------------------T-----------T-----------T---------T--------
	-----¬

	¦	 N 	¦	   Конструктивные    	¦	 Профессия 	¦	  Единица  	¦	Расчетное	¦	Норма
	времени	¦

	¦	п/п	¦	      элементы,      	¦	  рабочих  	¦	 измерения 	¦	 кол-во  	¦	 на
	единицу  	¦

	¦	   	¦	  отделка, домовое   	¦	           	¦	           	¦	осмотров 	¦
	измерения в 	¦

	¦	   	¦	    оборудование     	¦	           	¦	           	¦	  в год  	¦	 
	чел./час.  	¦

	¦	   	¦	                     	¦	           	¦	           	¦	         	+------T-
	-----+

	¦	   	¦	                     	¦	           	¦	           	¦	         	¦	 на 1
	¦	на год	¦

	¦	   	¦	                     	¦	           	¦	           	¦	        
	¦	осмотр	¦	      	¦

	+---+---------------------+-----------+-----------+---------+------+-
	-----+

	¦	 1 	¦	          2          	¦	     3     	¦	     4     	¦	    5    	¦	  6   	¦	 

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	7   	¦

	+---+---------------------+-----------+-----------+---------+------+-
	-----+

	¦	1  	¦	Кровля               	¦	кровельщик 	¦	1000 кв. м 	¦	6        	¦	3    
	¦	18    	¦

	¦	   	¦	                     	¦	           	¦	кровли     	¦	         	¦	     
	¦	      	¦

	¦	2  	¦	Деревянные           	¦	плотник-   	¦	1000 кв. м 	¦	2        	¦	7    
	¦	14    	¦

	¦	   	¦	конструкции          	¦	столяр     	¦	приведенной	¦	         	¦	     
	¦	      	¦

	¦	   	¦	                     	¦	           	¦	жилой      	¦	         	¦	     
	¦	      	¦

	¦	   	¦	                     	¦	           	¦	площади    	¦	         	¦	     
	¦	      	¦

	¦	3  	¦	Внутренняя и наружная	¦	штукатур-  	¦	-"-        	¦	2        	¦	7    
	¦	14    	¦

	¦	   	¦	отделка стен         	¦	маляр      	¦	           	¦	         	¦	     
	¦	      	¦

	¦	   	¦	(штукатурка, окраска 	¦	           	¦	           	¦	         	¦	     
	¦	      	¦

	¦	   	¦	и другая отделка)    	¦	           	¦	           	¦	         	¦	     
	¦	      	¦

	¦	4  	¦	Каменные конструкции 	¦	каменщик   	¦	-"-        	¦	2        	¦	3,5  
	¦	7     	¦

	¦	5  	¦	Печи, дымоходы и     	¦	           	¦	           	¦	         	¦	     
	¦	      	¦

	¦	   	¦	вентиляция           	¦	           	¦	           	¦	         	¦	     
	¦	      	¦

	¦	   	¦	а) печи, топки       	¦	печник-    	¦	печь       	¦	2        	¦	0,5  
	¦	1     	¦

	¦	   	¦	котлов, борова,      	¦	каменщик   	¦	(котел)    	¦	         	¦	     
	¦	      	¦

	¦	   	¦	дымоходы             	¦	           	¦	           	¦	         	¦	     
	¦	      	¦

	¦	   	¦	б) вентиляционные    	¦	-"-        	¦	1000 кв. м 	¦	1        	¦	4    
	¦	4     	¦

	¦	   	¦	каналы и устройства  	¦	           	¦	приведенной	¦	         	¦	     
	¦	      	¦

	¦	   	¦	                     	¦	           	¦	жилой      	¦	         	¦	     

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	¦	      	¦

	¦	   	¦	                     	¦	           	¦	площади    	¦	         	¦	     
	¦	      	¦

	¦	   	¦	в) системы каналов,  	¦	-"-        	¦	газоход    	¦	4        	¦	1    
	¦	4     	¦

	¦	   	¦	газоходов от всех    	¦	           	¦	           	¦	         	¦	     
	¦	      	¦

	¦	   	¦	приборов и котлов    	¦	           	¦	           	¦	         	¦	     
	¦	      	¦

	¦	   	¦	(газоходы и оголовки)	¦	           	¦	           	¦	         	¦	     
	¦	      	¦

	¦	6  	¦	Водопровод, канализа-	¦	слесарь-   	¦	100 квартир	¦	6        	¦	60   
	¦	360   	¦

	¦	   	¦	ция и горячее        	¦	сантехник  	¦	(приведен- 	¦	         	¦	     
	¦	      	¦

	¦	   	¦	водоснабжение (обору-	¦	           	¦	ных)       	¦	         	¦	     
	¦	      	¦

	¦	   	¦	дование в квартирах, 	¦	           	¦	           	¦	         	¦	     
	¦	      	¦

	¦	   	¦	санузлах и нежилых   	¦	           	¦	           	¦	         	¦	     
	¦	      	¦

	¦	   	¦	помещениях, в том    	¦	           	¦	           	¦	         	¦	     
	¦	      	¦

	¦	   	¦	числе арматура и     	¦	           	¦	           	¦	         	¦	     
	¦	      	¦

	¦	   	¦	приборы)             	¦	           	¦	           	¦	         	¦	     
	¦	      	¦

	¦	7  	¦	Центральное отопление	¦	           	¦	           	¦	         	¦	     
	¦	      	¦

	¦	   	¦	а) внутриквартирные  	¦	-"-        	¦	1000 кв. м 	¦	2        	¦	10   
	¦	20    	¦

	¦	   	¦	устройства           	¦	           	¦	жилой при- 	¦	         	¦	     
	¦	      	¦

	¦	   	¦	                     	¦	           	¦	веденной   	¦	         	¦	     
	¦	      	¦

	¦	   	¦	                     	¦	           	¦	площади    	¦	         	¦	     
	¦	      	¦

	¦	   	¦	б) устройства в      	¦	слесарь-   	¦	1000 кв. м 	¦	6        	¦	4    
	¦	24    	¦

	¦	   	¦	чердачных и          	¦	сантехник  	¦	осматривае-	¦	         	¦	     

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	¦	      	¦

	¦	   	¦	подвальных помещениях	¦	           	¦	мых помещ. 	¦	         	¦	     
	¦	      	¦

	¦	   	¦	в) котлы и котельное 	¦	-"-        	¦	котел      	¦	6        	¦	1    
	¦	6     	¦

	¦	   	¦	оборудование (в      	¦	           	¦	           	¦	         	¦	     
	¦	      	¦

	¦	   	¦	отопительный сезон)  	¦	           	¦	           	¦	         	¦	     
	¦	      	¦

	¦	   	¦	г) вводы, тепловые и 	¦	-"-        	¦	элеваторный	¦	6        	¦	1    
	¦	6     	¦

	¦	   	¦	элеваторные узлы (в  	¦	           	¦	узел       	¦	         	¦	     
	¦	      	¦

	¦	   	¦	отопительный сезон)  	¦	           	¦	           	¦	         	¦	     
	¦	      	¦

	¦	8  	¦	Мусоропроводы (все   	¦	рабочий    	¦	мусоропро- 	¦	24       	¦	1    
	¦	24    	¦

	¦	   	¦	устройства)          	¦	мусорокамер	¦	вод        	¦	         	¦	     
	¦	      	¦

	¦	   	¦	                     	¦	и слесарь- 	¦	           	¦	         	¦	     
	¦	      	¦

	¦	   	¦	                     	¦	сантехник  	¦	           	¦	         	¦	     
	¦	      	¦

	¦	9  	¦	Электросети, арматура	¦	           	¦	           	¦	         	¦	     
	¦	      	¦

	¦	   	¦	и электрооборудование	¦	           	¦	           	¦	         	¦	     
	¦	      	¦

	¦	   	¦	в квартирах:         	¦	           	¦	           	¦	         	¦	     
	¦	      	¦

	¦	   	¦	а) каменных зданий   	¦	электро-   	¦	1000 кв. м 	¦	1        	¦	8    
	¦	8     	¦

	¦	   	¦	                     	¦	монтер     	¦	жилой      	¦	         	¦	     
	¦	      	¦

	¦	   	¦	б) деревянных и      	¦	-"-        	¦	площади    	¦	2        	¦	8    
	¦	16    	¦

	¦	   	¦	смешанных зданий     	¦	           	¦	(приведен- 	¦	         	¦	     
	¦	      	¦

	¦	   	¦	                     	¦	           	¦	ной)       	¦	         	¦	     
	¦	      	¦

	¦	   	¦	То же, на лестничных 	¦	-"-        	¦	100        	¦	12       	¦	9    

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	¦	108   	¦

	¦	   	¦	клетках              	¦	           	¦	лестничных 	¦	         	¦	     
	¦	      	¦

	¦	   	¦	                     	¦	           	¦	площадок   	¦	         	¦	     
	¦	      	¦

	¦	   	¦	То же, на чердаках и 	¦	электро-   	¦	1000 кв. м 	¦	12       	¦	2    
	¦	24    	¦

	¦	   	¦	в подвалах           	¦	монтер     	¦	площади    	¦	         	¦	     
	¦	      	¦

	¦	   	¦	                     	¦	           	¦	осматривае-	¦	         	¦	     
	¦	      	¦

	¦	   	¦	                     	¦	           	¦	мых        	¦	         	¦	     
	¦	      	¦

	¦	   	¦	                     	¦	           	¦	помещений  	¦	         	¦	     
	¦	      	¦

	¦	   	¦	Ввод, щитовая,       	¦	-"-        	¦	здание     	¦	12       	¦	2    
	¦	24    	¦

	¦	   	¦	наружная проводка и  	¦	           	¦	           	¦	         	¦	     
	¦	      	¦

	¦	   	¦	арматура             	¦	           	¦	           	¦	         	¦	     
	¦	      	¦

	¦	   	¦	Силовые установки    	¦	-"-        	¦	мотор      	¦	24       	¦	0,5  
	¦	12    	¦

	¦	10 	¦	Радио и              	¦	           	¦	           	¦	         	¦	     
	¦	      	¦

	¦	   	¦	телеустройства       	¦	           	¦	           	¦	         	¦	     
	¦	      	¦

	¦	   	¦	а) на кровлях        	¦	-"-        	¦	система    	¦	12       	¦	0,5  
	¦	6     	¦

	¦	   	¦	                     	¦	           	¦	радио      	¦	         	¦	     
	¦	      	¦

	¦	   	¦	                     	¦	           	¦	(теле-     	¦	         	¦	     
	¦	      	¦

	¦	   	¦	                     	¦	           	¦	устройств) 	¦	         	¦	     
	¦	      	¦

	¦	   	¦	б) на чердаках и     	¦	-"-        	¦	-"-        	¦	4        	¦	1    
	¦	4     	¦

	¦	   	¦	лестничных клетках   	¦	           	¦	           	¦	         	¦	     
	¦	      	¦

	L---+---------------------+-----------+-----------+---------+------+-

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	------

	Примечания: 1. В процессе осмотров исправляются мелкие дефекты конструкций и
	оборудования.

	2. В городах, где имеются специализированные службы обслуживания, технический осмотр
	дымоходов, вентиляционных каналов и устройств, систем каналов-газоходов производится
	трубочистными цехами пожарного надзора, а радио и телеустройства - соответствующими ателье
	согласно договорам на техническое обслуживание жилищно-эксплуатационных организаций.

	Приложение 5

	Управление домами (ЖЭК) N ________

	___________________________ района

	гор. _____________________________

	                                  КАРТА N ______

	        обхода квартир и осмотра конструкций и оборудования в жилых

	   зданиях технического участка N _______ на ____________ месяц 19__
	год

	Фамилия рабочего и профессия           Всего часов по нормам затрат
	труда

	                                       на проведение периодических
	осмотров

	____________________________          
	____________________________________

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	N	Дата 	Адрес дома, N 	Работы, 	Работы,  	Подпись    
	п/п	осмотра	квартир и   	выполненные	подлежащие 	квартиросъемщика
	наименование 	при осмотре	выполнению 	(ответственного
	других объектов	дополнительно	лица по квартире)
	осмотра    	или техника  
	1	2  	3       	4    	5     	6       

	      Техник                          (подпись)

	      Рабочий                         (подпись)

	Дата ___________________

	Приложение 5а

	ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ, ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОЧИМИ ВО ВРЕМЯ ОБХОДОВ И ОСМОТРОВ

	Кровельщик.

	Промазывает суриковой замазкой гребни и свищи в местах протечек, выявленных при осмотре.

	Печник.

	1. Проверяет наличие тяги в дымовых и вентиляционных каналах.

	2. Проверяет состояние отопительных приборов, патрубков, дымовых труб и вентиляционных
	каналов.

	3. Производит мелкий ремонт печей и очагов (укрепление дверец, предтопочных листов и т.п.).

	Слесарь по центральному отоплению.

	1. Устраняет течи в кранах и муфтовых соединениях.

	2. Производит (при надобности) набивку сальников.

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	3. Регулирует систему центрального отопления.

	Слесарь-водопроводчик.

	1. Устраняет причины утечек воды в кранах и санузлах.

	2. Выполняет мелкий ремонт оборудования, который может быть выполнен в течение времени,
	отведенного на осмотр (15 - 20 минут).

	Электромонтер.

	1. Протирает электролампочки, электроарматуру и электрооборудование, меняет перегоревшие
	лампочки.

	2. Производит мелкий ремонт электропроводки, розеток, выключателей и др., который может
	быть выполнен в течение времени, отведенного на осмотр.

	Приложение 6

	УТВЕРЖДАЮ:

	                                                         Главный
	инженер

	                                                      "__" ________
	19__ г.

	Управление домами (ЖЭК) N _______

	__________________________ района

	гор. ____________________________

	                           ОПИСЬ РАБОТ N ______

	      по профилактическому текущему ремонту по дому N ____ (строение)

	      по ул. ______________________________ жилая площадь _____ кв. м

	¦	Шифр	¦	     Наименование      	¦	Единица	¦	Объем	¦	 В том числе 	¦	 Норма 

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	¦	Всего   	¦	Наиме- 	¦	Единица	¦	Норма  	¦	Потреб- 	¦

	¦	 по 	¦	    конструктивных     	¦	измер. 	¦	работ	+------T------+	времени
	¦	челове- 	¦	нование	¦	измер. 	¦	расхода	¦	ность   	¦

	¦	СУНу	¦	элементов и видов работ	¦	       	¦	     	¦	под-  	¦	своими	¦	на
	един.	¦	ко-часов	¦	матери-	¦	       	¦	матери-	¦	в мате- 	¦

	¦	    	¦	                       	¦	       	¦	     	¦	рядным	¦	силами	¦	работ
	(в	¦	(гр. 6 х	¦	алов   	¦	       	¦	алов на	¦	риалах  	¦

	¦	    	¦	                       	¦	       	¦	     	¦	спосо-	¦	      	¦	 часах)
	¦	гр. 7)  	¦	       	¦	       	¦	единицу	¦	(гр. 6 х	¦

	¦	    	¦	                       	¦	       	¦	     	¦	бом   	¦	      	¦	       
	¦	        	¦	       	¦	       	¦	       	¦	гр. 11) 	¦

	¦	 1  	¦	           2           	¦	   3   	¦	  4  	¦	  5   	¦	  6   	¦	   7    	¦	  
	8    	¦	   9   	¦	  10   	¦	  11   	¦	   12   	¦

	¦	    	¦	I. Фундаменты          	¦	       	¦	     	¦	      	¦	      	¦	       
	¦	        	¦	       	¦	       	¦	       	¦	        	¦

	¦	    	¦	1. ...                 	¦	       	¦	     	¦	      	¦	      	¦	       
	¦	        	¦	       	¦	       	¦	       	¦	        	¦

	¦	    	¦	2. ... и т.д.          	¦	       	¦	     	¦	      	¦	      	¦	       
	¦	        	¦	       	¦	       	¦	       	¦	        	¦

	¦	    	¦	II. Стены и перегородки	¦	       	¦	     	¦	      	¦	      	¦	       
	¦	        	¦	       	¦	       	¦	       	¦	        	¦

	¦	    	¦	1. ...                 	¦	       	¦	     	¦	      	¦	      	¦	       
	¦	        	¦	       	¦	       	¦	       	¦	        	¦

	¦	    	¦	2. ... и т.д.          	¦	       	¦	     	¦	      	¦	      	¦	       
	¦	        	¦	       	¦	       	¦	       	¦	        	¦

	¦	    	¦	III. Перекрытия        	¦	       	¦	     	¦	      	¦	      	¦	       
	¦	        	¦	       	¦	       	¦	       	¦	        	¦

	¦	    	¦	1. ...                 	¦	       	¦	     	¦	      	¦	      	¦	       
	¦	        	¦	       	¦	       	¦	       	¦	        	¦

	¦	    	¦	2. ... и т.д.          	¦	       	¦	     	¦	      	¦	      	¦	       
	¦	        	¦	       	¦	       	¦	       	¦	        	¦

	¦	    	¦	IV. Крыша              	¦	       	¦	     	¦	      	¦	      	¦	       
	¦	        	¦	       	¦	       	¦	       	¦	        	¦

	¦	    	¦	1. ...                 	¦	       	¦	     	¦	      	¦	      	¦	       
	¦	        	¦	       	¦	       	¦	       	¦	        	¦

	¦	    	¦	2. ... и т.д.          	¦	       	¦	     	¦	      	¦	      	¦	       
	¦	        	¦	       	¦	       	¦	       	¦	        	¦

	¦	    	¦	V. Полы                	¦	       	¦	     	¦	      	¦	      	¦	       
	¦	        	¦	       	¦	       	¦	       	¦	        	¦

	¦	    	¦	1. ...                 	¦	       	¦	     	¦	      	¦	      	¦	       

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	¦	        	¦	       	¦	       	¦	       	¦	        	¦

	¦	    	¦	2. ... и т.д.          	¦	       	¦	     	¦	      	¦	      	¦	       
	¦	        	¦	       	¦	       	¦	       	¦	        	¦

	¦	    	¦	VI. Проемы             	¦	       	¦	     	¦	      	¦	      	¦	       
	¦	        	¦	       	¦	       	¦	       	¦	        	¦

	¦	    	¦	1. ...                 	¦	       	¦	     	¦	      	¦	      	¦	       
	¦	        	¦	       	¦	       	¦	       	¦	        	¦

	¦	    	¦	2. ... и т.д.          	¦	       	¦	     	¦	      	¦	      	¦	       
	¦	        	¦	       	¦	       	¦	       	¦	        	¦

	¦	    	¦	VII. Отделочные работы 	¦	       	¦	     	¦	      	¦	      	¦	       
	¦	        	¦	       	¦	       	¦	       	¦	        	¦

	¦	    	¦	1. ...                 	¦	       	¦	     	¦	      	¦	      	¦	       
	¦	        	¦	       	¦	       	¦	       	¦	        	¦

	¦	    	¦	2. ... и т.д.          	¦	       	¦	     	¦	      	¦	      	¦	       
	¦	        	¦	       	¦	       	¦	       	¦	        	¦

	¦	    	¦	VIII. Санитарно-       	¦	       	¦	     	¦	      	¦	      	¦	       
	¦	        	¦	       	¦	       	¦	       	¦	        	¦

	¦	    	¦	электротехнические     	¦	       	¦	     	¦	      	¦	      	¦	       
	¦	        	¦	       	¦	       	¦	       	¦	        	¦

	¦	    	¦	работы                 	¦	       	¦	     	¦	      	¦	      	¦	       
	¦	        	¦	       	¦	       	¦	       	¦	        	¦

	¦	    	¦	1. ...                 	¦	       	¦	     	¦	      	¦	      	¦	       
	¦	        	¦	       	¦	       	¦	       	¦	        	¦

	¦	    	¦	2. ... и т. д.         	¦	       	¦	     	¦	      	¦	      	¦	       
	¦	        	¦	       	¦	       	¦	       	¦	        	¦

	¦	    	¦	IX. Разные работы      	¦	       	¦	     	¦	      	¦	      	¦	       
	¦	        	¦	       	¦	       	¦	       	¦	        	¦

	¦	    	¦	1. ...                 	¦	       	¦	     	¦	      	¦	      	¦	       
	¦	        	¦	       	¦	       	¦	       	¦	        	¦

	¦	    	¦	2. ... и т. д.         	¦	       	¦	     	¦	      	¦	      	¦	       
	¦	        	¦	       	¦	       	¦	       	¦	        	¦

	¦	    	+-----------------------+-------+-----+------+------+--------+--
	------+-------+-------+-------+--------+

	¦	    	¦	Итого                  	¦	       	¦	     	¦	      	¦	      	¦	       
	¦	        	¦	       	¦	       	¦	       	¦	        	¦

	Техник

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	К Приложению 6

	                     ВЫБОРКА ТРУДОЗАТРАТ И МАТЕРИАЛОВ

	                           К ОПИСИ РАБОТ N _____

	Трудозатраты по работам, выполняемым      Выборка основных материалов
	по

	         собственными силами              работам, выполняемым
	собственными

	                                                      силами

	-------------------T------------------¬	  	----------------T--------T--
	-----¬

	¦	   Наименование   	¦	  Человеко-часов  	¦	  	¦	 Наименование  	¦	 Един.  	¦
	К-во  	¦

	¦	    профессий     	¦	                  	¦	  	¦	  материалов   	¦	  изм. 
	¦	       	¦

	+------------------+------------------+	  	+---------------+--------+--
	-----+

	¦	        1         	¦	        2         	¦	  	¦	       1       	¦	   2    	¦	  
	3   	¦

	+------------------+------------------+	  	+---------------+--------+--
	-----+

	¦	Кровельщики-      	¦	                  	¦	  	¦	-              	¦	       
	¦	       	¦

	¦	жестянщики        	¦	                  	¦	  	¦	               	¦	       
	¦	       	¦

	+------------------+------------------+	  	+---------------+--------+--
	-----+

	¦	Плотники-столяры  	¦	                  	¦	  	¦	-              	¦	       
	¦	       	¦

	+------------------+------------------+	  	+---------------+--------+--
	-----+

	¦	Штукатуры-маляры  	¦	                  	¦	  	¦	-              	¦	       
	¦	       	¦

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	+------------------+------------------+	  	+---------------+--------+--
	-----+

	¦	Каменщики-печники 	¦	                  	¦	  	¦	-              	¦	       
	¦	       	¦

	+------------------+------------------+	  	+---------------+--------+--
	-----+

	¦	Слесари-сантехники	¦	                  	¦	  	¦	-              	¦	       
	¦	       	¦

	+------------------+------------------+	  	+---------------+--------+--
	-----+

	¦	Слесари-электро-  	¦	                  	¦	  	¦	-              	¦	       
	¦	       	¦

	¦	монтеры           	¦	                  	¦	  	¦	               	¦	       
	¦	       	¦

	+------------------+------------------+	  	+---------------+--------+--
	-----+

	¦	Другие профессии  	¦	                  	¦	  	¦	-              	¦	       
	¦	       	¦

	+------------------+------------------+	  	+---------------+--------+--
	-----+

	¦	Итого             	¦	                  	¦	  	¦	Итого          	¦	       
	¦	       	¦

	L------------------+-------------------	  	L---------------+--------+--
	------

	                         Техник

	Приложение 7

	                                                   УТВЕРЖДАЮ:

	                                                Главный инженер

	                                             "__" ________ 19__ г.

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	Управление домами (ЖЭК) N _______

	__________________________ района

	гор. ____________________________

	                      ОПИСЬ РАБОТ N ______

	      по текущему ремонту малоценного (ветхого) дома N ____

	      по улице ____________________________________________

	---------T---------------------------T------------T--------------¬

	¦	Шифр по 	¦	Наименование конструктивных	¦	  Единица   	¦	 Объем работ  	¦

	¦	  СУНу  	¦	  элементов и видов работ  	¦	 измерения  	¦	              	¦

	+--------+---------------------------+------------+--------------+

	¦	   1    	¦	             2             	¦	     3      	¦	      4       	¦

	+--------+---------------------------+------------+--------------+

	¦	        	¦	I. Фундаменты              	¦	            	¦	              	¦

	¦	        	¦	1. ...                     	¦	            	¦	              	¦

	¦	        	¦	2. ... и т.д.              	¦	            	¦	              	¦

	¦	        	¦	II. Стены и перегородки    	¦	            	¦	              	¦

	¦	        	¦	1. ...                     	¦	            	¦	              	¦

	¦	        	¦	2. ... и т.д.              	¦	            	¦	              	¦

	¦	        	¦	III. Перекрытия            	¦	            	¦	              	¦

	¦	        	¦	1. ...                     	¦	            	¦	              	¦

	¦	        	¦	2. ... и т.д.              	¦	            	¦	              	¦

	¦	        	¦	IV. Крыша                  	¦	            	¦	              	¦

	¦	        	¦	1. ...                     	¦	            	¦	              	¦

	¦	        	¦	2. ... и т.д.              	¦	            	¦	              	¦

	¦	        	¦	V. Полы                    	¦	            	¦	              	¦

	¦	        	¦	1. ...                     	¦	            	¦	              	¦

	¦	        	¦	2. ... и т.д.              	¦	            	¦	              	¦

	¦	        	¦	VI. Проемы                 	¦	            	¦	              	¦

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	¦	        	¦	1. ...                     	¦	            	¦	              	¦

	¦	        	¦	2. ... и т.д.              	¦	            	¦	              	¦

	¦	        	¦	VII. Отделочные работы     	¦	            	¦	              	¦

	¦	        	¦	1. ...                     	¦	            	¦	              	¦

	¦	        	¦	2. ... и т.д.              	¦	            	¦	              	¦

	¦	        	¦	VIII. Санитарно-электро-   	¦	            	¦	              	¦

	¦	        	¦	технические работы         	¦	            	¦	              	¦

	¦	        	¦	1. ...                     	¦	            	¦	              	¦

	¦	        	¦	2. ... и т.д.              	¦	            	¦	              	¦

	¦	        	¦	IX. Разные работы          	¦	            	¦	              	¦

	¦	        	¦	1. ...                     	¦	            	¦	              	¦

	¦	        	¦	2. ... и т.д.              	¦	            	¦	              	¦

	¦	        	+---------------------------+------------+--------------+

	¦	        	¦	Итого                      	¦	            	¦	              	¦

	L--------+---------------------------+------------+---------------

	Техник

	Приложение 8

	УТВЕРЖДАЮ:

	                                                         Главный
	инженер

	                                                      "__" ________
	19__ г.

	Управление домами (ЖЭК) N _______

	__________________________ района

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	гор. ____________________________

	                               СВОДНАЯ ОПИСЬ

	               по текущему ремонту малоценных (ветхих) домов

	                         и домов, подлежащих сносу

	¦	Шифр	¦	     Наименование      	¦	Единица	¦	Объем	¦	 В том числе 	¦	 Норма 
	¦	Всего   	¦	Наиме- 	¦	Единица	¦	Норма рас-	¦	Потреб- 	¦

	¦	 по 	¦	    конструктивных     	¦	измер. 	¦	работ	+------T------+	времени
	¦	челове- 	¦	нование	¦	  изм. 	¦	хода мате-	¦	ность   	¦

	¦	СУНу	¦	элементов и видов работ	¦	       	¦	     	¦	под-  	¦	своими	¦	на
	един.	¦	ко-часов	¦	матери-	¦	       	¦	риалов на 	¦	в мате- 	¦

	¦	    	¦	                       	¦	       	¦	     	¦	рядным	¦	силами	¦	работ
	(в	¦	(гр. 6 х	¦	алов   	¦	       	¦	единицу   	¦	риалах  	¦

	¦	    	¦	                       	¦	       	¦	     	¦	спосо-	¦	      	¦	 часах)
	¦	гр. 7)  	¦	       	¦	       	¦	          	¦	(гр. 6 х	¦

	¦	    	¦	                       	¦	       	¦	     	¦	бом   	¦	      	¦	       
	¦	        	¦	       	¦	       	¦	          	¦	гр. 11) 	¦

	¦	 1  	¦	           2           	¦	   3   	¦	  4  	¦	  5   	¦	  6   	¦	   7    	¦	  
	8    	¦	   9   	¦	  10   	¦	    11    	¦	   12   	¦

	¦	    	¦	I. Фундаменты          	¦	       	¦	     	¦	      	¦	      	¦	       
	¦	        	¦	       	¦	       	¦	          	¦	        	¦

	¦	    	¦	1. ...                 	¦	       	¦	     	¦	      	¦	      	¦	       
	¦	        	¦	       	¦	       	¦	          	¦	        	¦

	¦	    	¦	2. ... и т.д.          	¦	       	¦	     	¦	      	¦	      	¦	       
	¦	        	¦	       	¦	       	¦	          	¦	        	¦

	¦	    	¦	II. Стены и перегородки	¦	       	¦	     	¦	      	¦	      	¦	       
	¦	        	¦	       	¦	       	¦	          	¦	        	¦

	¦	    	¦	1. ...                 	¦	       	¦	     	¦	      	¦	      	¦	       
	¦	        	¦	       	¦	       	¦	          	¦	        	¦

	¦	    	¦	2. ... и т.д.          	¦	       	¦	     	¦	      	¦	      	¦	       
	¦	        	¦	       	¦	       	¦	          	¦	        	¦

	¦	    	¦	III. Перекрытия        	¦	       	¦	     	¦	      	¦	      	¦	       
	¦	        	¦	       	¦	       	¦	          	¦	        	¦

	¦	    	¦	1. ...                 	¦	       	¦	     	¦	      	¦	      	¦	       
	¦	        	¦	       	¦	       	¦	          	¦	        	¦

	¦	    	¦	2. ... и т.д.          	¦	       	¦	     	¦	      	¦	      	¦	       
	¦	        	¦	       	¦	       	¦	          	¦	        	¦

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	¦	    	¦	IV. Крыша              	¦	       	¦	     	¦	      	¦	      	¦	       
	¦	        	¦	       	¦	       	¦	          	¦	        	¦

	¦	    	¦	1. ...                 	¦	       	¦	     	¦	      	¦	      	¦	       
	¦	        	¦	       	¦	       	¦	          	¦	        	¦

	¦	    	¦	2. ... и т.д.          	¦	       	¦	     	¦	      	¦	      	¦	       
	¦	        	¦	       	¦	       	¦	          	¦	        	¦

	¦	    	¦	V. Полы                	¦	       	¦	     	¦	      	¦	      	¦	       
	¦	        	¦	       	¦	       	¦	          	¦	        	¦

	¦	    	¦	1. ...                 	¦	       	¦	     	¦	      	¦	      	¦	       
	¦	        	¦	       	¦	       	¦	          	¦	        	¦

	¦	    	¦	2. ... и т.д.          	¦	       	¦	     	¦	      	¦	      	¦	       
	¦	        	¦	       	¦	       	¦	          	¦	        	¦

	¦	    	¦	VI. Проемы             	¦	       	¦	     	¦	      	¦	      	¦	       
	¦	        	¦	       	¦	       	¦	          	¦	        	¦

	¦	    	¦	1. ...                 	¦	       	¦	     	¦	      	¦	      	¦	       
	¦	        	¦	       	¦	       	¦	          	¦	        	¦

	¦	    	¦	2. ... и т.д.          	¦	       	¦	     	¦	      	¦	      	¦	       
	¦	        	¦	       	¦	       	¦	          	¦	        	¦

	¦	    	¦	VII. Отделочные работы 	¦	       	¦	     	¦	      	¦	      	¦	       
	¦	        	¦	       	¦	       	¦	          	¦	        	¦

	¦	    	¦	1. ...                 	¦	       	¦	     	¦	      	¦	      	¦	       
	¦	        	¦	       	¦	       	¦	          	¦	        	¦

	¦	    	¦	2. ... и т.д.          	¦	       	¦	     	¦	      	¦	      	¦	       
	¦	        	¦	       	¦	       	¦	          	¦	        	¦

	¦	    	¦	VIII. Санитарно-       	¦	       	¦	     	¦	      	¦	      	¦	       
	¦	        	¦	       	¦	       	¦	          	¦	        	¦

	¦	    	¦	электротехнические     	¦	       	¦	     	¦	      	¦	      	¦	       
	¦	        	¦	       	¦	       	¦	          	¦	        	¦

	¦	    	¦	работы                 	¦	       	¦	     	¦	      	¦	      	¦	       
	¦	        	¦	       	¦	       	¦	          	¦	        	¦

	¦	    	¦	1. ...                 	¦	       	¦	     	¦	      	¦	      	¦	       
	¦	        	¦	       	¦	       	¦	          	¦	        	¦

	¦	    	¦	2. ... и т.д.          	¦	       	¦	     	¦	      	¦	      	¦	       
	¦	        	¦	       	¦	       	¦	          	¦	        	¦

	¦	    	¦	IX. Разные работы      	¦	       	¦	     	¦	      	¦	      	¦	       
	¦	        	¦	       	¦	       	¦	          	¦	        	¦

	¦	    	¦	1. ...                 	¦	       	¦	     	¦	      	¦	      	¦	       
	¦	        	¦	       	¦	       	¦	          	¦	        	¦

	¦	    	¦	2. ... и т д.          	¦	       	¦	     	¦	      	¦	      	¦	       
	¦	        	¦	       	¦	       	¦	          	¦	        	¦

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	¦	   

	¦	    	¦	Итого                  	¦	       	¦	     	¦	      	¦	      	¦	       
	¦	        	¦	       	¦	       	¦	          	¦	        	¦

	Техник

	К Приложению 8

	             ВЫБОРКА ТРУДОЗАТРАТ И МАТЕРИАЛОВ К СВОДНОЙ ОПИСИ

	Трудозатраты по работам, выполняемым      Выборка основных материалов
	по

	         собственными силами              работам, выполняемым
	собственными

	                                                       силами

	-------------------T------------------¬	  	----------------T--------T--
	-----¬

	¦	   Наименование   	¦	  Человеко-часов  	¦	  	¦	 Наименование  	¦	   Ед.  	¦
	К-во  	¦

	¦	    профессий     	¦	                  	¦	  	¦	  материалов   	¦	  изм. 
	¦	       	¦

	+------------------+------------------+	  	+---------------+--------+--
	-----+

	¦	        1         	¦	        2         	¦	  	¦	       1       	¦	   2    	¦	  
	3   	¦

	+------------------+------------------+	  	+---------------+--------+--
	-----+

	¦	Кровельщики-      	¦	                  	¦	  	¦	-              	¦	       
	¦	       	¦

	¦	жестянщики        	¦	                  	¦	  	¦	               	¦	       
	¦	       	¦

	+------------------+------------------+	  	+---------------+--------+--

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	-----+

	¦	Плотники-столяры  	¦	                  	¦	  	¦	-              	¦	       
	¦	       	¦

	+------------------+------------------+	  	+---------------+--------+--
	-----+

	¦	Штукатуры-маляры  	¦	                  	¦	  	¦	-              	¦	       
	¦	       	¦

	+------------------+------------------+	  	+---------------+--------+--
	-----+

	¦	Каменщики-печники 	¦	                  	¦	  	¦	-              	¦	       
	¦	       	¦

	+------------------+------------------+	  	+---------------+--------+--
	-----+

	¦	Слесари-сантехники	¦	                  	¦	  	¦	-              	¦	       
	¦	       	¦

	+------------------+------------------+	  	+---------------+--------+--
	-----+

	¦	Слесари-электро-  	¦	                  	¦	  	¦	-              	¦	       
	¦	       	¦

	¦	монтеры           	¦	                  	¦	  	¦	               	¦	       
	¦	       	¦

	+------------------+------------------+	  	+---------------+--------+--
	-----+

	¦	Другие профессии  	¦	                  	¦	  	¦	-              	¦	       
	¦	       	¦

	+------------------+------------------+	  	+---------------+--------+--
	-----+

	¦	Итого             	¦	                  	¦	  	¦	Итого          	¦	       
	¦	       	¦

	L------------------+-------------------	  	L---------------+--------+--
	------

	                         Техник

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	Приложение 9

	Управление домами (ЖЭК) N ________

	___________________________ района

	гор. _____________________________

	         РАСЧЕТ НЕОБХОДИМОГО КОЛИЧЕСТВА НОРМО-ЧАСОВ НА ПРОВЕДЕНИЕ

	                    ПЕРИОДИЧЕСКИХ ОСМОТРОВ на 19__ год

	----T-----------------T---------T-------T----------T-----------T-----
	-----¬

	¦	 N 	¦	 Конструктивные  	¦	 Единица 	¦	 Нормы 	¦	Количество	¦	Потребное  	¦
	Рабочие  	¦

	¦	п/п	¦	элементы, домовое	¦	измерения	¦	времени	¦	обслужива-	¦	количество 	¦	 
	каких   	¦

	¦	   	¦	 оборудование и  	¦	         	¦	на год 	¦	емых еди- 	¦	нормо-
	часов	¦	профессий 	¦

	¦	   	¦	   виды работ    	¦	         	¦	(часы) 	¦	ниц (по   	¦	на периоди-
	¦	производят	¦

	¦	   	¦	                 	¦	         	¦	       	¦	данным    	¦	ческие     	¦	 
	осмотр  	¦

	¦	   	¦	                 	¦	         	¦	       	¦	техничес- 	¦	осмотры   
	¦	          	¦

	¦	   	¦	                 	¦	         	¦	       	¦	кого      	¦	(гр. 4 х  
	¦	          	¦

	¦	   	¦	                 	¦	         	¦	       	¦	паспорта  	¦	гр. 5)    
	¦	          	¦

	¦	   	¦	                 	¦	         	¦	       	¦	зданий)   	¦	          
	¦	          	¦

	+---+-----------------+---------+-------+----------+-----------+-----
	-----+

	¦	 1 	¦	        2        	¦	    3    	¦	   4   	¦	    5     	¦	     6     	¦	   
	7     	¦

	+---+-----------------+---------+-------+----------+-----------+-----
	-----+

	¦	   	¦	                 	¦	 Пример расчета  	¦	          	¦	          
	¦	          	¦

	¦	   	¦	                 	¦	                 	¦	          	¦	          

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	¦	          	¦

	¦	1  	¦	Кровли           	¦	1000 кв. 	¦	18     	¦	59,7      	¦	1075      
	¦	Кровельщик	¦

	¦	   	¦	                 	¦	м кровли 	¦	       	¦	          	¦	          
	¦	          	¦

	¦	2  	¦	Деревянные       	¦	1000     	¦	14     	¦	123,7     	¦	1732      
	¦	Плотник-  	¦

	¦	   	¦	конструкции      	¦	кв. м    	¦	       	¦	          	¦	          
	¦	столяр    	¦

	¦	   	¦	                 	¦	приведен-	¦	       	¦	          	¦	          
	¦	          	¦

	¦	   	¦	                 	¦	ной жилой	¦	       	¦	          	¦	          
	¦	          	¦

	¦	   	¦	                 	¦	площади  	¦	       	¦	          	¦	          
	¦	          	¦

	¦	3  	¦	Внутренняя и     	¦	-"-      	¦	14     	¦	123,7     	¦	1732      
	¦	Штукатур- 	¦

	¦	   	¦	наружная отделка 	¦	         	¦	       	¦	          	¦	          
	¦	маляр     	¦

	¦	   	¦	стен (штукатурка,	¦	         	¦	       	¦	          	¦	          
	¦	          	¦

	¦	   	¦	окраска и др.    	¦	         	¦	       	¦	          	¦	          
	¦	          	¦

	¦	   	¦	отделка)         	¦	         	¦	       	¦	          	¦	          
	¦	          	¦

	¦	4  	¦	Каменные         	¦	-"-      	¦	7      	¦	123,7     	¦	866       
	¦	Каменщик  	¦

	¦	   	¦	конструкции      	¦	         	¦	       	¦	          	¦	          
	¦	          	¦

	¦	5  	¦	Печи, дымоходы и 	¦	         	¦	       	¦	          	¦	          
	¦	          	¦

	¦	   	¦	вентиляция:      	¦	         	¦	       	¦	          	¦	          
	¦	          	¦

	¦	   	¦	а) печи, топки   	¦	котел,   	¦	1      	¦	810       	¦	810       
	¦	Печник    	¦

	¦	   	¦	котлов, борова и 	¦	печь     	¦	       	¦	          	¦	          
	¦	          	¦

	¦	   	¦	дымоходы         	¦	         	¦	       	¦	          	¦	          
	¦	          	¦

	¦	   	¦	б) вентиляционные	¦	1000 кв. 	¦	4      	¦	      Осмотр

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	производится        	¦

	¦	   	¦	каналы и         	¦	м жилой  	¦	       	¦	      
	специализированной        	¦

	¦	   	¦	устройства       	¦	площади  	¦	       	¦	    организацией по
	договорам    	¦

	¦	   	¦	в) системы       	¦	газоход  	¦	4      	¦	         -"-          	¦	-"-
	       	¦

	¦	   	¦	каналов-газоходов	¦	(5 - 9 м)	¦	       	¦	                     
	¦	          	¦

	¦	   	¦	от всех приборов 	¦	         	¦	       	¦	                     
	¦	          	¦

	¦	   	¦	и котлов (газохо-	¦	         	¦	       	¦	                     
	¦	          	¦

	¦	   	¦	ды и оголовки)   	¦	         	¦	       	¦	                     
	¦	          	¦

	¦	6  	¦	Водопровод,      	¦	100      	¦	360    	¦	32,84     	¦	11822     
	¦	Слесарь-  	¦

	¦	   	¦	канализация и    	¦	квартир  	¦	       	¦	          	¦	          
	¦	сантехник 	¦

	¦	   	¦	горячее          	¦	(приве-  	¦	       	¦	          	¦	          
	¦	          	¦

	¦	   	¦	водоснабжение    	¦	денных)  	¦	       	¦	          	¦	          
	¦	          	¦

	¦	   	¦	(оборудование в  	¦	         	¦	       	¦	          	¦	          
	¦	          	¦

	¦	   	¦	квартирах, сан-  	¦	         	¦	       	¦	          	¦	          
	¦	          	¦

	¦	   	¦	узлах и нежилых  	¦	         	¦	       	¦	          	¦	          
	¦	          	¦

	¦	   	¦	помещениях, в том	¦	         	¦	       	¦	          	¦	          
	¦	          	¦

	¦	   	¦	числе арматура и 	¦	         	¦	       	¦	          	¦	          
	¦	          	¦

	¦	   	¦	приборы)         	¦	         	¦	       	¦	          	¦	          
	¦	          	¦

	¦	7  	¦	Центральное      	¦	         	¦	       	¦	          	¦	          
	¦	          	¦

	¦	   	¦	отопление        	¦	         	¦	       	¦	          	¦	          
	¦	          	¦

	¦	   	¦	а) внутриквартир-	¦	1000     	¦	20     	¦	105,6     	¦	2112      

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	¦	Слесарь-  	¦

	¦	   	¦	ные устройства   	¦	кв. м    	¦	       	¦	          	¦	          
	¦	сантехник 	¦

	¦	   	¦	                 	¦	приведен-	¦	       	¦	          	¦	          
	¦	          	¦

	¦	   	¦	                 	¦	ной жилой	¦	       	¦	          	¦	          
	¦	          	¦

	¦	   	¦	                 	¦	площади  	¦	       	¦	          	¦	          
	¦	          	¦

	¦	   	¦	б) устройства в  	¦	1000 кв. 	¦	24     	¦	10,5      	¦	252        	¦	-"-
	       	¦

	¦	   	¦	чердачных и      	¦	м площади	¦	       	¦	          	¦	          
	¦	          	¦

	¦	   	¦	подвальных       	¦	осматри- 	¦	       	¦	          	¦	          
	¦	          	¦

	¦	   	¦	помещениях       	¦	ваемых   	¦	       	¦	          	¦	          
	¦	          	¦

	¦	   	¦	                 	¦	помещений	¦	       	¦	          	¦	          
	¦	          	¦

	¦	   	¦	в) котлы и       	¦	котел    	¦	6      	¦	5         	¦	30         	¦	-"-
	       	¦

	¦	   	¦	котельное        	¦	         	¦	       	¦	          	¦	          
	¦	          	¦

	¦	   	¦	оборудование     	¦	         	¦	       	¦	          	¦	          
	¦	          	¦

	¦	   	¦	г) вводы,        	¦	элеватор-	¦	6      	¦	8         	¦	48         	¦	-"-
	       	¦

	¦	   	¦	тепловые и       	¦	ный узел 	¦	       	¦	          	¦	          
	¦	          	¦

	¦	   	¦	элеваторные узлы 	¦	         	¦	       	¦	          	¦	          
	¦	          	¦

	¦	8  	¦	Мусоропроводы    	¦	мусоро-  	¦	24     	¦	 В данном примере
	мусоропроводов 	¦

	¦	   	¦	(все устройства) 	¦	провод   	¦	       	¦	             
	нет                	¦

	¦	9  	¦	Электросети,     	¦	         	¦	       	¦	          	¦	          
	¦	          	¦

	¦	   	¦	арматура и элект-	¦	         	¦	       	¦	          	¦	          
	¦	          	¦

	¦	   	¦	рооборудование в 	¦	         	¦	       	¦	          	¦	          

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	¦	          	¦

	¦	   	¦	квартирах        	¦	         	¦	       	¦	          	¦	          
	¦	          	¦

	¦	   	¦	а) каменных      	¦	1000 кв. 	¦	8      	¦	123,7     	¦	990       
	¦	Электро-  	¦

	¦	   	¦	зданий           	¦	м жилой  	¦	       	¦	          	¦	          
	¦	монтер    	¦

	¦	   	¦	                 	¦	площади  	¦	       	¦	          	¦	          
	¦	          	¦

	¦	   	¦	б) деревянных и  	¦	(приве-  	¦	16     	¦	2,8       	¦	45         	¦	-"-
	       	¦

	¦	   	¦	смешанных зданий 	¦	денной)  	¦	       	¦	          	¦	          
	¦	          	¦

	¦	   	¦	То же, на        	¦	100      	¦	108    	¦	7,4       	¦	799        	¦	-"-
	       	¦

	¦	   	¦	лестничных       	¦	лестн.   	¦	       	¦	          	¦	          
	¦	          	¦

	¦	   	¦	клетках          	¦	площадок 	¦	       	¦	          	¦	          
	¦	          	¦

	¦	   	¦	То же, на черда- 	¦	1000 кв. 	¦	24     	¦	48        	¦	1152       	¦	-"-
	       	¦

	¦	   	¦	ках и в подвалах 	¦	м площади	¦	       	¦	          	¦	          
	¦	          	¦

	¦	   	¦	                 	¦	осматри- 	¦	       	¦	          	¦	          
	¦	          	¦

	¦	   	¦	                 	¦	ваемых   	¦	       	¦	          	¦	          
	¦	          	¦

	¦	   	¦	                 	¦	помещений	¦	       	¦	          	¦	          
	¦	          	¦

	¦	   	¦	Ввод, щитовая,   	¦	здание   	¦	24     	¦	40        	¦	960        	¦	-"-
	       	¦

	¦	   	¦	наружная проводка	¦	         	¦	       	¦	          	¦	          
	¦	          	¦

	¦	   	¦	и арматура       	¦	         	¦	       	¦	          	¦	          
	¦	          	¦

	¦	   	¦	Силовые установки	¦	эл. мотор	¦	12     	¦	15        	¦	180       
	¦	Электро-  	¦

	¦	   	¦	                 	¦	         	¦	       	¦	          	¦	          
	¦	монтер    	¦

	¦	10 	¦	Радио- и         	¦	         	¦	       	¦	          	¦	          

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	¦	          	¦

	¦	   	¦	телеустройства   	¦	         	¦	       	¦	          	¦	          
	¦	          	¦

	¦	   	¦	а) на кровлях    	¦	система  	¦	6      	¦	       Осмотр
	производится       	¦

	¦	   	¦	                 	¦	радио    	¦	       	¦	 специализированной
	организацией 	¦

	¦	   	¦	                 	¦	(теле-   	¦	       	¦	           по
	договору           	¦

	¦	   	¦	                 	¦	устрой-  	¦	      
	¦	                                 	¦

	¦	   	¦	                 	¦	ства)    	¦	      
	¦	                                 	¦

	¦	   	¦	б) в чердаках и  	¦	-"-      	¦	4      	¦	              то
	же              	¦

	¦	   	¦	на лестничных    	¦	         	¦	      
	¦	                                 	¦

	¦	   	¦	клетках          	¦	         	¦	      
	¦	                                 	¦

	¦	   	+-----------------+---------+-------+----------T-----------T-----
	-----+

	¦	   	¦	Итого            	¦	         	¦	       	¦	          	¦	24605     
	¦	          	¦

	L---+-----------------+---------+-------+----------+-----------+-----
	------

	Примечание: Приведенная жилая площадь: 3 кв. метра нежилой площади
	приравнивается к 1 кв. метру жилой площади.

	Приведенная квартира: 100 кв. метров нежилой площади
	приравнивается к одной квартире.

	Главный (старший) инженер

	Экономист

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	Приложение 10

	Управление домами (ЖЭК) N ______

	_________________________ района

	города _________________________

	                  РАСЧЕТ НЕОБХОДИМОЙ ЧИСЛЕННОСТИ РАБОЧИХ

	                      ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ на 19__ год

	----T------------------T----------------------------T------------T---
	---T-------T-------T--------¬

	¦	 N 	¦	   Наименование   	¦	   Необходимое количество   	¦	Непредвиден-
	¦	Всего 	¦	Необхо-	¦	Полага-	¦	Принято 	¦

	¦	п/п	¦	    профессий     	¦	      нормо-часов на:       	¦	ные и
	мелкие	¦	требу-	¦	димая  	¦	ется по	¦	в плане 	¦

	¦	   	¦	                  	¦	                            	¦	работы     
	¦	ется  	¦	числен-	¦	норма- 	¦	с учетом	¦

	¦	   	¦	                  	+-------T-------T------T-----+------T-----
	+	чело- 	¦	ность  	¦	тивам  	¦	коррек- 	¦

	¦	   	¦	                  	¦	обходы 	¦	профи- 	¦	ремонт	¦	итого	¦	в % к 	¦	чело-
	¦	веко- 	¦	работ- 	¦	обслу- 	¦	тива    	¦

	¦	   	¦	                  	¦	   и   	¦	лакти- 	¦	мало- 	¦	     	¦	итогу 	¦	веко-
	¦	часов 	¦	ников  	¦	живания	¦	нормо-  	¦

	¦	   	¦	                  	¦	осмотры	¦	ческий 	¦	ценных	¦	     	¦	по
	гр.	¦	часов	¦	      	¦	на     	¦	       	¦	часов   	¦

	¦	   	¦	                  	¦	       	¦	ремонт 	¦	и вет-	¦	     	¦	6     	¦	    
	¦	      	¦	объем  	¦	       	¦	обслужи-	¦

	¦	   	¦	                  	¦	       	¦	по     	¦	хих   	¦	     	¦	      	¦	    
	¦	      	¦	работ  	¦	       	¦	вания   	¦

	¦	   	¦	                  	¦	       	¦	графику	¦	домов 	¦	     	¦	      	¦	    
	¦	      	¦	       	¦	       	¦	        	¦

	+---+------------------+-------+-------+------+-----+------+-----+---
	---+-------+-------+--------+

	¦	 1 	¦	        2         	¦	   3   	¦	   4   	¦	   5  	¦	  6  	¦	  7   	¦	  8  	¦	 
	9   	¦	  10   	¦	  11   	¦	   12   	¦

	+---+------------------+-------+-------+------+-----+------+-----+---

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	---+-------+-------+--------+

	¦	   	¦	                  	¦	       	¦	       	¦	  Пример расчета   	¦	    
	¦	      	¦	       	¦	       	¦	        	¦

	¦	   	¦	                  	¦	       	¦	       	¦	                   	¦	    
	¦	      	¦	       	¦	       	¦	        	¦

	¦	1  	¦	Кровельщики-      	¦	1075   	¦	5099   	¦	2726  	¦	8900 	¦	25    	¦	2225
	¦	11125 	¦	6      	¦	5      	¦	6       	¦

	¦	   	¦	жестянщики        	¦	       	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	    
	¦	      	¦	       	¦	       	¦	        	¦

	¦	2  	¦	Плотники-столяры  	¦	1732   	¦	5100   	¦	3687  	¦	10519	¦	10    	¦	1052
	¦	11571 	¦	6      	¦	5      	¦	6       	¦

	¦	3  	¦	Штукатуры-маляры  	¦	1732   	¦	8000   	¦	1459  	¦	11191	¦	10    	¦	1191
	¦	12382 	¦	6      	¦	5      	¦	6       	¦

	¦	4  	¦	Каменщики-печники 	¦	1676   	¦	3996   	¦	2348  	¦	8020 	¦	10    	¦	802 
	¦	8822  	¦	4,5    	¦	6      	¦	4,5     	¦

	¦	5  	¦	Слесари-сантехники	¦	14264  	¦	17001  	¦	4625  	¦	35890	¦	30   
	¦	10767	¦	46657 	¦	24     	¦	24     	¦	24      	¦

	¦	6  	¦	Слесари-          	¦	4126   	¦	3500   	¦	2652  	¦	10278	¦	25    	¦	2570
	¦	12848 	¦	6,5    	¦	6      	¦	6,5     	¦

	¦	   	¦	электромонтеры    	¦	       	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	    
	¦	      	¦	       	¦	       	¦	        	¦

	¦	   	+------------------+-------+-------+------+-----+------+-----+---
	---+-------+-------+--------+

	¦	   	¦	Итого             	¦	24605  	¦	42696  	¦	17497 	¦	84798	¦	21,9 
	¦	18607	¦	103405	¦	53     	¦	51     	¦	53      	¦

	L---+------------------+-------+-------+------+-----+------+-----+---
	---+-------+-------+---------

	    Главный (старший) инженер                   Экономист

	Приложение 11

	ПРИМЕРНЫЙ БАЛАНС РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	-----------------------------------T--------------T--------------¬

	¦	                                  	¦	     При      	¦	     При      	¦

	¦	                                  	¦	 шестидневной 	¦	 пятидневной  	¦

	¦	                                  	¦	рабочей неделе	¦	рабочей неделе	¦

	+----------------------------------+--------------+--------------+

	¦	                1                 	¦	      2       	¦	      3       	¦

	+----------------------------------+--------------+--------------+

	¦	Количество календарных дней в году	¦	365           	¦	365           	¦

	¦	из них: нерабочие дни (всего)     	¦	79            	¦	129           	¦

	¦	  в том числе:                    	¦	              	¦	              	¦

	¦	  а) праздничные                  	¦	8             	¦	8             	¦

	¦	  б) выходные                     	¦	52            	¦	102           	¦

	¦	  в) отпуска                      	¦	15            	¦	15            	¦

	¦	  г) болезни                      	¦	4             	¦	4             	¦

	¦	Число явок на работу одного       	¦	286           	¦	236           	¦

	¦	рабочего в год                    	¦	              	¦	              	¦

	¦	Средняя продолжительность рабочего	¦	6,8           	¦	8,24          	¦

	¦	дня в часах                       	¦	              	¦	              	¦

	¦	Общий баланс рабочего времени в   	¦	1945          	¦	1945          	¦

	¦	человеко-часах в год              	¦	              	¦	              	¦

	L----------------------------------+--------------+---------------

	Примечание: Данные пунктов "в" и "г" рассчитываются по отчетным
	данным предыдущих лет. Соответственно изменяется и общее количество
	нерабочих дней.

	Приложение 12

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	Управление домами (ЖЭК) N ______

	_________________________ района

	города _________________________

	                             РАСЧЕТ

	      потребности и стоимости материалов и запасных частей

	    санитарно-технического и другого оборудования на 19__ год

	----T------------------T----T----------T-------T------T----------¬

	¦	 N 	¦	   Наименование   	¦	Ед. 	¦	Количество	¦	 Цена, 	¦	Сумма,	¦	Примечание	¦

	¦	п/п	¦	    материалов    	¦	изм.	¦	          	¦	 руб., 	¦	 руб. 	¦	          	¦

	¦	   	¦	                  	¦	    	¦	          	¦	 коп.  	¦	      	¦	          	¦

	+---+------------------+----+----------+-------+------+----------+

	¦	 1 	¦	        2         	¦	 3  	¦	    4     	¦	   5   	¦	  6   	¦	    7     	¦

	+---+------------------+----+----------+-------+------+----------+

	¦	   	¦	      Пример      	¦	    	¦	          	¦	       	¦	      	¦	          	¦

	¦	   	¦	                  	¦	    	¦	          	¦	       	¦	      	¦	          	¦

	¦	1  	¦	Сталь кровельная  	¦	кг  	¦	7760      	¦	0-15   	¦	1164  	¦	          	¦

	¦	   	¦	оцинкованная      	¦	    	¦	          	¦	       	¦	      	¦	          	¦

	¦	2  	¦	Сталь кровельная  	¦	-"- 	¦	3720      	¦	0-11   	¦	409   	¦	          	¦

	¦	   	¦	черная            	¦	    	¦	          	¦	       	¦	      	¦	          	¦

	¦	3  	¦	Олифа             	¦	-"- 	¦	220       	¦	1-35   	¦	2970  	¦	          	¦

	¦	   	¦	и т.д.            	¦	    	¦	          	¦	       	¦	      	¦	          	¦

	¦	   	+------------------+----+----------+-------+------+----------+

	¦	   	¦	Итого             	¦	    	¦	-         	¦	-      	¦	13500 	¦	          	¦

	¦	   	¦	                  	¦	    	¦	          	¦	       	¦	      	¦	          	¦

	¦	   	¦	Кроме того, на    	¦	    	¦	-         	¦	-      	¦	2970  	¦	          	¦

	¦	   	¦	непредвиденные    	¦	    	¦	          	¦	       	¦	      	¦	          	¦

	¦	   	¦	работы            	¦	    	¦	          	¦	       	¦	      	¦	          	¦

	¦	   	+------------------+----+----------+-------+------+----------+

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	¦	   	¦	Всего             	¦	    	¦	-         	¦	-      	¦	16470 	¦	          	¦

	L---+------------------+----+----------+-------+------+-----------

	Главный (старший) инженер

	Экономист

	Приложение 13

	                                                           УТВЕРЖДАЮ:

	                                                       Управляющий
	домами

	                                                         (начальник
	ЖЭК)

	                                                      "__" ________
	19__ г.

	Управление домами (ЖЭК) N _______

	__________________________ района

	гор. ____________________________

	               ПООБЪЕКТНЫЙ ГРАФИК РАБОТ ПО ПРОФИЛАКТИЧЕСКОМУ

	                 ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ЖИЛЫХ ДОМОВ на 19__ год

	----T--T--------------------T-------T-------T------------------T-----
	-----¬

	¦	 N 	¦	  	¦	    Адреса домов    	¦	 Жилая 	¦	Трудо- 	¦	 Срок выполнения 
	¦	Отметка о 	¦

	¦	п/п	¦	  	¦	                    	¦	площадь	¦	емкость	¦	      работ      
	¦	выполнении	¦

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	¦	   	¦	  	¦	                    	¦	в кв. м	¦	в чел./	+--------T---------
	+	          	¦

	¦	   	¦	  	¦	                    	¦	       	¦	час.   	¦	 начало
	¦	окончание	¦	          	¦

	+---+--+--------------------+-------+-------+--------+---------+-----
	-----+

	¦	 1 	¦	2 	¦	         3          	¦	   4   	¦	   5   	¦	   6    	¦	    7    	¦	   
	8     	¦

	+---+--+--------------------+-------+-------+--------+---------+-----
	-----+

	¦	                            Пример
	заполнения                            	¦

	¦	                                                            &n
	bsp;            	¦

	¦	               I. Работы, выполненные собственными
	силами                	¦

	¦	                                                            &n
	bsp;            	¦

	¦	1  	¦	21	¦	Советская ул., д. 6 	¦	8800   	¦	11530  	¦	январь  	¦	март    
	¦	          	¦

	¦	2  	¦	24	¦	Советская ул., д. 12	¦	4200   	¦	4410   	¦	апрель  	¦	апрель  
	¦	          	¦

	¦	3  	¦	22	¦	Советская ул., д. 16	¦	4600   	¦	7356   	¦	май     	¦	июнь    
	¦	          	¦

	¦	4  	¦	22	¦	Советская ул., д. 17	¦	6500   	¦	7800   	¦	июль    	¦	август  
	¦	          	¦

	¦	5  	¦	26	¦	Комсомольская ул.,  	¦	3200   	¦	4100   	¦	сентябрь	¦	октябрь 
	¦	          	¦

	¦	   	¦	  	¦	д. 4                	¦	       	¦	       	¦	        	¦	        
	¦	          	¦

	¦	6  	¦	25	¦	Орловская ул., д. 11	¦	3460   	¦	7500   	¦	ноябрь  	¦	декабрь 
	¦	          	¦

	¦	                                                            &n
	bsp;            	¦

	¦	               II. Работы, выполняемые подрядным
	способом                	¦

	¦	                                                            &n
	bsp;            	¦

	¦	7  	¦	28	¦	ул. Гагарина, д. 7  	¦	3280   	¦	-      	¦	январь  	¦	февраль 
	¦	          	¦

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	¦	8  	¦	30	¦	Комсомольская ул.,  	¦	2450   	¦	-      	¦	март    	¦	апрель  
	¦	          	¦

	¦	   	¦	  	¦	д. 8                	¦	       	¦	       	¦	        	¦	        
	¦	          	¦

	¦	9  	¦	31	¦	Советская ул., д. 20	¦	7380   	¦	-      	¦	март    	¦	апрель  
	¦	          	¦

	¦	10 	¦	29	¦	Советская ул., д. 22	¦	3200   	¦	-      	¦	октябрь 	¦	ноябрь  
	¦	          	¦

	¦	11 	¦	27	¦	Советская ул., д. 24	¦	2100   	¦	-      	¦	ноябрь  	¦	декабрь 
	¦	          	¦

	¦	   	¦	  	+--------------------+-------+-------+--------+---------+-----
	-----+

	¦	   	¦	  	¦	Итого               	¦	49170  	¦	42696  	¦	        	¦	        
	¦	          	¦

	L---+--+--------------------+-------+-------+--------+---------+-----
	------

	    Примечание:  Если  в  доме  работы  производятся  подрядным 
	способом и

	собственными  силами  -  график  составляется  общий, а в гр. 5
	указываются

	трудозатраты только по работам, выполняемым собственными силами.

	Дата                    Главный (старший) инженер

	Приложение 14

	                                                            &n bsp; 
	УТВЕРЖДАЮ

	                                                            Главный
	инженер

	_______________

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	                                  ГРАФИК

	                   выполнения работ по текущему ремонту

	       на техническом участке N _______ на ______ квартал 19__ года

	Объекты ремонта	Наименование	Единица	Коли-	В каком	Отметка о
	(улицы, N домов,	работ   	измерения	чество	месяце	выполнении
	квартир,	должна быть
	дворовые	выполнена 
	объекты и т.п.)	работа   
	1       	2     	3   	4  	5      	6    

	              Техник                     (подпись)

	Приложение 15

	Управление домами (ЖЭК) N ______

	_________________________ района

	города _________________________

	                  СВОДНЫЙ ПЛАН РАБОТ ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ

	                          ЖИЛЫХ ДОМОВ на 19__ год

	----T---------------------------------------------------T-----------
	T-----¬

	¦	 N 	¦	             Наименование показателей              	¦	  Единица 
	¦	Всего	¦

	¦	п/п	¦	                                                   	¦	 измерения
	¦	     	¦

	+---+---------------------------------------------------+-----------
	+-----+

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	¦	 1 	¦	                         2                         	¦	     3    
	¦	  4  	¦

	+---+---------------------------------------------------+-----------
	+-----+

	¦	1  	¦	Стоимость работ по текущему ремонту жилых домов, в 	¦	руб.      
	¦	     	¦

	¦	   	¦	том числе:                                         	¦	          
	¦	     	¦

	¦	   	¦	  а) выполняемых хозяйственным способом            	¦	-"-       
	¦	     	¦

	¦	   	¦	  б) подрядным способом                            	¦	-"-       
	¦	     	¦

	¦	2  	¦	Объем работ по профилактическому текущему ремонту  	¦	кв. м
	жилой	¦	     	¦

	¦	   	¦	                                                   	¦	площади   
	¦	     	¦

	¦	3  	¦	Затраты труда в нормированном времени - всего      	¦	ч/ч       
	¦	     	¦

	¦	   	¦	  в том числе:                                     	¦	          
	¦	     	¦

	¦	   	¦	  а) профилактический ремонт                       	¦	-"-       
	¦	     	¦

	¦	   	¦	  б) ремонт малоценных и ветхих домов              	¦	-"-       
	¦	     	¦

	¦	   	¦	  в) обходы и осмотры                              	¦	-"-       
	¦	     	¦

	¦	   	¦	  г) непредвиденные работы                         	¦	-"-       
	¦	     	¦

	¦	4  	¦	Ремонт квартир за счет квартиросъемщиков:          	¦	          
	¦	     	¦

	¦	   	¦	  а) жилых комнат                                  	¦	комнаты   
	¦	     	¦

	¦	   	¦	  б) мест общего пользования                       	¦	квартиры  
	¦	     	¦

	L---+---------------------------------------------------+-----------
	+------

	Управляющий домами (начальник ЖЭК)

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	Старший бухгалтер

	Экономист

	Приложение 16

	Управление домами (ЖЭК) N ______

	_________________________ района

	города _________________________

	                          НАРЯД-ЗАДАНИЕ N _______

	на проведение профилактического текущего ремонта в строении N
	_____________

	дома N ________ по
	____________________________________________________ ул.

	Основание: Опись работ N _________

	    Срок производства работ устанавливается:

	    Начало "__" _______________________ 19__ г.

	    Окончание "__" ____________________ 19__ г.

	    Состав бригады:

	    Фамилия, и., о.                   профессия

	    1. ________________________________________

	    2. ________________________________________

	    3. ________________________________________

	       и т.д.

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	    На  все  работы  бригада  должна затратить не более "__"
	человеко-часов

	рабочего времени.

	    Потребный для выполнения работ материал указан в описи работ.

	    Работы  по профилактическому текущему ремонту в указанном выше
	строении

	должны быть выполнены в полном соответствии с прилагаемой описью
	работ.

	            Задание выдал: Главный (старший) инженер

	            Задание принял: (рабочий звена, бригады)

	Приложение 17

	                                    АКТ

	          приемки дома после профилактического текущего ремонта

	                                                  "__" ____________
	19__ г.

	    Комиссия  в  составе:  председателя  -  главного  или старшего
	инженера

	управления домами (жилищно-эксплуатационной конторы) т.
	___________________

	    Члены комиссии: техника т.
	____________________________________________

	и представителя домового комитета т.
	______________________________________

	в присутствии рабочего звена, бригады т.
	__________________________________

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	произвели осмотр и приемку выполненных работ  по профилактическому
	текущему

	ремонту строения N ____ дома N ______ по
	__________________________________

	    Установлено,  что  все  работы, предусмотренные описью работ N
	_______,

	а также дополнительные работы согласно описи N _______ выполнены
	полностью.

	    Фактические  работы  были  начаты  на объекте "__" __________
	19__ г. и

	окончены "__" _____________ 19__ г.

	    Комиссия установила, что работы выполнены с оценкой
	___________________

	__________________________________________________________________________.

	    На все работы звеном, бригадой затрачено ___________ человеко-
	часов.

	    Расход материалов указан на обороте.

	         Председатель комиссии:

	         Члены комиссии:

	    Работы сдал:

	    рабочий звена, бригады

	Оборотная сторона Приложения 17

	РАСХОД МАТЕРИАЛОВ

	N	Наименование	Единица	По 	Фактически	N    	Возврат
	п/п	материалов	измерения	норме	требо-	неиспользован-
	ваний	ных
	материалов       
	количество	N
	приходных
	накладных
	1	2     	3   	4 	5    	6  	7    	8    

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	Главный (старший) инженер

	Рабочий звена

	Приложение 18

	Управление домами (ЖЭК) N ________

	___________________________ района

	города ___________________________

	                           НАРЯД-ЗАДАНИЕ N _____

	Технический участок N
	_____________________________________________________

	Фамилия, и., о.
	___________________________________________________________

	Специальность
	_____________________________________________________________

	N	Дата	Место	Наиме-	Единица	Задание  	Выполнение	Работы
	п/п	работы	нование	измерения	приня-
	работ 	объем	нормо-	объем	нормо-	ты с оценкой
	часы 	часы 	на (подпись 
	техн.)      
	1	2 	3  	4  	5   	6 	7  	8 	9  	10     

	Наряд-задание выдал: техник

	Наряд-задание принял: рабочий

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	Оборотная сторона

	РАСХОД МАТЕРИАЛОВ

	N	Наименование	Единица	Количество    	N    	Возврат
	п/п	материалов	измерения	требо-	неиспользо-
	ваний	ванных материалов 
	по норме	фактически	к-во 	N
	приходных
	накладных
	1	2     	3   	4   	5    	6  	7  	8    

	Подпись техника

	Подпись рабочего

	Приложение 19

	Управление домами (ЖЭК) N _______

	__________________________ района

	города __________________________

	                                 ВЕДОМОСТЬ

	        учета выполнения работ по текущему ремонту на _______ месяц

	                19__ года штатными рабочими и ремдружинами

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	N	Фамилия, имя, 	Количество	N описей работ	Выполнено	Примечание
	п/п	отчество	отработанных	или     	в
	рабочего	часов   	нарядов-	нормо-
	(ремдружинника)	заданий	часах

	Старший инженер (инженер) или техник

	Приложение 20

	Управление домами (ЖЭК) N _______

	__________________________ района

	города __________________________

	                                 ВЕДОМОСТЬ

	          учета выполнения графиков обхода и осмотра жилых домов

	          штатными рабочими за _________________ месяц 19__ года

	N	Фамилия, имя,  	Количество   	N карт	Выполнено	Примечание
	п/п	отчество рабочего	отработанных	обхода	в
	часов	нормо-
	часах
	1	2        	3        	4  	5    	6    

	Старший инженер (инженер) или техник

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	Приложение 21

	Управление домами (ЖЭК) N _______

	__________________________ района

	города __________________________

	                                  СПРАВКА

	       о выполнении показателей премирования рабочими-повременщиками

	                  за ____________________ месяц 19__ года

	N	Фамилия,	Трудовая	Отсут-	Своевременное	Отсут-	Отсут- 	Береж-	Исправное
	п/п	имя, 	дисциплина	ствие 	и	ствие	ствие  	ливое 	содержа-
	отчество	обосно-	доброкачест-	утечки	пере-  	отно- 	ние элек-
	ванных	венное выпол-	воды 	расхода	шение к	тросети и
	жалоб 	нение	электро-	матери-	электро-
	нормиро-	энергии	алам  	оборудо-
	ванных	вания   
	заданий
	и соблюдение 
	графиков     
	осмотра      
	1	2   	3    	4  	5     	6  	7   	8  	9   

	Техник

	Приложение 22

	                                                        СОГЛАСОВАНО

	                                                 Главный инженер
	управления

	                                                 домами (ЖЭК) N
	___________

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	                                                 "__" _____________
	19__ г.

	Управление домами (ЖЭК) N _______

	__________________________ района

	города __________________________

	                                    АКТ

	"__" ______________ 19__ г.

	    Комиссия в составе старшего инженера (техника участка) тов.
	___________

	________________________ и представителя домового комитета тов.
	___________

	составила  настоящий  акт  в  том,  что  в  результате  проверки
	выполнения

	наряд-заданий и графиков осмотра за _____________ м-ц 19__ г.
	нижеследующим

	рабочим, полностью выполнившим условия Положения о премировании,
	может быть

	выплачена премия в полном размере:

	N	Фамилия, имя, отчество	Профессия	Размер премий в
	п/п	рабочего	%

	Старший инженер или техник участка

	Представитель домового комитета

	Приложение 23

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	                                                        СОГЛАСОВАНО

	                                                 Главный инженер
	управления

	                                                 домами (ЖЭК) N
	___________

	                                                 "__" _____________
	19__ г.

	Управление домами (ЖЭК) N _______

	__________________________ района

	города __________________________

	                                    АКТ

	"__" ______________ 19__ г.

	    Комиссия в составе старшего инженера (техника участка) тов.
	___________

	и представителя домового комитета тов. ____________ составили
	настоящий акт

	в том, что на основании  результатов  проверки  выполнения  наряд-
	заданий и

	графиков осмотра за ______________ месяц 19__ г. рабочий тов.
	_____________

	не выполнил следующие условия,  предусмотренные  Положением о 
	премировании

	___________________________________________________________________________

	___________________________________________________________________________

	___________________________________________________________________________

	    Считаем необходимым тов.
	______________________________________________

	за ______________ месяц   лишить  премии   полностью,   частично 
	(ненужное

	зачеркнуть).

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	                Старший инженер (техник участка)

	                Представитель домового комитета

	Приложение 24

	                                  ЖУРНАЛ

	            учета выполнения ремонта жилых комнат и мест общего

	            пользования в квартирах за счет собственных средств

	                       квартиросъемщиков на 19__ г.

	                                       Технический участок
	________________

	N	Наименование	Планируемое	Фамилия, и., о. 	Коли-	Места 	Дата  
	п/п	улицы,  	время  	квартиросъемщика	чество	общего	выполнения
	N домов и 	ремонта 	или	комнат	пользо-
	квартир  	(квартал)	ответственного	вания 
	лица по квартире
	1	2     	3    	4        	5  	6  	7   

	Примечание: За единицу измерения мест общего пользования
	принимается одна квартира.

	Приложение 25

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	СПРАВКА о выполнении плана текущего ремонта за ____ квартал 19__ г.

	----T---------------------------------------T---------T--------T-----
	-----¬

	¦	 N 	¦	       Наименование показателей        	¦	 Единица 	¦	По
	плану	¦	Фактически	¦

	¦	п/п	¦	                                       	¦	измерения	¦	       
	¦	          	¦

	+---+---------------------------------------+---------+--------+-----
	-----+

	¦	 1 	¦	                   2                   	¦	    3    	¦	   4    	¦	   
	5     	¦

	+---+---------------------------------------+---------+--------+-----
	-----+

	¦	1  	¦	Всего затрат на текущий ремонт из общей	¦	руб.     	¦	       
	¦	          	¦

	¦	   	¦	суммы затрат:                          	¦	         	¦	       
	¦	          	¦

	¦	   	¦	  а) работы, выполненные собственными  	¦	-"-      	¦	       
	¦	          	¦

	¦	   	¦	  силами                               	¦	         	¦	       
	¦	          	¦

	¦	   	¦	  б) работы, выполненные подрядными    	¦	-"-      	¦	       
	¦	          	¦

	¦	   	¦	  организациями                        	¦	         	¦	       
	¦	          	¦

	¦	2  	¦	Отремонтировано жилой площади          	¦	кв. м    	¦	       
	¦	          	¦

	¦	   	¦	по профилактическому текущему ремонту  	¦	жилой    	¦	       
	¦	          	¦

	¦	   	¦	(кроме малоценных и ветхих домов)      	¦	площади  	¦	       
	¦	          	¦

	¦	3  	¦	Затраты труда в нормиров. времени      	¦	ч/ч      	¦	       
	¦	          	¦

	¦	   	¦	на работах, выполненных собственными   	¦	         	¦	       
	¦	          	¦

	¦	   	¦	силами, с учетом непредвиденных работ -	¦	         	¦	       
	¦	          	¦

	¦	   	¦	всего                                  	¦	         	¦	       

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	¦	          	¦

	¦	   	¦	  в том числе:                         	¦	         	¦	       
	¦	          	¦

	¦	   	¦	  а) на профилактический ремонт        	¦	-"-      	¦	       
	¦	          	¦

	¦	   	¦	  б) текущий ремонт малоценных (ветхих)	¦	-"-      	¦	       
	¦	          	¦

	¦	   	¦	  домов                                	¦	         	¦	       
	¦	          	¦

	¦	   	¦	  в) обходы и осмотры                  	¦	-"-      	¦	       
	¦	          	¦

	¦	4  	¦	Работы, выполненные ремонтными         	¦	         	¦	       
	¦	          	¦

	¦	   	¦	дружинами:                             	¦	         	¦	       
	¦	          	¦

	¦	   	¦	  а) в денежном выражении              	¦	руб.     	¦	-      
	¦	          	¦

	¦	   	¦	  б) трудозатраты                      	¦	ч/ч      	¦	-      
	¦	          	¦

	¦	5  	¦	Ремонт квартир за счет средств         	¦	         	¦	       
	¦	          	¦

	¦	   	¦	населения:                             	¦	         	¦	       
	¦	          	¦

	¦	   	¦	  а) жилых комнат                      	¦	комнаты  	¦	       
	¦	          	¦

	¦	   	¦	  б) мест общего пользования           	¦	квартиры 	¦	       
	¦	          	¦

	L---+---------------------------------------+---------+--------+-----
	------

	Управляющий домами (начальник ЖЭК)

	Главный инженер (инженер)

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	Приложение 26

	Выписка из "Правил и норм технической

	эксплуатации жилищного фонда"

	МАКСИМАЛЬНЫЕ СРОКИ УСТРАНЕНИЯ НЕИСПРАВНОСТЕЙ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ
	НЕПРЕДВИДЕННОГО ТЕКУЩЕГО РЕМОНТА ОТДЕЛЬНЫХ ЧАСТЕЙ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ И ИХ
	ОБОРУДОВАНИЯ

	----T-----------------------------------------------------T----------
	-----¬

	¦	 N 	¦	    Наименование неисправностей в конструктивных     	¦
	Максимальный  	¦

	¦	п/п	¦	              элементах и оборудовании               	¦	срок
	выполнения	¦

	¦	   	¦	                                                     	¦	   
	ремонта    	¦

	+---+-----------------------------------------------------+----------
	-----+

	¦	 1 	¦	                          2                          	¦	      
	3       	¦

	+---+-----------------------------------------------------+----------
	-----+

	¦	   	¦	Кровля                                              
	¦	               	¦

	¦	   	¦	                                                    
	¦	               	¦

	¦	   	¦	Свищи в отдельных местах кровли                      	¦	1
	сутки        	¦

	¦	   	¦	Повреждение водосточных труб, воронок, колен, отметов	¦	5
	суток        	¦

	¦	   	¦	и расстройство их крепления                         
	¦	               	¦

	¦	   	¦	                                                    
	¦	               	¦

	¦	   	¦	Стены и фасады                                      
	¦	               	¦

	¦	   	¦	                                                    

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	¦	               	¦

	¦	   	¦	Нависающие, теряющие связь со стенами отдельные     
	¦	               	¦

	¦	   	¦	кирпичи в кладке и особенно в перемычках, элементы  
	¦	               	¦

	¦	   	¦	архитектурного оформления фасадов, отслаивающаяся   
	¦	               	¦

	¦	   	¦	штукатурка и лепные элементы карнизов               
	¦	               	¦

	¦	   	¦	Ограждения около аварийных мест должны быть          	¦	1
	сутки        	¦

	¦	   	¦	поставлены немедленно                               
	¦	               	¦

	¦	   	¦	На сквозные трещины и неплотности в дымоходах и      	¦	3
	суток        	¦

	¦	   	¦	газоходах и сопряжения их с печами                  
	¦	               	¦

	¦	   	¦	                                                    
	¦	               	¦

	¦	   	¦	Оконные и дверные заполнения                        
	¦	               	¦

	¦	   	¦	                                                    
	¦	               	¦

	¦	   	¦	Разбитые стекла и сорванные створки оконных         
	¦	               	¦

	¦	   	¦	переплетов и форточек:                              
	¦	               	¦

	¦	   	¦	  в зимнее время                                     	¦	1
	сутки        	¦

	¦	   	¦	  в летнее время                                     	¦	5
	суток        	¦

	¦	   	¦	                                                    
	¦	               	¦

	¦	   	¦	Печи                                                
	¦	               	¦

	¦	   	¦	                                                    
	¦	               	¦

	¦	   	¦	Трещины и неисправности в печах, дымоходах и         	¦	1
	сутки        	¦

	¦	   	¦	газоходах, могущие вызвать отравление жильцов       

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	¦	               	¦

	¦	   	¦	дымовыми газами и угрожающие пожарной безопасности  
	¦	               	¦

	¦	   	¦	здания                                              
	¦	               	¦

	¦	   	¦	                                                    
	¦	               	¦

	¦	   	¦	Сантехническое оборудование                         
	¦	               	¦

	¦	   	¦	                                                    
	¦	               	¦

	¦	   	¦	Течи в водопроводных кранах и в кранах бачков при    	¦	3
	суток        	¦

	¦	   	¦	унитазах                                            
	¦	               	¦

	¦	   	¦	Неисправности аварийного порядка в трубопроводах и
	их	¦	Немедленно     	¦

	¦	   	¦	сопряжениях с фитингами, арматурой и приборами      
	¦	               	¦

	¦	   	¦	водопровода, канализации, горячего водоснабжения,   
	¦	               	¦

	¦	   	¦	центрального отопления, газооборудования            
	¦	               	¦

	¦	   	¦	                                                    
	¦	               	¦

	¦	   	¦	Лифт                                                
	¦	               	¦

	¦	   	¦	                                                    
	¦	               	¦

	¦	   	¦	Неисправности лифта, требующие для устранения:      
	¦	               	¦

	¦	   	¦	  работы в течение 1 часа                            	¦	1
	сутки        	¦

	¦	   	¦	  не более 7 часов                                   	¦	3
	суток        	¦

	L---+-----------------------------------------------------+----------
	------

	Примечание: Сроки устранения отдельных неисправностей указаны с
	момента их обнаружения или заявки жильцов.

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	Приложение 27

	Выписка из "Правил и норм технической

	эксплуатации жилищного фонда"

	ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ЖИЛИЩНОГО ФОНДА

	I. Фундаменты и подвальные помещения

	1. Постановка на растворе отдельных выпавших или отставших от
	раствора камней в фундаментных стенах с внутренней стороны подвальных
	помещений.

	2. Ремонт облицовки фундаментных стен со стороны подвальных
	помещений; перекладка местами кирпичной облицовки.

	3. Расшивка и заделка стабилизированных трещин в кладке
	фундамента.

	4. Расчистка и заделка неплотностей в сборных и монолитных
	фундаментных стенах.

	5. Устранение разных мелких неисправностей в фундаментных стенах,
	не связанное с усилением или перекладкой фундамента.

	6. Исправление дефектов бетонных фундаментов под оборудованием в
	котельных и домовых прачечных.

	7. Исправление или перекладка ограждающих стенок приямков, оконных
	и дверных проемов подвальных помещений.

	8. Пробивка проемов в бутовых и кирпичных стенах в фундаментах в
	связи с ремонтом трубопроводов и для других целей.

	9. Исправление или замена на отдельных участках повреждений
	гидроизоляции фундаментов и подвальных помещений.

	10. Исправление нарушенной кирпичной кладки столбов и цоколей.

	11. Замена отдельных фундаментных стульев под деревянными

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	зданиями.

	12. Восстановление отдельными местами осевшей отмостки тротуаров
	около строения.

	13. Ремонт существующих и устройство при необходимости новых
	вентиляционных продухов в цоколях зданий.

	14. Заделка на зиму вентиляционных продухов.

	II. Стены

	1. Ремонт каменной облицовки цоколя.

	2. Расшивка раствором трещин в кирпичных стенах.

	3. Расчистка от старого раствора и тщательная герметическая
	заделка или проконопатка смоляной паклей стыков крупноблочных и
	крупнопанельных стен в отдельных случаях с заделкой цементным
	раствором в местах повышенной продуваемости или проникания
	атмосферной влаги.

	4. Постановка на растворе отдельных кирпичей или облицованных
	плиток взамен выпавших или ослабевших.

	5. Устранение разных мелких неисправностей в наружных и внутренних
	(капитальных) стенах, не связанное с перекладкой или креплением стен,
	а также со сменой венцов по всему периметру (в деревянных домах).

	6. Пробивка и заделка мелких сквозных отверстий гнезд, ниш и
	борозд в кирпичных стенах.

	Выборочное вскрытие узлов сопряжений панелей стен, опирания
	прогонов и др. с последующей заделкой.

	7. Мелкий ремонт бетонных и железобетонных стен отдельными
	местами.

	8. Ремонт перемычек под проемами.

	9. Укрепление наружных деревянных стен постановкой сжимов.

	10. Вставка местами заделок в деревянные стены с подконопаткой.

	11. Утепление ветхих деревянных стен под подоконниками нашивкой
	досок по войлоку и толю или обшивкой досками с засыпкой.

	12. Пополнение засыпки цоколя (между фундаментными столбами) с
	частичной заменой дощатой забирки.

	13. Смена местами сгнившей обшивки стен, цоколя и отливов снаружи
	деревянных зданий.

	14. Частичная конопатка пазов рубленых и брусчатых стен.

	15. Ремонт и замена отливных досок, покрытий цоколя, отливов окон.

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	16. Добавляется утепляющей засыпки в стены деревянных каркасно-
	обшивных зданий.

	17. Утепление промерзающих углов зданий.

	18. Общая и частичная проконопатка рубленых и брусчатых стен
	зданий.

	III. Фасады зданий

	1. Укрепление или снятие с фасада угрожающих падением отдельных
	кирпичей или архитектурных деталей и облицовочных плиток.

	2. Ремонт наружной штукатурки отдельными местами с отбивкой
	отставшей штукатурки (не более 500 кв. м вертикальной проекции
	фасадов строения).

	3. Частичный ремонт или восстановление местами облицовки фасадов
	зданий (не более 500 кв. м вертикальной проекции фасадов строения).

	4. Промывка поверхностей фасадов зданий, окрашенных
	перхлорвиниловыми красками или облицованными плитками, а также
	очистка от копоти, пыли кирпичных или ранее окрашенных масляной
	краской фасадов.

	5. Окраска фасадов зданий (не более 1000 кв. м вертикальной
	проекции фасадов).

	6. Укрепление решеток и ограждений на балконах зданий, заделка
	трещин в местах примыкания пола балкона к стенам, ремонт штукатурки
	балкона.

	7. Устранение мелких неисправностей на фасадах, не связанное с
	заменой штукатурки или новым архитектурным оформлением. Ремонт и
	замена окрытий архитектурных деталей на фасадах.

	8. Ремонт крылец, ремонт и восстановление зонтов над входами.

	9. Окраска металлических ограждений балконов, флагодержателей и
	др. металлических элементов на фасадах.

	IV. Крыши

	1. Усиление стропильных ног.

	2. Постановка подкосов и подпорок в отдельных местах провисания
	крыши, с передачей нагрузок на капитальные стены.

	3. Постановка дополнительных металлических скоб и болтов в местах
	ослабевших сопряжений стропильных элементов.

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	4. Смена концов стропильных ног в отдельных местах с постановкой
	протезов пруткового и других типов.

	5. Смена отдельных участков подстропильных брусьев (мауэрлатов).

	6. Усиление обрешетки крыши пришивкой досок.

	7. Смена местами отдельных брусков обрешетки и отдельных участков
	обрешетки.

	8. Ремонт и замена отдельных досок опалубки, обрешетки в местах
	разжелобков, карнизных спусков и пр.

	9. Ремонт слуховых окон.

	Навеска защитных решеток в вентиляционных отверстиях в
	подкарнизной или карнизной части крыши.

	10. Антисептическая и противопожарная защита деревянных
	конструкций и их деталей.

	11. Замена или ремонт выходов на крышу через слуховые окна или
	специальные люки с изготовлением приставных лестниц, стремянок и т.п.

	12. Замена и ремонт стальных патрубков с колпаками для вентиляций
	чердаков.

	13. Уплотнение фальцев и обжимка гребней в стальной кровле с
	промазкой гребней и свищей суриковой замазкой.

	14. Постановка разного рода заплат на стальной кровле (листовой
	сталью, из мешковины на мастике и пр.).

	15. Ремонт металлической кровли отдельными местами с последующей
	окраской.

	16. Смена отдельных листов и плиток в шиферной, этернитовой,
	черепичной и других кровлях из штучных материалов.

	17. Ремонт отдельных мест кровли из рулонных материалов с заменой
	до 25% общей площади покрытия или покрытия всей площади кровли в один
	слой. Защитная окраска рубероидных кровель алюминиевой краской.

	18. Ремонт настенных желобов и карнизных свесов с частичной
	заменой материала. Крепление или восстановление сорванных стальных
	листов.

	19. Ремонт покрытия вокруг дымовых и вентиляционных труб,
	брандмауэров, парапетов и других выступающих частей на крыше.

	20. Ремонт водосточных подвесных желобов.

	21. Укрепление парапетов, стальных решеток, ограждения, ремонт
	оголовков вентиляционных шахт, труб газоходов, канализационных
	стояков и других выступающих частей на крыше. Замена колпаков на
	дымовых вентиляционных трубах.

	22. Восстановление и ремонт стремянок для безопасности очистки
	дымоходов на крышах.

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	23. Ремонт и окраска наружных пожарных лестниц для подъема на
	крышу.

	24. Регулярная очистка кровли от мусора, грязи, листьев и других
	посторонних предметов, окраска стальной кровли, водосточных стальных
	труб (или защитное покрытие рулонной кровли в установленные сроки).

	25. Мелкий ремонт чердачных дверей и люков, утепление их,
	установка и ремонт запоров и пр.

	26. Исправление местами драночной, тесовой и щепной кровель в
	местах ее разрушения.

	27. Замена разбитых стекол световых фонарей на крышах с промазкой
	фальцев, мелкий ремонт открывающихся и закрывающихся фонарей.

	28. Изготовление и установка жалюзийных решеток на слуховые окна.

	29. Ремонт и замена отдельных звеньев труб водосточных воронок,
	лотков, колен, отметок; ремонт сопряжений кровли в местах установки
	антенн, вокруг труб и прочих выступающих элементов оборудования на
	кровле.

	30. Ремонт мест примыкания гидроизоляционного ковра к различным
	конструктивным элементам, выступающим над кровлей (парапеты, трубы,
	вентиляционные шахты, блоки выхода на крыши и др.).

	31. Очистка крыши от снега.

	V. Проемы

	1. Оконопатка оконных и дверных коробок (колод) в деревянных
	наружных рубленых стенах с заделкой и утеплением пространства над
	вершником, оконопатка и промазка зазоров между коробкой и стеной в
	каменных зданиях.

	2. Устранение щелей в деревянных подоконниках вставкой реек или
	промазкой шпаклевкой, а также промазкой щелей под подоконниками,
	заделка цементным раствором трещин в бетонных, мозаичных и других
	подоконниках.

	3. Ремонт и замена отдельных оконных створок переплетов, коробок и
	колод до 10% от общего количества проемов в доме.

	4. Мелкий ремонт и укрепление оконных переплетов пристружкой и
	нашивкой планок.

	5. Укрепление или замена отливов - слезников с наружной стороны
	летних переплетов и фрамуг.

	6. Ремонт или замена форточек в летних и зимних переплетах.

	7. Замена неисправных уплотняющих прокладок в заполнениях оконных
	и балконных дверных проемов, замена и установка недостающих дверных и
	оконных приборов.

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	8. Замена растрескавшейся замазки и разбитых стекол в оконных
	переплетах, очистка стекол и заделка вторых оконных переплетов
	бумагой на зимнее время лестничных клеток жилых домов и служебных
	помещений жилищно-эксплуатационных организаций.

	9. Ремонт дверей с перевязкой и заменой отдельных частей их или
	полная замена до 10% от общего количества дверей.

	10. Ремонт входных и квартирных дверей с пристружкой, нашивкой
	планок или вставкой реек в филенки, а также перенавеской с
	устройством новых и заделкой старых четвертей в коробках.

	11. Утепление входных, квартирных и балконных дверей.

	12. Окраска окон и дверей.

	13. Постановка пружин к наружным входным дверям и упоров.

	14. Укрепление существующих наличников прошивкой гвоздями.

	15. Ремонт и смена наличников.

	VI. Перекрытия и полы

	1. Постановка временных подпорок и прогонов под провисшие балки
	перекрытий в домах.

	Постановка временных опор (прогонов на стояках) под балку с
	подгнившими концами (в ветхих домах).

	2. Проведение охранных работ по укреплению отдельных частей наката
	(подбора) в перекрытиях путем подведения листов фанеры, подкладок из
	досок с установкой отдельных стоек.

	3. Ремонт перекрытий отдельными местами с частичной заменой
	черного и чистого полов, подшивки, смазки и замены или добавления
	утеплителя.

	4. Расшивка швов в стыках сборных перекрытий из железобетонных
	настилов.

	5. Ремонт дощатых чистых полов с дополнительной прошивкой досок
	гвоздями, заделкой отверстий в полах, сменой отдельных досок.

	6. Мелкий ремонт паркетных полов и полов из искусственных
	синтетических и др. материалов с добавлением нового материала на
	площади до 25%.

	7. Смена износившегося паркета в отдельных помещениях.

	8. Заделка выбоин в цементных, бетонных, асфальтовых полах и в
	основаниях под полы.

	9. Ремонт полов из керамических и других плиток с заменой
	отдельных разбитых плиток новыми или добавлением недостающих.

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	10. Ремонт бетонного основания полов отдельными местами.

	11. Вскрытие чистых полов в местах промачивания перекрытий для
	просушки конструкций перекрытий с заделкой.

	12. Сплачивание дощатых полов после усушки досок.

	13. Ремонт цементных плинтусов в санитарных узлах и других местах,
	подверженных сырости.

	14. Дополнительное утепление стальных балок на чердаке с
	устройством дощатых коробов и засыпкой их утеплителем.

	15. Дополнительное утепление чердачных перекрытий с добавлением
	засыпки и устройство защитной стяжки.

	16. Ремонт отдельных мест в железобетонных конструкциях с очисткой
	от ржавчины обнаженной арматуры бетонированием, с расшивкой и
	затиркой.

	17. Окраска стальных конструкций перекрытий.

	18. Вырубка поврежденных мест ксилолитовых полов, с заделкой этих
	мест ксилолитом на полную толщину.

	19. Антисептирование отдельных частей деревянных перекрытий.

	20. Заделка неплотностей в местах прохождения через перекрытия
	стояков центрального отопления.

	21. Смена отдельных участков рулонных полов с ремонтом основания.

	VII. Перегородки

	1. Укрепление существующих перегородок постановкой ершей с
	заделкой просветов, щелей и отверстий в перегородках.

	2. Сплачивание чистых дощатых столярных перегородок с добавлением
	нового материала.

	3. Смена отдельных сгнивших досок и элементов деревянного каркаса
	перегородок.

	4. Ремонт и замена отдельных мест в облицовке стен глазурованными
	плитками.

	5. Заделка уплотнения жгутом пороизола или сухой паклей с
	последующей заделкой известково-цементным раствором, заподлицо с
	перегородкой трещин в местах сопряжения перегородок со смежными
	конструкциями.

	VIII. Лестницы

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	1. Заделка выбоин в бетонных ступенях лестниц, на площадках и
	пандусах. (Замена отдельных каменных или бетонных ступеней.)

	2. Замена отдельных плит из естественного камня, бетона, керамики
	на площадках лестничных клеток.

	Укрепление отдельных плит лестничных площадок.

	3. Смена отдельных изношенных досок в деревянных лестницах,
	площадках и крыльцах.

	4. Укрепление перил и поручней на лестничных маршах с заменой
	отдельных участков.

	Исправление деревянного поручня перил с заделкой его отдельными
	вставками.

	5. Исправление в деревянных лестницах тетив.

	6. Укрепление деревянных проступей в тетивах и смена расколотых
	проступей и подступенков.

	7. Укрепление, а также исправление прогнутых и вставка недостающих
	элементов в металлических перилах лестниц.

	8. Заделка стабилизировавшихся трещин в местах примыкания стен
	лестничных клеток к наружным стенам; замоноличивание в торцовых
	стенах цементным раствором.

	9. Восстановление повреждений (разрушений) проступей,
	подступенков, усиление лестничных клеток площадок с увеличенными
	прогибами (выполнять по проекту).

	IX. Печи и очаги

	1. Ремонт отопительных печей и кухонных очагов с частичной
	перекладкой их, с добавлением материалов и сменой приборов, а также
	переоборудованием топочных устройств отдельных печей и очагов.

	Устранение завалов в печах и очагах; укрепление или замена
	отдельных кирпичей в топливниках.

	2. Укрепление существующих и замена испорченных печных приборов в
	печах и очагах, включая смену плит, жаровых шкафов и водогрейных
	коробок и бачков, замена лопнувших или прогоревших колосников и
	решеток.

	3. Расшивка трещин и затирка внешних поверхностей печей и очагов,
	исправление штукатурки, промазка швов в стенах, где проходят дымовые
	каналы.

	4. Укрепление отдельных изразцов в облицовке печей и очагов.

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	5. Исправление и укрепление вертикальных и горизонтальных
	разделок, а также восстановление разделок.

	6. Укрепление и замена предтопочных листов.

	7. Ремонт дымовых труб, патрубков и боровов укреплением и заменой
	отдельных кирпичей или частичной перекладкой, восстановлением зонтов,
	искроуловителей.

	8. Очистка от сажи и прожиг дымовых труб.

	9. Устройство новых разделок, исправление и замена колпаков,
	флюгарок над трубами.

	10. Ремонт и замена шиберов и заслонок.

	11. Побелка дымовых труб.

	X. Штукатурно-малярные работы

	1. Ремонт штукатурки стен и потолков отдельными местами в связи с
	имевшимися протечками и другими явлениями аварийного порядка и
	заделка разного рода выбоин, трещин в штукатурке.

	2. Частичная штукатурка перекрытий, стен и перегородок, а также
	ремонт сухой штукатурки.

	3. Побелка и окраска стен и потолков, смена обоев после ремонта
	штукатурки.

	4. Побелка и окраска стен, потолков, полов, окон и дверей в местах
	общего пользования и в лестничных клетках жилых домов, в общественных
	и служебных помещениях в установленные сроки.

	5. Масляная окраска радиаторов, труб отопления, канализации,
	водопровода, металлических решеток, перил, лестниц и пр.

	6. Постановка выпавших облицовочных плиток на стенах санузлов и на
	кухнях.

	7. Расшивка трещин и заделка неплотностей, а также выбоин
	цементным раствором с частичным оголением арматуры в железобетонных
	настилах.

	8. Заделка трещин в перегородках из гипсовых, алебастровых плит и
	др.

	9. Ремонт штукатурки оконных и дверных откосов.

	10. Укрепление отставших розеток с постановкой их на растворе.

	11. Укрепление отставших порезок в карнизах.

	XI. Разные работы

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	1. Заделка трещин в местах примыкания тротуаров и отмосток к
	стенам зданий и устройство надлежащего отвода поверхностной воды от
	зданий.

	2. Заделка отдельных выбоин в асфальтовых тротуарах и исправление
	просевших плит во дворах.

	3. Исправление металлических решеток, ограждающих приямки окон
	подвальных этажей.

	4. Заделка проемов и устройство дополнительных ограждений в окнах
	подвальных помещений в зданиях, подвергающихся действию паводков.

	5. Возобновление и ремонт переходов на чердаках через трубы
	центрального отопления, вентиляционные короба и пр.

	6. Работы, связанные с подготовкой к зиме.

	7. Ремонт калиток, столбов, оград (имеющих архитектурную ценность)
	с добавлением нового материала; приборов и металлических поковок, а
	также надворных служебных строений (дворовых уборных, мусорных ям и
	т.д.).

	8. Мелкий ремонт мусоропровода.

	XII. Центральное отопление <*>

	--------------------------------

	<*> При эксплуатации инженерного оборудования следует
	руководствоваться Инструкцией о порядке возмещения жилищно-
	эксплуатационным организациям расходов по техническому оборудованию
	водопроводных, канализационных, теплофикационных и электрических
	сетей и устройств, находящихся внутри здания, предприятиями,
	получающими доходы от эксплуатации этих сетей и устройств,
	утвержденной Советом Министров РСФСР.

	1. Промывка трубопровода и приборов системы центрального отопления
	ежегодно по окончании отопительного сезона.

	2. Регулировка системы центрального отопления.

	3. Устранение течи в трубопроводах, приборах и арматуре.

	4. Смена отдельных секций отопительных приборов и небольших
	участков трубопровода при устранении неплотностей, протечек и засоров
	в трубах. Постановка дополнительных секций радиаторов.

	5. Ремонт и замена в отдельных помещениях регулировочной и
	запорной арматуры.

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	6. Устранение обратных уклонов в трубопроводе и приборах
	центрального отопления. Установка воздушных кранов (как исключение
	при сложных условиях) в местах, где не удается устранить обратные
	уклоны или воздушные мешки.

	7. Укрепление существующих крюков и постановка дополнительных
	крюков для труб и приборов центрального отопления.

	8. Утепление труб и приборов, проходящих в открытых и охлаждаемых
	местах.

	9. Устройство дополнительных подвесок и подкладок-подставок для
	магистрального трубопровода на чердаке.

	10. Исправление утепления расширительных баков на чердаке, сливных
	и воздушных труб, вантузов и пр.

	11. Утепление помещения котельной.

	12. Устранение сырости в помещении котельной с заделкой отдельных
	повреждений, изоляцией пола и устройством ограждений от атмосферных
	осадков при входе в помещение котельной.

	13. Мелкий ремонт оборудования котельной.

	14. Исправление и перекладка боровов, просушка их, устранение
	подсосов воздуха и другие работы для обеспечения тяги в дымоходе.

	15. Побелка помещений котельной, насосной и прочих помещений в
	установленный срок.

	16. Мелкий ремонт электроосвещения и силовой проводки.

	17. Очистка котлов и их секций с наружной стороны от нагара.

	18. Смена 1 - 2 секций в чугунных секционных котлах.

	19. Заделка стальных свищей в котлах центрального отопления
	шпильками или постановкой болтов.

	20. Смена прокладок во фланцевых соединениях и устранение течи.

	21. Смена прогоревших колосников, топочных и поддувальных дверок
	котлов и шиберов.

	22. Укрепление топочных и поддувальных дверок.

	23. Оборудование шиберов противовесами.

	24. Мелкий ремонт обмуровки котлов в отдельных местах.

	25. Мелкий ремонт вентиляторов, моторов и насосных установок.

	26. Мелкий ремонт дутьевого трубопровода, устранение неплотностей
	в соединениях.

	27. Ремонт и окраска расширительных баков, сливных и воздушных
	труб, вантузов.

	28. Просмотр и подтягивание на трубах системы контргаек, муфт, в

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	случае надобности замена их.

	29. Проверка контрольно-измерительных приборов и замена негодных.

	30. Разборка, осмотр и прочистка конденсационных горшков,
	инжекторов, элеваторов, смесителей, редукционных клапанов,
	регулирующих кранов и вентилей, задвижек, грязевиков,
	воздухосборников, вантузов, компенсаторов.

	31. Частичный ремонт расширительного бака с устранением течи и
	последующей окраской с двух сторон масляной краской.

	32. Подвальцовка дымогарных труб у котлов и ниппелей у секционных
	котлов.

	33. Очистка от накипи запорной арматуры, проверка ее и перебивка
	сальников.

	34. Очистка от грязи и ржавчины расширительного бака на чердаке,
	исправление изоляции и утепление будки расширительного бака.

	35. Периодический осмотр металлических дымовых труб отопительных
	котельных, анкерных болтов, растяжек и периодическая окраска
	конструкций.

	XIII. Вентиляция

	1. Ремонт отдельными местами (вставками) вентиляционных сборных
	коробов.

	2. Устранение подсоса воздуха в вентиляционных шахтах на чердаке;
	поддержание в исправности дроссель-клапанов в шахтах.

	3. Частичный ремонт вентиляционных коробов в помещениях с
	укреплением существующих плит и промазкой трещин, а также укрепление
	вентиляционных жалюзийных решеток.

	4. Мелкий ремонт моторов, калориферов и их регулировка.

	5. Ремонт отдельными местами металлических воздуховодов,
	укрепление и смена подвесок и средств крепления.

	XIV. Водопровод и канализация (внутри здания)

	1. Ремонт и замена водоразборных кранов у раковины, умывальников,
	ванн и пр., а также смена уплотнений в пожарных кранах, установка
	ограничителей (дроссельных шайб) перед водоразборной арматурой.

	2. Регулирование и ремонт бачков, смена или припайка поплавка-
	шара, замена резиновых прокладок и колокола и шарового крана,
	установка ограничителей для держек, очистка бачков от известковых

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	отложений и ржавчины.

	3. Укрепление расшатанных раковин, унитазов, умывальников, ремонт
	и уплотнение в месте присоединения их к раструбу фановой трубы.

	4. Смена резиновых муфт и манжет у унитазов; смена, ремонт,
	укрепление сидений.

	5. Замена новыми отдельных повреждений унитазов, умывальников и
	кухонных раковин.

	6. Устранение засорений во внутренней канализационной сети.

	7. Подчеканка раструбов и уплотнение стыков с заделкой битумной
	замазкой, а также укрепление канализационных и водопроводных труб
	постановкой дополнительных крючков.

	8. Постановка в крышке ревизий резиновых прокладок.

	9. Устранение конденсата на бачках в водопроводно-канализационных
	трубах.

	10. Утепление трубопровода обмоткой, устройство коробов с засыпкой
	и пр.

	11. Устранение неплотностей и течи в соединениях трубопровода
	ванных колонок.

	12. Укрепление дымоотводящих патрубков дровяных ванных колонок с
	устройством разделок и постановкой предтопочных листов.

	13. Очистка, промывка и ремонт водонапорных баков на чердаке
	зданий, оборудование их запирающимися крышками и утепление, а также
	ремонт арматуры.

	14. Устройство и ремонт водопроводных наружных выпусков для
	поливки улиц и дворов в летнее время.

	15. Смена небольших участков трубопровода при устранении
	неплотностей, протечек и засоров в трубах.

	16. Ремонт и замена в отдельных местах запорной арматуры.

	17. Ремонт и смена отдельных негодных фасонных частей, трапов,
	сифонов и ревизий.

	18. Ремонт тепловой изоляции трубопроводов в местах возможного
	промерзания.

	19. Испытание сети трубопроводов гидравлическим давлением.

	20. Очистка и ремонт внутренних пожарных кранов.

	XV. Горячее водоснабжение

	1. Очистка бойлеров и змеевиков от накипи и отложений.

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	2. Мелкий ремонт насосных и моторных установок.

	3. Притирки, ремонт и замена водоразборных кранов, устранение
	неплотностей в трубопроводе, утепление его и осуществление разных
	мелких работ, аналогично перечисленным в предыдущих разделах:
	"Центральное отопление", "Водопровод и канализация".

	4. Ремонт отдельных водонагревательных колонок для ванн.

	5. Ремонт изоляции горячих трубопроводов.

	6. Ремонт душей и арматуры к ним.

	XVI. Электроосвещение и силовые проводки (внутри здания)

	1. Перетяжка обвисшей внутренней электропроводки и постановка
	дополнительных креплений со сменой установочной арматуры
	(выключатели, патроны, розетки и пр.) в лестничных клетках, чердаках
	и служебных помещениях.

	2. Смена отдельных участков электропроводки до ввода в квартиры.

	3. Снятие и восстановление электропроводки при выполнении
	штукатурных работ.

	4. Ремонт групповых распределительных и предохранительных щитков и
	коробок.

	5. Проверка заземления оболочки электрокабеля.

	6. Проверка целости изоляторов и замена новыми.

	Приложение 28

	СБОРНИК УКРУПНЕННЫХ НОРМ ЗАТРАТ ТРУДА И РАСХОДА МАТЕРИАЛОВ НА ТЕКУЩИЙ
	РЕМОНТ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ (СУН)
	ОБЩАЯ ЧАСТЬ

	1. Сборник укрупненных норм затрат труда и расхода материалов на
	текущий ремонт жилых зданий предназначен для планирования и учета
	нагрузки рабочих и расхода материалов в управлениях домами и жилищно-
	эксплуатационных конторах местных Советов депутатов трудящихся.

	2. Приведенные в Сборнике нормы исчислены на основании:

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	а) Справочника укрупненных сметных норм на ремонтно-строительные
	работы (СУСН-62), утвержденного Министерством коммунального хозяйства
	РСФСР в 1962 году, с учетом дополнений и изменений к СУСНу,
	опубликованных в 1964 г. и в 1965 г.;

	б) на работы, не предусмотренные СУСНом, нормы исчислены по
	Сборнику норм на работы по текущему ремонту жилых домов, выполняемые
	жилищно-эксплуатационными конторами г. Москвы, утвержденному жилищным
	управлением исполкома Моссовета в 1960 г., и по Единым нормам и
	расценкам на строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы
	Государственного комитета Совета Министров СССР по делам
	строительства	 издания 1964 года.

	3. Для учета особенностей выполнения работ по текущему ремонту в
	условиях заселенного дома, а также мелочности и разбросанности работ
	применены поправочные коэффициенты к нормам затрат труда, а именно:

	а) К = 1,10, учитывающий работы в заселенном эксплуатируемом
	здании, - применен на работы внутри помещения;

	б) К = 1,05 - на мелочность и разбросанность работ;

	в) К = 1,05 - дополнительно, применен только к нормам, принятым по
	ЕНиРу.

	4. В нормах затрат труда учтено время:

	а) на подготовку и уборку рабочего места;

	б) на получение рабочими материалов с приобъектных складов,
	подноску их в пределах рабочей зоны и выноску мусора;

	в) на получение рабочими инструментов и мелких приспособлений с
	подноской их к месту работы и обратно;

	г) на переходы рабочих с одного места работы на другое;

	д) на заправку инструментов;

	е) на получение рабочими задания и на периодический отдых в
	течение рабочей смены.

	Кроме того, нормами затрат труда учтены, но в описании работ не
	оговорены следующие работы:

	а) сборка, разборка и передвижка по ходу работ простейших
	подмостей, верстаков и т.п.;

	б) приготовление растворов и колеров;

	в) выполнение всех вспомогательных работ и операций;

	г) использование при ремонте, наряду с новым, старого материала от
	разборки.

	Все нормы затрат труда предусматривают законченный комплекс
	соответствующего вида работ.

	5. Нормативы составлены для обычных условий труда. При наличии

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	других условий, например, производство работ в зимнее время на
	открытом воздухе или в неотапливаемых помещениях к нормативам
	трудовых затрат должны применяться коэффициенты согласно общей части
	Единых норм и расценок на строительные, монтажные и ремонтно-
	строительные работы (ЕНиР, 1964 г.).

	6. Перечень приведенных в Сборнике работ соответствует работам по
	текущему ремонту, предусмотренным Положением о проведении планово-
	предупредительного ремонта жилых и общественных зданий.

	7. Затраты труда и материалов на работы, отсутствующие в настоящем
	Сборнике, могут быть определены применительно к аналогичным работам,
	предусмотренным Сборником, или по фактически затраченному времени и
	расходу материалов.

	8. При подготовке настоящего издания Сборника учтены рекомендации
	о необходимых изменениях, уточнениях и дополнениях, предложенные
	Главным Управлением жилищного хозяйства МКХ РСФСР и жилищными
	организациями двадцати семи городов Российской Федерации.

	--------T-----------------------T---------T-------T------------------
	----------------¬

	¦	 Шифр  	¦	  Наименование работ   	¦	 Единица 	¦	Затраты	¦	        На единицу
	работы         	¦

	¦	       	¦	                       	¦	измерения	¦	труда, 	+------------------
	----------------+

	¦	       	¦	                       	¦	         	¦	ч/час. 	¦	    Расход
	основных материалов    	¦

	¦	       	¦	                       	¦	         	¦	       	+------------------
	T--------T------+

	¦	       	¦	                       	¦	         	¦	       	¦	   наименование  
	¦	ед. изм.	¦	 к-во 	¦

	+-------+-----------------------+---------+-------+------------------
	+--------+------+

	¦	   1   	¦	           2           	¦	    3    	¦	   4   	¦	        5        
	¦	   6    	¦	  7   	¦

	+-------+-----------------------+---------+-------+------------------
	+--------+------+

	¦	       	¦	I. Кровли и ограждения 	¦	         	¦	       	¦	                 
	¦	        	¦	      	¦

	¦	       	¦	                       	¦	         	¦	       	¦	                 
	¦	        	¦	      	¦

	¦	I-1    	¦	Смена кровли из черной 	¦	кв. м    	¦	0,99   	¦	Сталь кровельная 
	¦	кг      	¦	5,3   	¦

	¦	       	¦	кровельной стали при   	¦	         	¦	       	¦	черная           

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	¦	        	¦	      	¦

	¦	       	¦	площади покрытия до    	¦	         	¦	       	¦	Олифа            
	¦	-"-     	¦	0,028 	¦

	¦	       	¦	10 кв. м               	¦	         	¦	       	¦	Гвозди кровельные
	¦	-"-     	¦	0,012 	¦

	¦	       	¦	                       	¦	         	¦	       	¦	Костыли и крючья 
	¦	-"-     	¦	0,63  	¦

	¦	I-2    	¦	То же, при площади     	¦	-"-      	¦	0,80   	¦	То же            
	¦	        	¦	      	¦

	¦	       	¦	покрытия до 25 кв. м   	¦	         	¦	       	¦	                 
	¦	        	¦	      	¦

	¦	I-3    	¦	Смена кровли из оцинко-	¦	-"-      	¦	0,93   	¦	Сталь кровельная 
	¦	-"-     	¦	5,36  	¦

	¦	       	¦	ванной кровельной стали	¦	         	¦	       	¦	оцинкованная     
	¦	        	¦	      	¦

	¦	       	¦	при площади покрытия до	¦	         	¦	       	¦	Гвозди кровельные
	¦	-"-     	¦	0,012 	¦

	¦	       	¦	10 кв. м               	¦	         	¦	       	¦	Костыли и крючья 
	¦	-"-     	¦	0,63  	¦

	¦	I-4    	¦	То же, при площади     	¦	-"-      	¦	0,75   	¦	То же            
	¦	        	¦	      	¦

	¦	       	¦	покрытия до 25 кв. м   	¦	         	¦	       	¦	                 
	¦	        	¦	      	¦

	¦	I-5    	¦	Смена отдельных листов 	¦	лист     	¦	1,24   	¦	Сталь кровельная 
	¦	-"-     	¦	4,4   	¦

	¦	       	¦	из черной кровельной   	¦	         	¦	       	¦	черная           
	¦	        	¦	      	¦

	¦	       	¦	стали при рядовом      	¦	         	¦	       	¦	Олифа            
	¦	-"-     	¦	0,028 	¦

	¦	       	¦	покрытии               	¦	         	¦	       	¦	Гвозди кровельные
	¦	-"-     	¦	0,03  	¦

	¦	I-6    	¦	То же, из оцинкованной 	¦	-"-      	¦	1,20   	¦	Сталь кровельная 
	¦	-"-     	¦	4,5   	¦

	¦	       	¦	кровельной стали       	¦	         	¦	       	¦	оцинкованная     
	¦	        	¦	      	¦

	¦	       	¦	                       	¦	         	¦	       	¦	Гвозди кровельные
	¦	-"-     	¦	0,03  	¦

	¦	       	¦	                       	¦	         	¦	       	¦	оцинкованные     
	¦	        	¦	      	¦

	¦	I-7    	¦	Смена отдельных листов 	¦	-"-      	¦	1,25   	¦	Сталь кровельная 

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	¦	-"-     	¦	4,7   	¦

	¦	       	¦	из черной кровельной   	¦	         	¦	       	¦	черная           
	¦	        	¦	      	¦

	¦	       	¦	стали в разжелобках и  	¦	         	¦	       	¦	Олифа            
	¦	-"-     	¦	0,028 	¦

	¦	       	¦	карнизных свесах на    	¦	         	¦	       	¦	Гвозди кровельные
	¦	-"-     	¦	0,03  	¦

	¦	       	¦	двойном фальце         	¦	         	¦	       	¦	                 
	¦	        	¦	      	¦

	¦	I-8    	¦	То же, из оцинкованной 	¦	-"-      	¦	1,22   	¦	Сталь кровельная 
	¦	-"-     	¦	4,8   	¦

	¦	       	¦	кровельной стали       	¦	         	¦	       	¦	оцинкованная     
	¦	        	¦	      	¦

	¦	       	¦	                       	¦	         	¦	       	¦	Гвозди           
	¦	-"-     	¦	0,03  	¦

	¦	I-9    	¦	Постановка заплат на   	¦	место    	¦	0,62   	¦	Сталь кровельная 
	¦	кг      	¦	2,2   	¦

	¦	       	¦	кровле из черной кро-  	¦	         	¦	       	¦	черная           
	¦	        	¦	      	¦

	¦	       	¦	вельной стали размером 	¦	         	¦	       	¦	Олифа            
	¦	-"-     	¦	0,014 	¦

	¦	       	¦	1/2 листа              	¦	         	¦	       	¦	Гвозди           
	¦	-"-     	¦	0,015 	¦

	¦	I-10   	¦	То же, из оцинкованной 	¦	-"-      	¦	0,60   	¦	Сталь кровельная 
	¦	-"-     	¦	2,25  	¦

	¦	       	¦	кровельной стали       	¦	         	¦	       	¦	оцинкованная     
	¦	        	¦	      	¦

	¦	       	¦	                       	¦	         	¦	       	¦	Гвозди           
	¦	-"-     	¦	0,015 	¦

	¦	I-11   	¦	Смена рулонной кровли  	¦	кв. м    	¦	0,42   	¦	Толь или рубероид
	¦	кв. м   	¦	1,15  	¦

	¦	       	¦	отдельными местами при 	¦	         	¦	       	¦	Бруски           
	¦	куб. м  	¦	0,001 	¦

	¦	       	¦	площади покрытия до    	¦	         	¦	       	¦	Мастика          
	¦	кг      	¦	2,2   	¦

	¦	       	¦	10 кв. м в 1 слой      	¦	         	¦	       	¦	Гвозди           
	¦	-"-     	¦	0,039 	¦

	¦	       	¦	                       	¦	         	¦	       	¦	Дрова            
	¦	куб. м  	¦	0,002 	¦

	¦	I-12   	¦	То же, в 2 слоя        	¦	-"-      	¦	0,82   	¦	Толь или рубероид

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	¦	кв. м   	¦	2,28  	¦

	¦	       	¦	                       	¦	         	¦	       	¦	Бруски           
	¦	куб. м  	¦	0,001 	¦

	¦	       	¦	                       	¦	         	¦	       	¦	Мастика          
	¦	кг      	¦	3,0   	¦

	¦	       	¦	                       	¦	         	¦	       	¦	Гвозди           
	¦	-"-     	¦	0,059 	¦

	¦	       	¦	                       	¦	         	¦	       	¦	Дрова            
	¦	куб. м  	¦	0,003 	¦

	¦	I-13   	¦	Смена рулонной кровли  	¦	кв. м    	¦	0,34   	¦	Толь или рубероид
	¦	кв. м   	¦	1,15  	¦

	¦	       	¦	отдельными местами при 	¦	         	¦	       	¦	Бруски           
	¦	куб. м  	¦	0,001 	¦

	¦	       	¦	площади покрытия до    	¦	         	¦	       	¦	Мастика          
	¦	кг      	¦	2,2   	¦

	¦	       	¦	25 кв. м в один слой   	¦	         	¦	       	¦	Гвозди           
	¦	-"-     	¦	0,039 	¦

	¦	       	¦	                       	¦	         	¦	       	¦	Дрова            
	¦	куб. м  	¦	0,002 	¦

	¦	I-14   	¦	То же, в 2 слоя        	¦	-"-      	¦	0,67   	¦	Толь или рубероид
	¦	кв. м   	¦	2,28  	¦

	¦	       	¦	                       	¦	         	¦	       	¦	Бруски           
	¦	куб. м  	¦	0,001 	¦

	¦	       	¦	                       	¦	         	¦	       	¦	Мастика          
	¦	кг      	¦	3,0   	¦

	¦	       	¦	                       	¦	         	¦	       	¦	Гвозди           
	¦	-"-     	¦	0,059 	¦

	¦	       	¦	                       	¦	         	¦	       	¦	Дрова            
	¦	куб. м  	¦	0,003 	¦

	¦	I-15   	¦	Ремонт рулонного покры-	¦	место    	¦	1,01   	¦	Толь или рубероид
	¦	кв. м   	¦	2,28  	¦

	¦	       	¦	тия постановкой заплат 	¦	         	¦	       	¦	Мастика          
	¦	кг      	¦	5,5   	¦

	¦	       	¦	площадью до 1 кв. м в  	¦	         	¦	       	¦	Гвозди           
	¦	-"-     	¦	0,07  	¦

	¦	       	¦	два слоя               	¦	         	¦	       	¦	                 
	¦	        	¦	      	¦

	¦	I-16   	¦	Смена поврежденных     	¦	шт.      	¦	0,29   	¦	Асбоцементная    
	¦	шт.     	¦	1     	¦

	¦	       	¦	асбоцементных плоских  	¦	         	¦	       	¦	плитка           

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	¦	        	¦	      	¦

	¦	       	¦	плиток                 	¦	         	¦	       	¦	Гвозди           
	¦	кг      	¦	0,016 	¦

	¦	       	¦	                       	¦	         	¦	       	¦	оцинкованные     
	¦	        	¦	      	¦

	¦	I-17   	¦	Смена поврежденных     	¦	-"-      	¦	0,31   	¦	Асбофанерные     
	¦	шт.     	¦	1     	¦

	¦	       	¦	асбофанерных           	¦	         	¦	       	¦	профилированные  
	¦	        	¦	      	¦

	¦	       	¦	профилированных плиток 	¦	         	¦	       	¦	плитки           
	¦	        	¦	      	¦

	¦	       	¦	                       	¦	         	¦	       	¦	Шурупы           
	¦	кг      	¦	0,053 	¦

	¦	I-18   	¦	Смена поврежденных     	¦	-"-      	¦	0,16   	¦	Черепица         
	¦	шт.     	¦	1     	¦

	¦	       	¦	плиток черепицы        	¦	         	¦	       	¦	Раствор глиняный 
	¦	куб. м  	¦	0,004 	¦

	¦	I-19   	¦	Смена обрамлений (при- 	¦	м        	¦	0,87   	¦	Черепица         
	¦	шт.     	¦	2,5   	¦

	¦	       	¦	мыканий) у дымовых труб	¦	         	¦	       	¦	Гвозди кровельные
	¦	кг      	¦	0,1   	¦

	¦	       	¦	на кровле, крытой      	¦	         	¦	       	¦	оцинкованные     
	¦	        	¦	      	¦

	¦	       	¦	черепицей              	¦	         	¦	       	¦	Сталь кровельная 
	¦	-"-     	¦	1,1   	¦

	¦	       	¦	                       	¦	         	¦	       	¦	оцинкованная     
	¦	        	¦	      	¦

	¦	I-20   	¦	То же, у противопожар- 	¦	-"-      	¦	0,73   	¦	Черепица         
	¦	шт.     	¦	2     	¦

	¦	       	¦	ных стен               	¦	         	¦	       	¦	Гвозди кровельные
	¦	кг      	¦	0,1   	¦

	¦	       	¦	                       	¦	         	¦	       	¦	оцинкованные     
	¦	        	¦	      	¦

	¦	       	¦	                       	¦	         	¦	       	¦	Сталь кровельная 
	¦	-"-     	¦	1,7   	¦

	¦	       	¦	                       	¦	         	¦	       	¦	оцинкованная     
	¦	        	¦	      	¦

	¦	I-21   	¦	Смена обрамлений (при- 	¦	-"-      	¦	0,87   	¦	Асбоцементные    
	¦	шт.     	¦	1,5   	¦

	¦	       	¦	мыканий) у дымовых труб	¦	         	¦	       	¦	плитки размером  

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	¦	        	¦	      	¦

	¦	       	¦	на кровле, крытой      	¦	         	¦	       	¦	400 х 400 мм     
	¦	        	¦	      	¦

	¦	       	¦	асбоцементными плитками	¦	         	¦	       	¦	Гвозди кровельные
	¦	кг      	¦	0,1   	¦

	¦	       	¦	                       	¦	         	¦	       	¦	оцинкованные     
	¦	        	¦	      	¦

	¦	       	¦	                       	¦	         	¦	       	¦	Сталь кровельная 
	¦	-"-     	¦	0,9   	¦

	¦	       	¦	                       	¦	         	¦	       	¦	оцинкованная     
	¦	        	¦	      	¦

	¦	I-22   	¦	То же, у противопожар- 	¦	-"-      	¦	0,72   	¦	Асбоцементные    
	¦	шт.     	¦	1     	¦

	¦	       	¦	ных стен               	¦	         	¦	       	¦	плитки размером  
	¦	        	¦	      	¦

	¦	       	¦	                       	¦	         	¦	       	¦	400 х 400 мм     
	¦	        	¦	      	¦

	¦	       	¦	                       	¦	         	¦	       	¦	Гвозди кровельные
	¦	кг      	¦	0,1   	¦

	¦	       	¦	                       	¦	         	¦	       	¦	оцинкованные     
	¦	        	¦	      	¦

	¦	       	¦	                       	¦	         	¦	       	¦	Сталь кровельная 
	¦	-"-     	¦	1,7   	¦

	¦	       	¦	                       	¦	         	¦	       	¦	оцинкованная     
	¦	        	¦	      	¦

	¦	I-23   	¦	Смена простой тесовой  	¦	кв. м    	¦	0,87   	¦	Сталь кровельная 
	¦	кг      	¦	0,112 	¦

	¦	       	¦	кровли при уклоне до   	¦	         	¦	       	¦	оцинкованная     
	¦	        	¦	      	¦

	¦	       	¦	35° отдельными местами 	¦	         	¦	       	¦	Доски            
	¦	куб. м  	¦	0,034 	¦

	¦	       	¦	площадью до 10 кв. м   	¦	         	¦	       	¦	Гвозди           
	¦	кг      	¦	0,4   	¦

	¦	I-24   	¦	То же, площадью до     	¦	-"-      	¦	0,74   	¦	То же            
	¦	        	¦	      	¦

	¦	       	¦	25 кв. м               	¦	         	¦	       	¦	                 
	¦	        	¦	      	¦

	¦	I-25   	¦	Смена простой драночной	¦	кв. м    	¦	1,02   	¦	Сталь кровельная 
	¦	кг      	¦	0,112 	¦

	¦	       	¦	кровли при уклоне до   	¦	         	¦	       	¦	оцинкованная     

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	¦	        	¦	      	¦

	¦	       	¦	35° отдельными местами 	¦	         	¦	       	¦	Дрань кровельная 
	¦	куб. м  	¦	0,05  	¦

	¦	       	¦	площадью до 10 кв. м   	¦	         	¦	       	¦	Доски            
	¦	-"-     	¦	0,005 	¦

	¦	       	¦	                       	¦	         	¦	       	¦	Гвозди кровельные
	¦	кг      	¦	0,051 	¦

	¦	       	¦	                       	¦	         	¦	       	¦	Гвозди           
	¦	-"-     	¦	0,103 	¦

	¦	       	¦	                       	¦	         	¦	       	¦	строительные     
	¦	        	¦	      	¦

	¦	I-26   	¦	То же, площадью до     	¦	-"-      	¦	0,91   	¦	То же            
	¦	        	¦	      	¦

	¦	       	¦	25 кв. м               	¦	         	¦	       	¦	                 
	¦	        	¦	      	¦

	¦	I-27   	¦	Изготовление прямых    	¦	         	¦	       	¦	                 
	¦	        	¦	      	¦

	¦	       	¦	звеньев из водосточных 	¦	         	¦	       	¦	                 
	¦	        	¦	      	¦

	¦	       	¦	труб:                  	¦	         	¦	       	¦	                 
	¦	        	¦	      	¦

	¦	       	¦	а) диаметром 220 мм    	¦	м        	¦	0,18   	¦	Сталь кровельная 
	¦	кг      	¦	3,17  	¦

	¦	       	¦	б) диаметром 140 мм    	¦	-"-      	¦	0,15   	¦	-"-              
	¦	-"-     	¦	2,0   	¦

	¦	I-28   	¦	Изготовление колен для 	¦	         	¦	       	¦	                 
	¦	        	¦	      	¦

	¦	       	¦	водосточных труб:      	¦	         	¦	       	¦	                 
	¦	        	¦	      	¦

	¦	       	¦	а) диаметром 220 мм    	¦	шт.      	¦	0,62   	¦	Сталь кровельная 
	¦	-"-     	¦	2,25  	¦

	¦	       	¦	б) диаметром 140 мм    	¦	-"-      	¦	0,43   	¦	-"-              
	¦	-"-     	¦	1,4   	¦

	¦	I-29   	¦	Изготовление отметов   	¦	         	¦	       	¦	                 
	¦	        	¦	      	¦

	¦	       	¦	для водосточных труб:  	¦	         	¦	       	¦	                 
	¦	        	¦	      	¦

	¦	       	¦	а) диаметром 220 мм    	¦	-"-      	¦	0,37   	¦	Сталь кровельная 
	¦	-"-     	¦	2,25  	¦

	¦	       	¦	б) диаметром 140 мм    	¦	-"-      	¦	0,26   	¦	-"-              

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	¦	-"-     	¦	1,4   	¦

	¦	I-30   	¦	Изготовление воронок   	¦	         	¦	       	¦	                 
	¦	        	¦	      	¦

	¦	       	¦	для водосточных труб:  	¦	         	¦	       	¦	                 
	¦	        	¦	      	¦

	¦	       	¦	а) диаметром 220 мм    	¦	-"-      	¦	0,76   	¦	Сталь кровельная 
	¦	-"-     	¦	4,5   	¦

	¦	       	¦	б) диаметром 140 мм    	¦	-"-      	¦	0,50   	¦	-"-              
	¦	-"-     	¦	2,8   	¦

	¦	I-31   	¦	Смена прямых звеньев   	¦	         	¦	       	¦	                 
	¦	        	¦	      	¦

	¦	       	¦	водосточных труб (диа- 	¦	         	¦	       	¦	                 
	¦	        	¦	      	¦

	¦	       	¦	метром 14 и 22 см) с   	¦	         	¦	       	¦	                 
	¦	        	¦	      	¦

	¦	       	¦	земли, подмостей или   	¦	         	¦	       	¦	                 
	¦	        	¦	      	¦

	¦	       	¦	люлек:                 	¦	         	¦	       	¦	                 
	¦	        	¦	      	¦

	¦	       	¦	а) с земли и подмостей 	¦	м        	¦	0,32   	¦	Прямые звенья    
	¦	м       	¦	1,05  	¦

	¦	       	¦	б) с люлек             	¦	-"-      	¦	0,76   	¦	                 
	¦	        	¦	      	¦

	¦	I-32   	¦	То же, колен           	¦	         	¦	       	¦	                 
	¦	        	¦	      	¦

	¦	       	¦	а) с земли и подмостей 	¦	шт.      	¦	0,57   	¦	Колена           
	¦	шт.     	¦	1     	¦

	¦	       	¦	б) с люлек             	¦	-"-      	¦	1,25   	¦	                 
	¦	        	¦	      	¦

	¦	I-33   	¦	То же, отливов с земли 	¦	шт.      	¦	0,44   	¦	Отливы           
	¦	шт.     	¦	1     	¦

	¦	       	¦	и подмостей            	¦	         	¦	       	¦	                 
	¦	        	¦	      	¦

	¦	I-34   	¦	То же, воронок с люлек 	¦	-"-      	¦	1,05   	¦	Воронки          
	¦	-"-     	¦	1     	¦

	¦	I-35   	¦	Перенавеска водосточных	¦	1 м трубы	¦	0,62   	¦	Проволока        
	¦	кг      	¦	0,006 	¦

	¦	       	¦	труб                   	¦	         	¦	       	¦	оцинкованная     
	¦	        	¦	      	¦

	¦	I-36   	¦	Устройство покрытий    	¦	         	¦	       	¦	                 

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	¦	        	¦	      	¦

	¦	       	¦	поясков, сандриков,    	¦	         	¦	       	¦	                 
	¦	        	¦	      	¦

	¦	       	¦	подоконных отливов     	¦	         	¦	       	¦	                 
	¦	        	¦	      	¦

	¦	       	¦	а) при ширине до 0,4 м 	¦	м        	¦	0,29   	¦	Сталь кровельная 
	¦	-"-     	¦	2,0   	¦

	¦	       	¦	                       	¦	         	¦	       	¦	черная           
	¦	        	¦	      	¦

	¦	       	¦	                       	¦	         	¦	       	¦	Гвозди кровельные
	¦	-"-     	¦	0,04  	¦

	¦	       	¦	                       	¦	         	¦	       	¦	Олифа            
	¦	-"-     	¦	0,013 	¦

	¦	       	¦	                       	¦	         	¦	       	¦	Проволока        
	¦	-"-     	¦	0,058 	¦

	¦	       	¦	б) то же, при ширине до	¦	-"-      	¦	0,38   	¦	Сталь кровельная 
	¦	-"-     	¦	3,6   	¦

	¦	       	¦	0,7 м                  	¦	         	¦	       	¦	черная           
	¦	        	¦	      	¦

	¦	       	¦	                       	¦	         	¦	       	¦	Гвозди кровельные
	¦	-"-     	¦	0,04  	¦

	¦	       	¦	                       	¦	         	¦	       	¦	Олифа            
	¦	-"-     	¦	0,023 	¦

	¦	       	¦	                       	¦	         	¦	       	¦	Проволока        
	¦	-"-     	¦	0,058 	¦

	¦	I-37   	¦	Устройство покрытий    	¦	-"-      	¦	0,27   	¦	Сталь кровельная 
	¦	-"-     	¦	3,2   	¦

	¦	       	¦	карнизных свесов из    	¦	         	¦	       	¦	черная           
	¦	        	¦	      	¦

	¦	       	¦	черной кровельной стали	¦	         	¦	       	¦	Гвозди кровельные
	¦	-"-     	¦	0,005 	¦

	¦	       	¦	                       	¦	         	¦	       	¦	Костыли          
	¦	-"-     	¦	2,89  	¦

	¦	       	¦	                       	¦	         	¦	       	¦	Олифа            
	¦	-"-     	¦	0,021 	¦

	¦	       	¦	                       	¦	         	¦	       	¦	Проволока        
	¦	-"-     	¦	0,059 	¦

	¦	I-38   	¦	То же, настенных       	¦	-"-      	¦	0,29   	¦	Сталь кровельная 
	¦	-"-     	¦	3,2   	¦

	¦	       	¦	желобов шириной 0,7 м  	¦	         	¦	       	¦	черная           

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	¦	        	¦	      	¦

	¦	       	¦	                       	¦	         	¦	       	¦	Гвозди кровельные
	¦	-"-     	¦	0,005 	¦

	¦	       	¦	                       	¦	         	¦	       	¦	Крючья           
	¦	-"-     	¦	0,33  	¦

	¦	       	¦	                       	¦	         	¦	       	¦	Олифа            
	¦	-"-     	¦	0,021 	¦

	¦	       	¦	                       	¦	         	¦	       	¦	Проволока        
	¦	-"-     	¦	0,059 	¦

	¦	I-39   	¦	Смена колпаков на дымо-	¦	труба    	¦	2,12   	¦	Сталь кровельная 
	¦	кг      	¦	6,0   	¦

	¦	       	¦	вых трубах в один канал	¦	         	¦	       	¦	черная           
	¦	        	¦	      	¦

	¦	       	¦	с их изготовлением     	¦	         	¦	       	¦	Олифа            
	¦	-"-     	¦	0,004 	¦

	¦	       	¦	                       	¦	         	¦	       	¦	Гвозди           
	¦	-"-     	¦	0,06  	¦

	¦	       	¦	                       	¦	         	¦	       	¦	Проволока печная 
	¦	-"-     	¦	0,025 	¦

	¦	I-40   	¦	Добавление при каждом  	¦	-"-      	¦	0,62   	¦	Сталь кровельная 
	¦	-"-     	¦	2     	¦

	¦	       	¦	следующем канале       	¦	         	¦	       	¦	черная           
	¦	        	¦	      	¦

	¦	       	¦	                       	¦	         	¦	       	¦	Олифа            
	¦	-"-     	¦	0,001 	¦

	¦	       	¦	                       	¦	         	¦	       	¦	Гвозди           
	¦	-"-     	¦	0,03  	¦

	¦	       	¦	                       	¦	         	¦	       	¦	Проволока печная 
	¦	-"-     	¦	0,013 	¦

	¦	I-41   	¦	Устройство покрытий    	¦	кв. м    	¦	0,77   	¦	Сталь кровельная 
	¦	-"-     	¦	5,2   	¦

	¦	       	¦	зонтов над крыльцами   	¦	         	¦	       	¦	черная           
	¦	        	¦	      	¦

	¦	       	¦	или подвалами из черной	¦	         	¦	       	¦	Гвозди кровельные
	¦	-"-     	¦	0,041 	¦

	¦	       	¦	кровельной стали       	¦	         	¦	       	¦	Олифа            
	¦	-"-     	¦	0,045 	¦

	¦	       	¦	                       	¦	         	¦	       	¦	Проволока черная 
	¦	-"-     	¦	0,053 	¦

	¦	I-42   	¦	То же, из оцинкованной 	¦	-"-      	¦	0,74   	¦	Сталь кровельная 

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	¦	-"-     	¦	5,3   	¦

	¦	       	¦	стали                  	¦	         	¦	       	¦	оцинкованная     
	¦	        	¦	      	¦

	¦	       	¦	                       	¦	         	¦	       	¦	Гвозди кровельные
	¦	-"-     	¦	0,041 	¦

	¦	       	¦	                       	¦	         	¦	       	¦	Проволока        
	¦	-"-     	¦	0,053 	¦

	¦	       	¦	                       	¦	         	¦	       	¦	оцинкованная     
	¦	        	¦	      	¦

	¦	I-43   	¦	Смена стремян для      	¦	шт.      	¦	0,42   	¦	Стремена         
	¦	шт.     	¦	1     	¦

	¦	       	¦	водосточных труб в     	¦	         	¦	       	¦	Проволока        
	¦	кг      	¦	0,003 	¦

	¦	       	¦	каменных стенах при    	¦	         	¦	       	¦	                 
	¦	        	¦	      	¦

	¦	       	¦	работе с лестниц       	¦	         	¦	       	¦	                 
	¦	        	¦	      	¦

	¦	I-44   	¦	Смена стремян для      	¦	-"-      	¦	0,86   	¦	Стремена         
	¦	шт.     	¦	1     	¦

	¦	       	¦	водосточных труб в     	¦	         	¦	       	¦	Проволока        
	¦	кг      	¦	0,003 	¦

	¦	       	¦	каменных стенах при    	¦	         	¦	       	¦	                 
	¦	        	¦	      	¦

	¦	       	¦	работе с люлек         	¦	         	¦	       	¦	                 
	¦	        	¦	      	¦

	¦	I-45   	¦	Раскрытие фальцев и    	¦	кв. м    	¦	0,26   	¦	Замазка суриковая
	¦	кг      	¦	0,04  	¦

	¦	       	¦	гребней, промазка сури-	¦	кровли   	¦	       	¦	Олифа            
	¦	-"-     	¦	0,03  	¦

	¦	       	¦	ковой замазкой и вновь 	¦	         	¦	       	¦	                 
	¦	        	¦	      	¦

	¦	       	¦	поджатие фальцев и     	¦	         	¦	       	¦	                 
	¦	        	¦	      	¦

	¦	       	¦	гребней                	¦	         	¦	       	¦	                 
	¦	        	¦	      	¦

	¦	I-46   	¦	Промазка фальцев и     	¦	-"-      	¦	0,03   	¦	Замазка суриковая
	¦	-"-     	¦	0,01  	¦

	¦	       	¦	свищей стальной кровли 	¦	         	¦	       	¦	Олифа            
	¦	-"-     	¦	0,012 	¦

	¦	       	¦	суриковой замазкой     	¦	         	¦	       	¦	                 

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	¦	        	¦	      	¦

	¦	I-47   	¦	Осмолка рулонной кровли	¦	кв. м    	¦	0,09   	¦	Смола            
	¦	-"-     	¦	1,5   	¦

	¦	       	¦	за 1 раз               	¦	         	¦	       	¦	Песок            
	¦	куб. м  	¦	0,002 	¦

	¦	       	¦	                       	¦	         	¦	       	¦	Дрова            
	¦	-"-     	¦	0,002 	¦

	¦	I-48   	¦	Масляная окраска сталь-	¦	кв. м    	¦	0,15   	¦	Сурик железный   
	¦	кг      	¦	0,193 	¦

	¦	       	¦	ной кровли с расчисткой	¦	окраски  	¦	       	¦	Олифа            
	¦	-"-     	¦	0,057 	¦

	¦	       	¦	старой краски до 10%   	¦	         	¦	       	¦	Замазка суриковая
	¦	-"-     	¦	0,006 	¦

	¦	I-49   	¦	Масляная окраска сталь-	¦	-"-      	¦	0,16   	¦	Сурик железный   
	¦	-"-     	¦	0,193 	¦

	¦	       	¦	ной кровли с расчисткой	¦	         	¦	       	¦	Олифа            
	¦	-"-     	¦	0,059 	¦

	¦	       	¦	старой краски более 10%	¦	         	¦	       	¦	Замазка суриковая
	¦	-"-     	¦	0,021 	¦

	¦	I-50   	¦	Масляная окраска ранее 	¦	-"-      	¦	0,31   	¦	Белила тертые    
	¦	-"-     	¦	0,035 	¦

	¦	       	¦	окрашенных водосточных 	¦	         	¦	       	¦	Краски тертые    
	¦	-"-     	¦	0,024 	¦

	¦	       	¦	труб, оконных сливов и 	¦	         	¦	       	¦	Олифа            
	¦	-"-     	¦	0,035 	¦

	¦	       	¦	поясков за 1 раз       	¦	         	¦	       	¦	                 
	¦	        	¦	      	¦

	¦	I-51   	¦	Ремонт парапетной      	¦	м        	¦	0,43   	¦	Заклепки         
	¦	-"-     	¦	0,01  	¦

	¦	       	¦	решетки на месте с     	¦	решетки  	¦	       	¦	                 
	¦	        	¦	      	¦

	¦	       	¦	креплением к крыше     	¦	         	¦	       	¦	                 
	¦	        	¦	      	¦

	¦	I-52   	¦	Ремонт лестничных реше-	¦	м        	¦	0,83   	¦	Цемент           
	¦	-"-     	¦	3,0   	¦

	¦	       	¦	ток (без смены частей) 	¦	решетки  	¦	       	¦	Болты            
	¦	-"-     	¦	0,12  	¦

	¦	       	¦	выправкой и укреплением	¦	         	¦	       	¦	                 
	¦	        	¦	      	¦

	¦	I-53   	¦	Мелкий ремонт металли- 	¦	кв. м    	¦	1,20   	¦	                 

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	¦	        	¦	      	¦

	¦	       	¦	ческих ограждений      	¦	         	¦	       	¦	                 
	¦	        	¦	      	¦

	¦	I-54   	¦	Прорезка отверстий для 	¦	место    	¦	0,96   	¦	Олифа            
	¦	-"-     	¦	0,02  	¦

	¦	       	¦	труб в стальной кровле 	¦	         	¦	       	¦	Сурик            
	¦	-"-     	¦	0,045 	¦

	¦	       	¦	с последующей отделкой 	¦	         	¦	       	¦	                 
	¦	        	¦	      	¦

	¦	I-55   	¦	Смена конусообразных   	¦	шт.      	¦	0,50   	¦	Сталь кровельная 
	¦	-"-     	¦	1,4   	¦

	¦	       	¦	зонтов диаметром до 200	¦	         	¦	       	¦	Сталь сортовая   
	¦	-"-     	¦	0,4   	¦

	¦	       	¦	мм над вытяжными труба-	¦	         	¦	       	¦	Заклепки         
	¦	-"-     	¦	0,15  	¦

	¦	       	¦	ми с окраской          	¦	         	¦	       	¦	Олифа            
	¦	-"-     	¦	0,03  	¦

	¦	       	¦	                       	¦	         	¦	       	¦	Сурик тертый     
	¦	-"-     	¦	0,07  	¦

	¦	I-56   	¦	Очистка и сметание му- 	¦	10       	¦	0,213  	¦	                 
	¦	        	¦	      	¦

	¦	       	¦	сора со стальной кровли	¦	кв. м    	¦	       	¦	                 
	¦	        	¦	      	¦

	¦	       	¦	в порядке ухода за     	¦	         	¦	       	¦	                 
	¦	        	¦	      	¦

	¦	       	¦	кровлей                	¦	         	¦	       	¦	                 
	¦	        	¦	      	¦

	¦	I-57   	¦	Очистка кровли от снега	¦	10       	¦	0,30   	¦	                 
	¦	        	¦	      	¦

	¦	       	¦	со сбиванием сосулек   	¦	кв. м    	¦	       	¦	                 
	¦	        	¦	      	¦

	¦	       	¦	при толщине слоя 10 см 	¦	кровли   	¦	       	¦	                 
	¦	        	¦	      	¦

	¦	I-58   	¦	То же, при толщине слоя	¦	-"-      	¦	0,44   	¦	                 
	¦	        	¦	      	¦

	¦	       	¦	20 см                  	¦	         	¦	       	¦	                 
	¦	        	¦	      	¦

	¦	       	¦	На каждые следующие 10 	¦	-"-      	¦	0,09   	¦	                 
	¦	        	¦	      	¦

	¦	       	¦	см увеличения толщины  	¦	         	¦	       	¦	                 

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	¦	        	¦	      	¦

	¦	       	¦	слоя добавлять         	¦	         	¦	       	¦	                 
	¦	        	¦	      	¦

	¦	       	¦	                       	¦	         	¦	       	¦	                 
	¦	        	¦	      	¦

	¦	       	¦	II. Деревянные         	¦	         	¦	       	¦	                 
	¦	        	¦	      	¦

	¦	       	¦	конструкции            	¦	         	¦	       	¦	                 
	¦	        	¦	      	¦

	¦	       	¦	                       	¦	         	¦	       	¦	                 
	¦	        	¦	      	¦

	¦	II-1   	¦	Смена отдельных дере-  	¦	стул     	¦	7,95   	¦	Бревна           
	¦	куб. м  	¦	0,1   	¦

	¦	       	¦	вянных стульев под     	¦	         	¦	       	¦	Пластины         
	¦	-"-     	¦	0,03  	¦

	¦	       	¦	деревянными зданиями с 	¦	         	¦	       	¦	Скобы            
	¦	кг      	¦	1,2   	¦

	¦	       	¦	земляными работами     	¦	         	¦	       	¦	Смола            
	¦	-"-     	¦	2,3   	¦

	¦	II-2   	¦	Смена местами деревян- 	¦	кв. м    	¦	4,44   	¦	Доски            
	¦	куб. м  	¦	0,081 	¦

	¦	       	¦	ного цоколя с постанов-	¦	         	¦	       	¦	Бруски           
	¦	-"-     	¦	0,003 	¦

	¦	       	¦	кой отливной доски со  	¦	         	¦	       	¦	Пластины         
	¦	-"-     	¦	0,018 	¦

	¦	       	¦	сменой забирки и       	¦	         	¦	       	¦	Гвозди           
	¦	кг      	¦	0,13  	¦

	¦	       	¦	шлаковой засыпки       	¦	         	¦	       	¦	Смола            
	¦	-"-     	¦	3,0   	¦

	¦	       	¦	                       	¦	         	¦	       	¦	Шлак             
	¦	куб. м  	¦	0,1   	¦

	¦	II-3   	¦	То же, без смены       	¦	-"-      	¦	2,52   	¦	Доски            
	¦	-"-     	¦	0,028 	¦

	¦	       	¦	забирки                	¦	         	¦	       	¦	Бруски           
	¦	-"-     	¦	0,003 	¦

	¦	       	¦	                       	¦	         	¦	       	¦	Гвозди           
	¦	кг      	¦	0,13  	¦

	¦	       	¦	                       	¦	         	¦	       	¦	Шлак             
	¦	куб. м  	¦	0,1   	¦

	¦	II-4   	¦	Смена местами деревян- 	¦	м        	¦	1,83   	¦	Доски            

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	¦	-"-     	¦	0,028 	¦

	¦	       	¦	ного незасыпного цоколя	¦	         	¦	       	¦	Бруски           
	¦	-"-     	¦	0,003 	¦

	¦	       	¦	с постановкой отливной 	¦	         	¦	       	¦	Гвозди           
	¦	кг      	¦	0,13  	¦

	¦	       	¦	доски                  	¦	         	¦	       	¦	                 
	¦	        	¦	      	¦

	¦	II-5   	¦	Смена отливных досок   	¦	-"-      	¦	0,12   	¦	Доски            
	¦	куб. м  	¦	0,005 	¦

	¦	       	¦	цоколя                 	¦	         	¦	       	¦	Гвозди           
	¦	кг      	¦	0,02  	¦

	¦	II-6   	¦	Укрепление бревенчатых 	¦	м сжима  	¦	3,49   	¦	Пластины         
	¦	куб. м  	¦	0,03  	¦

	¦	       	¦	стен установкой сжимов 	¦	с одной  	¦	       	¦	Болты с гайками  
	¦	кг      	¦	1,5   	¦

	¦	       	¦	из пластин с креплением	¦	стороны  	¦	       	¦	                 
	¦	        	¦	      	¦

	¦	       	¦	их болтами             	¦	         	¦	       	¦	                 
	¦	        	¦	      	¦

	¦	II-7   	¦	Смена чистой обшивки   	¦	кв. м    	¦	0,76   	¦	Доски            
	¦	куб. м  	¦	0,025 	¦

	¦	       	¦	стен местами           	¦	         	¦	       	¦	Бруски           
	¦	-"-     	¦	0,003 	¦

	¦	       	¦	                       	¦	         	¦	       	¦	Гвозди           
	¦	кг      	¦	0,070 	¦

	¦	II-8   	¦	Конопатка стен с 2-х   	¦	-"-      	¦	0,73   	¦	Пакля пеньковая  
	¦	-"-     	¦	1,45  	¦

	¦	       	¦	сторон                 	¦	         	¦	       	¦	                 
	¦	        	¦	      	¦

	¦	II-9   	¦	Добавление утепляющей  	¦	-"-      	¦	0,53   	¦	Толь             
	¦	кв. м   	¦	0,24  	¦

	¦	       	¦	засыпки в стены дере-  	¦	         	¦	       	¦	Шлак             
	¦	куб. м  	¦	0,024 	¦

	¦	       	¦	вянных каркасно-обшив- 	¦	         	¦	       	¦	Гвозди           
	¦	кг      	¦	0,033 	¦

	¦	       	¦	ных зданий со снятием и	¦	         	¦	       	¦	                 
	¦	        	¦	      	¦

	¦	       	¦	восстановлением обшивки	¦	         	¦	       	¦	                 
	¦	        	¦	      	¦

	¦	II-10  	¦	Заделка проемов в дере-	¦	кв. м    	¦	3,96   	¦	Бруски           

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	¦	куб. м  	¦	0,002 	¦

	¦	       	¦	вянных перегородках из 	¦	проема   	¦	       	¦	Доски            
	¦	-"-     	¦	0,053 	¦

	¦	       	¦	досок, забранных в     	¦	         	¦	       	¦	Гвозди           
	¦	кг      	¦	0,1   	¦

	¦	       	¦	обвязки                	¦	         	¦	       	¦	                 
	¦	        	¦	      	¦

	¦	II-11  	¦	Укрепление деревянной  	¦	место    	¦	8,85   	¦	Бревна           
	¦	куб. м  	¦	0,005 	¦

	¦	       	¦	балки из бруса поста-  	¦	         	¦	       	¦	Брусья           
	¦	-"-     	¦	0,005 	¦

	¦	       	¦	новкой протеза на      	¦	         	¦	       	¦	Пластины         
	¦	-"-     	¦	0,145 	¦

	¦	       	¦	сгнивший конец балки   	¦	         	¦	       	¦	Доски            
	¦	-"-     	¦	0,021 	¦

	¦	       	¦	                       	¦	         	¦	       	¦	Поковки          
	¦	-"-     	¦	0,06  	¦

	¦	       	¦	                       	¦	         	¦	       	¦	Гвозди           
	¦	кг      	¦	0,036 	¦

	¦	       	¦	                       	¦	         	¦	       	¦	Болты с гайками  
	¦	-"-     	¦	1,56  	¦

	¦	       	¦	                       	¦	         	¦	       	¦	Шлак             
	¦	куб. м  	¦	0,3   	¦

	¦	II-12  	¦	Укрепление конца балки 	¦	-"-      	¦	8,4    	¦	Бревна           
	¦	-"-     	¦	0,11  	¦

	¦	       	¦	у каменной стены при   	¦	         	¦	       	¦	Брусья           
	¦	-"-     	¦	0,024 	¦

	¦	       	¦	помощи подбалки из бру-	¦	         	¦	       	¦	Пластины         
	¦	-"-     	¦	0,002 	¦

	¦	       	¦	са сверху или снизу    	¦	         	¦	       	¦	Бетон            
	¦	-"-     	¦	0,025 	¦

	¦	       	¦	                       	¦	         	¦	       	¦	Скобы            
	¦	кг      	¦	0,3   	¦

	¦	       	¦	                       	¦	         	¦	       	¦	Гвозди           
	¦	-"-     	¦	0,008 	¦

	¦	       	¦	                       	¦	         	¦	       	¦	Болты с гайками  
	¦	-"-     	¦	3,05  	¦

	¦	II-13  	¦	Временное крепление    	¦	пог. м   	¦	0,69   	¦	Бревна           
	¦	куб. м  	¦	0,035 	¦

	¦	       	¦	перекрытий с укладкой  	¦	         	¦	       	¦	Скобы            

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	¦	кг      	¦	0,50  	¦

	¦	       	¦	нижнего прогона, уста- 	¦	         	¦	       	¦	Возврат бревна   
	¦	куб. м  	¦	0,03  	¦

	¦	       	¦	новкой по нему стоек и 	¦	         	¦	       	¦	Возврат скобы    
	¦	кг      	¦	0,50  	¦

	¦	       	¦	укладкой по ним верхне-	¦	         	¦	       	¦	                 
	¦	        	¦	      	¦

	¦	       	¦	го прогона с заготовкой	¦	         	¦	       	¦	                 
	¦	        	¦	      	¦

	¦	       	¦	брусьев, выделкой соп- 	¦	         	¦	       	¦	                 
	¦	        	¦	      	¦

	¦	       	¦	ряжений, трубками и    	¦	         	¦	       	¦	                 
	¦	        	¦	      	¦

	¦	       	¦	креплением скобками    	¦	         	¦	       	¦	                 
	¦	        	¦	      	¦

	¦	II-14  	¦	Смена мауэрлата        	¦	м        	¦	0,39   	¦	Брус             
	¦	куб. м  	¦	0,035 	¦

	¦	       	¦	отдельными местами     	¦	         	¦	       	¦	Гвозди           
	¦	кг      	¦	0,005 	¦

	¦	       	¦	                       	¦	         	¦	       	¦	Смола            
	¦	-"-     	¦	1,0   	¦

	¦	       	¦	                       	¦	         	¦	       	¦	Толь             
	¦	кв. м   	¦	0,31  	¦

	¦	II-15  	¦	Усиление стропильных   	¦	-"-      	¦	1,89   	¦	Бревна           
	¦	куб. м  	¦	0,053 	¦

	¦	       	¦	ног постановкой подко- 	¦	         	¦	       	¦	Поковки          
	¦	кг      	¦	1,8   	¦

	¦	       	¦	сов или стоек          	¦	         	¦	       	¦	                 
	¦	        	¦	      	¦

	¦	II-15а 	¦	Смена конца стропильной	¦	конец    	¦	3,74   	¦	Бревна           
	¦	куб. м  	¦	0,06  	¦

	¦	       	¦	ноги                   	¦	         	¦	       	¦	Поковки          
	¦	кг      	¦	0,4   	¦

	¦	II-16  	¦	Забивка скоб при ремон-	¦	скоба    	¦	       	¦	                 
	¦	        	¦	      	¦

	¦	       	¦	те стропильной системы:	¦	         	¦	       	¦	                 
	¦	        	¦	      	¦

	¦	       	¦	а) в разных плоскостях 	¦	         	¦	0,07   	¦	Поковки          
	¦	-"-     	¦	0,4   	¦

	¦	       	¦	б) в одной плоскости   	¦	         	¦	0,04   	¦	Поковки          

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	¦	-"-     	¦	0,4   	¦

	¦	II-17  	¦	Установка хомутов при  	¦	хомут    	¦	       	¦	                 
	¦	        	¦	      	¦

	¦	       	¦	ремонте стропильной    	¦	         	¦	       	¦	                 
	¦	        	¦	      	¦

	¦	       	¦	системы:               	¦	         	¦	       	¦	                 
	¦	        	¦	      	¦

	¦	       	¦	а) весом до 1 кг с     	¦	         	¦	0,52   	¦	Болты с гайками  
	¦	-"-     	¦	0,82  	¦

	¦	       	¦	одним болтом           	¦	         	¦	       	¦	Поковки          
	¦	-"-     	¦	1,0   	¦

	¦	       	¦	б) весом 1 кг с двумя  	¦	         	¦	0,98   	¦	Болты с гайками  
	¦	-"-     	¦	1,64  	¦

	¦	       	¦	болтами                	¦	         	¦	       	¦	Поковки          
	¦	-"-     	¦	1,0   	¦

	¦	II-18  	¦	На каждый кг сверх     	¦	хомут    	¦	0,15   	¦	Поковки          
	¦	кг      	¦	1,0   	¦

	¦	       	¦	одного добавлять       	¦	         	¦	       	¦	                 
	¦	        	¦	      	¦

	¦	II-19  	¦	Дополнительное утепле- 	¦	куб. м   	¦	3,95   	¦	Шлак             
	¦	куб. м  	¦	1,1   	¦

	¦	       	¦	ние чердачного перекры-	¦	         	¦	       	¦	                 
	¦	        	¦	      	¦

	¦	       	¦	тия шлаком             	¦	         	¦	       	¦	                 
	¦	        	¦	      	¦

	¦	II-20  	¦	Смена местами обрешетки	¦	кв. м    	¦	0,80   	¦	Бруски           
	¦	куб. м  	¦	0,008 	¦

	¦	       	¦	или опалубки крыши     	¦	         	¦	       	¦	Гвозди           
	¦	кг      	¦	0,036 	¦

	¦	II-21  	¦	Смена оштукатуренной   	¦	-"-      	¦	1,30   	¦	Доски            
	¦	куб. м  	¦	0,0264	¦

	¦	       	¦	подшивки потолка       	¦	         	¦	       	¦	Гвозди           
	¦	кг      	¦	0,126 	¦

	¦	II-22  	¦	Смена наката (подбора) 	¦	-"-      	¦	1,65   	¦	Доски            
	¦	куб. м  	¦	0,0446	¦

	¦	       	¦	из досок под штукатурку	¦	         	¦	       	¦	                 
	¦	        	¦	      	¦

	¦	II-23  	¦	Смена лаг из досок по  	¦	пог. м   	¦	0,18   	¦	Доски            
	¦	-"-     	¦	0,01  	¦

	¦	       	¦	балкам                 	¦	         	¦	       	¦	                 

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	¦	        	¦	      	¦

	¦	II-24  	¦	Разборка дощатых полов 	¦	кв. м    	¦	0,34   	¦	                 
	¦	        	¦	      	¦

	¦	II-25  	¦	Устройство дощатых пок-	¦	-"-      	¦	1,08   	¦	Доски при толщине
	¦	-"-     	¦	0,039 	¦

	¦	       	¦	рытий полов в шпунт или	¦	         	¦	       	¦	37 мм            
	¦	        	¦	      	¦

	¦	       	¦	в четверть толщиной в  	¦	         	¦	       	¦	Доски при толщине
	¦	-"-     	¦	0,026 	¦

	¦	       	¦	37 или 22 мм           	¦	         	¦	       	¦	22 мм            
	¦	        	¦	      	¦

	¦	       	¦	                       	¦	         	¦	       	¦	Плинтусы         
	¦	м       	¦	1,05  	¦

	¦	       	¦	                       	¦	         	¦	       	¦	Решетки половые  
	¦	шт.     	¦	0,13  	¦

	¦	       	¦	                       	¦	         	¦	       	¦	вентиляционные   
	¦	        	¦	      	¦

	¦	       	¦	                       	¦	         	¦	       	¦	Шурупы           
	¦	кг      	¦	0,003 	¦

	¦	       	¦	                       	¦	         	¦	       	¦	Гвозди           
	¦	-"-     	¦	0,22  	¦

	¦	II-26  	¦	Устройство дощатых по- 	¦	-"-      	¦	0,98   	¦	Доски при толщине
	¦	куб. м  	¦	0,044 	¦

	¦	       	¦	лов из досок с прозора-	¦	         	¦	       	¦	47 мм            
	¦	        	¦	      	¦

	¦	       	¦	ми толщиной в 47 или   	¦	         	¦	       	¦	Доски при толщине
	¦	-"-     	¦	0,035 	¦

	¦	       	¦	37 мм                  	¦	         	¦	       	¦	37 мм            
	¦	        	¦	      	¦

	¦	       	¦	                       	¦	         	¦	       	¦	Гвозди           
	¦	кг      	¦	0,25  	¦

	¦	II-27  	¦	Сплачивание чистых до- 	¦	-"-      	¦	0,55   	¦	Доски            
	¦	куб. м  	¦	0,001 	¦

	¦	       	¦	щатых полов с загонкой 	¦	         	¦	       	¦	Гвозди           
	¦	кг      	¦	0,01  	¦

	¦	       	¦	реек                   	¦	         	¦	       	¦	                 
	¦	        	¦	      	¦

	¦	II-28  	¦	Смена в полах до 3-х   	¦	м        	¦	0,73   	¦	Доски            
	¦	куб. м  	¦	0,005 	¦

	¦	       	¦	штук досок в одном     	¦	         	¦	       	¦	Гвозди           

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	¦	кг      	¦	0,05  	¦

	¦	       	¦	месте                  	¦	         	¦	       	¦	                 
	¦	        	¦	      	¦

	¦	II-29  	¦	Ремонт местами паркет- 	¦	место    	¦	0,32   	¦	Клепка паркетная 
	¦	кв. м   	¦	0,061 	¦

	¦	       	¦	ного пола (до 5 клепок 	¦	         	¦	       	¦	Рейка основная   
	¦	кг      	¦	0,022 	¦

	¦	       	¦	в одном месте)         	¦	         	¦	       	¦	Гвозди           
	¦	-"-     	¦	0,02  	¦

	¦	       	¦	                       	¦	         	¦	       	¦	Бумага           
	¦	-"-     	¦	0,06  	¦

	¦	II-30  	¦	Ремонт местами паркет- 	¦	место    	¦	1,23   	¦	Клепка паркетная 
	¦	кв. м   	¦	0,41  	¦

	¦	       	¦	ного пола площадью до  	¦	         	¦	       	¦	Рейка            
	¦	кг      	¦	0,15  	¦

	¦	       	¦	0,5 кв. м              	¦	         	¦	       	¦	Гвозди           
	¦	-"-     	¦	0,13  	¦

	¦	       	¦	                       	¦	         	¦	       	¦	Бумага           
	¦	-"-     	¦	0,42  	¦

	¦	II-31  	¦	Циклевка паркетных     	¦	кв. м    	¦	0,28   	¦	                 
	¦	        	¦	      	¦

	¦	       	¦	полов вручную после    	¦	         	¦	       	¦	                 
	¦	        	¦	      	¦

	¦	       	¦	ручной острожки        	¦	         	¦	       	¦	                 
	¦	        	¦	      	¦

	¦	II-31а 	¦	Циклевка старых        	¦	-"-      	¦	0,56   	¦	                 
	¦	        	¦	      	¦

	¦	       	¦	паркетных полов        	¦	         	¦	       	¦	                 
	¦	        	¦	      	¦

	¦	II-31б 	¦	Острожка и циклевка    	¦	-"-      	¦	0,73   	¦	                 
	¦	        	¦	      	¦

	¦	       	¦	старых паркетных полов 	¦	         	¦	       	¦	                 
	¦	        	¦	      	¦

	¦	II-32  	¦	Сплошная острожка      	¦	-"-      	¦	1,11   	¦	                 
	¦	        	¦	      	¦

	¦	       	¦	старых дощатых полов   	¦	         	¦	       	¦	                 
	¦	        	¦	      	¦

	¦	II-33  	¦	Смена покрытий полов из	¦	кв. м    	¦	0,86   	¦	Линолеум         
	¦	кв. м   	¦	1,02  	¦

	¦	       	¦	линолеума площадью до 5	¦	         	¦	       	¦	Клей             

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	¦	кг      	¦	0,017 	¦

	¦	       	¦	кв. м с установкой     	¦	         	¦	       	¦	Олифа            
	¦	-"-     	¦	0,075 	¦

	¦	       	¦	плинтусов              	¦	         	¦	       	¦	Плинтусы         
	¦	м       	¦	1,05  	¦

	¦	       	¦	                       	¦	         	¦	       	¦	Гвозди           
	¦	кг      	¦	0,04  	¦

	¦	II-34  	¦	Смена сосновых плинту- 	¦	м        	¦	0,20   	¦	Плинтусы или     
	¦	м       	¦	1,05  	¦

	¦	       	¦	сов или галтелей       	¦	         	¦	       	¦	галтели          
	¦	        	¦	      	¦

	¦	       	¦	                       	¦	         	¦	       	¦	Гвозди           
	¦	кг      	¦	0,02  	¦

	¦	II-35  	¦	Смена сосновых плинту- 	¦	-"-      	¦	0,56   	¦	Доски строганые  
	¦	куб. м. 	¦	0,003 	¦

	¦	       	¦	сов местами с изготов- 	¦	         	¦	       	¦	Гвозди           
	¦	кг      	¦	0,02  	¦

	¦	       	¦	лением новых           	¦	         	¦	       	¦	                 
	¦	        	¦	      	¦

	¦	II-36  	¦	Разборка оштукатуренных	¦	кв. м    	¦	0,50   	¦	                 
	¦	        	¦	      	¦

	¦	       	¦	деревянных перегородок 	¦	         	¦	       	¦	                 
	¦	        	¦	      	¦

	¦	II-37  	¦	Устройство перегородок 	¦	кв. м за 	¦	1,02   	¦	Бруски           
	¦	куб. м  	¦	0,002 	¦

	¦	       	¦	под штукатурку (из до- 	¦	вычетом  	¦	       	¦	Доски            
	¦	-"-     	¦	0,06  	¦

	¦	       	¦	сок, забранных стоймя в	¦	проемов  	¦	       	¦	Гвозди           
	¦	кг      	¦	0,1   	¦

	¦	       	¦	обвязку)               	¦	         	¦	       	¦	Закрепы          
	¦	-"-     	¦	0,64  	¦

	¦	II-38  	¦	Смена нижней части     	¦	кв. м    	¦	1,35   	¦	Доски            
	¦	куб. м  	¦	0,053 	¦

	¦	       	¦	обшивки перегородок из 	¦	сменяемой	¦	       	¦	Бруски           
	¦	-"-     	¦	0,006 	¦

	¦	       	¦	досок, забранных стоймя	¦	части    	¦	       	¦	Плинтусы         
	¦	м       	¦	2     	¦

	¦	       	¦	в обвязку              	¦	перего-  	¦	       	¦	Гвозди           
	¦	кг      	¦	0,16  	¦

	¦	       	¦	                       	¦	родок    	¦	       	¦	                 

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	¦	        	¦	      	¦

	¦	II-39  	¦	Добавление засыпки в   	¦	кв. м    	¦	0,64   	¦	Шлак             
	¦	куб. м  	¦	0,11  	¦

	¦	       	¦	перегородки            	¦	         	¦	       	¦	Гвозди           
	¦	кг      	¦	0,12  	¦

	¦	II-40  	¦	Ремонт дверных коробок 	¦	шт.      	¦	4,96   	¦	Доски            
	¦	куб. м  	¦	0,008 	¦

	¦	       	¦	в каменных стенах без  	¦	         	¦	       	¦	Бруски           
	¦	-"-     	¦	0,01  	¦

	¦	       	¦	снятия заполнения      	¦	         	¦	       	¦	Гвозди           
	¦	кг      	¦	0,05  	¦

	¦	       	¦	проемов                	¦	         	¦	       	¦	Пакля            
	¦	-"-     	¦	0,5   	¦

	¦	       	¦	                       	¦	         	¦	       	¦	Смола            
	¦	-"-     	¦	0,2   	¦

	¦	       	¦	                       	¦	         	¦	       	¦	Гипс             
	¦	-"-     	¦	0,8   	¦

	¦	       	¦	                       	¦	         	¦	       	¦	Олифа            
	¦	-"-     	¦	0,05  	¦

	¦	       	¦	                       	¦	         	¦	       	¦	Толь             
	¦	-"-     	¦	0,7   	¦

	¦	II-41  	¦	Ремонт дверных и окон- 	¦	-"-      	¦	5,67   	¦	Доски            
	¦	куб. м  	¦	0,008 	¦

	¦	       	¦	ных коробок в рубленых 	¦	         	¦	       	¦	Бруски           
	¦	-"-     	¦	0,018 	¦

	¦	       	¦	и брусчатых стенах без 	¦	         	¦	       	¦	Гвозди           
	¦	кг      	¦	0,36  	¦

	¦	       	¦	снятия заполнения      	¦	         	¦	       	¦	Пакля            
	¦	-"-     	¦	0,65  	¦

	¦	       	¦	проемов                	¦	         	¦	       	¦	Олифа            
	¦	-"-     	¦	0,08  	¦

	¦	II-42  	¦	Ремонт дверных коробок 	¦	-"-      	¦	3,47   	¦	Доски            
	¦	куб. м  	¦	0,023 	¦

	¦	       	¦	в перегородках без сня-	¦	         	¦	       	¦	Гвозди           
	¦	кг      	¦	0,36  	¦

	¦	       	¦	тия заполнения проемов 	¦	         	¦	       	¦	Олифа            
	¦	-"-     	¦	0,06  	¦

	¦	II-43  	¦	Оконопатка оконных и   	¦	место    	¦	0,67   	¦	Пакля            
	¦	-"-     	¦	2,76  	¦

	¦	       	¦	дверных коробок с рас- 	¦	         	¦	       	¦	Алебастр         

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	¦	-"-     	¦	4,7   	¦

	¦	       	¦	чисткой щелей при пери-	¦	         	¦	       	¦	                 
	¦	        	¦	      	¦

	¦	       	¦	метре до 7 м           	¦	         	¦	       	¦	                 
	¦	        	¦	      	¦

	¦	II-44  	¦	Укрепление дверных     	¦	         	¦	       	¦	                 
	¦	        	¦	      	¦

	¦	       	¦	коробок:               	¦	         	¦	       	¦	                 
	¦	        	¦	      	¦

	¦	       	¦	а) с проконопаткой     	¦	шт.      	¦	3,78   	¦	Закрепы          
	¦	шт.     	¦	4     	¦

	¦	       	¦	                       	¦	         	¦	       	¦	Пакля            
	¦	кг      	¦	3,4   	¦

	¦	       	¦	                       	¦	         	¦	       	¦	Гипс строительный
	¦	-"-     	¦	5,4   	¦

	¦	       	¦	б) без проконопатки    	¦	-"-      	¦	2,68   	¦	Закрепы          
	¦	шт.     	¦	4     	¦

	¦	II-45  	¦	Смена дверных коробок в	¦	шт.      	¦	3,70   	¦	Коробки дверные  
	¦	м       	¦	7,0   	¦

	¦	       	¦	каменных стенах        	¦	         	¦	       	¦	Пакля            
	¦	кг      	¦	1,0   	¦

	¦	       	¦	                       	¦	         	¦	       	¦	Смола            
	¦	-"-     	¦	1,0   	¦

	¦	       	¦	                       	¦	         	¦	       	¦	Толь             
	¦	кв. м   	¦	1,8   	¦

	¦	II-46  	¦	То же, в перегородках  	¦	-"-      	¦	1,26   	¦	Коробки дверные  
	¦	м       	¦	6,5   	¦

	¦	II-47  	¦	Смена наличников       	¦	м        	¦	0,13   	¦	Наличники        
	¦	-"-     	¦	1,01  	¦

	¦	       	¦	                       	¦	         	¦	       	¦	Гвозди           
	¦	кг      	¦	0,034 	¦

	¦	II-48  	¦	Смена подоконных досок 	¦	кв. м    	¦	2,43   	¦	Доски подоконные 
	¦	м       	¦	7,7   	¦

	¦	       	¦	                       	¦	         	¦	       	¦	Войлок           
	¦	кв. м   	¦	1,1   	¦

	¦	II-49  	¦	Устранение щелей в     	¦	шт.      	¦	0,58   	¦	Доски            
	¦	куб. м  	¦	0,0021	¦

	¦	       	¦	деревянных подоконниках	¦	         	¦	       	¦	Клей столярный   
	¦	кг      	¦	0,023 	¦

	¦	       	¦	вставкой реек          	¦	         	¦	       	¦	                 

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	¦	        	¦	      	¦

	¦	II-50  	¦	Большой ремонт деревян-	¦	кв. м    	¦	9,14   	¦	Доски            
	¦	куб. м  	¦	0,022 	¦

	¦	       	¦	ных подоконников       	¦	         	¦	       	¦	Войлок           
	¦	кв. м   	¦	1,1   	¦

	¦	       	¦	                       	¦	         	¦	       	¦	Клей столярный   
	¦	кг      	¦	0,08  	¦

	¦	II-51  	¦	Смена глухих внутренних	¦	-"-      	¦	1,52   	¦	Полотна дверные  
	¦	кв. м   	¦	1,0   	¦

	¦	       	¦	однопольных и двуполь- 	¦	         	¦	       	¦	                 
	¦	        	¦	      	¦

	¦	       	¦	ных дверных полотен без	¦	         	¦	       	¦	                 
	¦	        	¦	      	¦

	¦	       	¦	установки приборов     	¦	         	¦	       	¦	                 
	¦	        	¦	      	¦

	¦	II-52  	¦	Большой ремонт сосновых	¦	полотно  	¦	14,7   	¦	Доски            
	¦	куб. м  	¦	0,033 	¦

	¦	       	¦	дверных полотен со сня-	¦	         	¦	       	¦	Клей столярный   
	¦	кг      	¦	0,14  	¦

	¦	       	¦	тием с места -         	¦	         	¦	       	¦	                 
	¦	        	¦	      	¦

	¦	       	¦	внутренних             	¦	         	¦	       	¦	                 
	¦	        	¦	      	¦

	¦	II-53  	¦	Большой ремонт сосновых	¦	-"-      	¦	18,9   	¦	Доски            
	¦	куб. м  	¦	0,04  	¦

	¦	       	¦	дверных полотен - вход-	¦	         	¦	       	¦	Клей столярный   
	¦	кг      	¦	0,24  	¦

	¦	       	¦	ных, со снятием с места	¦	         	¦	       	¦	                 
	¦	        	¦	      	¦

	¦	II-54  	¦	Перевязка дверных поло-	¦	-"-      	¦	5,88   	¦	Петли            
	¦	пара    	¦	1     	¦

	¦	       	¦	тен с уменьшением их   	¦	         	¦	       	¦	Шурупы           
	¦	кг      	¦	0,06  	¦

	¦	       	¦	размера, со снятием с  	¦	         	¦	       	¦	Клей столярный   
	¦	-"-     	¦	0,02  	¦

	¦	       	¦	петель и навеской на   	¦	         	¦	       	¦	                 
	¦	        	¦	      	¦

	¦	       	¦	новые петли с подгонкой	¦	         	¦	       	¦	                 
	¦	        	¦	      	¦

	¦	       	¦	без прирезки замка     	¦	         	¦	       	¦	                 

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	¦	        	¦	      	¦

	¦	II-55  	¦	Перенавеска дверного   	¦	полотно  	¦	1,96   	¦	Шурупы           
	¦	кг      	¦	0,06  	¦

	¦	       	¦	полотна в той же короб-	¦	         	¦	       	¦	                 
	¦	        	¦	      	¦

	¦	       	¦	ке, без переустройства 	¦	         	¦	       	¦	                 
	¦	        	¦	      	¦

	¦	       	¦	четвертей, с пристрож- 	¦	         	¦	       	¦	                 
	¦	        	¦	      	¦

	¦	       	¦	кой и врезкой старых   	¦	         	¦	       	¦	                 
	¦	        	¦	      	¦

	¦	       	¦	петель на новые места, 	¦	         	¦	       	¦	                 
	¦	        	¦	      	¦

	¦	       	¦	с заделкой старых мест 	¦	         	¦	       	¦	                 
	¦	        	¦	      	¦

	¦	       	¦	врезки петель          	¦	         	¦	       	¦	                 
	¦	        	¦	      	¦

	¦	II-56  	¦	Малый ремонт филенчатых	¦	-"-      	¦	1,34   	¦	Клей столярный   
	¦	-"-     	¦	0,004 	¦

	¦	       	¦	дверей пристрожкой, на-	¦	         	¦	       	¦	                 
	¦	        	¦	      	¦

	¦	       	¦	бивкой планок и встав- 	¦	         	¦	       	¦	                 
	¦	        	¦	      	¦

	¦	       	¦	кой реек               	¦	         	¦	       	¦	                 
	¦	        	¦	      	¦

	¦	II-57  	¦	Смена оконных перепле- 	¦	кв. м    	¦	1,93   	¦	Переплеты оконные
	¦	кв. м   	¦	1,0   	¦

	¦	       	¦	тов створностью до 70% 	¦	         	¦	       	¦	                 
	¦	        	¦	      	¦

	¦	       	¦	без остекления и уста- 	¦	         	¦	       	¦	                 
	¦	        	¦	      	¦

	¦	       	¦	новки приборов         	¦	         	¦	       	¦	                 
	¦	        	¦	      	¦

	¦	II-58  	¦	Смена глухих оконных   	¦	-"-      	¦	1,41   	¦	Переплеты оконные
	¦	-"-     	¦	1,0   	¦

	¦	       	¦	переплетов без остекле-	¦	         	¦	       	¦	                 
	¦	        	¦	      	¦

	¦	       	¦	ния и установки прибо- 	¦	         	¦	       	¦	                 
	¦	        	¦	      	¦

	¦	       	¦	ров                    	¦	         	¦	       	¦	                 

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	¦	        	¦	      	¦

	¦	II-59  	¦	Большой ремонт оконных 	¦	-"-      	¦	6,22   	¦	Бруски           
	¦	куб. м  	¦	0,006 	¦

	¦	       	¦	переплетов             	¦	         	¦	       	¦	Клей столярный   
	¦	кг      	¦	0,004 	¦

	¦	II-60  	¦	Малый ремонт оконных   	¦	-"-      	¦	1,56   	¦	Клей столярный   
	¦	-"-     	¦	0,02  	¦

	¦	       	¦	переплетов постановкой 	¦	         	¦	       	¦	Шурупы           
	¦	кг      	¦	0,02  	¦

	¦	       	¦	угольников, нашивкой   	¦	         	¦	       	¦	Угольники        
	¦	шт.     	¦	2     	¦

	¦	       	¦	планок, отливов и      	¦	         	¦	       	¦	                 
	¦	        	¦	      	¦

	¦	       	¦	пристрожкой            	¦	         	¦	       	¦	                 
	¦	        	¦	      	¦

	¦	II-61  	¦	Вставки зимних глухих  	¦	-"-      	¦	0,58   	¦	Пакля            
	¦	кг      	¦	0,29  	¦

	¦	       	¦	переплетов с промывкой 	¦	         	¦	       	¦	Замазка
	стекольная	¦	-"-     	¦	0,54  	¦

	¦	       	¦	и протиркой стекол,    	¦	         	¦	       	¦	                 
	¦	        	¦	      	¦

	¦	       	¦	оконопаткой и подноской	¦	         	¦	       	¦	                 
	¦	        	¦	      	¦

	¦	       	¦	с места хранения       	¦	         	¦	       	¦	                 
	¦	        	¦	      	¦

	¦	II-62  	¦	Изготовление форточек  	¦	шт.      	¦	1,16   	¦	Доски            
	¦	куб. м  	¦	0,005 	¦

	¦	II-63  	¦	Смена форточек         	¦	-"-      	¦	1,0    	¦	Форточка         
	¦	шт.     	¦	1     	¦

	¦	       	¦	                       	¦	         	¦	       	¦	Прибор форточный 
	¦	к-т     	¦	1     	¦

	¦	II-64  	¦	Устройство новой       	¦	-"-      	¦	3,04   	¦	Пиломатериалы    
	¦	куб. м  	¦	0,005 	¦

	¦	       	¦	форточки с отверстием в	¦	         	¦	       	¦	Клей столярный   
	¦	кг      	¦	0,1   	¦

	¦	       	¦	старом переплете, с    	¦	         	¦	       	¦	Приборы форточные
	¦	к-т     	¦	1     	¦

	¦	       	¦	прирезкой приборов, без	¦	         	¦	       	¦	                 
	¦	        	¦	      	¦

	¦	       	¦	остекления             	¦	         	¦	       	¦	                 

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	¦	        	¦	      	¦

	¦	II-65  	¦	Замена неисправных     	¦	пара     	¦	0,63   	¦	Петли оконные или
	¦	пара    	¦	1     	¦

	¦	       	¦	дверных или оконных    	¦	         	¦	       	¦	дверные          
	¦	        	¦	      	¦

	¦	       	¦	петель                 	¦	         	¦	       	¦	Шурупы           
	¦	кг      	¦	0,07  	¦

	¦	II-66  	¦	Замена неисправных     	¦	шт.      	¦	0,32   	¦	Прибор по факти- 
	¦	        	¦	      	¦

	¦	       	¦	дверных или оконных    	¦	         	¦	       	¦	ческой
	потребности	¦	        	¦	      	¦

	¦	       	¦	приборов - задвижек,   	¦	         	¦	       	¦	Шурупы           
	¦	кг      	¦	0,02  	¦

	¦	       	¦	скоб, балкончиков      	¦	         	¦	       	¦	                 
	¦	        	¦	      	¦

	¦	II-67  	¦	Замена неисправных     	¦	-"-      	¦	0,71   	¦	Замок внутренний 
	¦	шт.     	¦	1     	¦

	¦	       	¦	дверных врезных замков 	¦	         	¦	       	¦	Шурупы           
	¦	кг      	¦	0,02  	¦

	¦	II-68  	¦	Замена неисправных     	¦	к-т      	¦	1,42   	¦	Шпингалеты       
	¦	к-т     	¦	1     	¦

	¦	       	¦	дверных шпингалет      	¦	         	¦	       	¦	Шурупы           
	¦	кг      	¦	0,04  	¦

	¦	II-69  	¦	Смена дверной пружины  	¦	шт.      	¦	0,43   	¦	Пружины          
	¦	шт.     	¦	1     	¦

	¦	       	¦	                       	¦	         	¦	       	¦	Шурупы           
	¦	кг      	¦	0,02  	¦

	¦	II-70  	¦	Смена разбитых оконных 	¦	кв. м    	¦	1,96   	¦	Стекло           
	¦	кв. м   	¦	1,14  	¦

	¦	       	¦	стекол                 	¦	         	¦	       	¦	Замазка
	стекольная	¦	кг      	¦	1,45  	¦

	¦	II-71  	¦	Смена остекления вход- 	¦	кв. м    	¦	1,84   	¦	Стекло утолщенное
	¦	кв. м   	¦	1,03  	¦

	¦	       	¦	ных дверей утолщенным  	¦	         	¦	       	¦	Прокладка        
	¦	кг      	¦	0,86  	¦

	¦	       	¦	стеклом на штапиках и  	¦	         	¦	       	¦	резиновая        
	¦	        	¦	      	¦

	¦	       	¦	прокладках             	¦	         	¦	       	¦	                 
	¦	        	¦	      	¦

	¦	II-72  	¦	Перемазка фальцев в    	¦	кв. м    	¦	0,50   	¦	Замазка

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	стекольная	¦	-"-     	¦	0,45  	¦

	¦	       	¦	оконных переплетах     	¦	переплета	¦	       	¦	                 
	¦	        	¦	      	¦

	¦	II-73  	¦	Обивка дверных полотен 	¦	кв. м    	¦	0,93   	¦	Сталь кровельная 
	¦	-"-     	¦	4,5   	¦

	¦	       	¦	и коробок кровельной   	¦	         	¦	       	¦	черная           
	¦	        	¦	      	¦

	¦	       	¦	сталью по войлоку      	¦	         	¦	       	¦	Войлок           
	¦	кв. м   	¦	1,04  	¦

	¦	       	¦	                       	¦	         	¦	       	¦	Олифа            
	¦	кг      	¦	0,03  	¦

	¦	II-74  	¦	Обивка дверей дермати- 	¦	-"-      	¦	0,71   	¦	Дерматин         
	¦	кв. м   	¦	1,35  	¦

	¦	       	¦	ном по войлоку         	¦	         	¦	       	¦	Войлок           
	¦	-"-     	¦	1,28  	¦

	¦	       	¦	                       	¦	         	¦	       	¦	Гвозди обойные   
	¦	кг      	¦	0,043 	¦

	¦	       	¦	                       	¦	         	¦	       	¦	Тесьма           
	¦	м       	¦	8     	¦

	¦	II-75  	¦	Ремонт деревянных сос- 	¦	место    	¦	0,34   	¦	Бруски           
	¦	куб. м  	¦	0,001 	¦

	¦	       	¦	новых поручней поста-  	¦	         	¦	       	¦	Клей столярный   
	¦	кг      	¦	0,01  	¦

	¦	       	¦	новкой заделок на клею 	¦	         	¦	       	¦	                 
	¦	        	¦	      	¦

	¦	       	¦	- прямая часть         	¦	         	¦	       	¦	                 
	¦	        	¦	      	¦

	¦	II-76  	¦	То же, закругленная    	¦	-"-      	¦	0,40   	¦	Бруски           
	¦	куб. м  	¦	0,001 	¦

	¦	       	¦	часть                  	¦	         	¦	       	¦	Клей столярный   
	¦	кг      	¦	0,01  	¦

	¦	II-77  	¦	Ремонт деревянных лест-	¦	ступень  	¦	4,33   	¦	Доски            
	¦	куб. м  	¦	0,028 	¦

	¦	       	¦	ниц сменой отдельных   	¦	         	¦	       	¦	Гвозди           
	¦	кг      	¦	0,03  	¦

	¦	       	¦	ступеней               	¦	         	¦	       	¦	                 
	¦	        	¦	      	¦

	¦	II-78  	¦	Малый ремонт слухового 	¦	место    	¦	4,95   	¦	Бруски           
	¦	куб. м  	¦	0,038 	¦

	¦	       	¦	окна с исправлением    	¦	         	¦	       	¦	Толь             

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	¦	кв. м   	¦	1,98  	¦

	¦	       	¦	обшивки и переплета    	¦	         	¦	       	¦	Гвозди           
	¦	кг      	¦	0,44  	¦

	¦	       	¦	                       	¦	         	¦	       	¦	Смола            
	¦	-"-     	¦	0,66  	¦

	¦	       	¦	                       	¦	         	¦	       	¦	Клей столярный   
	¦	-"-     	¦	0,024 	¦

	¦	II-79  	¦	Замена старых негодных 	¦	шт.      	¦	4,9    	¦	Пиломатериалы    
	¦	куб. м  	¦	0,03  	¦

	¦	       	¦	деревянных жалюзи слу- 	¦	         	¦	       	¦	Гвозди           
	¦	кг      	¦	0,013 	¦

	¦	       	¦	ховых окон с изготовле-	¦	         	¦	       	¦	Олифа            
	¦	-"-     	¦	0,007 	¦

	¦	       	¦	нием их                	¦	         	¦	       	¦	                 
	¦	        	¦	      	¦

	¦	II-80  	¦	Ремонт переходов на    	¦	м        	¦	0,47   	¦	Доски            
	¦	куб. м  	¦	0,032 	¦

	¦	       	¦	чердаках через трубы   	¦	         	¦	       	¦	Бруски           
	¦	-"-     	¦	0,0015	¦

	¦	       	¦	центрального отопления 	¦	         	¦	       	¦	Гвозди           
	¦	кг      	¦	0,1   	¦

	¦	II-81  	¦	Антисептирование древе-	¦	10       	¦	0,34   	¦	Раствор          
	¦	кг      	¦	4,5   	¦

	¦	       	¦	сины водными растворами	¦	кв. м    	¦	       	¦	антисептический  
	¦	        	¦	      	¦

	¦	       	¦	вручную местами        	¦	обработ. 	¦	       	¦	маслянистый      
	¦	        	¦	      	¦

	¦	       	¦	                       	¦	поверхн. 	¦	       	¦	                 
	¦	        	¦	      	¦

	¦	II-82  	¦	То же, краскопультом   	¦	10 кв. м 	¦	0,29   	¦	То же            
	¦	-"-     	¦	4,5   	¦

	¦	II-83  	¦	Смена подступенок в    	¦	1 шт.    	¦	3,12   	¦	Доски            
	¦	куб. м  	¦	0,01  	¦

	¦	       	¦	чистых деревянных      	¦	         	¦	       	¦	Гвозди           
	¦	кг      	¦	0,03  	¦

	¦	       	¦	лестницах              	¦	         	¦	       	¦	                 
	¦	        	¦	      	¦

	¦	II-84  	¦	Ремонт перил у         	¦	место    	¦	1,24   	¦	Доски            
	¦	куб. м  	¦	0,003 	¦

	¦	       	¦	деревянных лестниц     	¦	         	¦	       	¦	Гвозди           

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	¦	кг      	¦	0,02  	¦

	¦	       	¦	                       	¦	         	¦	       	¦	                 
	¦	        	¦	      	¦

	¦	       	¦	III. Штукатурные,      	¦	         	¦	       	¦	                 
	¦	        	¦	      	¦

	¦	       	¦	малярные и отделочные  	¦	         	¦	       	¦	                 
	¦	        	¦	      	¦

	¦	       	¦	работы                 	¦	         	¦	       	¦	                 
	¦	        	¦	      	¦

	¦	       	¦	                       	¦	         	¦	       	¦	                 
	¦	        	¦	      	¦

	¦	III-1  	¦	Простукивание и отбивка	¦	кв. м    	¦	0,31   	¦	                 
	¦	        	¦	      	¦

	¦	       	¦	старой негодной штука- 	¦	         	¦	       	¦	                 
	¦	        	¦	      	¦

	¦	       	¦	турки по каменной и    	¦	         	¦	       	¦	                 
	¦	        	¦	      	¦

	¦	       	¦	бетонной поверхности   	¦	         	¦	       	¦	                 
	¦	        	¦	      	¦

	¦	       	¦	стен и потолков        	¦	         	¦	       	¦	                 
	¦	        	¦	      	¦

	¦	       	¦	То же, по деревянным   	¦	-"-      	¦	0,43   	¦	                 
	¦	        	¦	      	¦

	¦	       	¦	поверхностям стен и    	¦	         	¦	       	¦	                 
	¦	        	¦	      	¦

	¦	       	¦	потолков               	¦	         	¦	       	¦	                 
	¦	        	¦	      	¦

	¦	III-2  	¦	Ремонт штукатурки глад-	¦	-"-      	¦	1,96   	¦	Раствор          
	¦	куб. м  	¦	0,022 	¦

	¦	       	¦	ких стен фасадов пло-  	¦	         	¦	       	¦	                 
	¦	        	¦	      	¦

	¦	       	¦	щадью до 1 кв. м       	¦	         	¦	       	¦	                 
	¦	        	¦	      	¦

	¦	III-3  	¦	То же, с прорезными    	¦	-"-      	¦	2,98   	¦	Раствор          
	¦	-"-     	¦	0,044 	¦

	¦	       	¦	рустами площадью до    	¦	         	¦	       	¦	                 
	¦	        	¦	      	¦

	¦	       	¦	1 кв. м                	¦	         	¦	       	¦	                 
	¦	        	¦	      	¦

	¦	III-4  	¦	Ремонт штукатурки глад-	¦	-"-      	¦	1,63   	¦	Раствор          

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	¦	-"-     	¦	0,022 	¦

	¦	       	¦	ких стен фасадов пло-  	¦	         	¦	       	¦	                 
	¦	        	¦	      	¦

	¦	       	¦	щадью более 1 кв. м    	¦	         	¦	       	¦	                 
	¦	        	¦	      	¦

	¦	III-5  	¦	То же, с прорезными    	¦	-"-      	¦	2,48   	¦	Раствор          
	¦	-"-     	¦	0,044 	¦

	¦	       	¦	рустами площадью более 	¦	         	¦	       	¦	                 
	¦	        	¦	      	¦

	¦	       	¦	1 кв. м                	¦	         	¦	       	¦	                 
	¦	        	¦	      	¦

	¦	III-6  	¦	Ремонт штукатурки стен 	¦	-"-      	¦	2,05   	¦	Раствор          
	¦	куб. м  	¦	0,021 	¦

	¦	       	¦	отдельными местами     	¦	         	¦	       	¦	Гипс строительный
	¦	кг      	¦	11,0  	¦

	¦	       	¦	площадью до 1 кв. м    	¦	         	¦	       	¦	(по дереву)      
	¦	        	¦	      	¦

	¦	III-7  	¦	То же, потолков        	¦	-"-      	¦	2,33   	¦	Раствор          
	¦	куб. м  	¦	0,022 	¦

	¦	       	¦	                       	¦	         	¦	       	¦	Гипс строительный
	¦	кг      	¦	11    	¦

	¦	       	¦	                       	¦	         	¦	       	¦	(по дереву)      
	¦	        	¦	      	¦

	¦	III-8  	¦	Ремонт штукатурки стен 	¦	-"-      	¦	1,41   	¦	Раствор          
	¦	куб. м  	¦	0,021 	¦

	¦	       	¦	отдельными местами     	¦	         	¦	       	¦	Гипс строительный
	¦	кг      	¦	11,0  	¦

	¦	       	¦	площадью до 10 кв. м   	¦	         	¦	       	¦	(по дереву)      
	¦	        	¦	      	¦

	¦	III-9  	¦	То же, потолков        	¦	-"-      	¦	1,78   	¦	Раствор          
	¦	куб. м  	¦	0,022 	¦

	¦	       	¦	                       	¦	         	¦	       	¦	Гипс строительный
	¦	кг      	¦	11,0  	¦

	¦	       	¦	                       	¦	         	¦	       	¦	(по дереву)      
	¦	        	¦	      	¦

	¦	III-10 	¦	Оштукатуривание вручную	¦	-"-      	¦	0,53   	¦	Раствор          
	¦	куб. м  	¦	0,017 	¦

	¦	       	¦	стен и перегородок     	¦	         	¦	       	¦	Гипс строительный
	¦	кг      	¦	9,0   	¦

	¦	       	¦	(простая) готовым раст-	¦	         	¦	       	¦	(по дереву)      

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	¦	        	¦	      	¦

	¦	       	¦	вором, без подбивки    	¦	         	¦	       	¦	                 
	¦	        	¦	      	¦

	¦	       	¦	драни                  	¦	         	¦	       	¦	                 
	¦	        	¦	      	¦

	¦	III-11 	¦	То же, потолков        	¦	кв. м    	¦	0,59   	¦	Раствор          
	¦	куб. м  	¦	0,017 	¦

	¦	       	¦	                       	¦	         	¦	       	¦	Гипс строительный
	¦	кг      	¦	9,0   	¦

	¦	       	¦	                       	¦	         	¦	       	¦	(по дереву)      
	¦	        	¦	      	¦

	¦	III-12 	¦	Оштукатуривание вручную	¦	-"-      	¦	0,62   	¦	Раствор          
	¦	куб. м  	¦	0,019 	¦

	¦	       	¦	стен и перегородок     	¦	         	¦	       	¦	Гипс строительный
	¦	кг      	¦	9,0   	¦

	¦	       	¦	(улучшенная) готовым   	¦	         	¦	       	¦	(по дереву)      
	¦	        	¦	      	¦

	¦	       	¦	раствором без надбивки 	¦	         	¦	       	¦	                 
	¦	        	¦	      	¦

	¦	       	¦	драни                  	¦	         	¦	       	¦	                 
	¦	        	¦	      	¦

	¦	III-13 	¦	То же, потолков        	¦	-"-      	¦	0,72   	¦	Раствор          
	¦	куб. м  	¦	0,020 	¦

	¦	       	¦	                       	¦	         	¦	       	¦	Гипс строительный
	¦	кг      	¦	9,0   	¦

	¦	       	¦	                       	¦	         	¦	       	¦	(по дереву)      
	¦	        	¦	      	¦

	¦	III-14 	¦	Перетирка внутренней   	¦	-"-      	¦	0,28   	¦	Раствор          
	¦	куб. м  	¦	0,0003	¦

	¦	       	¦	штукатурки стен и      	¦	         	¦	       	¦	                 
	¦	        	¦	      	¦

	¦	       	¦	потолков               	¦	         	¦	       	¦	                 
	¦	        	¦	      	¦

	¦	III-15 	¦	Обивка штучной дранью  	¦	-"-      	¦	0,38   	¦	Дрань штукатурная
	¦	т. шт.  	¦	0,030 	¦

	¦	       	¦	стен и перегородок     	¦	         	¦	       	¦	                 
	¦	        	¦	      	¦

	¦	III-16 	¦	То же, потолков        	¦	-"-      	¦	0,51   	¦	Дрань штукатурная
	¦	-"-     	¦	0,032 	¦

	¦	III-17 	¦	Ремонт штукатурки      	¦	         	¦	       	¦	                 

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	¦	        	¦	      	¦

	¦	       	¦	откосов:               	¦	         	¦	       	¦	                 
	¦	        	¦	      	¦

	¦	       	¦	а) по камню            	¦	-"-      	¦	2,54   	¦	Раствор          
	¦	куб. м  	¦	0,022 	¦

	¦	       	¦	б) по дереву           	¦	-"-      	¦	2,69   	¦	Раствор          
	¦	-"-     	¦	0,02  	¦

	¦	       	¦	                       	¦	         	¦	       	¦	Гипс строительный
	¦	кг      	¦	11,0  	¦

	¦	III-18 	¦	Ремонт горизонтальных  	¦	-"-      	¦	3,90   	¦	Гипс строительный
	¦	-"-     	¦	18,0  	¦

	¦	       	¦	тяг и карнизов длиной  	¦	         	¦	       	¦	Раствор          
	¦	куб. м  	¦	0,046 	¦

	¦	       	¦	до 5 м                 	¦	         	¦	       	¦	                 
	¦	        	¦	      	¦

	¦	III-19 	¦	Ремонт надут           	¦	-"-      	¦	2,33   	¦	Гипс строительный
	¦	кг      	¦	18,0  	¦

	¦	       	¦	                       	¦	         	¦	       	¦	Раствор          
	¦	куб. м  	¦	0,046 	¦

	¦	III-20 	¦	Устройство каркаса под 	¦	         	¦	       	¦	                 
	¦	        	¦	      	¦

	¦	       	¦	сухую штукатурку стены:	¦	         	¦	       	¦	                 
	¦	        	¦	      	¦

	¦	       	¦	а) по дереву           	¦	-"-      	¦	0,39   	¦	Бруски           
	¦	-"-     	¦	0,005 	¦

	¦	       	¦	б) по камню            	¦	-"-      	¦	0,98   	¦	Гвозди           
	¦	кг      	¦	0,041 	¦

	¦	III-21 	¦	То же, потолков        	¦	         	¦	       	¦	                 
	¦	        	¦	      	¦

	¦	       	¦	а) по дереву           	¦	-"-      	¦	0,69   	¦	Бруски           
	¦	куб. м  	¦	0,007 	¦

	¦	       	¦	б) по камню            	¦	-"-      	¦	1,1    	¦	Гвозди           
	¦	кг      	¦	0,052 	¦

	¦	III-22 	¦	Облицовка стен древес- 	¦	кв. м    	¦	0,32   	¦	Плиты древесно-  
	¦	кв. м   	¦	1,05  	¦

	¦	       	¦	но-волокнистыми плитами	¦	         	¦	       	¦	волокнистые      
	¦	        	¦	      	¦

	¦	       	¦	сухой штукатурки по    	¦	         	¦	       	¦	Гвозди           
	¦	кг      	¦	0,02  	¦

	¦	       	¦	готовому каркасу       	¦	         	¦	       	¦	оцинкованные     

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	¦	        	¦	      	¦

	¦	       	¦	                       	¦	         	¦	       	¦	Гипс строительный
	¦	-"-     	¦	5,0   	¦

	¦	       	¦	                       	¦	         	¦	       	¦	Клей животный    
	¦	-"-     	¦	0,002 	¦

	¦	III-23 	¦	То же, гипсовыми       	¦	-"-      	¦	0,54   	¦	Плиты гипсовые   
	¦	кв. м   	¦	1,05  	¦

	¦	       	¦	плитами                	¦	         	¦	       	¦	Клей животный    
	¦	кг      	¦	0,042 	¦

	¦	       	¦	                       	¦	         	¦	       	¦	Раствор          
	¦	куб. м  	¦	0,0003	¦

	¦	       	¦	                       	¦	         	¦	       	¦	Гипс строительный
	¦	кг      	¦	5,5   	¦

	¦	III-24 	¦	Облицовка потолков     	¦	-"-      	¦	0,36   	¦	Гипс строительный
	¦	-"-     	¦	0,4   	¦

	¦	       	¦	древесно-волокнистыми  	¦	         	¦	       	¦	Клей животный    
	¦	-"-     	¦	0,002 	¦

	¦	       	¦	плитами сухой штукатур-	¦	         	¦	       	¦	Гвозди           
	¦	-"-     	¦	0,120 	¦

	¦	       	¦	ки по готовому каркасу 	¦	         	¦	       	¦	оцинкованные     
	¦	        	¦	      	¦

	¦	       	¦	                       	¦	         	¦	       	¦	Плиты древесно-  
	¦	кв. м   	¦	1,03  	¦

	¦	       	¦	                       	¦	         	¦	       	¦	волокнистые      
	¦	        	¦	      	¦

	¦	III-25 	¦	То же, гипсовыми       	¦	-"-      	¦	0,61   	¦	Гипс строительный
	¦	кг      	¦	5,6   	¦

	¦	       	¦	плитами                	¦	         	¦	       	¦	Клей животный    
	¦	-"-     	¦	0,044 	¦

	¦	       	¦	                       	¦	         	¦	       	¦	Плиты гипсовые   
	¦	кв. м   	¦	1,03  	¦

	¦	       	¦	                       	¦	         	¦	       	¦	Раствор          
	¦	куб. м  	¦	0,0003	¦

	¦	III-26 	¦	Заделка щелей в верхней	¦	1 м      	¦	0,20   	¦	Пакля            
	¦	кг      	¦	0,46  	¦

	¦	       	¦	части перегородок при  	¦	         	¦	       	¦	Раствор          
	¦	куб. м  	¦	0,004 	¦

	¦	       	¦	осадке их, с проконо-  	¦	         	¦	       	¦	Гипс строительный
	¦	кг      	¦	11,0  	¦

	¦	       	¦	паткой и подмазкой     	¦	         	¦	       	¦	                 

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	¦	        	¦	      	¦

	¦	       	¦	раствором              	¦	         	¦	       	¦	                 
	¦	        	¦	      	¦

	¦	III-27 	¦	Известковая окраска    	¦	         	¦	       	¦	                 
	¦	        	¦	      	¦

	¦	       	¦	оштукатуренных фасадов,	¦	         	¦	       	¦	                 
	¦	        	¦	      	¦

	¦	       	¦	ранее окрашенных       	¦	         	¦	       	¦	                 
	¦	        	¦	      	¦

	¦	       	¦	а) с лесов или         	¦	кв. м    	¦	0,17   	¦	Известь          
	¦	-"-     	¦	0,17  	¦

	¦	       	¦	подмостей              	¦	         	¦	       	¦	                 
	¦	        	¦	      	¦

	¦	       	¦	б) с люлек             	¦	-"-      	¦	0,22   	¦	                 
	¦	        	¦	      	¦

	¦	III-28 	¦	То же, кирпичных и     	¦	         	¦	       	¦	                 
	¦	        	¦	      	¦

	¦	       	¦	деревянных фасадов:    	¦	         	¦	       	¦	                 
	¦	        	¦	      	¦

	¦	       	¦	а) с лесов или         	¦	кв. м    	¦	0,10   	¦	Известь          
	¦	-"-     	¦	0,17  	¦

	¦	       	¦	подмостей              	¦	         	¦	       	¦	                 
	¦	        	¦	      	¦

	¦	       	¦	б) с люлек             	¦	-"-      	¦	0,17   	¦	Известь          
	¦	-"-     	¦	0,21  	¦

	¦	III-29 	¦	Окраска стен и потолков	¦	кв. м    	¦	0,16   	¦	Мел молотый      
	¦	кг      	¦	0,23  	¦

	¦	       	¦	клеевым колером с очи- 	¦	         	¦	       	¦	Краски сухие     
	¦	-"-     	¦	0,017 	¦

	¦	       	¦	сткой старой краски и  	¦	         	¦	       	¦	Клей малярный    
	¦	-"-     	¦	0,009 	¦

	¦	       	¦	подготовкой основания  	¦	         	¦	       	¦	Купорос медный   
	¦	-"-     	¦	0,006 	¦

	¦	       	¦	                       	¦	         	¦	       	¦	Мыло
	хозяйственное	¦	-"-     	¦	0,006 	¦

	¦	III-30 	¦	Масляная окраска ранее 	¦	-"-      	¦	0,18   	¦	Олифа            
	¦	-"-     	¦	0,105 	¦

	¦	       	¦	окрашенных стен и      	¦	         	¦	       	¦	Белила тертые    
	¦	-"-     	¦	0,074 	¦

	¦	       	¦	потолков за 1 раз      	¦	         	¦	       	¦	Краски тертые    

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	¦	-"-     	¦	0,011 	¦

	¦	       	¦	(освежение)            	¦	         	¦	       	¦	                 
	¦	        	¦	      	¦

	¦	III-31 	¦	То же, полов           	¦	-"-      	¦	0,134  	¦	Олифа            
	¦	-"-     	¦	0,11  	¦

	¦	       	¦	                       	¦	         	¦	       	¦	Белила тертые    
	¦	-"-     	¦	0,032 	¦

	¦	       	¦	                       	¦	         	¦	       	¦	Краски тертые    
	¦	-"-     	¦	0,102 	¦

	¦	III-32 	¦	Масляная окраска ранее 	¦	-"-      	¦	0,30   	¦	Олифа            
	¦	-"-     	¦	0,108 	¦

	¦	       	¦	окрашенных стен с рас- 	¦	         	¦	       	¦	Белила тертые    
	¦	-"-     	¦	0,212 	¦

	¦	       	¦	чисткой до 10% за 2    	¦	         	¦	       	¦	Краски тертые    
	¦	-"-     	¦	0,016 	¦

	¦	       	¦	раза                   	¦	         	¦	       	¦	Мел молотый      
	¦	-"-     	¦	0,03  	¦

	¦	III-32а	¦	То же, потолков        	¦	-"-      	¦	0,41   	¦	Олифа            
	¦	-"-     	¦	0,119 	¦

	¦	       	¦	                       	¦	         	¦	       	¦	Белила тертые    
	¦	-"-     	¦	0,233 	¦

	¦	       	¦	                       	¦	         	¦	       	¦	Краски тертые    
	¦	-"-     	¦	0,0176	¦

	¦	       	¦	                       	¦	         	¦	       	¦	Мел молотый      
	¦	-"-     	¦	0,033 	¦

	¦	III-33 	¦	То же, полов           	¦	-"-      	¦	0,34   	¦	Олифа            
	¦	-"-     	¦	0,113 	¦

	¦	       	¦	                       	¦	         	¦	       	¦	Белила тертые    
	¦	-"-     	¦	0,223 	¦

	¦	       	¦	                       	¦	         	¦	       	¦	Краски тертые    
	¦	-"-     	¦	0,017 	¦

	¦	       	¦	                       	¦	         	¦	       	¦	Мел молотый      
	¦	-"-     	¦	0,032 	¦

	¦	III-34 	¦	Масляная окраска ошту- 	¦	-"-      	¦	0,24   	¦	Олифа            
	¦	-"-     	¦	0,176 	¦

	¦	       	¦	катуренных стен внутри 	¦	         	¦	       	¦	Белила тертые    
	¦	-"-     	¦	0,153 	¦

	¦	       	¦	помещения (простая)    	¦	         	¦	       	¦	Краски тертые    
	¦	-"-     	¦	0,025 	¦

	¦	       	¦	                       	¦	         	¦	       	¦	Мел молотый      

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	¦	-"-     	¦	0,021 	¦

	¦	III-35 	¦	То же, улучшенная      	¦	-"-      	¦	0,70   	¦	Олифа            
	¦	-"-     	¦	0,259 	¦

	¦	       	¦	                       	¦	         	¦	       	¦	Белила тертые    
	¦	-"-     	¦	0,135 	¦

	¦	       	¦	                       	¦	         	¦	       	¦	Краски тертые    
	¦	-"-     	¦	0,020 	¦

	¦	       	¦	                       	¦	         	¦	       	¦	Мел молотый      
	¦	-"-     	¦	0,28  	¦

	¦	III-36 	¦	Масляная окраска за 1  	¦	кв. м    	¦	1,19   	¦	Олифа            
	¦	кг      	¦	0,263 	¦

	¦	       	¦	раз (освежение) ранее  	¦	проема   	¦	       	¦	Краска тертая    
	¦	-"-     	¦	0,052 	¦

	¦	       	¦	окрашенных оконных про-	¦	         	¦	       	¦	Белила тертые    
	¦	-"-     	¦	0,220 	¦

	¦	       	¦	емов площадью до 2,25  	¦	         	¦	       	¦	                 
	¦	        	¦	      	¦

	¦	       	¦	кв. м с 3-х внутренних 	¦	         	¦	       	¦	                 
	¦	        	¦	      	¦

	¦	       	¦	сторон                 	¦	         	¦	       	¦	                 
	¦	        	¦	      	¦

	¦	III-37 	¦	То же, за 2 раза с     	¦	-"-      	¦	2,54   	¦	Олифа            
	¦	кг      	¦	0,326 	¦

	¦	       	¦	расчисткой до 10%      	¦	         	¦	       	¦	Белила тертые    
	¦	-"-     	¦	0,638 	¦

	¦	       	¦	                       	¦	         	¦	       	¦	Краска тертая    
	¦	-"-     	¦	0,048 	¦

	¦	       	¦	                       	¦	         	¦	       	¦	Мел молотый      
	¦	-"-     	¦	0,09  	¦

	¦	III-38 	¦	Масляная окраска (прос-	¦	-"-      	¦	0,95   	¦	Олифа            
	¦	-"-     	¦	0,211 	¦

	¦	       	¦	тая) новых оконных про-	¦	         	¦	       	¦	Белила тертые    
	¦	-"-     	¦	0,633 	¦

	¦	       	¦	емов с трех внутренних 	¦	         	¦	       	¦	Краска тертая    
	¦	-"-     	¦	0,004 	¦

	¦	       	¦	сторон при площади     	¦	         	¦	       	¦	                 
	¦	        	¦	      	¦

	¦	       	¦	проема до 2,25 кв. м   	¦	         	¦	       	¦	                 
	¦	        	¦	      	¦

	¦	III-39 	¦	То же, улучшенная      	¦	-"-      	¦	4,23   	¦	Олифа            

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	¦	-"-     	¦	0,367 	¦

	¦	       	¦	                       	¦	         	¦	       	¦	Белила тертые    
	¦	-"-     	¦	0,589 	¦

	¦	       	¦	                       	¦	         	¦	       	¦	Краска тертая    
	¦	-"-     	¦	0,004 	¦

	¦	       	¦	                       	¦	         	¦	       	¦	Мел молотый      
	¦	-"-     	¦	0,50  	¦

	¦	III-40 	¦	Масляная окраска за 1  	¦	кв. м    	¦	0,91   	¦	Олифа            
	¦	-"-     	¦	0,322 	¦

	¦	       	¦	раз (освежение) ранее  	¦	проема   	¦	       	¦	Белила тертые    
	¦	-"-     	¦	0,268 	¦

	¦	       	¦	окрашенных однопольных 	¦	         	¦	       	¦	Краска тертая    
	¦	-"-     	¦	0,064 	¦

	¦	       	¦	дверей                 	¦	         	¦	       	¦	                 
	¦	        	¦	      	¦

	¦	III-41 	¦	То же, за 2 раза с     	¦	-"-      	¦	1,99   	¦	Олифа            
	¦	-"-     	¦	0,40  	¦

	¦	       	¦	расчисткой до 10%      	¦	         	¦	       	¦	Белила тертые    
	¦	-"-     	¦	0,78  	¦

	¦	       	¦	                       	¦	         	¦	       	¦	Краска тертая    
	¦	-"-     	¦	0,06  	¦

	¦	       	¦	                       	¦	         	¦	       	¦	Мел молотый      
	¦	-"-     	¦	0,11  	¦

	¦	III-42 	¦	Простая масляная окрас-	¦	-"-      	¦	0,55   	¦	Олифа            
	¦	-"-     	¦	0,25  	¦

	¦	       	¦	ка новых глухих одно-  	¦	         	¦	       	¦	Белила тертые    
	¦	-"-     	¦	0,59  	¦

	¦	       	¦	польных дверей в камен-	¦	         	¦	       	¦	Краска тертая    
	¦	-"-     	¦	0,026 	¦

	¦	       	¦	ных стенах             	¦	         	¦	       	¦	Мел молотый      
	¦	-"-     	¦	0,75  	¦

	¦	III-43 	¦	Смена обоев со сдирани-	¦	кв. м    	¦	0,45   	¦	Обои             
	¦	кв. м   	¦	1,12  	¦

	¦	       	¦	ем старых и подклейкой 	¦	         	¦	       	¦	Бумага           
	¦	кг      	¦	0,071 	¦

	¦	       	¦	стен бумагой           	¦	         	¦	       	¦	Бордюр           
	¦	м       	¦	0,35  	¦

	¦	       	¦	                       	¦	         	¦	       	¦	Клей малярный    
	¦	кг      	¦	0,07  	¦

	¦	       	¦	                       	¦	         	¦	       	¦	Мука             

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	¦	-"-     	¦	0,083 	¦

	¦	III-45 	¦	Окраска масляной крас- 	¦	кв. м    	¦	0,45   	¦	Олифа            
	¦	-"-     	¦	0,036 	¦

	¦	       	¦	кой радиаторов по ранее	¦	окраски  	¦	       	¦	Белила тертые    
	¦	-"-     	¦	0,132 	¦

	¦	       	¦	окрашенной поверхности 	¦	         	¦	       	¦	Краски тертые    
	¦	-"-     	¦	0,024 	¦

	¦	       	¦	за 1 раз               	¦	         	¦	       	¦	                 
	¦	        	¦	      	¦

	¦	III-46 	¦	То же, оград, решеток, 	¦	-"-      	¦	0,49   	¦	Олифа            
	¦	-"-     	¦	0,048 	¦

	¦	       	¦	сантехприборов и др.   	¦	         	¦	       	¦	Белила тертые    
	¦	-"-     	¦	0,132 	¦

	¦	       	¦	металлических          	¦	         	¦	       	¦	Краска тертая    
	¦	-"-     	¦	0,024 	¦

	¦	       	¦	поверхностей           	¦	         	¦	       	¦	                 
	¦	        	¦	      	¦

	¦	III-47 	¦	Простая масляная окрас-	¦	кв. м    	¦	0,31   	¦	Олифа            
	¦	-"-     	¦	0,077 	¦

	¦	       	¦	ка деревянных поверх-  	¦	окраски  	¦	       	¦	Белила тертые    
	¦	-"-     	¦	0,231 	¦

	¦	       	¦	ностей вновь (садовые  	¦	         	¦	       	¦	Краска тертая    
	¦	-"-     	¦	0,014 	¦

	¦	       	¦	скамейки, столы, табу- 	¦	         	¦	       	¦	                 
	¦	        	¦	      	¦

	¦	       	¦	реты и т.д.), ранее    	¦	         	¦	       	¦	                 
	¦	        	¦	      	¦

	¦	       	¦	проолифленные          	¦	         	¦	       	¦	                 
	¦	        	¦	      	¦

	¦	III-48 	¦	То же, ранее окрашенных	¦	-"-      	¦	0,84   	¦	Олифа            
	¦	-"-     	¦	0,119 	¦

	¦	       	¦	с расчисткой до 10%    	¦	         	¦	       	¦	Белила тертые    
	¦	-"-     	¦	0,233 	¦

	¦	       	¦	                       	¦	         	¦	       	¦	Краска тертая    
	¦	-"-     	¦	0,018 	¦

	¦	       	¦	                       	¦	         	¦	       	¦	Мел молотый      
	¦	-"-     	¦	0,033 	¦

	¦	III-49 	¦	Окраска ранее окрашен- 	¦	кв. м    	¦	0,29   	¦	Олифа            
	¦	-"-     	¦	0,056 	¦

	¦	       	¦	ных деревянных фасадов 	¦	окрашен. 	¦	       	¦	Белила тертые    

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	¦	-"-     	¦	0,212 	¦

	¦	       	¦	масляной краской без   	¦	поверхн. 	¦	       	¦	Краска тертая    
	¦	-"-     	¦	0,016 	¦

	¦	       	¦	шпаклевки за 2 раза с  	¦	         	¦	       	¦	                 
	¦	        	¦	      	¦

	¦	       	¦	расчисткой старой крас-	¦	         	¦	       	¦	                 
	¦	        	¦	      	¦

	¦	       	¦	ки с подмостей         	¦	         	¦	       	¦	                 
	¦	        	¦	      	¦

	¦	III-50 	¦	То же, с лесов         	¦	-"-      	¦	0,25   	¦	То же            
	¦	-"-     	¦	      	¦

	¦	III-51 	¦	Укрепление отставших   	¦	шт.      	¦	0,85   	¦	                 
	¦	        	¦	      	¦

	¦	       	¦	лепных потолочных      	¦	         	¦	       	¦	                 
	¦	        	¦	      	¦

	¦	       	¦	розеток                	¦	         	¦	       	¦	                 
	¦	        	¦	      	¦

	¦	III-52 	¦	Укрепление отставших   	¦	м        	¦	0,40   	¦	                 
	¦	        	¦	      	¦

	¦	       	¦	лепных потолочных      	¦	         	¦	       	¦	                 
	¦	        	¦	      	¦

	¦	       	¦	деталей высотой до 5 см	¦	         	¦	       	¦	                 
	¦	        	¦	      	¦

	¦	III-52а	¦	Укрепление отставших   	¦	м        	¦	0,46   	¦	                 
	¦	        	¦	      	¦

	¦	       	¦	лепных погонных деталей	¦	         	¦	       	¦	                 
	¦	        	¦	      	¦

	¦	       	¦	высотой до 10 см       	¦	         	¦	       	¦	                 
	¦	        	¦	      	¦

	¦	III-53 	¦	Окраска известью труб и	¦	кв. м    	¦	0,12   	¦	Известь негашеная
	¦	кг      	¦	0,105 	¦

	¦	       	¦	печей                  	¦	         	¦	       	¦	Краски сухие     
	¦	-"-     	¦	0,004 	¦

	¦	III 54 	¦	Ручное приготовление   	¦	куб. м   	¦	2,33   	¦	                 
	¦	        	¦	      	¦

	¦	       	¦	растворов              	¦	         	¦	       	¦	                 
	¦	        	¦	      	¦

	L-------+-----------------------+---------+-------+------------------
	+--------+-------

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	Примечания: 1. Затраты труда в п. п. III-10, III-11, III-12, III-
	13 предусматриваются при работе в помещениях площадью пола более 5
	кв. м.

	При работе в помещениях площадью пола менее 5 кв. м норму времени
	следует увеличить на 50%.

	2. Затраты труда на простукивание и отбивку старой негодной
	штукатурки фасадов с люлек следует принять по п. III-1 с увеличением
	на 15%.

	--------T-----------------------T---------T-------T------------------
	----------------¬

	¦	 Шифр  	¦	  Наименование работ   	¦	 Единица 	¦	Затраты	¦	        На единицу
	работы         	¦

	¦	       	¦	                       	¦	измерения	¦	труда, 	+------------------
	----------------+

	¦	       	¦	                       	¦	         	¦	ч/час. 	¦	    Расход
	основных материалов    	¦

	¦	       	¦	                       	¦	         	¦	       	+------------------
	T--------T------+

	¦	       	¦	                       	¦	         	¦	       	¦	   наименование  
	¦	ед. изм.	¦	 к-во 	¦

	+-------+-----------------------+---------+-------+------------------
	+--------+------+

	¦	   1   	¦	           2           	¦	    3    	¦	   4   	¦	        5        
	¦	   6    	¦	  7   	¦

	+-------+-----------------------+---------+-------+------------------
	+--------+------+

	¦	       	¦	IV. Каменные конструк- 	¦	         	¦	       	¦	                 
	¦	        	¦	      	¦

	¦	       	¦	ции, печи и очаги      	¦	         	¦	       	¦	                 
	¦	        	¦	      	¦

	¦	       	¦	                       	¦	         	¦	       	¦	                 
	¦	        	¦	      	¦

	¦	IV-1   	¦	Ремонт фундаментных    	¦	куб. м   	¦	23,0   	¦	Раствор          
	¦	куб. м  	¦	0,38  	¦

	¦	       	¦	стен со стороны подвала	¦	         	¦	       	¦	Камень - по факти-
	¦	        	¦	      	¦

	¦	       	¦	или стен приямков пере-	¦	         	¦	       	¦	ческой
	потребности	¦	        	¦	      	¦

	¦	       	¦	кладкой отставших от   	¦	         	¦	       	¦	с учетом возврата

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	¦	        	¦	      	¦

	¦	       	¦	старого раствора камней	¦	         	¦	       	¦	                 
	¦	        	¦	      	¦

	¦	IV-2   	¦	Замена отдельных дере- 	¦	стул     	¦	11,5   	¦	Кирпич красный   
	¦	т. шт.  	¦	0,12  	¦

	¦	       	¦	вянных стульев кирпич- 	¦	         	¦	       	¦	Раствор          
	¦	куб. м  	¦	0,07  	¦

	¦	       	¦	ными столбами сечением 	¦	         	¦	       	¦	                 
	¦	        	¦	      	¦

	¦	       	¦	1,5 х 1,5 с устройством	¦	         	¦	       	¦	                 
	¦	        	¦	      	¦

	¦	       	¦	щебеночного основания с	¦	         	¦	       	¦	                 
	¦	        	¦	      	¦

	¦	       	¦	изоляцией столбов      	¦	         	¦	       	¦	                 
	¦	        	¦	      	¦

	¦	       	¦	цементным раствором    	¦	         	¦	       	¦	                 
	¦	        	¦	      	¦

	¦	IV-3   	¦	Устройство забирки в   	¦	кв. м    	¦	2,38   	¦	Кирпич красный   
	¦	т. шт.  	¦	0,065 	¦

	¦	       	¦	полкирпича с устройст- 	¦	         	¦	       	¦	Мастика битумная 
	¦	кг      	¦	2,7   	¦

	¦	       	¦	вом щебеночного        	¦	         	¦	       	¦	Раствор сложный  
	¦	куб. м  	¦	0,03  	¦

	¦	       	¦	основания              	¦	         	¦	       	¦	Щебень           
	¦	-"-     	¦	0,02  	¦

	¦	IV-4   	¦	Засыпка цоколя шлаком  	¦	куб. м   	¦	3,08   	¦	Шлак             
	¦	куб. м  	¦	1,1   	¦

	¦	IV-5   	¦	Ремонт поверхности     	¦	кв. м    	¦	2,66   	¦	Кирпич красный   
	¦	т. шт.  	¦	0,052 	¦

	¦	       	¦	кирпичных стен со сме- 	¦	         	¦	       	¦	Раствор          
	¦	куб. м  	¦	0,024 	¦

	¦	       	¦	ной негодных кирпичей  	¦	         	¦	       	¦	                 
	¦	        	¦	      	¦

	¦	       	¦	(при толщине заделки в 	¦	         	¦	       	¦	                 
	¦	        	¦	      	¦

	¦	       	¦	0,5 кирпича)           	¦	         	¦	       	¦	                 
	¦	        	¦	      	¦

	¦	IV-6   	¦	То же, при толщине     	¦	кв. м    	¦	4,30   	¦	Кирпич красный   
	¦	т. шт.  	¦	0,103 	¦

	¦	       	¦	заделки в 1 кирпич     	¦	         	¦	       	¦	Раствор          

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	¦	куб. м  	¦	0,058 	¦

	¦	IV-7   	¦	Заделка трещин в       	¦	1 м      	¦	4,8    	¦	Кирпич           
	¦	т. шт.  	¦	0,016 	¦

	¦	       	¦	кирпичных стенах при   	¦	трещины  	¦	       	¦	Раствор          
	¦	куб. м  	¦	0,009 	¦

	¦	       	¦	борозде 0,5 х 1 кирпич 	¦	         	¦	       	¦	                 
	¦	        	¦	      	¦

	¦	IV-8   	¦	Пробивка борозд в кир- 	¦	         	¦	       	¦	                 
	¦	        	¦	      	¦

	¦	       	¦	пичных стенах размером:	¦	         	¦	       	¦	                 
	¦	        	¦	      	¦

	¦	       	¦	а) 1 х 1,5 кирпича     	¦	м        	¦	3,84   	¦	                 
	¦	        	¦	      	¦

	¦	       	¦	б) 1,5 х 2 кирпича     	¦	         	¦	8,43   	¦	                 
	¦	        	¦	      	¦

	¦	IV-9   	¦	Заделка борозд кирпичом	¦	         	¦	       	¦	                 
	¦	        	¦	      	¦

	¦	       	¦	размером:              	¦	         	¦	       	¦	                 
	¦	        	¦	      	¦

	¦	       	¦	а) 1 х 1,5 кирпича     	¦	-"-      	¦	5,83   	¦	Кирпич красный   
	¦	т. шт.  	¦	0,042 	¦

	¦	       	¦	                       	¦	         	¦	       	¦	Раствор          
	¦	куб. м  	¦	0,027 	¦

	¦	       	¦	б) 1,5 х 2 кирпича     	¦	         	¦	10,87  	¦	                 
	¦	т. шт.  	¦	0,081 	¦

	¦	       	¦	                       	¦	         	¦	       	¦	                 
	¦	куб. м  	¦	0,053 	¦

	¦	IV-10  	¦	Пробивка сквозных      	¦	1 отвер- 	¦	0,69   	¦	                 
	¦	        	¦	      	¦

	¦	       	¦	отверстий шлямбуром в  	¦	стие     	¦	       	¦	                 
	¦	        	¦	      	¦

	¦	       	¦	стенах кирпичных при   	¦	         	¦	       	¦	                 
	¦	        	¦	      	¦

	¦	       	¦	толщине стены в 0,5    	¦	         	¦	       	¦	                 
	¦	        	¦	      	¦

	¦	       	¦	кирпича                	¦	         	¦	       	¦	                 
	¦	        	¦	      	¦

	¦	IV-11  	¦	Пробивка сквозных      	¦	1 отвер- 	¦	1,08   	¦	                 
	¦	        	¦	      	¦

	¦	       	¦	отверстий шлямбуром в  	¦	стие     	¦	       	¦	                 

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	¦	        	¦	      	¦

	¦	       	¦	стенах кирпичных при   	¦	         	¦	       	¦	                 
	¦	        	¦	      	¦

	¦	       	¦	толщине стены в 1,5    	¦	         	¦	       	¦	                 
	¦	        	¦	      	¦

	¦	       	¦	кирпича                	¦	         	¦	       	¦	                 
	¦	        	¦	      	¦

	¦	IV-12  	¦	То же, при толщине     	¦	-"-      	¦	1,47   	¦	                 
	¦	        	¦	      	¦

	¦	       	¦	стены в 2,5 кирпича    	¦	         	¦	       	¦	                 
	¦	        	¦	      	¦

	¦	IV-13  	¦	Пробивка в железобетон-	¦	-"-      	¦	2,04   	¦	Раствор          
	¦	куб. м  	¦	0,007 	¦

	¦	       	¦	ных перекрытиях отвер- 	¦	         	¦	       	¦	                 
	¦	        	¦	      	¦

	¦	       	¦	стий для труб диаметром	¦	         	¦	       	¦	                 
	¦	        	¦	      	¦

	¦	       	¦	более 50 мм с последу- 	¦	         	¦	       	¦	                 
	¦	        	¦	      	¦

	¦	       	¦	ющей заделкой          	¦	         	¦	       	¦	                 
	¦	        	¦	      	¦

	¦	IV-14  	¦	Заделка бетоном неплот-	¦	м        	¦	0,31   	¦	Бетон            
	¦	куб. м  	¦	0,006 	¦

	¦	       	¦	ных стыков перекрытий  	¦	         	¦	       	¦	Раствор          
	¦	-"-     	¦	0,001 	¦

	¦	       	¦	из железобетонных      	¦	         	¦	       	¦	                 
	¦	        	¦	      	¦

	¦	       	¦	настилов               	¦	         	¦	       	¦	                 
	¦	        	¦	      	¦

	¦	IV-15  	¦	Заделка гнезд с расхо- 	¦	10 шт.   	¦	0,65   	¦	Кирпич красный   
	¦	т. шт.  	¦	0,01  	¦

	¦	       	¦	дом кирпича до 20 шт.  	¦	кирп.    	¦	       	¦	Раствор          
	¦	куб. м  	¦	0,007 	¦

	¦	IV-16  	¦	Устройство кирпичных   	¦	1 кв. м  	¦	1,64   	¦	Кирпич красный   
	¦	т. шт.  	¦	0,051 	¦

	¦	       	¦	неармированных перего- 	¦	перего-  	¦	       	¦	Раствор цементный
	¦	куб. м  	¦	0,023 	¦

	¦	       	¦	родок в 1/2 кирпича под	¦	родок    	¦	       	¦	                 
	¦	        	¦	      	¦

	¦	       	¦	штукатурку             	¦	         	¦	       	¦	                 

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	¦	        	¦	      	¦

	¦	IV-17  	¦	Заделка проемов в кир- 	¦	кв. м    	¦	1,98   	¦	Кирпич красный   
	¦	т. шт.  	¦	0,051 	¦

	¦	       	¦	пичных перегородках в  	¦	проема   	¦	       	¦	Раствор          
	¦	куб. м  	¦	0,023 	¦

	¦	       	¦	полкирпича армированные	¦	         	¦	       	¦	Сталь сортовая   
	¦	кг      	¦	2,0   	¦

	¦	IV-18  	¦	Разборка бетонного ос- 	¦	куб. м   	¦	11,26  	¦	                 
	¦	        	¦	      	¦

	¦	       	¦	нования полов отдельны-	¦	         	¦	       	¦	                 
	¦	        	¦	      	¦

	¦	       	¦	ми местами вручную     	¦	         	¦	       	¦	                 
	¦	        	¦	      	¦

	¦	IV-19  	¦	Устройство бетонной    	¦	кв. м    	¦	0,53   	¦	Бетон            
	¦	куб. м  	¦	0,102 	¦

	¦	       	¦	подготовки под полы при	¦	         	¦	       	¦	                 
	¦	        	¦	      	¦

	¦	       	¦	толщине подстилающего  	¦	         	¦	       	¦	                 
	¦	        	¦	      	¦

	¦	       	¦	слоя 100 мм в площади  	¦	         	¦	       	¦	                 
	¦	        	¦	      	¦

	¦	       	¦	пола до 5 кв. м        	¦	         	¦	       	¦	                 
	¦	        	¦	      	¦

	¦	IV-20  	¦	Ремонт цементных полов:	¦	-"-      	¦	1,28   	¦	Раствор          
	¦	-"-     	¦	0,02  	¦

	¦	       	¦	разборка старого пола, 	¦	         	¦	       	¦	Цемент           
	¦	кг      	¦	2,4   	¦

	¦	       	¦	устройство нового      	¦	         	¦	       	¦	                 
	¦	        	¦	      	¦

	¦	       	¦	толщиной 20 мм при     	¦	         	¦	       	¦	                 
	¦	        	¦	      	¦

	¦	       	¦	площади пола до 5 кв. м	¦	         	¦	       	¦	                 
	¦	        	¦	      	¦

	¦	IV-21  	¦	Смена чистых цементных 	¦	пог. м   	¦	0,39   	¦	Раствор цементный
	¦	куб. м  	¦	0,006 	¦

	¦	       	¦	плинтусов              	¦	         	¦	       	¦	Цемент           
	¦	кг      	¦	0,06  	¦

	¦	IV-22  	¦	Ремонт выбоин площадью 	¦	1 место  	¦	0,35   	¦	Раствор цементный
	¦	куб. м  	¦	0,003 	¦

	¦	       	¦	до 25 кв. м в цементных	¦	         	¦	       	¦	Цемент           

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	¦	кг      	¦	0,40  	¦

	¦	       	¦	полах раствором        	¦	         	¦	       	¦	                 
	¦	        	¦	      	¦

	¦	IV-23  	¦	Ремонт выбоин площадью 	¦	место    	¦	0,65   	¦	Раствор цементный
	¦	куб. м  	¦	0,007 	¦

	¦	       	¦	до 0,5 кв. м в цемент- 	¦	         	¦	       	¦	Цемент           
	¦	кг      	¦	0,80  	¦

	¦	       	¦	ных чистых полах       	¦	         	¦	       	¦	                 
	¦	        	¦	      	¦

	¦	       	¦	раствором              	¦	         	¦	       	¦	                 
	¦	        	¦	      	¦

	¦	IV-24  	¦	Разборка плиточных     	¦	кв. м    	¦	0,58   	¦	                 
	¦	        	¦	      	¦

	¦	       	¦	полов                  	¦	         	¦	       	¦	                 
	¦	        	¦	      	¦

	¦	IV-25  	¦	Устройство полов из    	¦	-"-      	¦	1,85   	¦	Плитка метлахская
	¦	кв. м   	¦	1,03  	¦

	¦	       	¦	метлахских плиток при  	¦	         	¦	       	¦	Раствор          
	¦	куб. м  	¦	0,019 	¦

	¦	       	¦	площади пола до 2 кв. м	¦	         	¦	       	¦	Опилки           
	¦	-"-     	¦	0,001 	¦

	¦	IV-26  	¦	То же, при площади     	¦	-"-      	¦	1,71   	¦	Плитка метлахская
	¦	кв. м   	¦	1,03  	¦

	¦	       	¦	пола до 10 кв. м       	¦	         	¦	       	¦	Раствор          
	¦	куб. м  	¦	0,019 	¦

	¦	       	¦	                       	¦	         	¦	       	¦	Опилки           
	¦	-"-     	¦	0,001 	¦

	¦	IV-27  	¦	Смена керамических пли-	¦	кв. м    	¦	13,78  	¦	Плитки           
	¦	кв. м   	¦	1,00  	¦

	¦	       	¦	ток отдельными местами 	¦	сменяемой	¦	       	¦	керамические     
	¦	        	¦	      	¦

	¦	       	¦	до 10 шт. в одном      	¦	облицов. 	¦	       	¦	Раствор цементный
	¦	куб. м  	¦	0,017 	¦

	¦	       	¦	месте. Стены           	¦	         	¦	       	¦	                 
	¦	        	¦	      	¦

	¦	IV-28  	¦	Ремонт железобетонных  	¦	место    	¦	0,98   	¦	Цемент           
	¦	кг      	¦	1,3   	¦

	¦	       	¦	ступеней с заделкой    	¦	         	¦	       	¦	Гравий           
	¦	куб. м  	¦	0,001 	¦

	¦	       	¦	отбитых мест и больших 	¦	         	¦	       	¦	Песок            

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	¦	-"-     	¦	0,001 	¦

	¦	       	¦	выбоин                 	¦	         	¦	       	¦	Доски            
	¦	-"-     	¦	0,004 	¦

	¦	IV-29  	¦	Ремонт железобетонных  	¦	-"-      	¦	0,65   	¦	Цемент           
	¦	кг      	¦	1,0   	¦

	¦	       	¦	ступеней с заделкой    	¦	         	¦	       	¦	Песок            
	¦	куб. м  	¦	0,001 	¦

	¦	       	¦	трещин и мелких выбоин 	¦	         	¦	       	¦	                 
	¦	        	¦	      	¦

	¦	IV-30  	¦	Ремонт каменных ступе- 	¦	-"-      	¦	1,69   	¦	Плита лещадная   
	¦	кв. м   	¦	0,05  	¦

	¦	       	¦	ней заделкой выбоин    	¦	         	¦	       	¦	Цемент           
	¦	кг      	¦	0,2   	¦

	¦	       	¦	вырубкой гнезд и поста-	¦	         	¦	       	¦	Песок            
	¦	куб. м  	¦	0,0004	¦

	¦	       	¦	новкой вставок длиной  	¦	         	¦	       	¦	                 
	¦	        	¦	      	¦

	¦	       	¦	до 15 см               	¦	         	¦	       	¦	                 
	¦	        	¦	      	¦

	¦	IV-31  	¦	Разборка печей:        	¦	куб. м   	¦	       	¦	                 
	¦	        	¦	      	¦

	¦	       	¦	а) необлицованных      	¦	         	¦	5,51   	¦	                 
	¦	        	¦	      	¦

	¦	       	¦	б) облицованных        	¦	         	¦	6,62   	¦	                 
	¦	        	¦	      	¦

	¦	IV-32  	¦	Разборка очагов        	¦	куб. м   	¦	5,12   	¦	                 
	¦	        	¦	      	¦

	¦	       	¦	                       	¦	         	¦	       	¦	                 
	¦	        	¦	      	¦

	¦	IV-33  	¦	Разборка труб или боро-	¦	м        	¦	1,52   	¦	                 
	¦	        	¦	      	¦

	¦	       	¦	вов в один канал       	¦	         	¦	       	¦	                 
	¦	        	¦	      	¦

	¦	       	¦	Добавлять на каждый    	¦	         	¦	1,01   	¦	                 
	¦	        	¦	      	¦

	¦	       	¦	последующий канал      	¦	         	¦	       	¦	                 
	¦	        	¦	      	¦

	¦	IV-34  	¦	Отсоединение металли-  	¦	плита    	¦	3,60   	¦	                 
	¦	        	¦	      	¦

	¦	       	¦	ческих плит с разборкой	¦	         	¦	       	¦	                 

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	¦	        	¦	      	¦

	¦	       	¦	топливника             	¦	         	¦	       	¦	                 
	¦	        	¦	      	¦

	¦	IV-35  	¦	Устройство оснований   	¦	место    	¦	7,48   	¦	Доски            
	¦	куб. м  	¦	0,053 	¦

	¦	       	¦	под средистенные печи и	¦	         	¦	       	¦	Кирпич красный   
	¦	т. шт.  	¦	0,01  	¦

	¦	       	¦	очаги с дощатым        	¦	         	¦	       	¦	Сталь двутавровая
	¦	кг      	¦	37,0  	¦

	¦	       	¦	настилом               	¦	         	¦	       	¦	Сталь полосовая  
	¦	-"-     	¦	1,6   	¦

	¦	       	¦	                       	¦	         	¦	       	¦	Раствор          
	¦	куб. м  	¦	0,020 	¦

	¦	IV-36  	¦	Устройство оснований   	¦	-"-      	¦	9,69   	¦	Кирпич красный   
	¦	т. шт.  	¦	0,005 	¦

	¦	       	¦	под угловые печи       	¦	         	¦	       	¦	Сталь двутавровая
	¦	кг      	¦	25,0  	¦

	¦	       	¦	                       	¦	         	¦	       	¦	Сталь листовая   
	¦	-"-     	¦	0,8   	¦

	¦	       	¦	                       	¦	         	¦	       	¦	Раствор          
	¦	куб. м  	¦	0,01  	¦

	¦	IV-37  	¦	Кладка комнатных печей 	¦	куб. м   	¦	14,18  	¦	Войлок           
	¦	кг      	¦	1,80  	¦

	¦	       	¦	                       	¦	кладки   	¦	       	¦	строительный     
	¦	        	¦	      	¦

	¦	       	¦	                       	¦	без      	¦	       	¦	Глина
	обыкновенная	¦	куб. м  	¦	0,23  	¦

	¦	       	¦	                       	¦	вычета   	¦	       	¦	Кирпич красный   
	¦	т. шт.  	¦	0,36  	¦

	¦	       	¦	                       	¦	пустот   	¦	       	¦	Песок            
	¦	куб. м  	¦	0,17  	¦

	¦	       	¦	                       	¦	         	¦	       	¦	Проволока печная 
	¦	кг      	¦	0,74  	¦

	¦	       	¦	                       	¦	         	¦	       	¦	Сталь кровельная 
	¦	-"-     	¦	1,4   	¦

	¦	       	¦	                       	¦	         	¦	       	¦	Сталь полосовая  
	¦	-"-     	¦	1,00  	¦

	¦	IV-38  	¦	Кладка квартирных      	¦	-"-      	¦	14,97  	¦	Глина
	обыкновенная	¦	куб. м  	¦	0,1   	¦

	¦	       	¦	очагов                 	¦	         	¦	       	¦	Кирпич красный   

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	¦	т. шт.  	¦	0,35  	¦

	¦	       	¦	                       	¦	         	¦	       	¦	Песок            
	¦	куб. м  	¦	0,11  	¦

	¦	       	¦	                       	¦	         	¦	       	¦	Проволока печная 
	¦	кг      	¦	0,50  	¦

	¦	       	¦	                       	¦	         	¦	       	¦	Сталь кровельная 
	¦	-"-     	¦	2,20  	¦

	¦	       	¦	                       	¦	         	¦	       	¦	Сталь полосовая  
	¦	-"-     	¦	21,0  	¦

	¦	IV-39  	¦	Кладка вновь печей в   	¦	кв. м    	¦	23,47  	¦	Футляры печные   
	¦	к-т     	¦	1     	¦

	¦	       	¦	металлических футлярах 	¦	кладки   	¦	       	¦	гофрированные    
	¦	        	¦	      	¦

	¦	       	¦	с разборкой старых     	¦	без      	¦	       	¦	Кирпич красный   
	¦	т. шт.  	¦	0,36  	¦

	¦	       	¦	                       	¦	вычета   	¦	       	¦	Глина
	обыкновенная	¦	куб. м  	¦	0,23  	¦

	¦	       	¦	                       	¦	пустот   	¦	       	¦	Песок            
	¦	-"-     	¦	0,17  	¦

	¦	       	¦	                       	¦	         	¦	       	¦	Войлок строитель-
	¦	кг      	¦	1,8   	¦

	¦	       	¦	                       	¦	         	¦	       	¦	ный              
	¦	        	¦	      	¦

	¦	       	¦	                       	¦	         	¦	       	¦	Проволока печная 
	¦	-"-     	¦	0,74  	¦

	¦	       	¦	                       	¦	         	¦	       	¦	Сталь кровельная 
	¦	-"-     	¦	1,4   	¦

	¦	       	¦	                       	¦	         	¦	       	¦	Сталь полосовая  
	¦	-"-     	¦	0,1   	¦

	¦	IV-40  	¦	Установка металлических	¦	место    	¦	5,51   	¦	Сущевские очаги  
	¦	шт.     	¦	1     	¦

	¦	       	¦	очагов размером до     	¦	         	¦	       	¦	Глина
	обыкновенная	¦	куб. м  	¦	0,011 	¦

	¦	       	¦	1100 х 550             	¦	         	¦	       	¦	Глина огнеупорная
	¦	т       	¦	0,023 	¦

	¦	       	¦	                       	¦	         	¦	       	¦	Кирпич красный   
	¦	т. шт.  	¦	0,004 	¦

	¦	       	¦	                       	¦	         	¦	       	¦	Кирпич
	тугоплавкий	¦	-"-     	¦	0,053 	¦

	¦	       	¦	                       	¦	         	¦	       	¦	Песок            

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	¦	куб. м  	¦	0,02  	¦

	¦	       	¦	                       	¦	         	¦	       	¦	Сталь кровельная 
	¦	кг      	¦	1,6   	¦

	¦	IV-41  	¦	Ремонт отопительных    	¦	печь     	¦	15,75  	¦	Глина
	обыкновенная	¦	куб. м  	¦	0,125 	¦

	¦	       	¦	печей с частичной      	¦	         	¦	       	¦	Кирпич           
	¦	т. шт.  	¦	0,1   	¦

	¦	       	¦	перекладкой их, с      	¦	         	¦	       	¦	Песок            
	¦	куб. м  	¦	0,08  	¦

	¦	       	¦	добавлением до 100 шт. 	¦	         	¦	       	¦	                 
	¦	        	¦	      	¦

	¦	       	¦	кирпичей               	¦	         	¦	       	¦	                 
	¦	        	¦	      	¦

	¦	IV-42  	¦	То же, кухонных очагов 	¦	очаг     	¦	10,87  	¦	Глина
	обыкновенная	¦	-"-     	¦	0,125 	¦

	¦	       	¦	                       	¦	         	¦	       	¦	Кирпич красный   
	¦	т. шт.  	¦	0,1   	¦

	¦	       	¦	                       	¦	         	¦	       	¦	Песок            
	¦	куб. м  	¦	0,08  	¦

	¦	IV-43  	¦	Ремонт печей, облицо-  	¦	печь     	¦	19,3   	¦	Глина
	обыкновенная	¦	куб. м  	¦	0,21  	¦

	¦	       	¦	ванных изразцами, с    	¦	         	¦	       	¦	Изразцы          
	¦	кв. м   	¦	0,105 	¦

	¦	       	¦	частичной перекладкой  	¦	         	¦	       	¦	Кирпич красный   
	¦	т. шт.  	¦	0,10  	¦

	¦	       	¦	их, с добавлением до   	¦	         	¦	       	¦	Песок            
	¦	куб. м  	¦	0,13  	¦

	¦	       	¦	100 шт. кирпича        	¦	         	¦	       	¦	                 
	¦	        	¦	      	¦

	¦	IV-44  	¦	То же, кухонных очагов 	¦	очаг     	¦	13,57  	¦	Глина
	обыкновенная	¦	-"-     	¦	0,21  	¦

	¦	       	¦	                       	¦	         	¦	       	¦	Кирпич красный   
	¦	т. шт.  	¦	0,100 	¦

	¦	       	¦	                       	¦	         	¦	       	¦	Изразцы          
	¦	кв. м   	¦	0,103 	¦

	¦	       	¦	                       	¦	         	¦	       	¦	Песок            
	¦	куб. м  	¦	0,13  	¦

	¦	IV-45  	¦	Мелкий ремонт печей с  	¦	печь     	¦	3,55   	¦	Глина
	обыкновенная	¦	куб. м  	¦	0,014 	¦

	¦	       	¦	заменой до 10 шт.      	¦	         	¦	       	¦	Кирпич красный   

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	¦	т. шт.  	¦	0,011 	¦

	¦	       	¦	кирпича                	¦	         	¦	       	¦	Песок            
	¦	куб. м  	¦	0,01  	¦

	¦	IV-46  	¦	То же, очагов          	¦	очаг     	¦	3,08   	¦	То же            
	¦	        	¦	      	¦

	¦	       	¦	                       	¦	         	¦	       	¦	                 
	¦	        	¦	      	¦

	¦	IV-47  	¦	Ремонт поверхности     	¦	печь     	¦	1,08   	¦	Глина
	обыкновенная	¦	-"-     	¦	0,006 	¦

	¦	       	¦	печей и очагов         	¦	или очаг 	¦	       	¦	Песок            
	¦	-"-     	¦	0,003 	¦

	¦	       	¦	                       	¦	         	¦	       	¦	                 
	¦	        	¦	      	¦

	¦	IV-48  	¦	Облицовка печей и      	¦	кв. м    	¦	6,38   	¦	Изразцы          
	¦	шт.     	¦	21    	¦

	¦	       	¦	очагов                 	¦	облицо-  	¦	       	¦	Кирпич красный   
	¦	т. шт.  	¦	0,015 	¦

	¦	       	¦	                       	¦	ванной   	¦	       	¦	Глина
	обыкновенная	¦	куб. м  	¦	0,021 	¦

	¦	       	¦	                       	¦	поверх-  	¦	       	¦	Гипс строительный
	¦	кг      	¦	0,20  	¦

	¦	       	¦	                       	¦	ности    	¦	       	¦	Гвозди           
	¦	-"-     	¦	0,314 	¦

	¦	       	¦	                       	¦	         	¦	       	¦	Песок            
	¦	куб. м  	¦	0,014 	¦

	¦	       	¦	                       	¦	         	¦	       	¦	Проволока 5 мм   
	¦	кг      	¦	0,156 	¦

	¦	       	¦	                       	¦	         	¦	       	¦	Проволока печная 
	¦	-"-     	¦	0,7   	¦

	¦	IV-49  	¦	Перекладка вертикальных	¦	метр     	¦	0,51   	¦	Кирпич           
	¦	т. шт.  	¦	0,004 	¦

	¦	       	¦	разделок в 0,5 кирпича 	¦	разделки 	¦	       	¦	Глина            
	¦	куб. м  	¦	0,001 	¦

	¦	       	¦	                       	¦	         	¦	       	¦	Песок            
	¦	-"-     	¦	0,001 	¦

	¦	       	¦	                       	¦	         	¦	       	¦	Гвозди           
	¦	кг      	¦	0,02  	¦

	¦	       	¦	                       	¦	         	¦	       	¦	Войлок           
	¦	кв. м   	¦	0,14  	¦

	¦	       	¦	                       	¦	         	¦	       	¦	Проволока        

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	¦	кг      	¦	0,08  	¦

	¦	IV-50  	¦	Перекладка вьюшечных и 	¦	метр     	¦	4,75   	¦	Вьюшечный прибор -
	¦	        	¦	      	¦

	¦	       	¦	перекидных патрубков   	¦	труб и   	¦	       	¦	по потребности   
	¦	        	¦	      	¦

	¦	       	¦	                       	¦	патрубков	¦	       	¦	Глина
	обыкновенная	¦	куб. м  	¦	0,031 	¦

	¦	       	¦	                       	¦	         	¦	       	¦	Кирпич красный   
	¦	т. шт.  	¦	0,039 	¦

	¦	       	¦	                       	¦	         	¦	       	¦	Песок            
	¦	куб. м  	¦	0,02  	¦

	¦	       	¦	                       	¦	         	¦	       	¦	Олифа            
	¦	кг      	¦	0,045 	¦

	¦	       	¦	                       	¦	         	¦	       	¦	Сталь кровельная 
	¦	-"-     	¦	7,0   	¦

	¦	       	¦	                       	¦	         	¦	       	¦	Сталь сортовая   
	¦	-"-     	¦	0,7   	¦

	¦	IV-51  	¦	Смена прибора в печах и	¦	прибор   	¦	1,86   	¦	Дверка топочная  
	¦	шт.     	¦	1     	¦

	¦	       	¦	очагах необлицованных  	¦	         	¦	       	¦	Проволока печная 
	¦	кг      	¦	0,05  	¦

	¦	       	¦	(дверцы топочные)      	¦	         	¦	       	¦	                 
	¦	        	¦	      	¦

	¦	IV-52  	¦	То же (вьюшки,         	¦	прибор   	¦	1,10   	¦	Вьюшка или задвиж-
	¦	шт.     	¦	1     	¦

	¦	       	¦	задвижки)              	¦	         	¦	       	¦	ка чугунная      
	¦	        	¦	      	¦

	¦	IV-53  	¦	То же (дверцы подду-   	¦	-"-      	¦	0,99   	¦	Дверка поддуваль-
	¦	-"-     	¦	1     	¦

	¦	       	¦	вальные и вьюшечные)   	¦	         	¦	       	¦	ная или вьюшечная
	¦	        	¦	      	¦

	¦	       	¦	                       	¦	         	¦	       	¦	Проволока печная 
	¦	кг      	¦	0,05  	¦

	¦	IV-54  	¦	Смена прибора в печах  	¦	-"-      	¦	2,41   	¦	Дверка топочная  
	¦	шт.     	¦	1     	¦

	¦	       	¦	и очагах облицованных  	¦	         	¦	       	¦	Проволока печная 
	¦	кг      	¦	0,05  	¦

	¦	       	¦	(дверки топочные)      	¦	         	¦	       	¦	                 
	¦	        	¦	      	¦

	¦	IV-55  	¦	Смена прибора в печах  	¦	-"-      	¦	1,74   	¦	Вьюшка или задвиж-

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	¦	шт.     	¦	1     	¦

	¦	       	¦	и очагах облицованных  	¦	         	¦	       	¦	ки чугунные      
	¦	        	¦	      	¦

	¦	       	¦	(вьюшка и задвижка)    	¦	         	¦	       	¦	                 
	¦	        	¦	      	¦

	¦	IV-56  	¦	То же, дверцы подду-   	¦	-"-      	¦	1,31   	¦	Дверка поддуваль-
	¦	-"-     	¦	1     	¦

	¦	       	¦	вальные и вьюшечные для	¦	         	¦	       	¦	ная или вьюшечная
	¦	        	¦	      	¦

	¦	       	¦	печей и очагов         	¦	         	¦	       	¦	Проволока печная 
	¦	кг      	¦	0,053 	¦

	¦	IV-57  	¦	Смена предтопочных     	¦	лист     	¦	0,35   	¦	Сталь кровельная 
	¦	-"-     	¦	1,51  	¦

	¦	       	¦	листов                 	¦	         	¦	       	¦	Гвозди           
	¦	-"-     	¦	0,007 	¦

	¦	IV-58  	¦	Исправление дымовых    	¦	10 шт.   	¦	1,48   	¦	Кирпич красный   
	¦	т. шт.  	¦	0,01  	¦

	¦	       	¦	труб сверх крыши       	¦	кирпича  	¦	       	¦	Раствор          
	¦	куб. м  	¦	0,006 	¦

	¦	IV-59  	¦	То же, под крышей      	¦	-"-      	¦	1,29   	¦	Кирпич красный   
	¦	т. шт.  	¦	0,01  	¦

	¦	       	¦	                       	¦	         	¦	       	¦	Глина
	обыкновенная	¦	куб. м  	¦	0,01  	¦

	¦	       	¦	                       	¦	         	¦	       	¦	Песок            
	¦	-"-     	¦	0,006 	¦

	¦	IV-60  	¦	Исправление головок    	¦	труба    	¦	1,39   	¦	Кирпич красный   
	¦	т. шт.  	¦	0,013 	¦

	¦	       	¦	дымовых труб в 1 канал 	¦	         	¦	       	¦	Раствор          
	¦	куб. м  	¦	0,015 	¦

	¦	       	¦	                       	¦	         	¦	       	¦	Гвозди           
	¦	кг      	¦	0,06  	¦

	¦	       	¦	                       	¦	         	¦	       	¦	Проволока печная 
	¦	-"-     	¦	0,023 	¦

	¦	IV-61  	¦	Добавлять на каждый    	¦	-"-      	¦	0,64   	¦	Кирпич красный   
	¦	т. шт.  	¦	0,007 	¦

	¦	       	¦	следующий канал сверх  	¦	         	¦	       	¦	Раствор М-10     
	¦	куб. м  	¦	0,006 	¦

	¦	       	¦	первого                	¦	         	¦	       	¦	Гвозди           
	¦	кг      	¦	0,03  	¦

	¦	       	¦	                       	¦	         	¦	       	¦	Проволока печная 

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	¦	-"-     	¦	0,013 	¦

	¦	IV-62  	¦	Смена духового шкафа со	¦	шт.      	¦	1,52   	¦	Духовой шкаф     
	¦	шт.     	¦	1     	¦

	¦	       	¦	снятием плит, обмазкой 	¦	         	¦	       	¦	Кирпич           
	¦	т. шт.  	¦	0,01  	¦

	¦	       	¦	шкафа глиной и укладкой	¦	         	¦	       	¦	Глина            
	¦	куб. м  	¦	0,08  	¦

	¦	       	¦	их вновь               	¦	         	¦	       	¦	Песок            
	¦	-"-     	¦	0,006 	¦

	¦	IV-63  	¦	Устройство дымовых     	¦	метр     	¦	5,44   	¦	Кирпич красный   
	¦	т. шт.  	¦	0,016 	¦

	¦	       	¦	каналов в кирпичных    	¦	канала   	¦	       	¦	Глина
	обыкновенная	¦	куб. м  	¦	0,007 	¦

	¦	       	¦	стенах в один дым      	¦	         	¦	       	¦	Песок            
	¦	-"-     	¦	0,005 	¦

	¦	       	¦	0,5 х 1,0 кирпича      	¦	         	¦	       	¦	                 
	¦	        	¦	      	¦

	¦	IV-64  	¦	Добавляется на каждый  	¦	-"-      	¦	4,03   	¦	Кирпич красный   
	¦	т. шт.  	¦	0,024 	¦

	¦	       	¦	последующий дым        	¦	         	¦	       	¦	Глина
	обыкновенная	¦	куб. м  	¦	0,011 	¦

	¦	       	¦	                       	¦	         	¦	       	¦	Песок            
	¦	-"-     	¦	0,007 	¦

	¦	IV-65  	¦	Смена вентиляционных   	¦	шт.      	¦	0,73   	¦	Решетка          
	¦	шт.     	¦	1     	¦

	¦	       	¦	решеток                	¦	         	¦	       	¦	вентиляционная   
	¦	        	¦	      	¦

	¦	       	¦	                       	¦	         	¦	       	¦	Проволока        
	¦	кг      	¦	0,05  	¦

	¦	       	¦	                       	¦	         	¦	       	¦	вязальная        
	¦	        	¦	      	¦

	¦	       	¦	                       	¦	         	¦	       	¦	Раствор          
	¦	куб. м  	¦	0,001 	¦

	¦	       	¦	                       	¦	         	¦	       	¦	Гипс строительный
	¦	кг      	¦	0,5   	¦

	¦	IV-66  	¦	Ремонт обмуровки котла 	¦	куб. м   	¦	       	¦	Кирпич - по пот- 
	¦	        	¦	      	¦

	¦	       	¦	с разборкой кладки,    	¦	кладки   	¦	       	¦	ребности и зависи-
	¦	        	¦	      	¦

	¦	       	¦	сортировкой, очисткой  	¦	         	¦	       	¦	мости от выхода  

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	¦	        	¦	      	¦

	¦	       	¦	и укладкой годного     	¦	         	¦	       	¦	годного кирпича  
	¦	        	¦	      	¦

	¦	       	¦	кирпича:               	¦	         	¦	       	¦	после разборки   
	¦	        	¦	      	¦

	¦	       	¦	а) прямые стены        	¦	         	¦	13,78  	¦	кладки           
	¦	        	¦	      	¦

	¦	       	¦	б) арки и своды        	¦	         	¦	17,64  	¦	                 
	¦	        	¦	      	¦

	¦	       	¦	в) борова              	¦	         	¦	11,03  	¦	                 
	¦	        	¦	      	¦

	¦	IV-67  	¦	Прочистка дымоходов с  	¦	м        	¦	       	¦	                 
	¦	        	¦	      	¦

	¦	       	¦	пробивкой отверстий,   	¦	         	¦	       	¦	                 
	¦	        	¦	      	¦

	¦	       	¦	удалением сажи, обрат- 	¦	         	¦	       	¦	                 
	¦	        	¦	      	¦

	¦	       	¦	ной заделкой и опробо- 	¦	         	¦	       	¦	                 
	¦	        	¦	      	¦

	¦	       	¦	ванием дымохода:       	¦	         	¦	       	¦	                 
	¦	        	¦	      	¦

	¦	       	¦	а) горизонтального     	¦	         	¦	0,17   	¦	                 
	¦	        	¦	      	¦

	¦	       	¦	б) вертикального       	¦	         	¦	0,08   	¦	                 
	¦	        	¦	      	¦

	¦	IV-68  	¦	Удаление засорения в   	¦	м канала 	¦	0,21   	¦	                 
	¦	        	¦	      	¦

	¦	       	¦	вентиляционных коробах 	¦	         	¦	       	¦	                 
	¦	        	¦	      	¦

	¦	       	¦	с проверкой каналов,   	¦	         	¦	       	¦	                 
	¦	        	¦	      	¦

	¦	       	¦	пробивкой и заделкой   	¦	         	¦	       	¦	                 
	¦	        	¦	      	¦

	¦	       	¦	отверстий              	¦	         	¦	       	¦	                 
	¦	        	¦	      	¦

	¦	IV-69  	¦	Восстановление отдель- 	¦	кв. м    	¦	1,31   	¦	Песок            
	¦	куб. м  	¦	0,075 	¦

	¦	       	¦	ными местами осевшей   	¦	покрытия 	¦	       	¦	Камень - по факти-
	¦	        	¦	      	¦

	¦	       	¦	булыжной отмостки      	¦	         	¦	       	¦	ческой

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	потребности	¦	        	¦	      	¦

	¦	       	¦	около строения         	¦	         	¦	       	¦	                 
	¦	        	¦	      	¦

	¦	IV-70  	¦	Восстановление отдель- 	¦	-"-      	¦	0,35   	¦	Асфальт песчаный 
	¦	т       	¦	0,059 	¦

	¦	       	¦	ными местами осевшей   	¦	         	¦	       	¦	литой            
	¦	        	¦	      	¦

	¦	       	¦	асфальтовой отмостки   	¦	         	¦	       	¦	Песок            
	¦	куб. м  	¦	0,058 	¦

	¦	       	¦	около строений с под-  	¦	         	¦	       	¦	                 
	¦	        	¦	      	¦

	¦	       	¦	сыпкой песка до 5 см   	¦	         	¦	       	¦	                 
	¦	        	¦	      	¦

	¦	IV-71  	¦	Заделка трещин в местах	¦	метр     	¦	0,11   	¦	Цемент           
	¦	кг      	¦	0,26  	¦

	¦	       	¦	примыкания отмостки к  	¦	трещины  	¦	       	¦	Песок            
	¦	куб. м  	¦	0,01  	¦

	¦	       	¦	стенам зданий          	¦	         	¦	       	¦	                 
	¦	        	¦	      	¦

	¦	       	¦	                       	¦	         	¦	       	¦	                 
	¦	        	¦	      	¦

	¦	       	¦	V. Водопровод,         	¦	         	¦	       	¦	                 
	¦	        	¦	      	¦

	¦	       	¦	канализация.           	¦	         	¦	       	¦	                 
	¦	        	¦	      	¦

	¦	       	¦	Центральное отопление  	¦	         	¦	       	¦	                 
	¦	        	¦	      	¦

	¦	       	¦	и горячее водоснабжение	¦	         	¦	       	¦	                 
	¦	        	¦	      	¦

	¦	       	¦	                       	¦	         	¦	       	¦	                 
	¦	        	¦	      	¦

	¦	V-1    	¦	Смена отдельных участ- 	¦	м        	¦	0,83   	¦	Трубопровод      
	¦	м       	¦	1,0   	¦

	¦	       	¦	ков стальных водогазо- 	¦	         	¦	       	¦	Крючья для       
	¦	кг      	¦	0,025 	¦

	¦	       	¦	проводных труб внутри  	¦	         	¦	       	¦	крепления        
	¦	        	¦	      	¦

	¦	       	¦	здания диаметром до 32 	¦	         	¦	       	¦	Олифа            
	¦	-"-     	¦	0,002 	¦

	¦	       	¦	мм                     	¦	         	¦	       	¦	Сурик            

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	¦	-"-     	¦	0,002 	¦

	¦	       	¦	                       	¦	         	¦	       	¦	Прядь льняная    
	¦	-"-     	¦	0,001 	¦

	¦	V-2    	¦	То же, диаметром до 50 	¦	-"-      	¦	1,17   	¦	Трубопровод      
	¦	м       	¦	1,0   	¦

	¦	       	¦	мм                     	¦	         	¦	       	¦	Крючья для       
	¦	кг      	¦	0,032 	¦

	¦	       	¦	                       	¦	         	¦	       	¦	крепления        
	¦	        	¦	      	¦

	¦	       	¦	                       	¦	         	¦	       	¦	Олифа            
	¦	-"-     	¦	0,004 	¦

	¦	       	¦	                       	¦	         	¦	       	¦	Сурик            
	¦	-"-     	¦	0,004 	¦

	¦	       	¦	                       	¦	         	¦	       	¦	Прядь льняная    
	¦	-"-     	¦	0,002 	¦

	¦	V-3    	¦	Смена отдельных участ- 	¦	-"-      	¦	1,70   	¦	Трубы            
	¦	м       	¦	0,67  	¦

	¦	       	¦	ков чугунных канализа- 	¦	         	¦	       	¦	Фасонные части   
	¦	шт.     	¦	1,73  	¦

	¦	       	¦	ционных труб внутри    	¦	         	¦	       	¦	Канат белый      
	¦	кг      	¦	0,02  	¦

	¦	       	¦	зданий диаметром до 50 	¦	         	¦	       	¦	Прядь смоляная   
	¦	-"-     	¦	0,05  	¦

	¦	       	¦	мм                     	¦	         	¦	       	¦	Цемент           
	¦	-"-     	¦	0,2   	¦

	¦	V-4    	¦	Смена отдельных участ- 	¦	м        	¦	2,15   	¦	Трубы чугунные   
	¦	м       	¦	0,75  	¦

	¦	       	¦	ков чугунных канализа- 	¦	         	¦	       	¦	канализационные  
	¦	        	¦	      	¦

	¦	       	¦	ционных труб внутри    	¦	         	¦	       	¦	Фасонные части   
	¦	шт.     	¦	1,26  	¦

	¦	       	¦	зданий диаметром до    	¦	         	¦	       	¦	Канат белый      
	¦	кг      	¦	0,04  	¦

	¦	       	¦	100 мм                 	¦	         	¦	       	¦	Прядь смоляная   
	¦	-"-     	¦	0,07  	¦

	¦	       	¦	                       	¦	         	¦	       	¦	Цемент           
	¦	-"-     	¦	0,29  	¦

	¦	V-5    	¦	То же, диаметром до    	¦	м        	¦	2,88   	¦	Трубы чугунные   
	¦	м       	¦	1,025 	¦

	¦	       	¦	150 мм                 	¦	         	¦	       	¦	канализационные  

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	¦	        	¦	      	¦

	¦	       	¦	                       	¦	         	¦	       	¦	Фасонные части   
	¦	шт.     	¦	0,263 	¦

	¦	       	¦	                       	¦	         	¦	       	¦	Канат белый      
	¦	кг      	¦	0,063 	¦

	¦	       	¦	                       	¦	         	¦	       	¦	Прядь смоляная   
	¦	-"-     	¦	0,117 	¦

	¦	       	¦	                       	¦	         	¦	       	¦	Цемент           
	¦	-"-     	¦	0,5   	¦

	¦	V-6    	¦	Зачеканка раструбов    	¦	раструб  	¦	0,40   	¦	Цемент           
	¦	-"-     	¦	0,25  	¦

	¦	       	¦	чугунных труб или фа-  	¦	         	¦	       	¦	Пакля смоляная   
	¦	-"-     	¦	0,002 	¦

	¦	       	¦	сонных частей цементом 	¦	         	¦	       	¦	                 
	¦	        	¦	      	¦

	¦	       	¦	при диаметре труб до   	¦	         	¦	       	¦	                 
	¦	        	¦	      	¦

	¦	       	¦	50 мм                  	¦	         	¦	       	¦	                 
	¦	        	¦	      	¦

	¦	V-7    	¦	То же, при диаметре    	¦	-"-      	¦	0,50   	¦	Цемент           
	¦	-"-     	¦	0,25  	¦

	¦	       	¦	труб до 100 мм         	¦	         	¦	       	¦	Пакля смоляная   
	¦	-"-     	¦	0,002 	¦

	¦	       	¦	                       	¦	         	¦	       	¦	                 
	¦	        	¦	      	¦

	¦	V-8    	¦	То же, при диаметре    	¦	-"-      	¦	0,76   	¦	Цемент           
	¦	-"-     	¦	0,25  	¦

	¦	       	¦	труб до 150 мм         	¦	         	¦	       	¦	Пакля смоляная   
	¦	-"-     	¦	0,002 	¦

	¦	V-9    	¦	Смена ванн             	¦	комплект 	¦	7,51   	¦	Ванны            
	¦	комплект	¦	1     	¦

	¦	V-10   	¦	Смена дровяной колонки 	¦	прибор   	¦	5,0    	¦	Дровяная колонка 
	¦	-"-     	¦	1     	¦

	¦	V-11   	¦	Смена водопроводных    	¦	         	¦	       	¦	                 
	¦	        	¦	      	¦

	¦	       	¦	кранов:                	¦	         	¦	       	¦	                 
	¦	        	¦	      	¦

	¦	       	¦	а) простых             	¦	шт.      	¦	1,15   	¦	Кран или
	смеситель	¦	шт.     	¦	1     	¦

	¦	       	¦	б) со смесителем       	¦	         	¦	       	¦	                 

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	¦	        	¦	      	¦

	¦	V-12   	¦	Смена раковины         	¦	-"-      	¦	2,02   	¦	Раковина         
	¦	-"-     	¦	1     	¦

	¦	V-13   	¦	Смена умывальников     	¦	прибор   	¦	3,13   	¦	Умывальник       
	¦	-"-     	¦	1     	¦

	¦	       	¦	                       	¦	         	¦	       	¦	фаянсовый        
	¦	        	¦	      	¦

	¦	V-14   	¦	Смена сифона           	¦	шт.      	¦	1,20   	¦	Сифон            
	¦	шт.     	¦	1     	¦

	¦	V-15   	¦	Смена смывной трубы    	¦	-"-      	¦	1,28   	¦	Смывная труба или
	¦	-"-     	¦	1     	¦

	¦	       	¦	или трапа              	¦	         	¦	       	¦	трап             
	¦	        	¦	      	¦

	¦	V-16   	¦	Смена смывного бачка   	¦	-"-      	¦	1,58   	¦	Смывной бачок    
	¦	-"-     	¦	1     	¦

	¦	V-17   	¦	Смена унитазов         	¦	прибор   	¦	2,47   	¦	Унитаз           
	¦	-"-     	¦	1     	¦

	¦	V-18   	¦	Смена сиденья к        	¦	шт.      	¦	0,98   	¦	Сидение          
	¦	-"-     	¦	1     	¦

	¦	       	¦	унитазу                	¦	         	¦	       	¦	                 
	¦	        	¦	      	¦

	¦	V-19   	¦	Смена шарового крана с 	¦	-"-      	¦	2,13   	¦	Кран шаровой с   
	¦	-"-     	¦	1     	¦

	¦	       	¦	шаром                  	¦	         	¦	       	¦	шаром            
	¦	        	¦	      	¦

	¦	V-20   	¦	Смена резинового       	¦	-"-      	¦	0,91   	¦	Манжета резиновая
	¦	шт.     	¦	1     	¦

	¦	       	¦	манжета унитаза        	¦	         	¦	       	¦	Проволока        
	¦	кг      	¦	0,05  	¦

	¦	V-21   	¦	Смена прокладки у      	¦	-"-      	¦	0,64   	¦	Резина для       
	¦	-"-     	¦	0,3   	¦

	¦	       	¦	ревизии диаметром 100  	¦	         	¦	       	¦	прокладки        
	¦	        	¦	      	¦

	¦	       	¦	мм с изготовлением их  	¦	         	¦	       	¦	                 
	¦	        	¦	      	¦

	¦	V-22   	¦	Смена манометров       	¦	прибор   	¦	0,57   	¦	Манометр         
	¦	шт.     	¦	1     	¦

	¦	V-23   	¦	Смена термометров      	¦	-"-      	¦	0,57   	¦	Термометр        
	¦	-"-     	¦	1     	¦

	¦	V-24   	¦	Ремонт водопроводных   	¦	кран     	¦	0,43   	¦	                 

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	¦	        	¦	      	¦

	¦	       	¦	кранов                 	¦	         	¦	       	¦	                 
	¦	        	¦	      	¦

	¦	V-25   	¦	Притирка пробочного    	¦	         	¦	       	¦	                 
	¦	        	¦	      	¦

	¦	       	¦	крана без снятия с     	¦	         	¦	       	¦	                 
	¦	        	¦	      	¦

	¦	       	¦	места; набивка и       	¦	         	¦	       	¦	                 
	¦	        	¦	      	¦

	¦	       	¦	установка на место     	¦	         	¦	       	¦	                 
	¦	        	¦	      	¦

	¦	       	¦	сальника:              	¦	         	¦	       	¦	                 
	¦	        	¦	      	¦

	¦	       	¦	а) диаметром до 25 мм  	¦	шт.      	¦	0,49   	¦	                 
	¦	        	¦	      	¦

	¦	       	¦	б) диаметром до 32 мм  	¦	-"-      	¦	0,58   	¦	                 
	¦	        	¦	      	¦

	¦	V-26   	¦	Укрепление расшатавших-	¦	прибор   	¦	1,91   	¦	                 
	¦	        	¦	      	¦

	¦	       	¦	ся раковин, умывальни- 	¦	         	¦	       	¦	                 
	¦	        	¦	      	¦

	¦	       	¦	ков, унитазов с уплот- 	¦	         	¦	       	¦	                 
	¦	        	¦	      	¦

	¦	       	¦	нением места присоеди- 	¦	         	¦	       	¦	                 
	¦	        	¦	      	¦

	¦	       	¦	нения их к трубопроводу	¦	         	¦	       	¦	                 
	¦	        	¦	      	¦

	¦	V-27   	¦	Разборка, прочистка и  	¦	шт.      	¦	1,01   	¦	                 
	¦	        	¦	      	¦

	¦	       	¦	сборка вновь смывного  	¦	         	¦	       	¦	                 
	¦	        	¦	      	¦

	¦	       	¦	бачка со сменой резины 	¦	         	¦	       	¦	                 
	¦	        	¦	      	¦

	¦	       	¦	под колпаком и у шаро- 	¦	         	¦	       	¦	                 
	¦	        	¦	      	¦

	¦	       	¦	вого крана с проверкой 	¦	         	¦	       	¦	                 
	¦	        	¦	      	¦

	¦	       	¦	бачка водой, без       	¦	         	¦	       	¦	                 
	¦	        	¦	      	¦

	¦	       	¦	снятия с места         	¦	         	¦	       	¦	                 

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	¦	        	¦	      	¦

	¦	V-28   	¦	Установка радиаторов с 	¦	кв. м    	¦	1,84   	¦	Радиаторы        
	¦	кв. м   	¦	1     	¦

	¦	       	¦	перегруппировкой,      	¦	         	¦	       	¦	Кронштейны       
	¦	шт.     	¦	1,5   	¦

	¦	       	¦	опрессовкой собранных  	¦	         	¦	       	¦	                 
	¦	        	¦	      	¦

	¦	       	¦	приборов, с установкой 	¦	         	¦	       	¦	                 
	¦	        	¦	      	¦

	¦	       	¦	кронштейнов строитель- 	¦	         	¦	       	¦	                 
	¦	        	¦	      	¦

	¦	       	¦	ных высотой до 500 мм  	¦	         	¦	       	¦	                 
	¦	        	¦	      	¦

	¦	V-29   	¦	Прочистка и промывка   	¦	прибор   	¦	2,06   	¦	                 
	¦	        	¦	      	¦

	¦	       	¦	радиаторов весом до 80 	¦	         	¦	       	¦	                 
	¦	        	¦	      	¦

	¦	       	¦	кг с отсоединением от  	¦	         	¦	       	¦	                 
	¦	        	¦	      	¦

	¦	       	¦	трубопровода и присое- 	¦	         	¦	       	¦	                 
	¦	        	¦	      	¦

	¦	       	¦	динением вновь после   	¦	         	¦	       	¦	                 
	¦	        	¦	      	¦

	¦	       	¦	промывки               	¦	         	¦	       	¦	                 
	¦	        	¦	      	¦

	¦	V-30   	¦	То же, весом до 160 кг 	¦	-"-      	¦	3,15   	¦	                 
	¦	        	¦	      	¦

	¦	V-31   	¦	Утепление водопроводных	¦	кв. м    	¦	1,28   	¦	Строительный     
	¦	кв. м   	¦	2,14  	¦

	¦	       	¦	труб на зиму войлоком в	¦	         	¦	       	¦	войлок           
	¦	        	¦	      	¦

	¦	       	¦	2 слоя с обертыванием  	¦	         	¦	       	¦	Мешковина        
	¦	-"-     	¦	1,15  	¦

	¦	       	¦	мешковиной             	¦	         	¦	       	¦	Дрань штукатурная
	¦	т. шт.  	¦	0,003 	¦

	¦	       	¦	                       	¦	         	¦	       	¦	Проволока печная 
	¦	кг      	¦	0,07  	¦

	¦	       	¦	                       	¦	         	¦	       	¦	Шпагат           
	¦	-"-     	¦	0,18  	¦

	¦	V-32   	¦	Изоляция горячих по-   	¦	кв. м    	¦	75,62  	¦	Асбозурит        

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	¦	куб. м  	¦	1,03  	¦

	¦	       	¦	верхностей трубопрово- 	¦	изоляции 	¦	       	¦	                 
	¦	        	¦	      	¦

	¦	       	¦	дов асбозуритом        	¦	         	¦	       	¦	                 
	¦	        	¦	      	¦

	¦	       	¦	толщиной слоя до 40 мм 	¦	         	¦	       	¦	                 
	¦	        	¦	      	¦

	¦	V-33   	¦	Прочистка канализацион-	¦	метр тру-	¦	0,37   	¦	                 
	¦	        	¦	      	¦

	¦	       	¦	ной внутренней сети    	¦	бопровода	¦	       	¦	                 
	¦	        	¦	      	¦

	¦	V-34   	¦	Прочистка дворовой     	¦	пролет   	¦	1,21   	¦	                 
	¦	        	¦	      	¦

	¦	       	¦	канализации            	¦	между    	¦	       	¦	                 
	¦	        	¦	      	¦

	¦	       	¦	                       	¦	колодцами	¦	       	¦	                 
	¦	        	¦	      	¦

	¦	V-35   	¦	Смена водомеров:       	¦	шт.      	¦	0,32   	¦	Водомеры         
	¦	шт.     	¦	По по-	¦

	¦	       	¦	а) диаметр 20 мм       	¦	         	¦	       	¦	                 
	¦	        	¦	треб- 	¦

	¦	       	¦	б) -"- 20 - 40 мм      	¦	         	¦	       	¦	                 
	¦	        	¦	ности 	¦

	¦	       	¦	в) -"- 50 мм           	¦	         	¦	       	¦	                 
	¦	        	¦	      	¦

	¦	       	¦	г) -"- 80 мм           	¦	         	¦	       	¦	                 
	¦	        	¦	      	¦

	¦	       	¦	д) -"- 100 мм          	¦	         	¦	       	¦	                 
	¦	        	¦	      	¦

	¦	V-36   	¦	Испытание системы ото- 	¦	1 м      	¦	0,07   	¦	                 
	¦	        	¦	      	¦

	¦	       	¦	пления гидравлическим  	¦	труб     	¦	       	¦	                 
	¦	        	¦	      	¦

	¦	       	¦	давлением              	¦	         	¦	       	¦	                 
	¦	        	¦	      	¦

	¦	V-37   	¦	Испытание водопроводной	¦	         	¦	       	¦	                 
	¦	        	¦	      	¦

	¦	       	¦	и канализационной сети 	¦	         	¦	       	¦	                 
	¦	        	¦	      	¦

	¦	       	¦	гидравлическим         	¦	         	¦	       	¦	                 

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	¦	        	¦	      	¦

	¦	       	¦	давлением:             	¦	         	¦	       	¦	                 
	¦	        	¦	      	¦

	¦	       	¦	а) водопроводная сеть  	¦	метр     	¦	0,08   	¦	                 
	¦	        	¦	      	¦

	¦	       	¦	б) канализационная сеть	¦	сети     	¦	0,24   	¦	                 
	¦	        	¦	      	¦

	¦	V-38   	¦	Регулировка системы    	¦	нагрева- 	¦	0,46   	¦	                 
	¦	        	¦	      	¦

	¦	       	¦	центрального отопления 	¦	тельный  	¦	       	¦	                 
	¦	        	¦	      	¦

	¦	       	¦	                       	¦	прибор   	¦	       	¦	                 
	¦	        	¦	      	¦

	¦	V-39   	¦	Промывка трубопровода  	¦	1000     	¦	1,4    	¦	                 
	¦	        	¦	      	¦

	¦	       	¦	и приборов систем цен- 	¦	куб. м   	¦	       	¦	                 
	¦	        	¦	      	¦

	¦	       	¦	трального отопления по 	¦	здания   	¦	       	¦	                 
	¦	        	¦	      	¦

	¦	       	¦	окончании отопительного	¦	         	¦	       	¦	                 
	¦	        	¦	      	¦

	¦	       	¦	сезона (с осмотром     	¦	         	¦	       	¦	                 
	¦	        	¦	      	¦

	¦	       	¦	системы)               	¦	         	¦	       	¦	                 
	¦	        	¦	      	¦

	¦	V-40   	¦	Ремонт вантузов        	¦	шт.      	¦	3,47   	¦	                 
	¦	        	¦	      	¦

	¦	V-41   	¦	Смена чугунного люка   	¦	-"-      	¦	4,08   	¦	Люк чугунный     
	¦	шт.     	¦	1     	¦

	¦	       	¦	                       	¦	         	¦	       	¦	                 
	¦	        	¦	      	¦

	¦	       	¦	VI. Электросети и      	¦	         	¦	       	¦	                 
	¦	        	¦	      	¦

	¦	       	¦	электрооборудование    	¦	         	¦	       	¦	                 
	¦	        	¦	      	¦

	¦	       	¦	                       	¦	         	¦	       	¦	                 
	¦	        	¦	      	¦

	¦	VI-1   	¦	Монтаж отдельных       	¦	м        	¦	0,32   	¦	Шнур ПРД         
	¦	м       	¦	1,03  	¦

	¦	       	¦	участков шнура с уста- 	¦	         	¦	       	¦	Ролики фарфоровые

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	¦	шт.     	¦	1,8   	¦

	¦	       	¦	новкой роликов сечением	¦	         	¦	       	¦	Шурупы с полукруг-
	¦	кг      	¦	0,009 	¦

	¦	       	¦	2 х 2,5 кв. мм по      	¦	         	¦	       	¦	лой головкой     
	¦	        	¦	      	¦

	¦	       	¦	каменному или бетонному	¦	         	¦	       	¦	                 
	¦	        	¦	      	¦

	¦	       	¦	основанию              	¦	         	¦	       	¦	                 
	¦	        	¦	      	¦

	¦	VI-2   	¦	То же, по деревянному  	¦	-"-      	¦	0,27   	¦	Шнур ПРД         
	¦	м       	¦	1,03  	¦

	¦	       	¦	основанию              	¦	         	¦	       	¦	Ролики фарфоровые
	¦	шт.     	¦	1,8   	¦

	¦	       	¦	                       	¦	         	¦	       	¦	Шурупы с полукруг-
	¦	кг      	¦	0,006 	¦

	¦	       	¦	                       	¦	         	¦	       	¦	лой головкой     
	¦	        	¦	      	¦

	¦	VI-3   	¦	Демонтаж старой провод-	¦	м        	¦	0,51   	¦	Провод ПР-500    
	¦	м       	¦	2,06  	¦

	¦	       	¦	ки и монтаж вновь про- 	¦	трубки   	¦	       	¦	Коробки ответви- 
	¦	шт.     	¦	0,08  	¦

	¦	       	¦	вода ПР-500 - 2 провода	¦	         	¦	       	¦	тельные и соедини-
	¦	        	¦	      	¦

	¦	       	¦	сечением 2,5 кв. мм в  	¦	         	¦	       	¦	тельные          
	¦	        	¦	      	¦

	¦	       	¦	полутвердых резиновых  	¦	         	¦	       	¦	Трубки резиновые 
	¦	кг      	¦	0,25  	¦

	¦	       	¦	трубках                	¦	         	¦	       	¦	полутвердые      
	¦	        	¦	      	¦

	¦	VI-4   	¦	То же, в ранее проло-  	¦	-"-      	¦	0,20   	¦	Провод ПР-500    
	¦	м       	¦	2,06  	¦

	¦	       	¦	женные резиновые полу- 	¦	         	¦	       	¦	                 
	¦	        	¦	      	¦

	¦	       	¦	твердые трубки - 2     	¦	         	¦	       	¦	                 
	¦	        	¦	      	¦

	¦	       	¦	провода сечением 2,5   	¦	         	¦	       	¦	                 
	¦	        	¦	      	¦

	¦	       	¦	кв. мм                 	¦	         	¦	       	¦	                 
	¦	        	¦	      	¦

	¦	VI-5   	¦	Демонтаж и монтаж      	¦	м        	¦	0,18   	¦	Лента

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	изоляционная	¦	кг      	¦	0,001 	¦

	¦	       	¦	электропроводки при    	¦	         	¦	       	¦	Трубка резиновая 
	¦	-"-     	¦	0,009 	¦

	¦	       	¦	выполнении штукатурных 	¦	         	¦	       	¦	полутвердая      
	¦	        	¦	      	¦

	¦	       	¦	работ по ранее установ-	¦	         	¦	       	¦	                 
	¦	        	¦	      	¦

	¦	       	¦	ленным роликам, провод 	¦	         	¦	       	¦	                 
	¦	        	¦	      	¦

	¦	       	¦	сечением 2,5 кв. мм    	¦	         	¦	       	¦	                 
	¦	        	¦	      	¦

	¦	VI-6   	¦	То же, шнур сечением   	¦	-"-      	¦	0,23   	¦	То же            
	¦	-"-     	¦	0,001 	¦

	¦	       	¦	2 х 2,5 кв. мм         	¦	         	¦	       	¦	                 
	¦	        	¦	0,009 	¦

	¦	VI-7   	¦	Смена выключателя или  	¦	шт.      	¦	0,50   	¦	Выключатель или  
	¦	шт.     	¦	1     	¦

	¦	       	¦	штепсельной розетки    	¦	         	¦	       	¦	штепсельные      
	¦	        	¦	      	¦

	¦	       	¦	(простые, установленные	¦	         	¦	       	¦	розетки          
	¦	        	¦	      	¦

	¦	       	¦	открыто)               	¦	         	¦	       	¦	                 
	¦	        	¦	      	¦

	¦	VI-8   	¦	Смена выключателя гер- 	¦	-"-      	¦	0,90   	¦	Выключатель      
	¦	-"-     	¦	1     	¦

	¦	       	¦	метического, установ-  	¦	         	¦	       	¦	герметический    
	¦	        	¦	      	¦

	¦	       	¦	ленного по кирпичной   	¦	         	¦	       	¦	                 
	¦	        	¦	      	¦

	¦	       	¦	или бетонной стене     	¦	         	¦	       	¦	                 
	¦	        	¦	      	¦

	¦	VI-9   	¦	Смена стенного или     	¦	-"-      	¦	0,51   	¦	Стенной или пото-
	¦	-"-     	¦	1     	¦

	¦	       	¦	потолочного патрона    	¦	         	¦	       	¦	лочный патрон или
	¦	        	¦	      	¦

	¦	       	¦	или бра на 1 лампу     	¦	         	¦	       	¦	бра              
	¦	        	¦	      	¦

	¦	VI-10  	¦	Смена шнурового        	¦	-"-      	¦	0,43   	¦	Шнуровой подвес  
	¦	-"-     	¦	1     	¦

	¦	       	¦	подвеса                	¦	         	¦	       	¦	                 

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	¦	        	¦	      	¦

	¦	VI-11  	¦	Смена подвеса со стек- 	¦	-"-      	¦	0,62   	¦	Подвес со стеклом
	¦	-"-     	¦	1     	¦

	¦	       	¦	лом шар или "Люцетта"  	¦	         	¦	       	¦	шар или "Люцетта"
	¦	        	¦	      	¦

	¦	VI-12  	¦	Смена домового фонаря  	¦	к-т      	¦	1,22   	¦	Домовой фонарь   
	¦	к-т     	¦	1     	¦

	¦	VI-13  	¦	Снятие и установка     	¦	шт.      	¦	2,51   	¦	                 
	¦	        	¦	      	¦

	¦	       	¦	трехфазного счетчика   	¦	         	¦	       	¦	                 
	¦	        	¦	      	¦

	¦	       	¦	на готовом основании   	¦	         	¦	       	¦	                 
	¦	        	¦	      	¦

	¦	VI-14  	¦	То же, однофазного     	¦	-"-      	¦	1,82   	¦	                 
	¦	        	¦	      	¦

	¦	       	¦	счетчика               	¦	         	¦	       	¦	                 
	¦	        	¦	      	¦

	¦	VI-15  	¦	Ремонт групповых       	¦	шт.      	¦	2,7    	¦	Предохранители   
	¦	шт.     	¦	2     	¦

	¦	       	¦	щитков со сменой       	¦	         	¦	       	¦	Пробки           
	¦	-"-     	¦	2     	¦

	¦	       	¦	предохранителей        	¦	         	¦	       	¦	Винты контактные 
	¦	-"-     	¦	2     	¦

	¦	VI-16  	¦	Ликвидация аварии и    	¦	место    	¦	1,06   	¦	                 
	¦	        	¦	      	¦

	¦	       	¦	групповой сети электро-	¦	         	¦	       	¦	                 
	¦	        	¦	      	¦

	¦	       	¦	освещения с выявлением 	¦	         	¦	       	¦	                 
	¦	        	¦	      	¦

	¦	       	¦	и устранением причины  	¦	         	¦	       	¦	                 
	¦	        	¦	      	¦

	¦	       	¦	аварии                 	¦	         	¦	       	¦	                 
	¦	        	¦	      	¦

	¦	VI-17  	¦	То же, в магистральной 	¦	-"-      	¦	1,46   	¦	                 
	¦	        	¦	      	¦

	¦	       	¦	сети                   	¦	         	¦	       	¦	                 
	¦	        	¦	      	¦

	¦	VI-18  	¦	Смена плавких вставок  	¦	шт.      	¦	0,44   	¦	Плавкие вставки  
	¦	шт.     	¦	1     	¦

	¦	       	¦	до 200 амп.            	¦	         	¦	       	¦	                 

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	¦	        	¦	      	¦

	¦	VI-19  	¦	Смена электролампочек в	¦	-"-      	¦	0,24   	¦	Лампы накаливания
	¦	-"-     	¦	1     	¦

	¦	       	¦	установленных арматурах	¦	         	¦	       	¦	                 
	¦	        	¦	      	¦

	¦	       	¦	с припайкой            	¦	         	¦	       	¦	                 
	¦	        	¦	      	¦

	¦	VI-20  	¦	Смена алюминиевого     	¦	10 м     	¦	       	¦	Провод АПР-500   
	¦	м       	¦	10,2  	¦

	¦	       	¦	провода АПР-500 по     	¦	провода  	¦	       	¦	                 
	¦	        	¦	      	¦

	¦	       	¦	установленным опорам   	¦	         	¦	       	¦	                 
	¦	        	¦	      	¦

	¦	       	¦	воздушной линии:       	¦	         	¦	       	¦	                 
	¦	        	¦	      	¦

	¦	       	¦	а) сечением 16 мм      	¦	         	¦	0,32   	¦	                 
	¦	        	¦	      	¦

	¦	       	¦	б) сечением 25 мм      	¦	         	¦	0,42   	¦	                 
	¦	        	¦	      	¦

	¦	VI-21  	¦	Смена стальных проводов	¦	-"-      	¦	0,34   	¦	Провод стальной  
	¦	-"-     	¦	10,3  	¦

	¦	       	¦	по установленным опорам	¦	         	¦	       	¦	типа ПС          
	¦	        	¦	      	¦

	¦	       	¦	воздушной линии        	¦	         	¦	       	¦	                 
	¦	        	¦	      	¦

	¦	       	¦	                       	¦	         	¦	       	¦	                 
	¦	        	¦	      	¦

	¦	       	¦	VII. Разные работы     	¦	         	¦	       	¦	                 
	¦	        	¦	      	¦

	¦	       	¦	                       	¦	         	¦	       	¦	                 
	¦	        	¦	      	¦

	¦	VII-1  	¦	Выемка грунта из подва-	¦	куб. м   	¦	7,17   	¦	                 
	¦	        	¦	      	¦

	¦	       	¦	лов при изменении      	¦	         	¦	       	¦	                 
	¦	        	¦	      	¦

	¦	       	¦	уровня пола            	¦	         	¦	       	¦	                 
	¦	        	¦	      	¦

	¦	VII-2  	¦	Подсыпка грунта II     	¦	-"-      	¦	5,28   	¦	                 
	¦	        	¦	      	¦

	¦	       	¦	категории при изменении	¦	         	¦	       	¦	                 

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	¦	        	¦	      	¦

	¦	       	¦	уровня пола            	¦	         	¦	       	¦	                 
	¦	        	¦	      	¦

	¦	VII-3  	¦	Устройство шлакового   	¦	кв. м    	¦	0,30   	¦	Шлак             
	¦	куб. м  	¦	0,13  	¦

	¦	       	¦	основания              	¦	         	¦	       	¦	                 
	¦	        	¦	      	¦

	¦	VII-4  	¦	Устройство гидроизоля- 	¦	-"-      	¦	1,81   	¦	Щебень кирпичный 
	¦	-"-     	¦	0,09  	¦

	¦	       	¦	ции полов в подвале    	¦	         	¦	       	¦	Бетон            
	¦	-"-     	¦	0,09  	¦

	¦	       	¦	                       	¦	         	¦	       	¦	Мастика битумная 
	¦	кг      	¦	13,0  	¦

	¦	       	¦	                       	¦	         	¦	       	¦	Раствор цементный
	¦	куб. м  	¦	0,056 	¦

	¦	       	¦	                       	¦	         	¦	       	¦	Дрова            
	¦	-"-     	¦	0,006 	¦

	¦	VII-5  	¦	Водоотлив из подвала   	¦	куб. м   	¦	0,10   	¦	                 
	¦	        	¦	      	¦

	¦	       	¦	механическим насосом   	¦	         	¦	       	¦	                 
	¦	        	¦	      	¦

	¦	VII-6  	¦	То же, ведрами         	¦	-"-      	¦	1,67   	¦	                 
	¦	        	¦	      	¦

	¦	VII-7  	¦	Очистка помещения      	¦	т        	¦	1,73   	¦	                 
	¦	        	¦	      	¦

	¦	       	¦	(подвалов от мусора)   	¦	         	¦	       	¦	                 
	¦	        	¦	      	¦

	¦	VII-8  	¦	Устройство песочницы с 	¦	шт.      	¦	4,23   	¦	Доски            
	¦	куб. м  	¦	0,134 	¦

	¦	       	¦	острожкой досок, уста- 	¦	         	¦	       	¦	Гвозди           
	¦	кг      	¦	0,75  	¦

	¦	       	¦	новкой на место и      	¦	         	¦	       	¦	Краска тертая    
	¦	-"-     	¦	0,64  	¦

	¦	       	¦	окраской масляной      	¦	         	¦	       	¦	Олифа            
	¦	-"-     	¦	0,68  	¦

	¦	       	¦	краской                	¦	         	¦	       	¦	                 
	¦	        	¦	      	¦

	¦	VII-9  	¦	Устройство качелей с   	¦	-"-      	¦	25,6   	¦	Бревна           
	¦	куб. м  	¦	0,9   	¦

	¦	       	¦	заготовкой всех элемен-	¦	         	¦	       	¦	Доски            

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	¦	-"-     	¦	0,01  	¦

	¦	       	¦	тов, с выполнением зем-	¦	         	¦	       	¦	Гвозди           
	¦	кг      	¦	0,05  	¦

	¦	       	¦	ляных работ и окраской 	¦	         	¦	       	¦	Краска тертая    
	¦	-"-     	¦	1,44  	¦

	¦	       	¦	масляной краской       	¦	         	¦	       	¦	Олифа            
	¦	-"-     	¦	1,5   	¦

	¦	       	¦	                       	¦	         	¦	       	¦	Смола            
	¦	-"-     	¦	2,2   	¦

	¦	       	¦	                       	¦	         	¦	       	¦	Скобы            
	¦	шт.     	¦	4     	¦

	¦	VII-10 	¦	Устройство гриба для   	¦	-"-      	¦	10,53  	¦	Бревна           
	¦	куб. м  	¦	0,09  	¦

	¦	       	¦	детской площадки с     	¦	         	¦	       	¦	Бруски           
	¦	-"-     	¦	0,05  	¦

	¦	       	¦	покрытием кровли       	¦	         	¦	       	¦	Гвозди           
	¦	кг      	¦	0,92  	¦

	¦	       	¦	сталью и раскраской    	¦	         	¦	       	¦	Галтели          
	¦	п.м     	¦	5,0   	¦

	¦	       	¦	гриба масляной краской 	¦	         	¦	       	¦	Сталь кровельная 
	¦	кг      	¦	1,36  	¦

	¦	       	¦	                       	¦	         	¦	       	¦	Белила           
	¦	-"-     	¦	0,33  	¦

	¦	       	¦	                       	¦	         	¦	       	¦	Краска тертая    
	¦	-"-     	¦	0,46  	¦

	¦	       	¦	                       	¦	         	¦	       	¦	Олифа            
	¦	-"-     	¦	0,54  	¦

	¦	VII-11 	¦	Устройство садовой     	¦	-"-      	¦	5,66   	¦	Бревна           
	¦	куб. м  	¦	0,08  	¦

	¦	       	¦	скамейки со спинкой и  	¦	         	¦	       	¦	Доски            
	¦	-"-     	¦	0,055 	¦

	¦	       	¦	острожкой, с выполнени-	¦	         	¦	       	¦	Гвозди           
	¦	кг      	¦	0,3   	¦

	¦	       	¦	ем земляных работ и    	¦	         	¦	       	¦	Краска тертая    
	¦	-"-     	¦	0,8   	¦

	¦	       	¦	окраской масляной      	¦	         	¦	       	¦	Олифа            
	¦	-"-     	¦	0,243 	¦

	¦	       	¦	краской                	¦	         	¦	       	¦	Смола            
	¦	-"-     	¦	0,24  	¦

	¦	VII-12 	¦	Устройство садового    	¦	стол     	¦	7,66   	¦	Бревна           

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	¦	куб. м  	¦	0,047 	¦

	¦	       	¦	стола на одной опоре с 	¦	         	¦	       	¦	Доски            
	¦	-"-     	¦	0,153 	¦

	¦	       	¦	окраской масляной      	¦	         	¦	       	¦	Гвозди           
	¦	кг      	¦	0,6   	¦

	¦	       	¦	краской                	¦	         	¦	       	¦	Смола            
	¦	-"-     	¦	1,0   	¦

	¦	       	¦	                       	¦	         	¦	       	¦	Белила           
	¦	-"-     	¦	0,92  	¦

	¦	       	¦	                       	¦	         	¦	       	¦	Краска тертая    
	¦	-"-     	¦	0,16  	¦

	¦	       	¦	                       	¦	         	¦	       	¦	Олифа            
	¦	-"-     	¦	0,08  	¦

	¦	VII-13 	¦	Установка столбов для  	¦	шт.      	¦	2,43   	¦	Бревна           
	¦	куб. м  	¦	0,16  	¦

	¦	       	¦	сушки белья без острож-	¦	         	¦	       	¦	Смола            
	¦	кг      	¦	0,4   	¦

	¦	       	¦	ки с выполнением земля-	¦	         	¦	       	¦	                 
	¦	        	¦	      	¦

	¦	       	¦	ных работ              	¦	         	¦	       	¦	                 
	¦	        	¦	      	¦

	¦	VII-14 	¦	Устройство уборной с   	¦	уборная  	¦	130,33 	¦	Бревна           
	¦	куб. м  	¦	0,565 	¦

	¦	       	¦	деревянным выгребом на 	¦	         	¦	       	¦	Доски            
	¦	-"-     	¦	0,683 	¦

	¦	       	¦	одно очко              	¦	         	¦	       	¦	Бруски           
	¦	-"-     	¦	0,008 	¦

	¦	       	¦	                       	¦	         	¦	       	¦	Пластины         
	¦	-"-     	¦	1,9   	¦

	¦	       	¦	                       	¦	         	¦	       	¦	Гвозди           
	¦	кг      	¦	3,6   	¦

	¦	       	¦	                       	¦	         	¦	       	¦	Глина            
	¦	куб. м  	¦	5,44  	¦

	¦	       	¦	                       	¦	         	¦	       	¦	Песок            
	¦	-"-     	¦	0,1   	¦

	¦	       	¦	                       	¦	         	¦	       	¦	Смола            
	¦	кг      	¦	22,6  	¦

	¦	       	¦	                       	¦	         	¦	       	¦	Толь кровельный  
	¦	кв. м   	¦	3,31  	¦

	¦	       	¦	                       	¦	         	¦	       	¦	Переплеты глухие 

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	¦	-"-     	¦	0,6   	¦

	¦	       	¦	                       	¦	         	¦	       	¦	Приборы дверные с
	¦	к-т     	¦	1     	¦

	¦	       	¦	                       	¦	         	¦	       	¦	задвижкой        
	¦	        	¦	      	¦

	¦	       	¦	                       	¦	         	¦	       	¦	Стекло оконное   
	¦	кв. м   	¦	0,5   	¦

	¦	VII-15 	¦	То же, на два очка     	¦	-"-      	¦	171,86 	¦	Бревна           
	¦	куб. м  	¦	0,8   	¦

	¦	       	¦	                       	¦	         	¦	       	¦	Доски            
	¦	-"-     	¦	1,08  	¦

	¦	       	¦	                       	¦	         	¦	       	¦	Бруски           
	¦	-"-     	¦	0,015 	¦

	¦	       	¦	                       	¦	         	¦	       	¦	Пластины         
	¦	-"-     	¦	2,86  	¦

	¦	       	¦	                       	¦	         	¦	       	¦	Гвозди           
	¦	кг      	¦	4,94  	¦

	¦	       	¦	                       	¦	         	¦	       	¦	Глина            
	¦	куб. м  	¦	6,72  	¦

	¦	       	¦	                       	¦	         	¦	       	¦	Песок            
	¦	-"-     	¦	0,2   	¦

	¦	       	¦	                       	¦	         	¦	       	¦	Смола            
	¦	кг      	¦	36,2  	¦

	¦	       	¦	                       	¦	         	¦	       	¦	Толь кровельный  
	¦	кв. м   	¦	6,62  	¦

	¦	       	¦	                       	¦	         	¦	       	¦	Переплеты глухие 
	¦	-"-     	¦	0,6   	¦

	¦	       	¦	                       	¦	         	¦	       	¦	Приборы дверные с
	¦	к-т     	¦	      	¦

	¦	       	¦	                       	¦	         	¦	       	¦	задвижкой        
	¦	        	¦	1     	¦

	¦	       	¦	                       	¦	         	¦	       	¦	Стекло оконное   
	¦	кв. м   	¦	0,5   	¦

	¦	VII-16 	¦	Устройство уборной с   	¦	уборная  	¦	216,3  	¦	Бревна           
	¦	куб. м  	¦	1,04  	¦

	¦	       	¦	деревянным выгребом на 	¦	         	¦	       	¦	Доски            
	¦	-"-     	¦	1,313 	¦

	¦	       	¦	три очка               	¦	         	¦	       	¦	Бруски           
	¦	-"-     	¦	0,022 	¦

	¦	       	¦	                       	¦	         	¦	       	¦	Пластины         

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	¦	-"-     	¦	3,81  	¦

	¦	       	¦	                       	¦	         	¦	       	¦	Гвозди           
	¦	кг      	¦	6,68  	¦

	¦	       	¦	                       	¦	         	¦	       	¦	Глина            
	¦	куб. м  	¦	9,41  	¦

	¦	       	¦	                       	¦	         	¦	       	¦	Песок            
	¦	-"-     	¦	0,3   	¦

	¦	       	¦	                       	¦	         	¦	       	¦	Смола            
	¦	кг      	¦	44,2  	¦

	¦	       	¦	                       	¦	         	¦	       	¦	Толь кровельный  
	¦	кв. м   	¦	9,93  	¦

	¦	       	¦	                       	¦	         	¦	       	¦	Переплеты глухие 
	¦	-"-     	¦	0,6   	¦

	¦	       	¦	                       	¦	         	¦	       	¦	Приборы дверные с
	¦	к-т     	¦	1     	¦

	¦	       	¦	                       	¦	         	¦	       	¦	задвижкой        
	¦	        	¦	      	¦

	¦	       	¦	                       	¦	         	¦	       	¦	Стекло оконное   
	¦	кв. м   	¦	0,5   	¦

	¦	VII-17 	¦	Устройство помойных ям 	¦	яма      	¦	61,58  	¦	Бревна           
	¦	куб. м  	¦	0,52  	¦

	¦	       	¦	емкостью 3,5 куб. м    	¦	         	¦	       	¦	Доски            
	¦	-"-     	¦	0,56  	¦

	¦	       	¦	                       	¦	         	¦	       	¦	Пластины         
	¦	-"-     	¦	1,71  	¦

	¦	       	¦	                       	¦	         	¦	       	¦	Бруски           
	¦	-"-     	¦	0,07  	¦

	¦	       	¦	                       	¦	         	¦	       	¦	Гвозди           
	¦	кг      	¦	1,74  	¦

	¦	       	¦	                       	¦	         	¦	       	¦	Глина            
	¦	куб. м  	¦	2,97  	¦

	¦	       	¦	                       	¦	         	¦	       	¦	Щебень булыжный  
	¦	-"-     	¦	0,9   	¦

	¦	       	¦	                       	¦	         	¦	       	¦	Смола            
	¦	кг      	¦	13,0  	¦

	¦	       	¦	                       	¦	         	¦	       	¦	Петли оконные    
	¦	пара    	¦	1     	¦

	¦	       	¦	                       	¦	         	¦	       	¦	Скобы            
	¦	шт.     	¦	2     	¦

	¦	VII-18 	¦	То же, емкостью        	¦	яма      	¦	158,25 	¦	Бревна           

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	¦	куб. м  	¦	1,1   	¦

	¦	       	¦	6 куб. м               	¦	         	¦	       	¦	Доски            
	¦	-"-     	¦	0,69  	¦

	¦	       	¦	                       	¦	         	¦	       	¦	Пластины         
	¦	-"-     	¦	3,98  	¦

	¦	       	¦	                       	¦	         	¦	       	¦	Бруски           
	¦	-"-     	¦	0,065 	¦

	¦	       	¦	                       	¦	         	¦	       	¦	Гвозди           
	¦	кг      	¦	1,46  	¦

	¦	       	¦	                       	¦	         	¦	       	¦	Глина            
	¦	куб. м  	¦	7,46  	¦

	¦	       	¦	                       	¦	         	¦	       	¦	Щебень булыжный  
	¦	-"-     	¦	1,17  	¦

	¦	       	¦	                       	¦	         	¦	       	¦	Смола            
	¦	кг      	¦	25,0  	¦

	¦	       	¦	                       	¦	         	¦	       	¦	Петли оконные    
	¦	пара    	¦	1     	¦

	¦	       	¦	                       	¦	         	¦	       	¦	Скобы            
	¦	шт.     	¦	2     	¦

	¦	VII-19 	¦	Устройство мусорного   	¦	шт.      	¦	2,86   	¦	Доски            
	¦	куб. м  	¦	0,33  	¦

	¦	       	¦	ящика размером 2,5 х 1 	¦	         	¦	       	¦	Гвозди           
	¦	кг      	¦	0,45  	¦

	¦	       	¦	х 1 м с осмолкой внутри	¦	         	¦	       	¦	Смола            
	¦	-"-     	¦	2,25  	¦

	¦	       	¦	и окраской масляной    	¦	         	¦	       	¦	Петли оконные    
	¦	пара    	¦	1     	¦

	¦	       	¦	краской снаружи        	¦	         	¦	       	¦	Скобы            
	¦	шт.     	¦	2     	¦

	¦	       	¦	                       	¦	         	¦	       	¦	Краска тертая    
	¦	кг      	¦	1,21  	¦

	¦	       	¦	                       	¦	         	¦	       	¦	Олифа            
	¦	-"-     	¦	1,27  	¦

	¦	VII-20 	¦	Устройство штакетного  	¦	кв. м    	¦	2,67   	¦	Лес круглый      
	¦	куб. м  	¦	0,0134	¦

	¦	       	¦	забора из брусков с    	¦	         	¦	       	¦	Доски            
	¦	-"-     	¦	0,0378	¦

	¦	       	¦	земляными работами и с 	¦	         	¦	       	¦	Смола            
	¦	кг      	¦	0,384 	¦

	¦	       	¦	окраской масляной      	¦	         	¦	       	¦	Гвозди           

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	¦	-"-     	¦	0,173 	¦

	¦	       	¦	краской                	¦	         	¦	       	¦	Олифа            
	¦	-"-     	¦	0,068 	¦

	¦	       	¦	                       	¦	         	¦	       	¦	Белила тертые    
	¦	-"-     	¦	0,264 	¦

	¦	       	¦	                       	¦	         	¦	       	¦	Краска тертая    
	¦	-"-     	¦	0,046 	¦

	¦	VII-21 	¦	Ремонт деревянного     	¦	м        	¦	3,75   	¦	Бревна           
	¦	куб. м  	¦	0,01  	¦

	¦	       	¦	штакетного забора с    	¦	         	¦	       	¦	Доски            
	¦	-"-     	¦	0,027 	¦

	¦	       	¦	добавлением нового     	¦	         	¦	       	¦	Гвозди           
	¦	кг      	¦	0,18  	¦

	¦	       	¦	материала до 25%       	¦	         	¦	       	¦	Смола            
	¦	-"-     	¦	0,2   	¦

	¦	VII-22 	¦	То же, деревянного     	¦	м        	¦	2,76   	¦	Бревна           
	¦	куб. м  	¦	0,008 	¦

	¦	       	¦	сплошного забора       	¦	         	¦	       	¦	Доски            
	¦	-"-     	¦	0,017 	¦

	¦	       	¦	                       	¦	         	¦	       	¦	Гвозди           
	¦	кг      	¦	0,13  	¦

	¦	       	¦	                       	¦	         	¦	       	¦	Смола            
	¦	-"-     	¦	0,16  	¦

	¦	VII-23 	¦	Средний ремонт деревян-	¦	ворота   	¦	28,21  	¦	Доски            
	¦	куб. м  	¦	0,06  	¦

	¦	       	¦	ных решетчатых ворот   	¦	         	¦	       	¦	Бруски           
	¦	-"-     	¦	0,04  	¦

	¦	       	¦	                       	¦	         	¦	       	¦	Гвозди           
	¦	кг      	¦	1,0   	¦

	¦	VII-24 	¦	То же, сплошных        	¦	-"-      	¦	18,05  	¦	Доски            
	¦	куб. м  	¦	0,07  	¦

	¦	       	¦	деревянных ворот       	¦	         	¦	       	¦	Бруски           
	¦	кг      	¦	0,06  	¦

	¦	       	¦	                       	¦	         	¦	       	¦	Гвозди           
	¦	-"-     	¦	1,4   	¦

	¦	VII-25 	¦	То же, деревянные      	¦	калитка  	¦	8,52   	¦	Доски            
	¦	куб. м  	¦	0,03  	¦

	¦	       	¦	калитки                	¦	         	¦	       	¦	                 
	¦	        	¦	      	¦

	¦	VII-26 	¦	Изготовление и насадка 	¦	         	¦	       	¦	                 

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	¦	        	¦	      	¦

	¦	       	¦	ручек для метел:       	¦	         	¦	       	¦	                 
	¦	        	¦	      	¦

	¦	       	¦	а) изготовление        	¦	10 шт.   	¦	1,54   	¦	                 
	¦	        	¦	      	¦

	¦	       	¦	б) насадка             	¦	-"-      	¦	0,62   	¦	                 
	¦	        	¦	      	¦

	¦	VII-27 	¦	То же, для металличес- 	¦	         	¦	       	¦	                 
	¦	        	¦	      	¦

	¦	       	¦	ких совков:            	¦	         	¦	       	¦	                 
	¦	        	¦	      	¦

	¦	       	¦	а) изготовление        	¦	-"-      	¦	1,27   	¦	                 
	¦	        	¦	      	¦

	¦	       	¦	б) насадка             	¦	-"-      	¦	0,62   	¦	                 
	¦	        	¦	      	¦

	¦	VII-28 	¦	То же, для лопат и     	¦	         	¦	       	¦	                 
	¦	        	¦	      	¦

	¦	       	¦	кувалд:                	¦	         	¦	       	¦	                 
	¦	        	¦	      	¦

	¦	       	¦	а) изготовление        	¦	-"-      	¦	1,93   	¦	                 
	¦	        	¦	      	¦

	¦	       	¦	б) насадка             	¦	-"-      	¦	1,16   	¦	                 
	¦	        	¦	      	¦

	¦	VII-29 	¦	Изготовление соколов   	¦	шт.      	¦	0,79   	¦	                 
	¦	        	¦	      	¦

	¦	       	¦	штукатурных            	¦	         	¦	       	¦	                 
	¦	        	¦	      	¦

	¦	VII-30 	¦	Изготовление полутерок 	¦	-"-      	¦	0,46   	¦	                 
	¦	        	¦	      	¦

	¦	       	¦	и правил длиной до 2,5 	¦	         	¦	       	¦	                 
	¦	        	¦	      	¦

	¦	       	¦	м (с фуговкой)         	¦	         	¦	       	¦	                 
	¦	        	¦	      	¦

	¦	VII-31 	¦	Установка и передвижка 	¦	метр по  	¦	1,07   	¦	                 
	¦	        	¦	      	¦

	¦	       	¦	подвесных люлек по     	¦	длине    	¦	       	¦	                 
	¦	        	¦	      	¦

	¦	       	¦	длине фасада с перед-  	¦	фасада   	¦	       	¦	                 
	¦	        	¦	      	¦

	¦	       	¦	вижкой лебедок, с      	¦	         	¦	       	¦	                 

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	¦	        	¦	      	¦

	¦	       	¦	креплением за стропила 	¦	         	¦	       	¦	                 
	¦	        	¦	      	¦

	¦	VII-32 	¦	То же, с креплением    	¦	-"-      	¦	0,72   	¦	                 
	¦	        	¦	      	¦

	¦	       	¦	через слуховые окна    	¦	         	¦	       	¦	                 
	¦	        	¦	      	¦

	¦	VII-33 	¦	Изготовление и сборка  	¦	шт.      	¦	0,78   	¦	Доски            
	¦	куб. м  	¦	0,144 	¦

	¦	       	¦	из досок козел длиною  	¦	         	¦	       	¦	Гвозди           
	¦	кг      	¦	0,3   	¦

	¦	       	¦	до 2 м при длине ног   	¦	         	¦	       	¦	                 
	¦	        	¦	      	¦

	¦	       	¦	до 3 м для подмостей в 	¦	         	¦	       	¦	                 
	¦	        	¦	      	¦

	¦	       	¦	помещениях с последую- 	¦	         	¦	       	¦	                 
	¦	        	¦	      	¦

	¦	       	¦	щей их разборкой и     	¦	         	¦	       	¦	                 
	¦	        	¦	      	¦

	¦	       	¦	уборкой материала с    	¦	         	¦	       	¦	                 
	¦	        	¦	      	¦

	¦	       	¦	учетом его возврата    	¦	         	¦	       	¦	                 
	¦	        	¦	      	¦

	¦	VII-34 	¦	Устройство и разборка  	¦	10 кв. м 	¦	0,45   	¦	Доски            
	¦	куб. м  	¦	0,42  	¦

	¦	       	¦	сплошных подмостей по  	¦	         	¦	       	¦	Гвозди           
	¦	кг      	¦	0,13  	¦

	¦	       	¦	готовым козлам для     	¦	         	¦	       	¦	                 
	¦	        	¦	      	¦

	¦	       	¦	работы в помещении     	¦	         	¦	       	¦	                 
	¦	        	¦	      	¦

	¦	VII-35 	¦	Установка и разборка   	¦	         	¦	       	¦	                 
	¦	        	¦	      	¦

	¦	       	¦	блока для подъема мате-	¦	         	¦	       	¦	                 
	¦	        	¦	      	¦

	¦	       	¦	риалов грузоподъем-    	¦	         	¦	       	¦	                 
	¦	        	¦	      	¦

	¦	       	¦	ностью до 1,5 т из     	¦	         	¦	       	¦	                 
	¦	        	¦	      	¦

	¦	       	¦	готовых деталей:       	¦	         	¦	       	¦	                 

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	¦	        	¦	      	¦

	¦	       	¦	а) установка блока     	¦	блок     	¦	1,21   	¦	                 
	¦	        	¦	      	¦

	¦	       	¦	б) разборка блока      	¦	-"-      	¦	0,72   	¦	                 
	¦	        	¦	      	¦

	¦	VII-36 	¦	Изготовление деревянных	¦	шт.      	¦	1,50   	¦	Доски            
	¦	куб. м  	¦	0,02  	¦

	¦	       	¦	крышек для смотровых   	¦	         	¦	       	¦	Ручки складывающи-
	¦	шт.     	¦	1     	¦

	¦	       	¦	колодцев с утеплением  	¦	         	¦	       	¦	еся (скобы)      
	¦	        	¦	      	¦

	¦	       	¦	минеральной ватой и    	¦	         	¦	       	¦	Вата минеральная 
	¦	куб. м  	¦	0,006 	¦

	¦	       	¦	установкой скобы       	¦	         	¦	       	¦	Толь             
	¦	кв. м   	¦	0,8   	¦

	L-------+-----------------------+---------+-------+------------------
	+--------+-------

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.