Утвержден и введен в действие

	Постановлением Госстроя РФ

	от 17 сентября 2002 г. N 122

	(Зарегистрирован в Минюсте РФ

	11 декабря 2002 г. N 4026)

	СВОД ПРАВИЛ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ И СТРОИТЕЛЬСТВУ
	БЕЗОПАСНОСТЬ ТРУДА В СТРОИТЕЛЬСТВЕ
	РЕШЕНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА И ПРОМЫШЛЕННОЙ
	БЕЗОПАСНОСТИ В ПРОЕКТАХ ОРГАНИЗАЦИИ
	СТРОИТЕЛЬСТВА И ПРОЕКТАХ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ

	Дата введения

	1 января 2003 года

	1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

	Настоящий свод правил определяет порядок разработки, состав и содержание
	решений, разрабатываемых с учетом требований охраны труда и промышленной
	безопасности, а также устанавливает порядок разработки и содержание решений по
	охране труда и промышленной безопасности в проектно-технологической
	документации по организации строительства и производству работ (проектах
	организации строительства и проектах производства работ).

	2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

	В настоящем документе использованы ссылки на нормативные правовые акты,
	приведенные в Приложении А.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	3. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

	3.1. Проекты организации строительства (ПОС) и проекты производства работ
	(ППР) разрабатываются с учетом требований охраны труда и промышленной
	безопасности.

	Выполнение работ в условиях действия опасных и вредных производственных
	факторов, а также строительстве, реконструкции или эксплуатации опасных
	производственных объектов осуществляется на основе решений по охране труда и
	промышленной безопасности, разрабатываемых в составе организационно-
	технологической документации (ПОС, ППР и др.).

	3.2. Руководящими и справочными материалами для учета требований, а также
	разработки решений по охране труда и промышленной безопасности в ПОС и ППР
	являются:

	требования нормативных правовых и нормативно-технических актов,
	содержащих государственные требования охраны труда и промышленной
	безопасности;

	типовые решения по безопасности труда, справочные пособия и каталоги
	технологической оснастки и средств защиты работающих;

	инструкции заводов-изготовителей машин, оборудования, оснастки,
	применяемых в процессе работ;

	ранее разработанная документация по организации строительства и производству
	работ.

	3.3. Для обеспечения безопасных условий работ при строительстве объекта до
	начала выполнения основных работ в ПОС и ППР предусматривается выполнение
	подготовительных работ.

	В частности, до начала строительства объекта должны быть выполнены
	следующие общеплощадочные подготовительные работы:

	ограждение территории стройплощадки;

	размещения санитарно-бытовых зданий, производственных и административных
	зданий и сооружений за пределами опасных зон;

	устройство временных автомобильных дорог, прокладка сетей временного
	электроснабжения, освещения, водопровода;

	освобождение строительной площадки для строительства объекта (расчистка
	территории, снос строений), планировка территории, водоотвод и перекладка

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	коммуникаций;

	устройство крановых путей, монтаж крана, устройство площадки для
	складирования строительных материалов и конструкций.

	Выполнение основных работ на объекте разрешается при условии необходимой
	подготовки строительной площадки.

	3.4. Безопасность решений при строительстве объекта в ПОС и ППР
	обеспечивается за счет выполнения следующих условий:

	сокращения объемов работ, выполняемых в условиях действия опасных и вредных
	производственных факторов за счет применения новых проектных решений,
	обеспечивающих возможность применения более безопасных методов выполнения
	работ;

	определения безопасной последовательности выполнения работ, а также
	необходимых условий для обеспечения безопасности при совмещении работ в
	пространстве и во времени;

	выбора и размещения строительных машин и средств механизации с учетом
	обеспечения безопасных условий работы;

	оснащения рабочих мест необходимой технологической оснасткой и средствами
	малой механизации;

	выбора безопасных методов и приемов выполнения работ;

	разработки решений по охране труда и промышленной безопасности при
	выполнении работ в условиях действия опасных и вредных производственных
	факторов при строительстве, реконструкции или эксплуатации опасных
	производственных объектов.

	4. ПОРЯДОК РАЗРАБОТКИ И СОДЕРЖАНИЕ РЕШЕНИЙ,
	РАЗРАБАТЫВАЕМЫХ В ПОС И ППР С УЧЕТОМ ТРЕБОВАНИЙ ОХРАНЫ
	ТРУДА И ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

	4.1. Порядок разработки и содержание решений в ПОС и ППР определяется
	строительными нормами и правилами.

	4.2. ПОС разрабатывается генеральной проектной организацией с привлечением
	специализированных проектных организаций, имеющих лицензию на данный вид
	деятельности.

	ПОС разрабатывается в составе проектной документации на полный объем

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	строительства для увязки решений по организации строительства с принятыми в
	рабочем проекте объемно-планировочными и конструктивными решениями
	проектируемых зданий и сооружений.

	4.3. На стадии разработки ПОС проводятся все необходимые согласования,
	связанные со строительством объекта.

	Принятые в ПОС решения по учету требований охраны труда и промышленной
	безопасности служат основой для определения сметной стоимости строительства и
	утверждаются заказчиком.

	4.4. Исходными данными для учета требований охраны труда и промышленной
	безопасности в ПОС являются:

	объемно-планировочные и конструктивные решения зданий и сооружений с
	разбивкой здания или сооружения на отдельные блоки (секции);

	условия возведения объекта, требующие совмещения производства работ в
	пространстве и во времени, что вызывает необходимость применения особых мер по
	защите окружающей среды или строителей;

	данные по обеспечению строительства энергетическими ресурсами, водой и т.д.;

	сведения об условиях обеспечения работников санитарно-бытовыми
	помещениями;

	особые условия строительства, связанные со строительством, реконструкцией и
	эксплуатацией опасных производственных объектов;

	имеющийся опыт возведения подобных объектов.

	4.5. Учет требований охраны труда и промышленной безопасности
	осуществляется при подготовке следующих видов документации в составе ПОС:

	а) календарном плане, в котором определяются сроки и очередность проведения
	подготовительных мероприятий и строительства объекта с выделением работ,
	выполняемых в условиях действия опасных и вредных производственных факторов
	или связанных со строительством, реконструкцией и эксплуатацией опасных
	производственных объектов;

	б) строительном генеральном плане (стройгенплане) с размещением строящихся
	зданий и сооружений, существующих и подлежащих сносу строений, существующих и
	перекладываемых коммуникаций, размещением временных зданий и сооружений,
	временных и постоянных дорог, мест для подключения временных коммуникаций,
	размещения опасных производственных объектов, расположенные вблизи
	стройплощадки объекты, требующие применения защитных мероприятий;

	в) технологических схемах, определяющих последовательность и совмещение
	работ при возведении зданий и сооружений с учетом обеспечения безопасности

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	производства работ;

	г) решениях по охране труда и промышленной безопасности при выполнении
	работ в условиях действия потенциально опасных производственных факторов и
	эксплуатации опасных производственных объектов;

	д) пояснительной записке, содержащей необходимые обоснования и расчеты для
	принятых решений.

	4.6. Для строительства особо сложных зданий и сооружений в составе ПОС
	разрабатываются с учетом требований безопасности труда рабочие чертежи на
	специальное оборудование, приспособления и оснастку, в том числе:

	специальная опалубка (несъемная, скользящая);

	крепления стенок котлованов и траншей;

	оснастка для строительства подземных сооружений способом "стена в грунте",
	прокладки подземных трубопроводов;

	защитные устройства при строительстве, реконструкции и эксплуатации опасных
	производственных объектов вблизи существующих зданий.

	4.7. При реконструкции действующих промышленных предприятий, зданий и
	сооружений дополнительно к требованиям, изложенным в пп. 4.4, 4.5, необходимо:

	определение состава работ, выполняемых в период, не связанный с остановкой
	действующего производства, и работ, связанных с частичной или полной его
	остановкой;

	определение очередности и порядка совмещенного выполнения строительных
	работ с эксплуатацией опасных производственных объектов, с указанием участков
	работ, где работы ведутся с выполнением особых мероприятий по защите строителей и
	работников действующего производства.

	4.8. ППР на строительство новых, расширение, реконструкцию и техническое
	перевооружение действующих предприятий, зданий и сооружений разрабатываются
	генеральными подрядными строительно-монтажными организациями. На отдельные
	виды общестроительных, монтажных и специальных строительных работ ППР
	разрабатывают организации, выполняющие эти работы.

	По заказу строительных организаций ППР могут разрабатываться
	специализированными организациями, имеющими лицензии на этот вид
	деятельности.

	4.9. В зависимости от сроков строительства и объемов работ по решению
	строительной организации ППР разрабатывается на строительство объекта в целом или
	отдельных его частей.

	На строительство особо сложных объектов (или их частей) ППР может
	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	разрабатываться в составе проектной документации при включении его заказчиком в
	перечень проектных работ.

	4.10. ППР утверждается руководителем организации, выполняющей работы, и
	передается на строительную площадку за 2 месяца до начала выполнения
	предусмотренных там работ.

	ППР на расширение, реконструкцию и техническое перевооружение
	действующего предприятия, здания и сооружения согласовывается с организацией
	заказчиком.

	4.11. Исходными данными для разработки решений в ППР являются:

	проект организации строительства;

	необходимая рабочая документация;

	материалы и результаты технического обследования подлежащих реконструкции
	эксплуатируемых зданий и сооружений, а также требования к выполнению
	строительных работ в условиях действующего производства;

	существующая в организации база механизации;

	особые условия строительства, связанные с возникновением зон постоянно
	действующих и потенциально действующих опасных производственных факторов.

	4.12. Учет требований безопасности труда осуществляется при подготовке в ППР
	следующих видов документации:

	а) календарном плане производства работ, в котором устанавливается
	последовательность выполнения работ, с выделением работ, связанных со
	строительством, эксплуатацией и реконструкцией опасных производственных
	объектов, а также указанием производства совмещенных работ;

	б) стройгенпланах, разрабатываемых на подготовительный и основной периоды
	строительства с расположением: ограждения стройплощадки и участков работ;
	строящихся и эксплуатируемых зданий и сооружений; месторасположения подземных
	коммуникаций; опасных зон вблизи строящихся зданий, мест строительства,
	реконструкции и эксплуатации опасных производственных объектов, мест работы
	экскаваторов и другой строительной техники; мест установки грузоподъемных кранов и
	других строительных машин, а также зоны ограничения их работы; мест размещения
	санитарно-бытовых и производственных зданий и сооружений; мест складирования
	строительных материалов и конструкций; автомобильных дорог и проходов
	работников; мест установки пожарных гидрантов, щитов с противопожарным
	инвентарем, мест курения;

	в) технологических картах (схемах) (с использованием соответствующей типовой
	документации) на выполнение отдельных видов работ, результатом которых являются
	законченные конструктивные элементы, а также части здания, сооружения,

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	содержащих план и разрез той части здания, где будут выполняться работы, а также
	схемы организации стройплощадки и рабочих мест с указанием: требований по
	подготовке места работы и выполнению предшествующих работ, обеспечивающих
	необходимый фронт и безопасные условия выполнения работ; методов и
	последовательности производства работ с разбивкой здания на захватки (ярусы),
	определением необходимых средств механизации и технологической оснастки,
	определением способов подачи и мест хранения материалов, конструкций и изделий;

	г) решения по охране труда и промышленной безопасности при выполнении
	работ в условиях действия опасных производственных факторов и эксплуатации
	опасных производственных объектов;

	д) пояснительная записка, содержащая необходимые обоснования и расчеты для
	выполнения работ.

	5. ПОРЯДОК РАЗРАБОТКИ И СОДЕРЖАНИЕ РЕШЕНИЙ ПО ОХРАНЕ ТРУДА И
	ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В ПОС И ППР

	5.1. К разработке проектных решений по охране труда и промышленной
	безопасности в ПОС и ППР необходимо привлекать специалистов, имеющих опыт
	производственной работы и прошедших обучение и проверку знаний по охране труда и
	промышленной безопасности в установленном порядке.

	Указанные лица несут установленную законом ответственность за соответствие
	разрабатываемых решений требованиям охраны труда.

	5.2. Состав и содержание основных проектных решений по охране труда и
	промышленной безопасности в ПОС и ППР определяется:

	СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие
	требования", принятый и введенный в действие Постановлением Госстроя России от
	23.07.2001 N 80, зарегистрированный Минюстом России 9 августа 2001 г. N 2862;

	СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное
	производство", принятый и введенный в действие Постановлением Госстроя России
	от 17.09.2002 N 123, зарегистрированный Минюстом России 18 октября 2002 г. N 3880;

	ПБ 10-382-00 "Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных
	кранов", утвержденные Постановлением Госгортехнадзора России от 31.12.99 N 98 (в
	государственной регистрации не нуждаются согласно Письму Минюста России от
	17.08.2000 N 6884-ЭР);

	другими нормативными правовыми актами, указанными в Приложении А.

	5.3. Решения по охране труда и промышленной безопасности могут приводиться в

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	составе документации, указанной в 5 разделе, или в виде отдельных конкретных
	решений. В качестве обоснования для разработки указанных решений рекомендуется
	приводить соответствующие нормы и правила охраны труда и промышленной
	безопасности.

	5.4. При разработке решений по охране труда необходимо выявить зоны действия
	опасных производственных факторов, связанных с технологией и условиями
	производства работ. При этом опасные зоны, связанные с применением
	грузоподъемных кранов, должны определяться в ПОС, а остальные в ППР.

	Производственные и санитарно-бытовые помещения необходимо размещать на
	стройгенплане за пределами опасных зон.

	5.5. При размещении на строительной площадке башенных кранов, когда в
	опасные зоны, расположенные вблизи строящихся зданий, а также мест перемещения
	грузов кранами, границы которых определяются согласно СНиП 12-03, попадают
	транспортные или пешеходные пути, санитарно-бытовые или производственные
	здания и сооружения, другие места временного или постоянного нахождения
	работников и других лиц на территории строительной площадки или жилые,
	общественные здания, транспортные магистрали за ее пределами, необходимо
	предусматривать решения по безопасности труда, исключающие возможность
	возникновения там опасных зон, включая:

	оснащение башенных кранов средствами для искусственного ограничения зоны их
	работы;

	применение вблизи строящегося здания защитных экранов.

	5.6. При организации рабочих мест в зонах возможного действия опасных или
	вредных производственных факторов необходимо предусматривать решения по охране
	труда, в том числе:

	размещении их вблизи перепада по высоте 1,3 м и более, вблизи строящегося
	здания, в местах перемещения краном груза, расположении по одной вертикали, в
	котлованах и траншеях, где возможно выделение вредного газа, вблизи
	электроустановок;

	выполнении работ с применением грузоподъемных кранов и транспортных
	средств в зоне ЛЭП, вблизи котлованов и траншей.

	5.7. При строительстве, реконструкции или эксплуатации опасных
	производственных объектов в ПОС и ППР предусматриваются решения по
	промышленной безопасности, в том числе при:

	производстве работ грузоподъемными кранами и подъемниками;

	производстве буровзрывных работ;

	строительстве подземных сооружений.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	5.8. При расположении рабочих мест вблизи перепада по высоте 1,3 м и более
	технологические карты должны содержать решения по предупреждению падения
	человека с высоты, которые связаны с определением конструкции и места установки
	необходимых средств коллективной защиты - защитных (страховочных или
	сигнальных) ограждений, а также средств подмащивания и лестниц для подъема на
	рабочие места.

	В связи с тем, что применяемые ограждения являются временными и
	перемещаются вместе с рабочими местами, они делаются, как правило, инвентарными.
	При их отсутствии ограждения должны изготавливаться по месту из лесоматериала или
	металла.

	В целях сокращения размеров ограждаемых участков необходимо предусматривать
	первоочередное устройство постоянных ограждающих конструкций (стен, панелей,
	ограждений балконов, лестничных маршей и площадок), а также установку лестничных
	маршей.

	В отдельных случаях, предусмотренных СНиП 12-03, работы могут выполняться с
	применением предохранительного пояса для строителей, соответствующего
	требованиям государственных стандартов и имеющего сертификат аттестации. В этом
	случае в технологической карте должны быть указаны места и способы крепления
	предохранительного пояса.

	При выборе способа крепления предохранительного пояса следует учитывать зону
	работы. В случае, если зона работы ограничена и не требует частого перемещения,
	предохранительный пояс может крепиться к элементам конструкций. В случае, если
	зона работы значительна и требует свободного перемещения работника,
	предохранительный пояс следует применять в комплекте со страховочным
	устройством.

	5.9. Основными критериями, определяющими выбор необходимого типа средства
	подмащивания, классификация и общие технические требования которых определены
	государственными стандартами, являются месторасположение зоны работ,
	трудоемкость работ, а также максимальная нагрузка от работников, материалов,
	инструмента.

	В зависимости от размеров зоны работы может возникнуть необходимость
	перемещения работающих по горизонтали, вертикали или по горизонтали и вертикали.
	В первом случае следует применять переставные (с массой до 15 кг) или передвижные
	подмости. Во втором случае подъемные подмости - люльки. При необходимости
	перемещения зоны работы по вертикали и горизонтали в случае значительной
	трудоемкости работ необходимо применять стоечные леса, а при незначительной
	трудоемкости - подъемники.

	При необходимости расположения на подмостях материалов и оборудования
	необходимо указать максимально допустимую нагрузку и характер ее распределения.

	5.10. Для защиты людей от падающих предметов небольшой массы применяются
	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	защитные настилы или козырьки.

	В соответствии с требованиями СНиП 12-03 и других строительных норм и
	правил защитные козырьки должны устраиваться при возведении кирпичных зданий, а
	защитные настилы - при выполнении работ по одной вертикали.

	5.11. В целях предупреждения падения перемещаемых краном строительных
	конструкций и материалов, а также их падения в процессе монтажа или при
	складировании в технологических картах следует указать:

	средства контейнеризации или тара для применения штучных и сыпучих
	материалов, а также бетона или раствора, предупреждающие падение груза при его
	перемещении и обеспечивающие удобства подачи к месту работ;

	способы строповки и грузозахватные приспособления (грузовые стропы, траверсы
	и монтажные захваты), обеспечивающие подачу элементов конструкций при монтаже и
	складировании в положении, близком к проектному;

	порядок и способы складирования конструкций и оборудования;

	способы временного и окончательного закрепления конструкций при монтаже.

	5.12. При разработке грунта и производстве работ в котлованах и траншеях
	необходимо предусматривать меры по предотвращению обрушения грунта. Для этого,
	исходя из требований строительных норм и правил, необходимо в ППР с учетом
	геологических и гидрогеологических условий участка работ и нагрузки от строительных
	машин и складируемых материалов определить крутизну откосов выемки или указать
	проект крепления стенок траншеи.

	В ППР необходимо определить места установки ограждений выемок, переходных
	мостиков и лестничных маршей для прохода людей через выемку и спуска в котлован, а
	также предусматривать меры безопасности при разработке грунта в местах пересечения
	траншей подземными коммуникациями.

	5.13. При выполнении отделочных или антикоррозионных работ в закрытых
	помещениях с применением материалов с вредными или пожароопасными свойствами
	в соответствии с требованиями СНиП 12-03 и других строительных норм и правил
	необходимо в ППР предусматривать применение естественной или искусственной
	вентиляции, а также применение работниками средств индивидуальной защиты.

	В местах применения окрасочных составов, образующих взрывоопасные пары,
	следует предусматривать решения, соответствующие ППБ-01.

	5.14. В целях обеспечения электробезопасности в соответствии с требованиями
	СНиП 12-03 в ППР необходимо предусматривать:

	указания по устройству временных электроустановок, выбору трасс и
	определению напряжения временных силовых и осветительных электросетей,
	месторасположению вводно-распределительных систем и приборов;

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	указания по заземлению металлических частей крановых путей и
	металлоконструкций грузоподъемных кранов, другого оборудования с
	электроприводом, металлических строительных лесов, металлических ограждений
	токоведущих частей;

	дополнительные меры безопасности при производстве работ в действующих
	установках.

	5.15. При выполнении работ с применением мобильных строительных машин и
	транспортных средств исходя из требований СНиП 12-03 необходимо
	предусматривать:

	определение на стройгенплане путей перемещения и мест установки мобильных
	машин на территории стройплощадки и местонахождения создаваемых ими опасных
	зон;

	места установки машин и транспортных средств вблизи выемок и траншей,
	которые должны определяться с учетом обеспечения устойчивости откосов и
	крепления выемок;

	определение специальных мер безопасности при выполнении работ с
	применением машин и транспортных средств в охранной зоне линии электропередачи.

	5.16. При производстве работ грузоподъемными кранами или подъемниками
	исходя из требований ПБ 10-382 и других правил безопасности в ППР должны быть
	заложены решения по выполнению следующих требований охраны труда и
	промышленной безопасности:

	устанавливаемые краны или подъемники должны соответствовать условиям
	строительно-монтажных работ по грузоподъемности, высоте подъема и вылету;

	при установке кранов или подъемников необходимо соблюдать безопасные
	расстояния от сетей и воздушных линий электропередачи, мест движения городского
	транспорта и пешеходов, а также безопасные расстояния приближения к строениям и
	местам складирования строительных конструкций, деталей и материалов;

	обеспечение безопасной совместной работы нескольких кранов на одном пути, на
	параллельных путях;

	указаны подъездные пути и места складирования грузов, порядок и габариты их
	складирования;

	мероприятия по безопасному производству работ с учетом конкретных условий на
	участке, где установлен кран или подъемник;

	соответствующий требованиям государственных стандартов проект кранового
	пути при перемещении крана по крановым путям.

	5.17. При выполнении горных работ и строительстве подземных сооружений

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	исходя из требований правил безопасности в ППР должны быть следующие решения
	по выполнению требований промышленной безопасности:

	определены способы разработки породы, а также временного и постоянного
	крепления подземных выработок, с учетом геологических и гидрогеологических
	условий участка работ;

	выбраны средства механизации для разработки, погрузки и транспортирования
	породы, средства для доставки материалов и конструкций, средства механизации для
	сооружения постоянной крепи;

	определены схемы и составлены проекты вентиляции подземных выработок;

	определены схемы и составлены проекты откачки воды;

	разработаны мероприятия по предупреждению аварий;

	разработаны мероприятия по обеспечению целостности и сохранности
	подземных и надземных коммуникаций и сооружений.

	Приложение А

	ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ, НА КОТОРЫЕ ИМЕЮТСЯ
	ССЫЛКИ В НАСТОЯЩЕМ СВОДЕ ПРАВИЛ

	1. СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие
	требования". Принят и введен в действие Постановлением Госстроя России от
	23.07.2001 N 80. Зарегистрирован Минюстом России 9 августа 2001 г. N 2862.

	2. СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное
	производство". Принят и введен в действие Постановлением Госстроя России от
	17.09.2002 N 123. Зарегистрирован Минюстом России 18 октября 2002 г. N 3880.

	3. ПБ 10-382-00 "Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных
	кранов. Утверждены Постановлением Госгортехнадзора России от 31.12.99 N 98. Не
	нуждаются в государственной регистрации согласно Письму Минюста России от

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	17.08.2000 N 6884-ЭР.

	4. ПБ 13-407-01 "Единые правила безопасности при взрывных работах".
	Утверждены Постановлением Госгортехнадзора России от 30.01.2001 N 3.
	Зарегистрированы Минюстом России 07.06.2001 N 2743.

	5. ПБ 03-428-02 "Правила безопасности при строительстве подземных
	сооружений". Утверждены Постановлением Госгортехнадзора России от 01.11.2001 N
	49. В государственной регистрации не нуждаются согласно Письму Минюста России от
	24.12.2001 N 12467-ЮД.

	6. ППБ 01-93 Правила пожарной безопасности в Российской Федерации.
	Утверждены МВД России 14 декабря 1993 г. с изм. и доп. Зарегистрированы
	Минюстом России 27.12.1993 N 445.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.